Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-4051/2022

30 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  30 мая 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ИНТРА» (адрес: 195027, 

<

...>, лит. Т, пом. 18Н, оф. 28, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «РемСтройМастер» (адрес: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Энергетиков, стр. 20, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании денежных средств, 

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 17.12.2021), 

- от ответчика: не явился (извещен), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ИНТРА» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМастер» 5 988 891 руб. 50 коп. основного долга по договору от 09.12.2020 № 27/20, 1 119 629 руб. 28 коп. неустойки за период с 16.07.2021 по 16.12.2021, а также неустойки из расчета 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки с 17.12.2021 по дату фактического исполнения основного обязательства (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 

Ответчик направил заявление о признании исковых требований в полном объеме. 

Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие в порядке статьи 156 АПК РФ. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме с учетом уточнения. 

Суд установил, что между обществом с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ИНТРА» (далее – Исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «РемСтройМастер» (далее – Заказчик) заключен договор от 09.12.2020 № 27/20 (далее – Договор). 

Исполнитель обязался оказать Заказчику услуги (выполнить работы), а Заказчик обязался принять услуги и оплатить их на условиях, в порядке и сроки, установленные сторонами в договоре (пункт 1.1 Договора). Перечень, объем и стоимость услуг определяются Приложениями к Договору (пункт 1.2 Договора). 

Согласно Приложению №4 к Договору «Соглашение №1 о перечне, сроках и стоимости услуг (выполненных работ)» (далее - Соглашение №1) Исполнитель обязался выполнить работы по врезке тройника в существующий газопровод DN1400 с УКПГ-16 Песцового месторождения ООО «Газпром добыча Уренгой», а Заказчик оплатить данные работы. Стоимость работ 12 400 274, 38 руб. вкл. НДС 20%.

Срок выполнения работ - апрель-июнь 2021 г.

Оплата выполненных работ по настоящему соглашению осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45-ти календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и получения счета-фактуры (пункт 3 Соглашения №1).

Работы выполнены Исполнителем полностью и в срок, результат работ передан Заказчику, что подтверждается двусторонним актом от 31.05.2021 № 254. Заказчик 03.08.2021 произвел частичную оплату принятых работ на сумму 5 000 000 руб. 

Согласно пункту 4 Соглашения №1 Исполнитель оплачивает Заказчику генподрядные услуги в размере 20% от общей стоимости работ с НДС. Данные денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет Заказчика, либо зачтены актами взаимозачетов, либо зачтены другим способом, не противоречащим законодательству.

Ответчиком по Соглашению №1 был выставлен Акт на услуги генподряда по Договору (Соглашение №1) №89 от 31.05.2021 на сумму 2 480 054, 88 руб., вкл. НДС 20%. Сторонами подписан Акт взаимозачета №79 от 01.10.2021 на сумму 2 480 054, 88 руб.

Задолженность по оплате выполненных на основании Соглашения № 1 работ составляет 4 920 219 руб. 50 коп. 

Согласно Приложению №5 к Договору «Соглашение №2 о перечне, сроках и стоимости услуг (выполненных работ)» (далее - Соглашение №2) Исполнитель обязался выполнить сварочно-монтажные работы по подключению трубопровода в рамках проекта «Газопровод внешнего транспорта Ен-Яхтинского месторождения» на объекте ООО «Газпром-Заполярье»: резка и формирование фаски под сварку 4 реза 8 фасок (4 стыковых соединений 0159x8 = 0159x10 (Рр=14,4 Мпа); сварочно-монтажные работы (последовательно) без выполнения РГК сварных соединений, материал 09Г2С: 4 стыковых соединения 0159x8 = 0159x10 (Рр=14,4 Мпа), а Заказчик оплатить данные работы.

Стоимость работ составила 1 335 840 руб., вкл. НДС 20%.

Срок выполнения работ - август-сентябрь 2021 г. 

Работы были выполнены в срок и надлежащим образом, что подтверждается подписанным сторонами Актом выполненных работ №534 от 06.09.2021.

Также согласно Соглашению №2 Исполнитель должен был выполнить иные сварочно-монтажные работы по подключению трубопровода в рамках проекта «Газопровод внешнего транспорта Ен-Яхтинского месторождения» на объекте ООО «Газпром-Заполярье» на сумму 8 968 440 руб. вкл. НДС 20%. Срок: сентябрь-декабрь 2021 года. Эти работы Исполнителем не выполнялись по причине не передачи площадки для выполнения работ.

Соглашением №2 предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45-ти календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и получения счета-фактуры (пункт 3 Соглашения №2).

Следовательно, Исполнитель имеет право на оплату части выполненных и принятых Заказчиком работ на сумму 1 335 840 руб. Однако оплату Заказчик не произвел.

При этом согласно пункту 4 Соглашения №1 Исполнитель оплачивает Заказчику генподрядные услуги в размере 20% от общей стоимости работ с НДС. Данные денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет Заказчика, либо зачтены актами взаимозачетов, либо зачтены другим способом, не противоречащим законодательству.

Стоимость генподрядных услуг по части Соглашения № 2 составляет 267 168 руб. По итогам зачета встречных требований сторон задолженность Заказчика по оплате выполненных по Соглашению № 2 работ составляет 1 068 672 руб. 

Общий размер задолженности ответчика по договору 09.12.2020 № 27/20 составляет 5 988 891 руб. 50 коп.

Истец 29.10.2021 направил в адрес ответчика претензию с требованием об уплате задолженности. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Согласно части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

До принятия решения ответчик признал иск полностью, и признание принято судом, поскольку не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РемСтройМастер» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ИНТРА» 5 988 891 руб. 50 коп. основного долга, 1 119 629 руб. 28 коп. неустойки по состоянию на 16.12.2021, а также неустойку из расчета 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки с 17.12.2021 по дату фактического исполнения основного обязательства, 58 543 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.