АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-17571/2018

г. Ярославль

11 января 2019 года

Резолютивная часть решения оглашена  12 декабря 2018 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Коншиной А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью "Сектор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Лесдревпром" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о   взыскании   17263000.00  руб.

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 26.06.2018

от ответчика – не явился

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Сектор" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лесдревпром" о расторжении договора подряда № 28 от 13.04.2015 и  взыскании 17 263 000,00  руб.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик извещен в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, письменный отзыв не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Дело слушается в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие ответчика.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

13.04.2015 между обществом с ограниченной ответственностью "Сектор" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лесдревпром" /Подрядчик/ заключен договор № 28, согласно которому Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 и сдать ее ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, принять результат и оплатить обусловленную цену.

Срок выполнения работ составляет 6 (шесть) месяца с момента начала работ, указанного в п.4.1. настоящего договора. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом работ, приведенным в Приложении №2 настоящего договора и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (п.1.4 Договора).

В силу п.п. 2.1 – 2.3 Договора цена выполняемых Работ составляет 9 881 000,00 (девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей без НДС. Оплата производится в четыре этапа: (1-й этап: предоплата на приобретение материалов: стоимость заготовки леса полностью на весь дом. Строевой круглый лес средний диаметр 340мм, в объеме 340 куб.м. С доставкой и выгрузкой 1 376 000,00 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч рублей) без НДС; 2-й этап: фундамент 17x17 (плита) 1 657 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч рублей) без НДС; 3-й этап: Доставка сруба и материалов на место установки 260 000 (двести шестьдесят тысяч рублей) без НДС; 4-й этап: рубка сруба и установка 2 434 000,00 (два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи рублей) без НДС; 5-й этап: установка стропильной системы с черепицей, а также материал на стропильную систему и обрешетку 4 154 000 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) рублей. Авансовый платеж составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей без НДС. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на предоставленный ПОДРЯДЧИКОМ расчетный счет или наличными расчетом в кассу ПОДРЯДЧИКА. Оплата бытовки для проживания рабочих оплачивается наличным расчетом в момент подписания настоящего договора. Стоимость бытовки составляет 65 000 (шестьдесят пять тысяч рублей), без НДС.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2 Договора срок выполнения работ по настоящему договору подряда с физическим лицом: начало «14» апреля 2015 г., окончание «14» октября 2015 г. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки работ.

05.10.2015 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым в связи с изменением объема работ по договору №28 от 13 апреля 2015 г., произошедшем не по вине подрядчика, Договор читать в следующей редакции: п. 2.1. Цена выполняемых работ по договору увеличивается на 3 000 000 (три миллиона) рублей без НДС; п. 2.2. В срок не позднее пяти банковских дней с момента подписания данного соглашения №1 от 05.10.2015, на основании выставленного счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей без НДС.

05.11.2015 между сторонами заключено соглашение № 2, в соответствии с п. 1.1 которого Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 и сдать её ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, принять результат и оплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1.4 Соглашения № 2 срок выполнения работ составляет 2 (два) месяца с момента начала работ, указанного в п.4.1. настоящего договора. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом работ, приведенным в Приложении №2 настоящего договора и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

В силу п.п. 2.1, 2.1.1 – 2.1.10, 2.2 – 2.4 Соглашения № 2 в связи с изменением рыночных цен на приобретение материалов и изменением технических требований здания. Внести изменения в договор №28 от 13 апреля 2015 г., добавить пункт №6 и считать его в следующей редакции: 6-й этап: Внутренняя и наружная отделка. Монтаж и установка напольного покрытия (плитка) на первый этаж. Монтаж и установка дверей и оконных рам во всем здании. Монтаж и установка потолков из имитации бруса первого и второго этажа. Утепление первого и второго этажа в три слоя. Монтаж и установка карнизов и ветровых частей здания (сапфиты). Монтаж и установка электрических мощностей. Шлифовка внутренних и наружных стен. Покраска и антисептирование огнебиозащитой наружных стен здания. Установка лестниц внутри здания. Монтаж и установка пола второго этажа. Стоимость работ составляет: 3 132 000 (три миллиона сто тридцать две тысячи) рублей. Авансовый платеж составляет 50% от общей суммы 1 566 000 (один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на предоставленный ПОДРЯДЧИКОМ расчетный счет или наличными расчетом в кассу ПОДРЯДЧИКА.

Согласно п. 4.1, 4.2 Соглашения № 2  срок выполнения работ по настоящему договору подряда с физическим лицом: Начало 10 ноября 2015 г. Окончание 30 декабря 2015 г. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки работ.

06.04.2016 между сторонами заключено соглашение № 3, в соответствии с п. 1.1 которого Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 и сдать её ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, принять результат и оплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1.4 Соглашения № 3 Срок выполнения работ составляет 2 (два) месяца с момента начала работ, указанного в п.4.1. настоящего договора. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом работ, приведенным в Приложении №2 настоящего договора и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

В силу п.п. 2.1, 2.1.1 – 2.1.8, 2.2 – 2.4 Соглашения № 3 Чистовые работы по 3-му этаже: Утепление потолка (толщина 150 мм); Гидро-паро изоляция; Отделка евровагонкой; Лестница на 3 этаж; Увеличение стропильной системы; Увеличение кровельного покрытия; Черновые полы; Плита ОСП. Стоимость работ 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей. Авансовый платеж составляет 50% от общей суммы 1 566 000 (один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.  Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на предоставленный ПОДРЯДЧИКОМ расчетный счет или наличными расчетом в кассу ПОДРЯДЧИКА.

Согласно п. 4.1, 4.2 Соглашения № 3 срок выполнения работ по настоящему договору подряда с физическим лицом: Начало 06 апреля 2016 г. Окончание 30 апреля 2016 г. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки работ.

Во исполнение условий договора заказчиком перечислен аванс на общую сумму 17 263 000,00 руб.

Подрядчик работы в установленный договором срок не выполнил, заказчику не сдал.

17.05.2018 заказчик направил подрядчику претензию исх. № 01/17/05 с требованиями о  передаче результата работ по договору, а также о возврате аванса, указал, что в случае неудовлетворения указанных требований будет вынужден обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении договора подряда № 28 от 13.04.2015 и взыскании неотработанного аванса.

Неисполнение требования истца о возврате аванса и нарушение срока окончания работ по договору № 28 от 13.04.2015 послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса РФ обязательство должно исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

Согласно ст.715 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу п.п. 1, 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

17.05.2018 истец направил ответчику по юридическому адресу требование о  передаче результата работ по договору или возврате аванса.

В нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик не представил доказательств, подтверждающих сдачу результата работ установленный договором срок.

Нарушение сроков выполнения работ при отсутствии доказательств сдачи результат работ является существенным нарушением условий договора подряда.

При таких обстоятельствах, суд считает требование истца о расторжении договора № 28 от 13.04.2015 на выполнение работ по строительству дома из бревна подлежащим удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании неотработанного аванса в размере 17 263 000,00 руб.

Согласно ст. 453 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В соответствии с разъяснениям, данными в п.1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» сторона вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

В силу ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Факт перечисления денежных средств ответчику на общую сумму 17 263 000,00 руб. подтверждается материалами дела:  платежными поручениями № 301 от 14.04.2015, № 302 от 14.04.2015, № 374 от 25.05.2015, № 377 от 27.05.2015, № 487 от 02.07.2015, № 740 от 06.10.2015, № 828 от 16.11.2015, № 877 от 02.12.2015, № 927 от 16.12.2015, № 945 от 28.12.2015, № 56 от 29.01.2016, № 98 от 24.02.2016, № 99 от 24.02.2016, № 150 от 06.04.2016.

Доказательств выполнения работ на сумму 17 263 000,00 руб., возврата денежных средств либо представления иного встречного исполнения, ответчиком суду не представлено.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, они подлежат удовлетворению в части взыскания неотработанного аванса в полном объеме, в сумме 17 263 000,00 руб.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу искового заявления относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор подряда № 28 от 13.04.2015 на выполнение работ по строительству дома из бревна между ООО «Сектор» и ООО «Лесдревпром».

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Лесдревпром" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Сектор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 17 263 000,00 руб. задолженности, 115 315,00 руб. в возмещение расходов на оплату госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Лапочкина И.М.