Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-108786/2019

17 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

рассмотрев дело по иску:

истец ООО  "ГК "ВОЛСПЕЦСТРОЙ" 

ответчик  ООО "РЕСУРС" 

о взыскании 758 847,50 руб.

установил:

Истец - ООО  "ГК "ВОЛСПЕЦСТРОЙ" обратился в суд с иском к ответчику - ООО "РЕСУРС" о взыскании 296 287,50 руб. неустойки по договору № 05/2018 от 13.12.2018 года, 262 560,00 руб. неустойки по договору № 03/2019 от 17.01.2019 года, 200 000,00 авансовый платеж по договору № 03/2019 от 17.01.2019 года, всего 758 847,50 руб.

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, ответчик отзыв на иск не представил.

В соответствии со статьями 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Решение в виде резолютивной части вынесено 03.12.2019.

В связи с поступлением апелляционной жалобы изготовлено решение в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд  установил следующее. 

Истец в исковом заявлении указывает, что 13.12.2018 между ООО «ГК «ВолСпецСтрой» (Заказчик) и ООО «Ресурс» (Исполнитель) заключен договор на производство комплекса вспомогательных работ № 05/2018 на лесных участках ВЛ 35 кВ Дюны-2/3, Дюны-2/Левашовская-2, Дюны-3/Левашовская-2, занимающих площадь 7,901 га. Техническим заданием (Приложение №1) установлен следующий срок окончания работ — 28.02.2019.

Цена договора согласно п. 2.1. составляет 1 185 150,00 руб.

В адрес ООО «Ресурс» 07.06.2019 было направлено письмо с требованием нарастить темпы производства работ по договору и представить актуальный график работ. Ответа получено не было.

В адрес ООО «Ресурс» 17.07.2019 была направлена претензия с требованием нарастить темпы производства работ по договору, расчетом пени и штрафов за срыв графика производства работ. Ответа получено не было.

В адрес ООО «Ресурс» 20.08.2019 было направлено письмо о расторжении договора в одностороннем порядке в связи со срывом сроков.

Пунктом 4.10. договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан оплатить пени в размере 0,1% от стоимости просроченных к сдаче работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

По состоянию на 20.08.2019 (дата расторжения договора) просрочка составляет 172 дня.

В соответствии с расчетом истца размер неустойки составляет  203 845,80 руб. С учетом ограничения предельного размера неустойка составляет 118 515,00 руб., что составляет 10 % от стоимости контракта.

Пунктом 4.11. договора предусмотрено: в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ более чем на 30 календарных дней, Исполнитель по требованию Заказчика обязан оплатить дополнительно к п. 4.10 штраф в размере 10% от стоимости просроченных к сдаче работ, что составляет 118 515,00 руб.

Пунктом 4.12. договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ более чем на 60 календарных дней, Исполнитель по требованию Заказчика обязан дополнительно к п. 4.10 и 4.11. оплатить штраф в размере 5% от стоимости просроченных к сдаче работ, что составляет 59 257,50 руб. 50 коп. 

Общий размер штрафных санкций по договору составляет 296 287,50 руб. 

Между ООО «ГК «ВолСпецСтрой» (Заказчик) и ООО «Ресурс» (Исполнитель) 17.01.2019 заключен договор на производство комплекса вспомогательных работ № 03/2019 на лесных участках ВЛ 110 кВ Нарвская-6/Южная-16, занимающих площадь 7,168 га. Техническим заданием (Приложение №1) установлен следующий срок окончания работ – 28.02.2019.

Цена Договора согласно п. 2.1. составляет 1 290 240,00 руб.

В адрес ООО «Ресурс» 18.02.2019 был произведен авансовый платеж на сумму 300 000,00 руб., 15.03.2019 - на сумму 100 000,00 руб.

Между сторонами 29.03.2019 без замечаний был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ на сумму 400 000,00 руб.

В адрес ООО «Ресурс» 23.04.2019 был перечислен авансовый платеж в размере 200 000,00 руб.

В адрес ООО «Ресурс» 07.06.2019 было направлено письмо с требованием нарастить темпы производства работ по договору и представить актуальный график работ. Ответа получено не было.

В адрес ООО «Ресурс» 17.07.2019 была направлена претензия с требованием нарастить темпы производства работ по договору, расчетом пени и штрафов за срыв графика производства работ. Ответа получено не было.

В адрес ООО «Ресурс» 20.08.2019 было направлено письмо о расторжении договора в одностороннем порядке в связи со срывом сроков.

Пунктом 4.10. договора предусмотрено: в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан оплатить пени в размере 0,1% от стоимости просроченных к сдаче работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

По состоянию на 29.03.2019 (дата частичной сдачи работ) просрочка составляет 29 дней.

Согласно расчетам истца размер неустойки составляет 37 416,96 руб. 

По состоянию на 20.08.2019 (дата расторжения договора) просрочка составляет 144 дня.

Согласно расчетам истца размер неустойки составляет 128 194,56 руб. 

Общий размер неустойки составляет 165 611,52 руб. С учетом ограничения предельного размера неустойка составит 129 024,00 руб., что составляет 10 % от стоимости контракта.

Пунктом 4.11. договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ более чем на 30 календарных дней, Исполнитель по требованию Заказчика обязан оплатить дополнительно к п. 4.10 штраф в размере 10% от стоимости просроченных к сдаче работ.

Расчет штрафа составляет 89 024,00 руб.

Пунктом 4.12. договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ более чем на 60 календарных дней, Исполнитель по требованию Заказчика обязан дополнительно к п. 4.10 и 4.11. оплатить штраф в размере 5 % от стоимости просроченных к сдаче работ.

Размер штрафа согласно расчету истца составляет 44 512,00 руб.

Общий размер штрафных санкций по договору составляет 262 560,00 руб. 

В силу положений п. 1 ст. 330, п. 4 ст. 425 ГК после окончания срока действия договора либо его расторжения возникшее в период его действия и предусмотренное им право на взыскание неустойки сохраняется при условии установления факта ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по договору в пределах срока исковой давности.

Ответа на претензию истец не получил, задолженность не погашена.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 31. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ВОЛСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН:  

<

***>) 296 287,50 руб. неустойки по договору № 05/2018 от 13.12.2018 года, 262 560,00 руб. неустойки по договору № 03/2019 от 17.01.2019 года, 200 000,00 авансовый платеж по договору № 03/2019 от 17.01.2019 года, всего 758 847,50 руб., а также 18 177,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

Судья Виноградова Л.В.