АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

А23-9582/2021

24 мая 2022 года                                                                                   г. Калуга

Резолютивная часть решения изготовлена 17 мая 2022 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 24 мая 2022 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Павлик Е.Н., рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 316547600119878) Новосибирская область,     р.п. Маслянино к обществу с ограниченной ответственностью "Нивастрой"              (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 249080, 

<

...>

о взыскании 2 885 019 руб. 05 коп.,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Нивастрой" о взыскании задолженности в сумме 2 791 000 руб. по договору подряда №14.12.2020-KOS-NS от 14.12.2021, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 94 019 руб. 05 коп. за период с 12.01.2021 по 08.10.2021.

Лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного заседания с учетом ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются уведомленными надлежащим образом. 

           На основании ст. ст. 123, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие, иных лиц участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд установил  следующее.

14.12.2020 между истцом и ответчиком заключен договор подряда                          № 14.12.2020-KOS-NS, согласно которому, подрядчик обязуется выполнить работы на объекте "Строительство молочного завода с производительностью 1150 т молока в сутки, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:17:024208:1304, Пеньковский сельсовет, Маслянинского района, Новосибирской области".

Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную договором стоимость работ.

Общая стоимость работ по договору определяется локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора и составляет 10 800 000 руб. При выполнении работ подрядчик может использовать материалы заказчика.

Оплата выполненных работ производится заказчиком на основании бухгалтерских справок подрядчика по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов в актах по форме КС-2, которые оформляет подрядчик не позднее 25 числа каждого текущего месяца, подписываются заказчиком в течение трех дней с момента их предъявления. КС_2 и КС-3 подписываются заказчиком при отсутствии замечаний. Оплата выполненных работ производится заказчиком в течение пяти дней после подписания заказчиком актов и справок по форме КС-2 и КС-3 подрядчика.

До начала работ заказчик оплачивает аванс подрядчику в размере 20% стоимости работ по договору. (Раздел 2 договора).

Работы по договору, предусмотренные п. 1.1 договора, должны быть выполнены в срок с 14.12.2020 по 30.03.2021. (Раздел 3 договора)

Приемка законченного объема работ осуществляется в соответствии с условиями договора. а также действующими на момент приемки строительными нормами правилами, а также иными нормативными актами РФ, регламентирующими приемку работ соответствующего вида. (Раздел 6).

Ответчиком выполнены работ на общую сумму 3 591 000 руб., ответчиком частично оплачена работа истца на сумму 800 000 руб. Задолженность на сумму               2 791 000 руб. ответчиком не оплачена.

Претензией ответчику претензию об оплате образовавшейся задолженности.

Ответчиком требование истца осталось без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения с иском в Арбитражный суд Калужской области.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии частью 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации,  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации). По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Применительно к пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истцом выполнены работы на общую сумму 3 591 000 руб., что подтверждается подписанными справками о стоимости выполненных работ и затрат, Акта о приемке выполненных работ. (л.д. 19-26).

Ответчиком частично оплачена сумму задолженности в размере 800 000 руб., при этом задолженность на сумму 2 791 000 руб. ответчиком не оплачена, ввиду чего требование истца подлежит удовлетворению.

Ввиду ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком, истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму                 94 019 руб. 05 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", уплата процентов за пользование чужими денежными средствами является ответственностью за неисполнение денежного обязательства.

Представленный истцом проверен, признан обоснованным, ответчиком не оспорен.

Расходы по уплате государственной пошлины судом распределяются на основании ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НиваСтрой» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженность в сумме 2 791 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 94 019 руб. 05 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 37 425 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья                                                         В.В. Жадан