И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 г. Москва                                                                                     Дело № А40-116899/22-151-865

26.04.2023 года                                                                             

Резолютивная часть решения объявлена 27.03.2023

Решение в полном объеме изготовлено 26.04.2023

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ЗАО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-СИСТЕМ» (ОГРН 1047815029635)

к ответчику ООО «ОРИОНСТМ» (ОГРН 5087746369376)

о взыскании 3 763 187,91 руб.

при участии

от истца: представитель не явился

от ответчика: Жердев В.Г. доверенность от 13.01.2023

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №1620187346251412539005687/ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017 в размере 3 269 967 руб. 76 коп., неустойки в размере 493 220 руб. 15 коп., неустойки, начисленной на сумму задолженности по день фактической оплаты, исходя из 1/300 ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, с учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ.  

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Надлежащим образом извещенный представитель истца в судебное заседание не явился, в порядке ст. 156 АПК РФ суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «ОрионСТМ» (далее - Заказчик, Ответчик) и ЗАО «Технологии Бизнес-Систем» (далее - Исполнитель, Истец) заключен Договор на выполнение пуско-наладочных и монтажных работ №1620187346251412539005687/ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017 г. (далее -Договор).

Согласно п. 1.1. Договора, Исполнитель обязуется в срок, установленный настоящим Договором, по заданию Заказчика выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить их по согласованной цене.

Согласно п. 1.2. Договора, Работы выполняются в целях исполнения Государственного контракта от 30.09.2016 г. №1620187346251412539005687 (далее - Госконтракт), заключенного между Министерством обороны РФ и АО «Воентелеком».

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора - стоимость работ, подлежащая оплате, определяется на основании Расчета стоимости Работ (Приложение №3 к Договору) и не может превышать сумме 7 700 091 руб. 23 коп.

Согласно п. 3.6. Договора, окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в размере суммарной стоимости выполненных Работ после завершения Работ за вычетом выплаченного аванса (в случае его выплаты) в течение 50 рабочих дней с момента предоставления следующих документов:

- счета на оплату, счета-фактура, а также Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанные уполномоченными представителями Сторон;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- отчета об использовании материалов.

В рамках исполнения обязательств по Договору, ООО «ОрионСТМ» был перечислен авансовый платеж согласно п. 3.5 Договора в сумме 3 850 045,61 платежным поручением № 425 от 29.05.2017 г.

Работы проводились по Объектам и были приняты ООО «ОрионСТМ»:

• Объект Ц-15-1_4366, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 165 - 06.06.2019 г. на сумму 95 421 (Девяносто пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 07 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-1_4220, 100303 Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, в/ч 16601 - 11.06.2019 г. на сумму 128 697 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 41 копейка (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Строительно-монтажные работы. Пусконаладочные работы);

• Объект Ц-15-1_4220, 100303 Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, в/ч 16601 - 11.06.2019 г. на сумму 402 608 (Четыреста две тысячи шестьсот восемь) рублей 59 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Линейно-кабельные сооружения. Выполнение работ по строительству ВРС. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-1_4001. Саратовская обл., Татищевский р-н, п. Светлый - 01.11.2019 г. на сумму 154 935(Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 16 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.;

• Объект Ц-15-1_4001. Саратовская обл., Татищевский р-н, п. Светлый - 01.11.2019 г. на сумму 127 080 (Сто двадцать семь тысяч восемьдесят) рублей 50 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Выполнение работ по строительству ВРС. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-14148. Республика Мордовия. г. Ковылкино - 07.11.2019 г. на сумму 323 385 (Триста двадцать три тысячи триста восемьдесят пять) рублей 96 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-1_4148, Республика Мордовия, г. Ковылкино - 07.11.2019 г. на сумму 1 577 613 (Один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 52 копейки (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Линейно- кабельные сооружения. Выполнение работ по строительству ВРС. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-14148. Республика Мордовия, г. Ковылкино -07.11.2019 г. на сумму 55 834 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 24 копейки (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Выполнение строительной подготовки. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-14136, Саратовская обл., г. Энегльс - 11.11.2019 г. на сумму 308 390 (Триста восемь тысяч триста девяносто) рублей 51 копейка (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Строительно-монтажные работы. Пусконаладочные работы. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-14136. Саратовская обл., г. Энгельс - 11.11.2019 г. на сумму 3 877 329 (Три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать девять) рублей 27 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Линейно-кабельные сооружения. Выполнение работ по ВРС. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.);

• Объект Ц-15-14136, Саратовская обл., г. Энегльс - 11.11.2019 г. на сумму 68 717 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей 14 копеек (Комплексное оснащение и дооснащение объектов МО РФ, узлов связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием. Строительная подготовка. По договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г.)

Итого общая стоимость выполненных ЗАО «Технологии Бизнес-Систем» работ по Договору № 1620187346251412539005687 ВТК-367/17-0096/С от 20.03.2017г. составила 7 120 013 (Семь миллионов сто двадцать тысяч тринадцать) рублей 37 копеек.

Таким образом, Ответчиком не оплачены Работы, выполненные Истцом, в размере 3 269 967 рублей 76 копеек.

Направление Актов выполненных работ, счетов на оплату, а также Справок о стоимости Работ подтверждается перепиской между Истцом и Ответчиком посредством электронной почты, которая указана в разделе 14 Договора.

Факт выполнения Работ Истцом также подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-110362/21-96-764 от 16.08.2021 г. (далее - Решение) (в рамках указанного дела в пользу ООО «Орион СТМ» была взыскана задолженность с АО «Воентелеком» в размере 1 039 358,31 руб. за работы, выполненные в целях исполнения Госконтракта с Министерством обороны РФ, на объектах, которые также являются Объектами по Договору между Истцом и Ответчиком). Указанное Решение было оставлено без изменений Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2021 г.

Согласно п. 9.3. Договора, за нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчик уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом составляет:

- 3 269 967 руб. 76 коп. - задолженность по оплате выполненных Работ;

- 601 129 руб. 09 коп. - неустойка. ИТОГО: 3 871 096 руб. 85 коп.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части,  суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также учитывает следующее. 

Работы были приняты АО «Воентелеком» у ООО «ОрионСТМ» в период с августа по январь 2020 г. на основании следующих документов: по объекту Ц15-1_4366 – 19.08.2019 на основании справки КС-3 от 06.06.2019 № 1 и акта КС-2 от 06.06.2019 № 3; по объекту Ц15-1_4220 – 19.08.2019 на основании справки КС-3 от 11.06.2019 № 2 и актов КС-2 от 11.06.2019 № 1, от 11.06.2019 № 2; по объекту Ц15-1_4001 – 20.11.2019 на основании справки КС-3 от 01.11.2019 № 3 и актов КС-2 от 01.11.2019 № 4, от 01.11.2019 № 5; по объекту Ц15-1_4148 – 10.12.2019 на основании справки КС-3 от 07.11.2019 № 4 и актов КС-2 от 07.11.2019 № 6, от 07.11.2019 № 7, от 07.11.2019 № 8; по объекту Ц15-1_4136 – 22.01.2020 на основании справки КС-3 от 11.11.2019 № 5 и актов КС-2 от 11.11.2019 № 9, от 11.11.2019 № 10, а также на основании справки КС-3 от 11.11.2019 № 6 и акта КС-2 от 11.11.2019 № 11.

15.04.2020 АО «Воентелеком» направило ответчику претензию № 367-01/020-3614 с требованием об уплате 370 834,06 руб. штрафа (5% от цены договора) в связи с непредоставлением калькуляции затрат.

16.04.2020 ответчиком истцу направлена претензия № 36/20 с требованием о предоставлении отчетной калькуляции фактических затрат и выплате штрафа в связи с непредоставлением указанной калькуляции.

29.05.2020 ответчиком истцу был направлен договор от 31.03.2020 № 20-0463-С о выкупе материалов, не израсходованных в ходе строительства, товарная накладная от 14.05.2021 № 1 на 790 385,46 руб., счет-фактура № 22 и счет № 21 от тот же даты (трек-номер почтового отправления 12747447003120).

Письмом от 01.09.2020 № 367-01/020-8643 АО «Воентелеком» уведомило ответчика об удержании из причитающихся ему средств неустойки в размере 1 374 228 руб. в связи с просрочкой выполнения работ и 370 834,06 руб. в связи с непредоставлением калькуляции затрат.

18.02.2022 ответчиком истцу направлена очередная претензия с требованием об оплате неустойки, а также стоимости материалов согласно договору от 31.03.2020 № 20-0463-С. В этой же претензии истцу было сообщено, что в случае неисполнения им условий пункта 4.7 о выкупе у ответчика неизрасходованных материалов, с него также будет удержана (помимо стоимости самих материалов) неустойка в виде пени, рассчитанная на основании пункта 9.1 договора подряда за период по 11.02.2022.

Письмом от 18.02.2022 ответчик на основании пункта 9.5 договора уведомил истца об удержании из причитающихся ему денежных средств 2 310 027,42 руб. в счет штрафов, в том числе 1 925 022,85 руб. за просрочку выполнения работ (по 385 004,57 ₽ по каждому объекту) и 385 004,57 руб. за непредоставление калькуляции затрат (трек-номер 11114167059835).

По условиям договора между АО «Воентелеком» и ответчиком, а также договора между ответчиком и истцом (пункт 2.2.8) отчетная калькуляция затрат предоставляется в течение 30 рабочих дней после завершения работ. Отсутствие указанной калькуляции не является препятствием для приемки работ (пункт 3.6 договора), однако является основанием для приостановления расчетов с подрядчиком (пункт 9.5 договора).

Калькуляция затрат необходима для раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту в целях соблюдения подпункта 16 пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и пункта 3 Правил ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 47.

Вопреки доводам истца, заключенный сторонами договор в пункте 9.5 допускал одностороннее удержание ответчиком неустойки из денежных средств, причитающихся истцу, равно как и приостановить расчеты до момента исполнения ответчиком всех своих обязательств, что допускается гражданским законодательством Российской Федерации.

Работы были выполнены с использованием материалов и оборудования, предоставленных АО «Воентелеком», что установлено вышеназванным решением арбитражного суда.

Подписанными истцом отчетами об использовании материалов также подтверждается как факт использования указанных материалов, так и факт наличия у истца, которые он обязан выкупить по условиям договора с ответчиком.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные во вступившем в законную силу решении суда от 19.04.2021 по делу №А40-253014/20, учитывая невозможность выполнения работ в установленные договором сроки и удержания, произведенные генеральным заказчиком с ООО «ОРИОНСТМ» 488 772 руб. 57 коп. признанных судом обоснованными, а также 370 834 руб. 06 коп. за не представление калькуляции, учитывая, что неустойка направлена на компенсацию, в том числе убытков, правомерным размером удовлетворенных требований в рамках настоящего дела является 2 410 361 руб. 13 коп. (3 269 967, 76 – 859 606, 63). 

В остальной части в удовлетворении требований суд отказывает. 

Рассмотрев расчет неустойки, суд признает его методологически и арифметически не верным, с учетом размера удовлетворенных требований. По перерасчету суда, за период с 30.04.2020 по 31.03.2022 размер неустойки составит 368 038 руб. 59 коп. Оснований для применения положений ст.333 ГК РФ судом не установлено. В остальной части требований суд отказывает. 

При этом, поскольку до настоящего времени денежное обязательство должником не исполнено,  в силу ст. 330 ГК РФ, п. 65 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г. неустойка подлежит уплате до момента фактического исполнения обязательства.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ОРИОНСТМ» (ОГРН 5087746369376) в пользу ЗАО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-СИСТЕМ» (ОГРН 1047815029635) задолженность в размере 2 410 361 руб. 13 коп., неустойку в размере 368 038 руб. 59 коп., неустойку, начисленную на сумму долга 2 410 361 руб. 13 коп. в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ с 01.10.2022 по дату фактической оплаты долга, а также расходы по оплате госпошлины в размере 30 873 руб.

В остальной части отказать.

Возвратить ЗАО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-СИСТЕМ» (ОГРН 1047815029635) из федерального бюджета РФ госпошлину в размере 539 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья             К.В. Вольская