Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-253132/23-56-305

12  апреля  2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 03 апреля  2024 года.

Полный тест решения изготовлен 12 апреля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе судьи Картавой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Савенковым А.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

по иску АО «КАСР КОМПАНИ» (ИНН 

<

***>)

к ответчику ООО  «НОНИ» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании  задолженности   2 378 634 руб. 42 коп.

при участии: согласно протоколу  

 

УСТАНОВИЛ:

АО «КАСР КОМПАНИ» (ИНН 

<

***>) (далее – истец, подрядчик) обратилось в суд к ООО  «НОНИ» (ИНН 

<

***>)  (далее – ответчик, заказчик) с требованием о взыскании суммы задолженности по договору подряда № 11/18-21 от 11.08.2021, ДС-4, ДС-5; договору подряда № 16/09-21 от 16.09.2021, ДС-1, ДС-2 в размере основного долга  2 162 394 (два миллиона сто шестьдесят две тысячи триста девяносто четыре) рубля 92 копейки, неустойку по договору подряда № 11/18-21 от 11.08.2021, ДС-4, ДС-5; Договору подряда № 16/09-21 от 16.09.2021, ДС-1, ДС-2 в размере 216 239 (двести шестнадцать тысяч двести тридцать девять) рублей 50 копеек.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом, отзыв не представил, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключены договора подряда № 11/08-21 от 11.08.2021 и Договора подряда № 16/09-21 от 16.09.2021.

В соответствии с условиями договора подряда № 11/08-21 от 11.08.2021 (далее -Договор № 11/08-21) заключенного между ООО «Каср Компани» (далее - «Подрядчик») и ООО «НОНИ» (далее - «Заказчик»), Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по усилению несущих конструкций на объекте: МТРЦ «ЭЛЬГРАД» по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязался принять результат выполненных работ, а также оплатить их стоимость в размере, порядке и сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре.

Согласно п. 3. Дополнительного соглашения №9 от 17.12.2021 к Договору № 11/08-21:

- Дата окончания работ - 05.03.2022 г.

«3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 8 916 049,66 руб. (Восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сорок девять рублей 66 копеек), в т.ч. НДС 20% - 1 486 008,28 руб. (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч восемь рублей 28 копеек).

- п. 3.1.1. оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- в течение 3 (Трех) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора и выставления счета Подрядчиком, Заказчик вносит 1-й аванс в размере 3 787 229,94 руб. (Три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать девять рублей 94 копейки), в т.ч. НДС 20% - 631 204,99 руб. (Шестьсот тридцать одна тысяча двести четыре рубля 99 копеек).

-   в течение 7 (Семи) банковских дней с даты начала Работ и выставления счета Подрядчиком, Заказчик вносит 2-й аванс в размере 3 787 229,94 руб. (Три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать девять рублей 94 копейки), в т.ч. НДС 20% - 631 204,99 руб. (Шестьсот тридцать одна тысяча двести четыре рубля 99 копеек).

-   в течение 14 (Четырнадцать) банковских дней с даты начала Работ и выставления счета Подрядчиком, Заказчик вносит 3-й аванс в размере 1 171 463,96 руб. (Один миллион сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля 96 копеек), в т.ч. НДС 20% - 195 243,99 руб. (Сто девяносто пять тысяч двести сорок три рубля 99 копеек).

-   оставшиеся денежные средства в размере 170 125,82 руб. (Сто семьдесят тысяч сто двадцать пять рублей 82 копейки), в т.ч. НДС 20% - 28 354,30 руб. (Двадцать восемь тысяч триста пятьдесят четыре рубля 30 копеек) Заказчик оплачивает в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и получения счета».

В соответствии с п. 4.8. Договора № 11/08-21 результат Работ считается выполненным Подрядчиком в полном объёме и с надлежащим качеством, с даты подписания Сторонами Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в дату окончания производства всего объёма Работ по настоящему Договору.

Подрядчик свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме, что подтверждается подписанными Заказчиком Актами о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

Однако, Заказчик свои обязанности перед Подрядчиком по оплате работ выполнил ненадлежащим образом.

ООО «Каср Компани» для оплаты выполненных работ по Договору № 11/08-21 от 11.08.2021 направил акты и справки: КС-2 № 1 от 15.10.2021, КС-3 № 1 от 15.10.2021 на сумму 2 763 142,38 руб., КС-2 № 2 от 05.03.2022, КС-3 № 2 от 05.03.2022 на сумму 6 086 700,28 руб., всего 8 849 842,66 руб., акты и справки ООО «НОНИ» приняты и подписаны, оплачено частично в размере 8 127 088,36 руб. Задолженность составляет 722 754,30руб.

                 Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 4 от 16.11.2021 к Договору № 11/08-21 (далее - ДС № 4) Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить комплекс работ поремонту поверхности балок на отм. -6100 на объекте: МТРЦ «ЭЛЬГРАД» по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязался принять результат выполненных Работ и уплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.

Согласно п. 3 ДС № 4 содержание, объем, а также стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Дополнительному соглашению работ определяется «Локальной сметой» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению №4 к Договору) и составляет 297 204,85 руб. (Двести девяносто семь тысяч двести четыре рубля 85 копеек), в том числе НДС 20% -49 534,14 руб. (Сорок девять тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 14 копеек).

ООО «Каср Компани» для оплаты выполненных работ по ДС №4 по Договору № 11/08-21 от 11.08.2021 направил акты и справки: КС-2 № 1 от 19.01.2022, КС-3 № 1 от 19.01.2022 на сумму 297 204,85 руб., которые ООО «НОНИ» приняты и подписаны, но не оплачены. Задолженность составляет 297 204,85 руб.

     В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 5 от 16.11.2021 к Договору №11/08-21 (далее - ДС № 5) Подрядчик обязался по заданию Заказчика в установленный настоящимДополнительным соглашением срок выполнить собственными и/или привлеченными силами исредствами комплекс работ по иньектированию балок на отм. -6.100 (далее - «Работы») наобъекте: МТРЦ «ЭЛЬГРАД» по адресу: 

<

...> (далее- «Объект»), а Заказчик обязался принять результат выполненных Работ и уплатитьобусловленную Дополнительным соглашением цену.

Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Дополнительному соглашению работ определяется «Локальной сметой» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению №5 к Договору) и составляет 5 642 922,00 руб. (Пять миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот двадцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20% - 940 487,00 руб. (Девятьсот сорок тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек).

ООО «Каср Компани» для оплаты выполненных работ по ДС №5 к Договору № 11/08-21 от 11.08.2021 направил акты и справки: КС-2 № 1 от 05.03.2022, КС-3 № 1 от 05.03.2022 на сумму 5 642 922,00 руб., которые ООО «НОНИ» приняты и подписаны, оплачены частично в размере 5 321 461,00 руб. Задолженность составляет 321 461,00руб.

В соответствии с условиями Договора подряда № 16/09-21 от 16.09.2021 (далее -Договор № 16/09-21) заключенного между ООО «Каср Компани» (далее - «Подрядчик») и ООО «НОНИ» (далее - «Заказчик»), Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по устройству гидроизоляции деформационного шва на объекте: МТРЦ «ЭЛЬГРАД» по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязался принять результат выполненных работ, а также оплатить их стоимость в размере, порядке и сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре.

Согласно п. 3.1. Договора № 16/09-21 общая стоимость настоящего Договора составляет 1 067 918,20 руб. (Один миллион шестьдесят семь тысяч девятьсот восемнадцать рублей 20 копеек), в т.ч. НДС 20% - 177 986,37 руб. (Сто семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 37 копеек).

В соответствии с п. 3.1.1. Договора Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (Семи) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора и выставления счета Подрядчиком, Заказчик вносит аванс в размере 854 334,56 руб. (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать четыре рубля 56 копеек), в т.ч. НДС 20% - 142 389,09 руб. (Сто сорок две тысячи триста восемьдесят девять рублей 09 копеек). оставшиеся денежные средства в размере 213 583,64 руб. (Двести тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 64 копейки), в т.ч. НДС 20% - 35 597,27 руб. (Тридцать пять тысяч пятьсот девяносто семь рублей 27 копеек) Заказчик оплачивает в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и получения счета.

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 1/1 к Договору№ 16/09-21 - Дата окончания Работ - «30» ноября 2021 г.

Пунктом 4.8. Договора результат Работ считается выполненным Подрядчиком в полном объёме и с надлежащим качеством, с даты подписания Сторонами Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в дату окончания производства всего объёма Работ по настоящему Договору.

Подрядчик свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме, что подтверждается подписанными Заказчиком Актами о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

Однако, Заказчик свои обязанности перед Подрядчиком по оплате работ выполнил ненадлежащим образом.

ООО «Каср Компани» для оплаты выполненных работ по Договору № 16/09-21 от 16.09.2021 направил акты и справки КС-2 № 1 от 15.10.2021, КС-3 № 1 от 15.10.2021 на сумму 950 943,20 руб., КС-2 № 2 от 30.11.2021, КС-3 № 2 от 30.11.2021 на сумму 116 975,00 руб., а ООО «НОНИ» принято и подписано, оплачено частично в размере 950 943,20 руб. Задолженность составляет 116 975,00 руб.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 1 от 29.09.2021 к Договору № 16/09-21(далее - ДС № 1) Подрядчик обязался по заданию Заказчика в установленный настоящимДополнительным соглашением срок выполнить собственными и/или привлеченными силами исредствами комплекс работ по устройству деформационного шва (далее - «Работы») на объекте: МТРЦ «ЭЛЬГРАД» по адресу: 

<

...> (далее - «Объект»), а Заказчик обязался принять результат выполненных Работ и уплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.

Стоимость выполняемых Подрядчиком по-настоящему ДС № 1 работ составляет 1 013 136,14 руб. (Один миллион тринадцать тысяч сто тридцать шесть рублей 14 копеек), в том числе НДС 20% - 168 856,02 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 02 копейки).

ООО «Каср Компани» для оплаты выполненных работ по ДС № 1 к Договору № 16/09-21 направил КС-2 № 1 от 05.03.2022, КС-3 № 1 от 05.03.2022 на сумму 1 013 136,14 руб., ООО «НОНИ» принято и подписано, а оплачено частично в размере 506 568,07 руб.

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 2 от 16.11.2021 к Договору №16/09-21 (далее - ДС № 2) Подрядчик обязался по заданию Заказчика в установленный настоящим Дополнительным соглашением срок выполнить собственными и/или привлеченными  силами и средствами комплекс работ по инъектированию балки (по деформационному шву) и гидроизоляции деформационного шва (далее - «Работы») на объекте: МТРЦ«ЭЛЬГРАД»поадресу: 

<

...> а Заказчикобязался принять результат выполненных Работ и уплатить обусловленную Дополнительнымсоглашением цену.

Стоимость выполняемых Подрядчиком по-настоящему ДС № 2 работ составляет 394 863,40 руб. (Триста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС 20% - 65 810.57 руб. (Шестьдесят пять тысяч восемьсот десять рублей 57 копеек).

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 2/1 от 16 ноября 2021 г. - дата окончания Работ - «05» марта 2022 г.

ООО «Каср Компани» для оплаты выполненных работ по ДС № 1 к Договору направил КС-2 № 1 от 05.03.2022, КС-3 № 1 от 05.03.2022 на сумму 394 863,40 руб., ООО «НОНИ» принято и подписано, а оплачено частично в размере 197 431,70 руб. Задолженность составляет 197431,70руб.

Указанные работы были выполнены истцом в полном объёме и приняты ответчиком, что подтверждается подписанием актов, однако оплата ответчиком в полном объёме так и не была произведена, сроки на оплату, установленные договором нарушены, задолженность составляет 2 162 394,92 руб., претензия была оставлена без ответа, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

Ответчик отзыв не представил, контррасчет требований не представил. 

Судом установлено, что истец свои обязательства по выполнению работ по договору полностью исполнил, ответчик факт наличие задолженности не оспаривает, при этом ответчик свои обязательства по оплате за выполненные работы не исполнил, на дату рассмотрения дела долг в размере 2 162 394,92 руб. ответчиком не оплачен, в связи с чем, в силу положений статей 309, 310, 720 ГК РФ, требование истца о взыскании указанной суммы долга с ответчика подлежит удовлетворению.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно п. 5.2. Договоров при нарушении Заказчиком сроков оплаты Работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от подлежащей оплате суммы, путём направления Заказчику соответствующего письменного уведомления, с указанием размера, порядка и сроков выплаты неустойки. Условия настоящего пункта не распространяются на внесение Заказчиком предоплаты, в соответствии с первым абзацем п. 3.1.1. настоящего Договора.

Таким образом, поскольку судом установлено наличие у ответчика долга перед истцом по просрочке исполнения обязательств, то в силу статей 330 ГК РФ и пункта 5.2 договора требование истца о взыскании с ответчика неустойки (пени) в размере 216 239 (двести шестнадцать тысяч двести тридцать девять) рублей 50 копеек, за неисполнение обязательств, согласно представленному истцом и проверенному судом расчету, признается обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Представленный истцом расчет неустойки и штрафа судом проверен и признан обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и условиям договора, в связи, с чем подлежащими удовлетворению в полном объеме.

         Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в полном объеме, в соответствии со статьей 110 АПК РФ и Постановлению Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО  «НОНИ» (ИНН 

<

***>) в пользу АО «КАСР КОМПАНИ» (ИНН 

<

***>) сумму задолженности в размере  2 162 394,92 руб., неустойку в  размере 216 239 руб., а также   расходы по уплате государственной пошлины в сумме 34 893 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 

СУДЬЯ

О.Н. Картавая