АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-3383/2019

г. Уфа

18 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 18 июля 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Перемышлева И. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куликовой К.В., рассмотрев дело по исковому заявлению

Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания  Центра" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Мегастрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 343 914 руб. 46 коп. неустойки 

Явка в судебное заседание не обеспечена. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.   

06.02.2019г. на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания  Центра" к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Мегастрой" о взыскании 343 914 руб. 46 коп. неустойки.

Определением суда от 13 февраля 2019 года исковое заявление Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания  Центра" принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, в соответствии со статьями 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда 08.04.2019 г. назначено предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 20.05.2019 г

20 мая 2019 года от истца в материалы дела поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя. Ходатайство приобщено к материалам дела.

Определением суда 20.05.2019 г. дело назначено к судебному разбирательству и отложено судебное разбирательство на 11.07.2019 г.

06 июня 2019 года от истца в материалы дела поступили дополнительные пояснения. Дополнительные пояснения приобщены к материалам дела.

11 июля 2019 года от истца в материалы дела поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя. Ходатайство приобщено к материалам дела.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв по существу заявленных требований не представил, в связи с чем, суд в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие ответчика по имеющимся документам.          

Рассмотрев заявленные требования, изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ООО "Ярославская городская электросеть" (Сетевая организация) и ООО "СК  Мегастрой" (ответчик, Заявитель) подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 955-Д/14 от 12 декабря 2014 года, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 411.7кВт (1кат,-56.3кВт; 2кат.-355.4кВт;); - категория надежности 1,2; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0.4кВ; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора,

Согласно п. 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: Наименование объектов заявителя: многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями. Место нахождения объектов заявителя: 

<

...>.

Технические условия  являются   неотъемлемой  частью  настоящего  договора  и  приведены  в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

В соответствии с п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет – 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (п. 8 договора).

Согласно п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (Приказ №184-э/тп от 30.12.2013г.) и составляет 551 410.07 руб. (пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста десять рублей 07 копеек), в т.ч. НДС(18%) – 84 113.40 руб. (восемьдесят четыре тысячи сто тринадцать рублей 40 копеек).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 12 договора, датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Между ООО "Ярославская городская электросеть" (Ликвидируемая сетевая организация), ПАО "МРСК  Центра" (Сетевая организация) и ООО "СК  Мегастрой" (Заявитель) заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве к договору № 955-Д/14 от 12.12.2014г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, согласно которого стороны подтвердили, что результатом подписания настоящего соглашения является выражение воли Сторон на перевод всех прав и обязанностей по Договору ТП от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации. Перевод прав и обязанностей по Договору ТП производится с согласия Заявителя, при наступлении следующего события: - передача объектов электросетевого хозяйства, участвующих в передаче электрической энергии и в осуществлении мероприятий по технологическому присоединению Заявителя, от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации.

Объем мероприятий, необходимых для выполнения сторонами в целях осуществления техприсоединения, определен в выданных заявителю Технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее «ТУ»), являющихся неотъемлемой частью Договора ТП (Приложение № 1).

ПАО «МРСК Центра» в адрес заявителя направило уведомление от 30.06.2016 г. о выполнении филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» своей части мероприятий по технологическому присоединению и готовности осуществить фактическое присоединение, а также о необходимости выполнения ООО «СК МегаСтрой» мероприятий в рамках договора.

Истец указал, что ответчиком не выполнены мероприятия по технологическому присоединению, не произведена полная оплата по договору.

Фактическое присоединение к электрической сети невозможно осуществить до выполнения заявителем своей части мероприятий, указанных в п. 11 технических условий.

Вместе с тем, каких-либо уведомлений о выполнении мероприятий технических условий со стороны ответчика в сетевую организацию не поступало. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению в настоящий момент истекли (пункт 5 договора). Кроме того, истек срок действия технических условий (пункт 4 договора).

В соответствии с пунктом 18 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 17 договора предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № МР1-ЯР/16-2/9275-2 от 28.12.2017г. с требованием об оплате неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий.

Несвоевременное исполнение ответчиком обязательства по договору послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению на основании следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора и закона, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, определяет, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Как следует из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий...

Ответчик, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства оплаты поставленного истцом товара в полном размере, в материалы дела не представил.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; далее - Закона об электроэнергетике).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 861 утверждены, в том числе Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (далее - Правила N 861), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктами 3, 6 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил N 861. К ним относятся:

а) мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (в редакции, действовавшей до 4.01.2017); обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном п. 16 (5) настоящих Правил.

Как следует из материалов дела и установлено судом, что ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по договору.

В силу пункта 2 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 17 договора предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

С учетом факта нарушения ответчиком своих обязательств по спорному договору, истец на основании п. 17 договора и п. 16 указанных Правил, правомерно предъявил в суд требование о взыскании неустойки по состоянию на 22.12.2017г. в сумме 343 914 руб. 46 коп.

Расчет неустойки судом проверен и признается верным. Контррасчет ответчиком не представлен.

Основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют, ходатайство о применении указанной нормы в суде ответчиком не было заявлено (пункт 72 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме в сумме 343 914 руб. 46 коп. неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 955-Д/14 от 12 декабря 2014 года.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Мегастрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания  Центра" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 343 914 руб. 46 коп. неустойки и  9 878 руб. 28 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья      И. В. Перемышлев