АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-20631/2024

г. Ставрополь

23 декабря 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

 общества с ограниченной ответственностью «Константа», г. Ставрополь, ОГРН 1142651017090, ИНН 2635831361,  

к управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, г. Георгиевск, ОГРН 1132651033129, ИНН 2625801946,  

о продлении срока действия муниципального контракта от 11.12.2023 № 30505/62 путем внесения следующих изменений в контракт: в пункт 3.2 контракта: «начало работ: с момента заключения. Окончание работ: до 13 декабря 2025 г. включительно»;  

- в пункт 3.4 контракта: «Срок исполнения контракта – до 28 декабря 2025 г.»;  

- в пункт 3.5 контракта. «Срок отдельных этапов исполнения контракта: 1. Не позднее 31 декабря 2023 г.; 2. Не позднее 31 января 2024 г.; 3. Не позднее 29 февраля 2024 г.; 4. Не позднее 30 октября 2024 г.; 5. Не позднее 31 августа 2025 г.; 6. Не позднее 31 мая 2025 г.; 7. Не позднее 30 июня 2025 г.; 8. Не позднее 30 июля 2025 г.; 9. Не позднее 31 августа 2025 г.; 10. Не позднее 30 сентября 2025 г.; 11. Не позднее 31 октября 2025 г.; 12. Не позднее 30 ноября 2025 г.; 13. Не позднее 13 декабря 2025 г.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Продлить срок действия муниципального контракта от 11.12.2023 № 30505/62, заключенного обществом с ограниченной ответственностью «Константа», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, и управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, г.  

Георгиевск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, путем внесения следующих изменений в контракт: в пункт 3.2 контракта: «начало работ: с момента заключения. Окончание работ: до 13 декабря 2025 г. включительно»;  

 - в пункт 3.4 контракта: «Срок исполнения контракта – до 28 декабря 2025 г.»; 

- в пункт 3.5 контракта. «Срок отдельных этапов исполнения контракта: 1. Не позднее 31 декабря 2023 г.; 2. Не позднее 31 января 2024 г.; 3. Не позднее 29 февраля 2024 г.; 4. Не позднее 30 октября 2024 г.; 5. Не позднее 31 августа 2025 г.; 6. Не позднее 31 мая 2025 г.; 7. Не позднее 30 июня 2025 г.; 8. Не позднее 30 июля 2025 г.; 9. Не позднее 31 августа 2025 г.; 10. Не позднее 30 сентября 2025 г.; 11. Не позднее 31 октября 2025 г.; 12. Не позднее 30 ноября 2025 г.; 13. Не позднее 13 декабря 2025 г.,  

 Взыскать с управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, г. Георгиевск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Константа», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 50 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина