Арбитражный суд Московской области 

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-23183/17

21 июня 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья М.Ю. Бондарев, при ведении протокола  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  по заявлению ООО "ЭКСТРОДЕНТ ВЫСОТКА" к ООО  «Стройсервискомплект» об обязании  

третье лицо ООО «Новый век» 

При участии в судебном заседании- согласно протоколу  

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервискомплект» в  течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно  устранить недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ по строительству  пристройки к жилому дому по адресу: 

<

...> Комсомола, дом 49; путём производства работ, установленных  предоставленным в материалы дела заключением эксперта строительно-технической  экспертизы, а именно:  

 №  п/п  

Наименование работ 

Ед.  изм.  

Кол-во 

1 

Демонтажные работы 

2 

Демонтаж с сохранением оборудования слаботочных систем  (вызывная панель)  

шт.  

4.00  

3 

Демонтаж с сохранением 2х ламповых люминесцентных настенных  электрических светильников  

шт  

5.00  

4 

Демонтаж с сохранением оконных блоков 

м2  

22.14  

5 

Демонтаж с сохранением дверных блоков 

м2  

2.16  

 №  п/п  

Наименование работ 

Ед. изм. 

Кол-во  

6 

Демонтаж с сохранением водосточного желоба  

м.п. 

7.20  

7 

Демонтаж с сохранением водосточных воронок  

шт 

1.00  

8 

Демонтаж с сохранением водосточной трубы 

м.п. 

8.30  

9 

Демонтаж утеплителя кровли (t=200мм) 

м2 

31.33  

10  

Демонтаж деревянный брусков 60х60 мм конструкции кровли  

м3 

0.10  

11  

Демонтаж деревянный брусков 60х50 мм конструкции кровли  

м3 

0.13  

12  

Демонтаж деревянный брусков 50х50 мм конструкции кровли  

м3 

0.12  

13  

Демонтаж деревянных досок 30х100 мм конструкции кровли  

м3 

0.80  

14  

Демонтаж оклеечной гидроизоляции на битумной мастике кровли  

м2 

31.97  

15  

Демонтаж с сохранением стальных профилей конструкции кровли  (труба 160х80х6)  

т 

0.51  

16  

Демонтаж с сохранением реечного алюминиевого потолка  

м2 

27.80  

17  

Демонтаж навесной вентилируемой фасадной системы с  сохранением декоративного облицовочного материала (плитка  500х500мм)  

м2 

100.26  

18  

Демонтаж ж/б лестничных межэтажных площадок и маршей  

м2 

29.25  

19  

Демонтаж стальных косоуров и балок 

т 

1.06  

20  

Демонтаж кирпичной кладки наружных стен и перегородки 

м3 

39.03  

22  

Демонтаж ж/б плиты 

м3 

7.00  

23  

Демонтаж асфальтобетонной отмостки 

м2 

20.40  

24  

Демонтаж ж/б ростверка 

м3 

2.50  

25  

Демонтаж ж/б свай 

м3 

0.85  

26  

Демонтаж керамической декоративной плитки пандуса 300х300мм  

м2 

116.05  

27  

Вывоз мусора 

м3/т 

66.2/117.3 

28  

Монтажные работы 

29  

Монтаж ж/б буронабивной сваи 

м3 

2.84  

30  

Монтаж ж/б ростверка 

м3 

2.50  

31  

Монтаж ж/б плиты 

м3 

7.00  

32  

Монтаж асфальтобетонной отмостки 

м2 

20.40  

33  

Монтаж кирпичной кладки наружных стен 

м3 

38.10  

34  

Монтаж кирпичной кладки перегородки 

м3 

7.73  

35  

Монтаж стальных косоуров и балок 

т 

1.06  

36  

Монтаж ж/б лестничных межэтажных площадок и маршей  

м2 

29.25  

37  

Монтаж вентилируемой фасадной системы декоративного  облицовочного материала (плитка)  

м2 

100.26  

38  

Монтаж водосточного желоба 

м.п. 

7.20  

39  

Монтаж водосточных воронок 

шт 

1.00  

40  

Монтаж водосточной трубы 

м.п. 

8.30  

41  

Монтаж оборудования слаботочных систем (вызывная панель) 

шт 

4.00  

42  

Монтаж 2х ламповых люминесцентных настенных электрических  светильников  

шт 

5.00  

43  

Монтаж оконных блоков 

м2 

22.14  

 №  п/п  

Наименование работ 

Ед. изм. 

Кол-во  

44  

Монтаж дверных блоков 

м2 

2.16  

45  

Монтаж утеплителя кровли (t=200мм) 

м2 

31.33  

46  

Монтаж деревянный брусков 60х60 мм конструкции кровли  

м3 

0.10  

47  

Монтаж деревянный брусков 60х50 мм конструкции кровли  

м3 

0.13  

48  

Монтаж деревянный брусков 50х50 мм конструкции кровли  

м3 

0.12  

49  

Монтаж деревянных досок 30х100 мм конструкции кровли 

м3 

0.80  

50  

Монтаж оклеечной гидроизоляции на битумной мастике кровли  

м2 

31.97  

51  

Монтаж стальных профилей конструкции кровли 

т 

0.51  

52  

Устройство напольного покрытия (керамическая плитка 300х300мм)  

м2 

92.16  

53  

Оштукатуривание стен 

м2 

80.21  

54  

Устройство наплавляемой гидроизоляции ростверка в 2 слоя  

м2 

31.60  

55  

Устройство оклеечной гидроизоляции свай (гидроизоляция сважин)  

м2 

32.44  

56  

Устройство реечного потолка 

м2 

27.80  

57  

Монтаж керамической декоративной плитки пандуса 300х300мм  

м2 

116.05  

Взыскать с ООО «Стройсервискомплект» в пользу ООО "ЭКСТРОДЕНТ ВЫСОТКА" ркасходы по госпошлине в размере 6 000руб. Решение может быть обжаловано. 

Судья М.Ю. Бондарев