АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5

http://www.tver.arbitr.ru; е-mail: info@tver.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-9569/2022

г.Тверь

20 октября 2022 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2022 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи В.Ю. Янкиной, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в отсутствие представителей сторон в судебном заседании материалы дела по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Центр» об обязании в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства индивидуального предпринимателя ФИО2, указанные в технических условиях, являющихся приложением к договору № 41897094 от 03 декабря 2019 года, 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу (далее – ПАО) «Россети Центр» об обязании в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства индивидуального предпринимателя ФИО2, указанные в технических условиях, являющихся приложением к договору № 41897094 от 03 декабря 2019 года.

Определением от 15 сентября 2022 года рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 13 октября 2022 года.

Стороны, надлежащим образом извещенные о месте, дате и времени судебного заседании, явку полномочных представителей в суд не обеспечили.

12 октября 2022 года от ответчика поступили возражения на исковое заявление, в которых ПАО «Россети Центр» указывает, что фактически в условиях отсутствия источника финансирования принимает меры для исполнения мероприятий для технологического присоединения.

12 октября 2022 года от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Из материалов дела следует, что 03 декабря 2019 года между ИП ФИО3 и ПАО «Россети Центр» (Сетевая организация) был  заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №41897094.

По договору Сетевая организация принимает на себя обязательства поосуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя вводное устройство парников, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;  категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения парников, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, 

<

...> (кадастровый номер: 69:15:0000021:269).

В материалы дела представлена выписка из ЕГРП, согласно которой земельный участок площадью 77 600+/-92 м2, кадастровый номер 69:15:0000021:269, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/п Завидовское, 

<

...> (л.д. 16-23).

Платежным поручением № 282 от 13 декабря 2019 года и № 19 от 30 января 2020 года ИП ФИО2 произвел оплату в сумме 22 419 руб. 18 коп. в счет оплаты по договору (л.д. 43, 45).

Письмом № 24312 от 28 июня 2021 года ПАО «Россети Центр» согласовало рабочую документацию, указав, что замечания к ней отсутствуют (л.д. 38).

Письмом от 12 октября 2021 года ИП ФИО2 просил Сетевую организацию продлить срок действия технических условий для приобретения прибора учета (л.д. 41). 

Письмом от 23 декабря 2021 года ИП ФИО2 уведомил Сетевую организацию о выполнении технических условий, обратился в Сетевую организацию с просьбой произвести комплекс мероприятий, возложенных на Сетевую организацию техническими условиями и выдать акт осуществления технологического присоединения, акт о выполнении технических условий (л.д. 24).

Письмом № МР1-ТВ/13-1/2770 от 26 апреля 2022 года Сетевая организация предложила заявителю подписать дополнительное соглашение: продлить срок действия технических условий и срок осуществления мероприятий по подключению до 31 декабря 2023 года (л.д. 50-53).

Письмом от 19 мая 2022 года ответчик согласовал продление сроков по 02 мая 2022 года (л.д. 54-60).

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В рассматриваемой ситуации права и обязанности сторон возникли из договора № 41897094 от 03 декабря 2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно абз. 1 ч. 1 ст. 26 федерального закона № 35-ФЗ от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти (абз. 5 ч. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861). 

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил (п. 3 Правил № 861).

Сетевой организацией на территории Тверской области является Публичное акционерное общество «Россети Центр».

В соответствии с п. 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

 Заключение договора является обязательным для сетевой организации, так как данный вид договора на основании абз. 2 ч. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ имеет статус публичного.

Правила № 861 устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и др.

В рассматриваемом случае ИП ФИО2 приступил к исполнению договора, а именно: истец произвел оплату за технологическое присоединение и направил уведомление о выполнении с его стороны технических условий по технологическому присоединению.

ПАО «Россети Центр» свою обязанность по осуществлению технологического присоединения в установленный договором срок не исполнило, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произведено до настоящего времени, доказательств обратного суду не представлено, отсутствие технической возможности технологического присоединения не доказано.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из положений ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

В силу положений ч. 2 ст. 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворяя требование о понуждении к исполнению в натуре, суд устанавливает срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, мнение истца и ответчика, а также характер неисполненных обязательств, суд полагает возможным согласиться с истцом и установить ответчику трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу для исполнения принятых на себя договорных обязательств.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество «Россетти Центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 17 декабря 2004 года) выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 309695226000022, дата регистрации 17 сентября 2009 года), указанные в технических условиях, являющихся приложением к договору № 41897094 от 03 декабря 2019 года, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с публичное акционерное общество «Россетти Центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 17 декабря 2004 года) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 309695226000022, дата регистрации 17 сентября 2009 года) 6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст. 319 АПК РФ после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    В.Ю. Янкина