АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-4648/2022

07 апреля 2022 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 07 апреля 2022 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.В. Чукавиной, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи М.С. Кропачевой, рассмотрел в судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Газпром газораспределение Екатеринбург" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания «Маркет Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности, пени в размере 4 471 457 руб. 27 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 45 357 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании:

от  истца – ФИО1, представитель по доверенности  № 3/юр от 01.01.2022,

от ответчика - в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещено надлежащим  образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Судебное заседание проведено в отсутствие ответчика  на основании ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Лицам, участвующим в деле процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда, ходатайств не заявлено.

АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" обратилось в суд с исковым заявлением к ООО Специализированный застройщик Строительная компания «Маркет Сервис» с требованием о взыскании задолженности в размере 3 501 095 руб. 91 коп. по договору № И_22-03157 от 16.04.2018, пени за период с 03.09.2020 по 31.01.2022 в размере 970 361 руб. 36 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 45 357 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.02.2022г. заявление оставлено без движения до 04.03.2022г.

Учитывая, что недостатки устранены истцом в срок, установленный в определении от 02.02.2022г., определением суда от 08.02.2022 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание на 05.04.2022.

Ответчик отзыв на заявленные требования не представил.

Истец заявленные требования поддерживает в полном объеме. 

В предварительном судебном заседании суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, с учетом отсутствия возражений со стороны участвующих в деле лиц, в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершив предварительное судебное заседание, перешел к судебному разбирательству.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» является специализированной организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее Правила № 1314), действующих до 18.10.2021 определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 3 Правил № 1314 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства  к  сетям  газораспределения  или  заявки  о  заключении  договора  о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;

б)выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в)заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении;

г)выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д)составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е)осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 59 Правил № 1314 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 60 Правил № 1314).

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Гражданским кодексом РФ обязанность по заключению договора возлагается на коммерческую организацию, которая по характеру своей деятельности обязана продать товар, выполнить работы или оказать услуги, которые в отношении каждого, кто к ней обратится, то есть при заключении публичного договора.

На основании п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ, публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Согласно п. 81 Правил № 1314 договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

16.04.2018 между АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (Исполнитель) и ООО СЗ СК «Маркет Сервис» - ранее ООО СК «Маркет сервис» (Заявитель) заключен договор № И_22-03157 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 16.04.2018 (далее - договор).

В соответствии с условиями договора, Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, кадастровый номер земельного участка 66:36:0103007:22 (далее - Объект) к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на праве собственности или ином законном  основании,  с  учетом  максимальной  нагрузки  (часовым  расходом  газа) газоиспользующего оборудования, а Заявитель обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Согласно пункту 2.3.8. договора Заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) Объекта к сети газораспределения в размере и сроки, установленные настоящим Договором.

В соответствии с пунктом 3.1. договора (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 19.08.2020) размер платы за подключение (технологическое присоединение) по договору определяется в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 19.08.2020 № 79-ПК и составляет 4 423 432 рубля 80 копеек, в том числе НДС 20% 737 238 рублей 80 копеек.

Пунктом 3.2. договора предусмотрено, что внесение платы осуществляется Заявителем в следующем порядке:

3.2.1. 80 процентов платы, что составляет 3 538 746 рублей 24 копеек, в т.е. НДС 20% 589 791 рублей 04 копеек, в течение 11 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, с учетом ранее внесенных авансовых платежей в размере 909 865 рублей 89 копеек, сумма к доплате 2 628 880 рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 20% 438 146 рублей 73 копеек;

3.2.2. 20 процентов платы, что составляет 884 686 рублей 56 копеек, в т.е. НДС 20% 147 447 рублей 76 копеек, в течение в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают, в том числе, проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (РЭК СО) утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения (технологического присоединения) по индивидуальному проекту.

Исполнитель направляет дополнительное соглашение к договору о подключении, которым корректируется стоимость услуг по подключению, а также решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, на основании которого корректируется стоимость услуг по подключению (технологическому присоединению), не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации, но не ранее вступления в силу указанного решения (п. 110 Правил № 1314 в редакции на дату заключения договора № И_22-03157).

На основании вышеизложенного, между АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» и ответчиком было заключено дополнительное соглашение №5 от 19.08.2020 к договору № И_22-03157.

Раздел 3 Договора изложен в следующей редакции:

«3.1. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 19.08.2020 г. № 79-ПК (Приложение № .1 к настоящему Дополнительному соглашению) и составляет 4 423 432 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи четыреста тридцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20 процентов 737 238 рублей 80 копеек.

3.2. Внесение платы осуществляется Заявителем в следующем порядке:

«3.2.1. 80 процентов платы, что составляет 3 538 746 рублей 24 копейки, в том числе НДС 20 процентов 589 791 рубль 04 копейки, в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего Дополнительного соглашения, с учетом ранее внесенных авансовых платежей в размере 909 865 рублей 89 копеек, сумма к доплате составит 2 628 880 рублей 35 копеек, в том числе НДС 20 процентов 438 146 рублей 73 копейки.

3.2.2. 20 процентов платы, что составляет 884 686 рублей 56 копеек, в том числе НДС 20 процентов 147 447 рублей 76 копеек, в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Ответчиком произведена оплата в размере 922 336 рублей 89 копеек. Таким образом, обязательство по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) ООО СЗ СК «Маркет Сервис» в полном объеме не исполнено в установленный договором срок.

Претензионный порядок соблюден, претензия № ТП/73 от 07.06.2021 оставлена ответчиком без ответа.

В связи  с чем, Истец обратился с данным иском в суд.

Доказательств оплаты товара ответчиком в полном объеме в оставшейся сумме суду не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Согласно п. 97 Правил № 1314 мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а)разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б)разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в)выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г)мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий;

д)осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Кроме того, в соответствии с п. 103 Правил № 1314 после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Свои обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма,    кадастровый номер земельного участка 66:36:0103007:22 Истец исполнил надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, что подтверждается актом о подключении от 23.03.2021, подписанным Сторонами без возражений.

Задолженность ответчика по договору № И_22-03157 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 16.04.2018 составляет 3 501 095 руб. 91 коп.

В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий     (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Указанные истцом обстоятельства ответчиком не оспорены, доказательств иного не представлено.

При таких обстоятельствах суд признает требование истца о взыскании с ответчика задолженности обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере. 

Истец также, просит взыскать сумму пени в соответствии с п. 6.4. договора, начисленной в размере 970 361 руб. 36 коп. за периоды:

с 03.09.2020 по 29.10.2020 в размере 422 руб. 95 коп.;

с 03.09.2020 по 31.01.2022 в размере 803 290 руб. 00 коп.;

с 08.04.2021 по 31.01.2022 в размере 166 648 руб. 41 коп.

В соответствии с п. 6.4. договора, в случае нарушения одной из Сторон настоящего договора сроков исполнения своих обязательств по договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления прострочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за подключение (технологическое присоединение) по договору за каждый день просрочки.

Согласно ч.1 ст.330 ГК РФ, под неустойкой (штрафом, пеней) признается

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истцом представлен расчет пени, данный расчет проверен судом и признан верным, контррасчет не заявлен. 

Ходатайство о снижении суммы пени в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации также не поступило.

Учитывая, что со стороны ответчика имело место нарушение исполнения обязательства, истец правомерно начислил  пени на  основании ст. 330 ГК РФ и  п. 6.4.  договора,  в связи с чем, требование истца о взыскании с ответчика пени в заявленном размере подлежит удовлетворению.

Таким образом, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном размере. 

В силу ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с нормой части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче иска в суд уплачена государственная пошлина в размере  45 357 руб. 00 коп.  по платежному поручению  № 495 от 31.01.2022, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в возмещение судебных расходов по уплате госпошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания «Маркет Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества "Газпром газораспределение Екатеринбург" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 4 471 457 (четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь) руб. 27 коп., из них:

- сумма основного долга в размере 3 501 095 (три миллиона пятьсот одна тысяча девяносто пять) руб. 91 коп.;

- пени в размере 970 361 (девятьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят один) руб. 36 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания «Маркет Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества "Газпром газораспределение Екатеринбург" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме  45 357 (сорок пять тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп. 

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                         Т.В. Чукавина