АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

07 июля 2025 года

Дело № А33-13407/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.2296.22 от 04 мая 2022 г. мероприятия, направленные на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО1, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0100503:285, с обеспечением максимальной мощности энергопринимающих устройств в 150 кВт:

– выполнить проектную документацию в соответствии в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

– определить в проектной документации необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0,4 кВ, а также способ прокладки, марку и сечение провода ЛЭП 0,4 кВ; – осуществить строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте 7 технических условий № 8000491493, являющихся приложением к договору № 20.2400.2296.22 от 04 мая 2022 г., до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100503:285;

– выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442.

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 3 000,00 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части возложения обязанности по выполнению мероприятий, направленных на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО1, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0100503:285, а также 15 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, несение которых подтверждается платежным поручением от 12.05.2025 № 8.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2