АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

18 июня 2019 года

Дело № А33-29069/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10.06.2019.

В полном объёме решение изготовлено 18.06.2019.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (ИНН 2465115689, ОГРН 1072465010100, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности,

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика:

- Красноярский краевой фонд жилищного строительства (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

в присутствии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 10.10.2018,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 01.01.2019,

от третьего лица: ФИО3 – представитель по доверенности от 09.01.2019,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (далее – истец по первоначальному иску, ООО «Сигма-С») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (далее – ответчик по первоначальному иску, ООО ПСК «ОМЕГА») о взыскании 2 997 664 руб. 92 коп. задолженности по договору подряда от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17, от 20.11.2017 № СГС-03КЛ/17, от 11.12.2017 № СГС-05КЛ/17.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 19.10.2018 возбуждено производство по делу.

Определением от 15.01.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечен Красноярский краевой фонд жилищного строительства.

Определением 04.04.2019 судом принято встречное исковое заявление ООО ПСК «ОМЕГА» к ООО «Сигма–С», уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании 79 825 руб. 32 коп. задолженности за услуги генподряда по договорам № СГС-01КЛ/17 от 14.08.2017 (15 431,90 руб.), № СГС-03КЛ/17 от 20.11.2017 (10 539,83 руб.), № СГС-05КЛ/17 от 11.12.2017 (53 853,60 руб.) для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

Представитель ответчика по первоначальному иску в судебном заседании 29.04.2019 представил письменное ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Представитель истца по первоначальному иску в судебном заседании заявил о согласии с расчётом ответчика по первоначальному иску, а также представил письменное заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец по первоначальному иску просит о взыскании 2 996 501 руб. 29 коп. задолженности по договорам подряда от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17 (1 126 877,06 руб.), от 20.11.2017 № СГС-03КЛ/17 (255 180,17 руб.), от 11.12.2017 № СГС-05КЛ/17 (1 614 444,06 руб.).

Представленные уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика по первоначальному иску не поддержал заявленное ранее ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Представитель ООО ПСК «Омега» в отзыве на иск пояснил, что стоимость устранения недостатков по договору №СГС-01КЛ/17 составляет 9165,60 руб., по договору №СГС-05КЛ/17 – 180 675,60 руб. 

Стороны пояснили об отсутствии в необходимости назначения экспертизы в связи с согласием сторон о стоимости устранения недостатков выполненных работ.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО ПСК «ОМЕГА» (заказчик) и ООО «Сигма-С» (подрядчик) заключен договор подряда от 14.08.2017 №СГС-01КЛ/17 (далее – договор №СГС-01КЛ/17), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по устройству наружных стен на объекте: «10-ый квартал жилого района «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска. Жилой дом № 13» секция тип ЗВ левая, секция тип 1Д правая, секция тип 1В правая в соответствии с условиями договора, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1).

Пунктом 1.2 договора №СГС-01КЛ/17 предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 договора №СГС-01КЛ/17, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническим регламентом и иными ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ заказчику.

В пункте 4.1.2 договора №СГС-01КЛ/17  подрядчик обязался обеспечить производство работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией, графиком производства, техническим регламентом, другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, требованиями органов государственного надзора, обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Согласно пункту 1.3 договора №СГС-01КЛ/17, подрядчик обязуется завершить работы и сдать завершенные наружные стены здания, готовые к эксплуатации, в установленном порядке в сроки, предусмотренные договором.

Календарные сроки выполнения работ по договору: начало работ - «15» августа 2017 г., окончание работ - «28» октября 2017 г. (пункт 3.1 договора №СГС-01КЛ/17). Работы на объекте должны быть проведены подрядчиком и сданы заказчику в срок, указанный в пункте 3.1 договора. Сроки начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков строительства, а также сроков оплаты за выполненные работы (пункт 3.2 договора №СГС-01КЛ/17).

Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с утвержденной проектной документацией (пункт 8.1 договора №СГС-01КЛ/17).

Заказчик обязался произвести приемку и оплату работ, выполненных подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 договора (пункт 4.2.4 договора №СГС-01КЛ/17), подписывать акт выполненных работ формы КС-2 в течение 5 рабочих дней с момента предъявления их подрядчиком, либо направить мотивированный отказ от приемки результата работ. В случае непоступления в течение 5 рабочих от заказчика мотивированного отказа от приемки результата работ, акты выполненных работ формы КС-2 считаются принятыми и подлежат оплате заказчиком (пункт 4.2.6 договора №СГС-01КЛ/17).

Согласно пункту 10.1 договора №СГС-01КЛ/17, после окончания работ, входящих в объем обязательств подрядчика по строительству объекта, производится сдача объекта заказчику с оформлением акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик передает заказчику за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному заказчиком подрядчику, в соответствии с обязательствами заказчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (пункт 10.2 договора №СГС-01КЛ/17).

Согласно пункту 10.3 договора №СГС-01КЛ/17, в случае если во время приемки объекта заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных подрядчиком работах или несоответствия их проектной документации, подрядчик устранит их за свой счет в срок, согласованный с заказчиком. При невыполнении подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от подрядчика» возмещения понесенных расходов и других убытков.

Пунктом 5.1 договора №СГС-01КЛ/17 предусмотрено, что заказчик в течение 10 банковских дней с момента подписания оригиналов документов, указанных в пункте 4.2,6 договора, оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетный счет подрядчика, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, пропорционально выполненным работам.

Стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, определяется на основании протокола согласования договорной цены (приложение № 1), составляет 4 237 356 руб., в т.ч. НДС 18% 646 376,34 руб. и является ориентировочной. Оплата производится за фактически выполненные объёмы работ (пункт 2.1 договора №СГС-01КЛ/17 в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2017 к нему).

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 10 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ (пункт 5.2 договора №СГС-01КЛ/17).

Пунктом 5.3 договора в редакции протокола разногласий от 18.08.2017 к договору №СГС-01КЛ/17 предусмотрено, что подрядчик оплачивает заказчику за услуги генподряда в размере 3% от стоимости выполняемых работ на основании счетов-фактур заказчика.

Согласно пункту 2.3 договора №СГС-01КЛ/17, в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, не учтенных договором и превышении в связи с этим определенной договором цены, подрядчик обязан предупредить заказчика об этом не менее чем за 15 дней до начала выполнения таких работ.

Подрядчик после оформления приемки объекта заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения (пункт 10.4 договора №СГС-01КЛ/17).

В силу пункта 7.1.1 договора №СГС-01КЛ/17, гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по договору.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов, оборудования и работ устанавливается 60 месяцев от даты акта приемки законченного строительством объекта формы №КС-11 (пункт 7.1.2 договора №СГС-01КЛ/17). Пунктом 7.1.3 договора №СГС-01КЛ/17 предусмотрено, что в течение указанного срока подрядчик обязан осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание указанного объекта, а также входящих в него материалов, оборудования и работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчик, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения  заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе подрядчика от устранения дефектов, допущенных по вине подрядчика, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес подрядчика (пункт 7.1.4 договора №СГС-01КЛ/17). При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении экспертизы, с обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной экспертизой вины подрядчика в обнаруженных дефектах, подрядчик возмещает заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы (пункт 7.2 договора №СГС-01КЛ/17).

В силу пункта 10.5 договора №СГС-01КЛ/17, при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 10 дней подписать акт сдачи/приёмки законченного строительством объекта и произвести окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы включая все удержания связанные, с объектом.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента получения претензии (пункт 14.3 договора №СГС-01КЛ/17).

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору №СГС-01КЛ/17: 

- от 31.08.2017 №1 на сумму 201 950,65 руб.,

- от 30.09.2017 №2 на сумму 949 319,65 руб.,

- от 30.10.2017 №3 на сумму 923 912,59 руб.,

- от 30.11.2017 №4 на сумму 924 638,89 руб.,

- от 29.12.2017 №5 на сумму 437 831,47 руб.,

ООО «Сигма-С» составлены акты о приемке выполненных работ по договору №СГС-01КЛ/17 от 29.06.2018 №1 на сумму 46 774,03 руб., от 29.06.2018 №1 на сумму 216 720,92 руб., от 29.06.2018 №6 на сумму 211 083,83 руб. и справка о стоимости выполненных работ и затрат - от 29.06.2018 №6 на сумму 474 578,78 руб.

К оплате по договору №СГС-01КЛ/17 ООО «Сигма-С» выставлены счет-фактуры:

- от 31.08.2017 №9 на сумму 201 950,65 руб.,

- от 30.09.2017 №14 на сумму 949 319,65 руб.,

- от 30.10.2017 №21 на сумму 923 912,59 руб.,

- от 29.12.2017 №32 на сумму 437 831,47 руб.,

- от 29.06.2018 №21 на сумму 474 578,78 руб.,

Сторонами подписан акт взаимозачета от 30.09.2017 №392 на сумму 34 538,10 руб. (оплата ответчиком по договору №СГС-01КЛ/17).

ООО ПСК «Омега» осуществлена оплата по договору №СГС-01КЛ/17 платежными поручениями:

- от 24.10.2017 №1616 на сумму 201 950,65 руб.,

- от 14.11.2017 №1746 на сумму 914 781,55 руб.,

- от 21.12.2017 №2037 на сумму 700 000 руб.,

- от 12.02.2018 №132 на сумму 223 912,59 руб.,

- от 12.02.2018 №133 на сумму 250 000 руб.,

- от 03.07.2018 №643 на сумму 500 000 руб. 

Согласно локальному сметному расчету №1, стоимость устранения недостатков по договору №СГС-01КЛ/17 составляет 9 165,60 руб. 

В претензии от 05.09.2018 (вх.№1107 от 06.09.2018) ООО «Сигма-С» просило подписать справку о стоимости выполненных работ и затрат от 29.06.2018 №6 и акты о приемке выполненных работ от 29.06.2018 №№ 1, 1, 6, а также оплатить 1 087 049,14 руб. по договору №СГС-01КЛ/17.

Между ООО ПСК «ОМЕГА» (заказчик) и ООО «Сигма-С» (подрядчик) заключен договор подряда от 20.11.2017 №СГС-03КЛ/17 (далее – договор №СГС-03КЛ/17), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по устройству наружных стен на объекте: «10-ый квартал жилого района «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска. Жилой дом № 13» секция тип 3 правая, в соответствии с условиями договора, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1).

Пунктом 1.2 договора №СГС-03КЛ/17 предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 договора №СГС-03КЛ/17, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническим регламентом и иными ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ заказчику.

В пункте 4.1.2 договора №СГС-03КЛ/17 подрядчик обязался обеспечить производство работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией, графиком производства, техническим регламентом, другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, требованиями органов государственного надзора, обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Согласно пункту 1.3 договора №СГС-03КЛ/17, подрядчик обязуется завершить работы и сдать завершенные наружные стены здания, готовые к эксплуатации, в установленном порядке в сроки, предусмотренные договором.

Календарные сроки выполнения работ по договору: начало работ – 20.11.2017, окончание работ – 29.12.2017 (пункт 3.1 договора №СГС-03КЛ/17). Работы на объекте должны быть проведены подрядчиком и сданы заказчику в срок, указанный в пункте 3.1 договора. Сроки начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков строительства, а также сроков оплаты за выполненные работы (пункт 3.2 договора №СГС-03КЛ/17).

Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с утвержденной проектной документацией (пункт 8.1 договора №СГС-03КЛ/17).

Заказчик обязался произвести приемку и оплату работ, выполненных подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 договора (пункт 4.2.4 договора №СГС-03КЛ/17), подписывать акт выполненных работ формы КС-2 в течение 5 рабочих дней с момента предъявления их подрядчиком, либо направить мотивированный отказ от приемки результата работ. В случае непоступления в течение 5 рабочих от заказчика мотивированного отказа от приемки результата работ, акты выполненных работ формы КС-2 считаются принятыми и подлежат оплате заказчиком (пункт 4.2.6 договора №СГС-03КЛ/17).

Согласно пункту 10.1 договора №СГС-03КЛ/17, после окончания работ, входящих в объем обязательств подрядчика по строительству объекта, производится сдача объекта заказчику с оформлением акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик передает заказчику за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному заказчиком подрядчику, в соответствии с обязательствами заказчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (пункт 10.2 договора №СГС-03КЛ/17).

Согласно пункту 10.3 договора №СГС-01КЛ/17, в случае если во время приемки объекта заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных подрядчиком работах или несоответствия их проектной документации, подрядчик устранит их за свой счет в срок, согласованный с заказчиком. При невыполнении подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от подрядчика» возмещения понесенных расходов и других убытков.

Пунктом 5.1 договора №СГС-03КЛ/17 предусмотрено, что заказчик в течение 10 банковских дней с момента подписания оригиналов документов, указанных в пункте 4.2,6 договора, оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетный счет подрядчика, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, пропорционально выполненным работам.

Стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, определяется на основании протокола согласования договорной цены (приложение № 1), составляет 1 191 960 руб., в т.ч. НДС 18% 181 824,41 руб. и является ориентировочной. Оплата производится за фактически выполненные объёмы работ (пункт 2.1 договора №СГС-03КЛ/17).

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 10 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ (пункт 5.2 договора №СГС-03КЛ/17).

Согласно пункту 5.4 договора в редакции протокола разногласий от 05.12.2017, заказчик ежемесячно резервирует 10% стоимости от выполненных работ сроком на 3 месяца с даты подписания последнего акта выполненных работ. 

Согласно пункту 2.3 договора №СГС-03КЛ/17, в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, не учтенных договором и превышении в связи с этим определенной договором цены, подрядчик обязан предупредить заказчика об этом не менее чем за 15 дней до начала выполнения таких работ.

Подрядчик после оформления приемки объекта заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения (пункт 10.4 договора №СГС-01КЛ/17).

В силу пункта 7.1.1 договора №СГС-03КЛ/17, гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по договору.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов, оборудования и работ устанавливается 60 месяцев от даты акта приемки законченного строительством объекта формы №КС-11 (пункт 7.1.2 договора №СГС-03КЛ/17). Пунктом 7.1.3 договора №СГС-03КЛ/17 предусмотрено, что в течение указанного срока подрядчик обязан осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание указанного объекта, а также входящих в него материалов, оборудования и работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчик, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения  заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе подрядчика от устранения дефектов, допущенных по вине подрядчика, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес подрядчика (пункт 7.1.4 договора №СГС-03КЛ/17). При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении экспертизы, с обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной экспертизой вины подрядчика в обнаруженных дефектах, подрядчик возмещает заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы (пункт 7.2 договора №СГС-03КЛ/17).

В силу пункта 10.5 договора №СГС-03КЛ/17, при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 10 дней подписать акт сдачи/приёмки законченного строительством объекта и произвести окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы включая все удержания связанные, с объектом.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента получения претензии (пункт 14.3 договора №СГС-03КЛ/17).

08.08.2018 сторонами с участием заказчика подписан акт приема-передачи строительной готовности.

Сторонами подписаны акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.12.2017 №1 по договору №СГС-03КЛ/17 на сумму 610 148,50 руб.,

К оплате по договору №СГС-03КЛ/17 ООО «Сигма-С» выставлена счет-фактура от 29.12.2017 №33 на сумму 610 148,50 руб.

ООО «Сигма-С» составлены акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.06.2018 №2 по договору №СГС-03КЛ/17 от 29.06.2018 №22 на сумму 664 908,48 руб.

Сторонами подписан акт взаимозачета от 31.12.2017 №634 на сумму 86 895,95 руб. (оплата ответчиком по договору №СГС-03КЛ/17).

Также ООО ПСК «ОМЕГА» осуществлена оплата по договору №СГС-03КЛ/17 платежным поручением от 12.02.2018 №131 на сумму 523 252,55 руб.

12.02.2019 посредством электронной почты ООО «Сигма-С» направило ООО ПСК «Омега» акт о приемке выполненных работ и справку о приемке выполненных работ от 31.12.2018 №2 на сумму 351 327,80 руб.  

В претензии от 05.09.2018 (вх.№1105 от 06.09.2018) ООО «Сигма-С» просило подписать справку о стоимости выполненных работ и затрат от 29.06.2018 №2 и акт о приемке выполненных работ от 29.06.2018 №2, а также оплатить 664 908,48 руб. по договору №СГС-03КЛ/17.

Между ООО ПСК «ОМЕГА» (заказчик) и ООО «Сигма-С» (подрядчик) заключен договор подряда от 11.12.2017 №СГС-05КЛ/17 (далее – договор №СГС-05КЛ/17), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по устройству одинарных и двойных перегородок из ПГП на объекте: «10-ый квартал жилого района «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска. Жилой дом № 13» секция тип 3 правая, в соответствии с условиями договора, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1).

Пунктом 1.2 договора №СГС-05КЛ/17 предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 договора №СГС-05КЛ/17, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническим регламентом и иными ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ заказчику.

В пункте 4.1.2 договора №СГС-05КЛ/17 подрядчик обязался обеспечить производство работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией, графиком производства, техническим регламентом, другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, требованиями органов государственного надзора, обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Согласно пункту 1.3 договора №СГС-05КЛ/17, подрядчик обязуется завершить работы и сдать завершенные наружные стены здания, готовые к эксплуатации, в установленном порядке в сроки, предусмотренные договором.

Календарные сроки выполнения работ по договору: начало работ – 20.12.2017, окончание работ – 17.02.2018 (пункт 3.1 договора №СГС-05КЛ/17). Работы на объекте должны быть проведены подрядчиком и сданы заказчику в срок, указанный в пункте 3.1 договора. Сроки начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков строительства, а также сроков оплаты за выполненные работы (пункт 3.2 договора №СГС-05КЛ/17).

Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с утвержденной проектной документацией (пункт 8.1 договора №СГС-05КЛ/17).

Заказчик обязался произвести приемку и оплату работ, выполненных подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 договора (пункт 4.2.4 договора №СГС-05КЛ/17), подписывать акт выполненных работ формы КС-2 в течение 5 рабочих дней с момента предъявления их подрядчиком, либо направить мотивированный отказ от приемки результата работ. В случае непоступления в течение 5 рабочих от заказчика мотивированного отказа от приемки результата работ, акты выполненных работ формы КС-2 считаются принятыми и подлежат оплате заказчиком (пункт 4.2.6 договора №СГС-05КЛ/17).

Согласно пункту 10.1 договора №СГС-05КЛ/17, после окончания работ, входящих в объем обязательств подрядчика по строительству объекта, производится сдача объекта заказчику с оформлением акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик передает заказчику за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному заказчиком подрядчику, в соответствии с обязательствами заказчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (пункт 10.2 договора №СГС-05КЛ/17).

Согласно пункту 10.3 договора №СГС-05КЛ/17, в случае если во время приемки объекта заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных подрядчиком работах или несоответствия их проектной документации, подрядчик устранит их за свой счет в срок, согласованный с заказчиком. При невыполнении подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от подрядчика» возмещения понесенных расходов и других убытков.

Пунктом 5.1 договора №СГС-05КЛ/17 предусмотрено, что заказчик в течение 10 банковских дней с момента подписания оригиналов документов, указанных в пункте 4.2,6 договора, оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетный счет подрядчика, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, пропорционально выполненным работам.

Стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, определяется на основании протокола согласования договорной цены (приложение № 1), составляет 4 501 372,70 руб., в т.ч. НДС 18% 686 650,07 руб., и является ориентировочной. Оплата производится за фактически выполненные объёмы работ (пункт 2.1 договора №СГС-05КЛ/17).

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 10 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ (пункт 5.2 договора №СГС-05КЛ/17).

Согласно пункту 2.3 договора №СГС-05КЛ/17, в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, не учтенных договором и превышении в связи с этим определенной договором цены, подрядчик обязан предупредить заказчика об этом не менее чем за 15 дней до начала выполнения таких работ.

Подрядчик после оформления приемки объекта заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения (пункт 10.4 договора №СГС-05КЛ/17).

В силу пункта 7.1.1 договора №СГС-05КЛ/17, гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по договору.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов, оборудования и работ устанавливается 60 месяцев от даты акта приемки законченного строительством объекта формы №КС-11 (пункт 7.1.2 договора №СГС-05КЛ/17). Пунктом 7.1.3 договора №СГС-05КЛ/17 предусмотрено, что в течение указанного срока подрядчик обязан осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание указанного объекта, а также входящих в него материалов, оборудования и работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчик, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения  заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе подрядчика от устранения дефектов, допущенных по вине подрядчика, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес подрядчика (пункт 7.1.4 договора №СГС-05КЛ/17). При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении экспертизы, с обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной экспертизой вины подрядчика в обнаруженных дефектах, подрядчик возмещает заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы (пункт 7.2 договора №СГС-05КЛ/17).

В силу пункта 10.5 договора №СГС-05КЛ/17, при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 10 дней подписать акт сдачи/приёмки законченного строительством объекта и произвести окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы включая все удержания связанные, с объектом.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента получения претензии (пункт 14.3 договора №СГС-05КЛ/17).

ООО «Сигма-С» составлен акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.06.2018 №1 по договору №СГС-05КЛ/17 на сумму 1 795 119,65 руб.

К оплате по договору №СГС-01КЛ/17 ООО «Сигма-С» выставлена счет-фактура от 29.06.2018 №23 на сумму 1 795 119,65 руб.

С сопроводительным письмом от 19.03.2018 №176 (вх.№378 от 19.03.2018) ООО «Сигма-С» направило ответчику справки по форме КС-2 от 31.01.2018 №№1, 2, 6.

С сопроводительным письмом от 02.07.2018 №194 (вх.№882 от 02.07.2018) истец направил ООО ПСК «Омега» справки по форме КС-2: от 08.05.2018 №1, от 08.05.2018 №2, от 08.05.2018 №6, от 25.06.2018 №1, акт на дополнительные работы по утеплению деформационного шва, локальный сметный расчет на монтаж и демонтаж перемычек, справку по форме КС-3 от 02.07.2018.

В претензии от 05.09.2018 (вх.№1106 от 06.09.2018) ООО «Сигма-С» просило подписать справку о стоимости выполненных работ и затрат от 29.06.2018 №1 и акт о приемке выполненных работ от 29.06.2018 №1, а также оплатить 1 795 119,65 руб. по договору №СГС-05КЛ/17.

Согласно локальному сметному расчету №2, стоимость устранения недостатков по договору №СГС-05КЛ/17 составляет 180 675,60 руб. 

В письме от 21.09.2018 №560 ООО ПСК «Омега» на претензии истца от 05.09.2018 сообщило о недостатках выполненных работ.

С сопроводительным письмом от 26.09.2018 №574 ответчик направил истцу полученные от заказчика (Красноярский краевой фонд жилищного строительства) замечания по качеству выполненных работ, предложив устранить их. Ответчик указал, что в случае неустранения недостатков, со стоимости выполненных работ будет удержано 353 830,89 руб. стоимости устранения недостатков, согласно прилагаемому локальному сметному расчету.

К оплате услуг генподряда ООО ПСК «Омега» передало ООО «Сигма-С» счет-фактуру от 31.10.2018 №183 на сумму 81 536,59 руб. с сопроводительным письмом от 23.01.2019 №26.

В претензии, направленной в адрес ООО «Сигма-С» 15.03.2019, согласно квитанции ФГУП «Почта России», ООО ПСК «Омега» просило оплатить 81 536,59 руб. за услуги генподряда по договорам.

При таких обстоятельствах ООО «Сигма-С» по первоначальному иску заявлено о взыскании 2 996 501 руб. 29 коп. задолженности по договорам подряда от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17 (1 126 877,06 руб.), от 20.11.2017 № СГС-03КЛ/17 (255 180,17 руб.), от 11.12.2017 № СГС-05КЛ/17 (1 614 444,06 руб.), ООО ПСК «Омега» по встречному иску просит о взыскании 79 825 руб. 32 коп. задолженности за услуги генподряда по договорам № СГС-01КЛ/17 от 14.08.2017 (15 431,90 руб.), № СГС-03КЛ/17 от 20.11.2017 (10 539,83 руб.), № СГС-05КЛ/17 от 11.12.2017 (53 853,60 руб.).

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе, гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Из материалов дела следует, что отношения сторон основаны на договорах подряда от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17, от 20.11.2017 № СГС-03КЛ/17, от 11.12.2017 № СГС-05КЛ/17, являющихся по своей правовой природе договором строительного подряда, и регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

 Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как следует из представленных в материалы дела актов приемки выполненных работ и пояснений сторон, в рамках договоров истцом выполнены, а ответчиком приняты работы.

С учетом частичной оплаты ответчика, осуществленных зачетов встречных однородных требований, подтвержденных материалами дела и не оспоренных сторонами, истец ООО «Сигма-С» числит за ответчиком 2 996 501 руб. 29 коп. задолженности, из них по договору подряда от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17 в размере 1 126 877,06 руб., по договору подряда от 20.11.2017 № СГС-03КЛ/17 в размере 255 180,17 руб., по договору подряда от 11.12.2017 № СГС-05КЛ/17 в размере 1 614 444,06 руб.

ООО ПСК «Омега» в контррасчете к иску пояснило, что задолженность с учетом гарантийного удержания по договору от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17 составляет 1 126 877,06 руб., по договору №СГС-03КЛ/17 – 255 180,17 руб., по договору №СГС-05КЛ/17 – 1 561 754,09 руб. 

Судом установлено, что выполнение ООО «Сигма-С» работ и предъявление их к приемке ООО ПСК «Омега» в порядке, предусмотренном договором, подтверждено материалами дела.

Так, по договору №СГС-01КЛ/17, сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 3 437 663,25 руб. С сопроводительным письмом от 02.07.2018 №194 ООО «Сигма-С» направлена составлены акты о приемке выполненных работ по договору №СГС-01КЛ/17 от 29.06.2018 №1 справка о стоимости выполненных работ и затрат - от 29.06.2018 №6 на сумму 474 578,78 руб. Таким образом, стоимость выполненных работ составила 3 912 232,03 руб. С учетом частичной оплаты ООО ПСК «Омега» в размере 2 825 182,89 руб., задолженность по договору №СГС-01КЛ/17 составила 1 126 877,06 руб. Доказательства оплаты указанной суммы задолженности в материалах дела отсутствуют.

По договору №СГС-03КЛ/17 сторонами подписаны акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.12.2017 №1 по договору №СГС-03КЛ/17 на сумму 610 148,50 руб. 12.02.2019 посредством электронной почты ООО «Сигма-С» направило ООО ПСК «Омега» акт о приемке выполненных работ и справку о приемке выполненных работ от 31.12.2018 №2 на сумму 351 327,80 руб.  С учетом частичной оплаты ООО ПСК «Омега» в размере 610 148,50 руб., а также с учетом гарантийного удержания в размере 96 147,63 руб., задолженность по договору №СГС-02КЛ/17 составила 255 180,17 руб.  Доказательства оплаты указанной суммы задолженности в материалах дела отсутствуют.

По договору №СГС-05КЛ/17 ООО «Сигма-С» составлены акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.06.2018 №1 по договору №СГС-05КЛ/17 на сумму 1 795 119,65 руб. Указанные акт и справка переданы ООО ПСК «Омега» с сопроводительным письмом от 02.07.2018 №194 (вх.№882 от 02.07.2018). По мнению суда, с учетом гарантийного удержания в размере 179 511,96 руб., а также признанной сторонами стоимости недостатков выполненных работ в размере 180 675,60 руб., согласно локальному сметному расчету №2, задолженность ООО ПСК «Омега» составляет 1 434 932,09 руб. Доказательства оплаты указанной суммы задолженности в материалах дела отсутствуют.

Истец согласился с расчетом ответчика, выполненным им для определения стоимости устранения недостатков. 

 Довод истца о том, что стоимость устранения недостатков следует вычесть из стоимости гарантийного удержания, отклоняется судом, поскольку данные недостатки выявлены при приемке работ, срок для возврата гарантийного удержания не наступил, в последствии бы заказчик был бы лишен возможности устранить недоставки, выявленные в пределах срока, предусмотренного договором, за счет гарантийного удержания.

При таких обстоятельствах требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в размере 2 816 989 рублей 32 копейки, из них по договору подряда от 14.08.2017 № СГС-01КЛ/17 задолженность в сумме 1 126 877,06 руб., по договору подряда от 20.11.2017 № СГС-03КЛ/17 задолженность в сумме 255 180,17 руб., по договору подряда от 11.12.2017 № СГС-05КЛ/17 задолженность в сумме 1 434 932,09 руб. В удовлетворении остальной части требований суд отказывает.

ООО ПСК «Омега» по встречному иску заявлено о взыскании 79 825 руб. 32 коп. задолженности за услуги генподряда по договорам № СГС-01КЛ/17 от 14.08.2017 (15 431,90 руб.), № СГС-03КЛ/17 от 20.11.2017 (10 539,83 руб.), № СГС-05КЛ/17 от 11.12.2017 (53 853,60 руб.).

Расчет истца по встречному иску судом проверен. Расчет выполнен верно, ответчиком по встречному иску не оспорен.

Учитывая, что доказательства оплаты за услуги генподряда ООО «Сигма-С2 представлены, требование ООО ПСК «Омега» о взыскании 79 825,32 руб. заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Излишне уплаченная истцом государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно часть 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 7 информационного письма от 29.12.2001 №65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» разъяснил, что статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида. 

Встречные требования в рамках настоящего дела являются, по существу, денежными, то есть однородными, и при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по правилам статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Учитывая, что требования сторон по настоящему делу носят однородный характер, суд считает возможным произвести их зачет. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 2 816 989 рублей 32 копейки основного долга, а также 35 708 рублей  расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 983 рубля государственной пошлины, излишне оплаченной по платежному поручению № 188 от 08.10.2018.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 79 825 рублей 32 копейки основного долга, а также 3 193 рубля расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 68 рублей государственной пошлины, излишне оплаченной по платежному поручению № 581 от 20.03.2019.

Произвести зачет сумм основного долга, взысканных по первоначальному и встречному искам и в результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сигма–С» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 2 737 164 рубля, а также 32 515 рублей  расходов по оплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.Н. Мальцева