542/2021-130067(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел.: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-12730/2020

22 июня 2021 года

город Саратов

 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Балаково в месячный срок со дня вступления решения в  

законную силу устранить недостатки выполненных работ по контракту № 0160300011619000043  

от 25.05.2019, а именно: - Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (104,4 руб.): 77% от ФОТ (135,58 руб.) СП (67,79 руб.): 50% от ФОТ (135,58 руб.); 

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная  

полиакрилатная; - Состав грунтовочный глубокого проникновения; 

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью  

отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (28,57 руб.): 79% от ФОТ (36,16 руб.) СП (18,08 руб.): 50% от ФОТ (36,16 руб.); 

- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых  

плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 

НР (372,49 руб.): 105% от ФОТ (354,75руб.) СП (195,11 руб.): 55% от ФОТ (354,75 руб.); 

- Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, белая и цветная, однотонная,  

толщина 9 мм; 

- Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм,  

водостойкая; 

- Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь);  - Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) HР (49,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (52,84 руб.) СП (24,7 руб.): 55% *0,85 от ФОТ (52,84 руб.); 

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная  полиакрилатная;  

- Состав грунтовочный глубокого проникновения; - Снятие дверных полотен НР (4,72 руб.): 82% от ФОТ (5,76 руб.) СП (3,57 руб.): 62% от ФОТ (5,76 руб.) 

- Установка дверных полотен: наружных кроме балконных  

НР (13,19 руб.): 82% от ФОТ (16,09 руб.)  СП (9,98 руб.): 62% от ФОТ (16,09 руб.);  - Дверное полотна ПВХ профиля;  

- Очистка помещений от строительного мусора 

НР (11,69 руб.): 78% от ФОТ (14,99 руб.)  СП (7,5 руб.): 50% от ФОТ (14,99 руб.);  

Оконный проем - Снятие наличников (снятие уголков, прим.) НР (2,19 руб.); 82% от ФОТ (2,67 руб.) СП (1,66 руб.): 62% от ФОТ (2,67 руб.); 

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью  

отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  НР (14,28 руб.): 79% от ФОТ (18, 08 руб.)  СП (9,04 руб.): 50% от ФОТ (18,08 руб.);  - Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (153,94 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (162,9 руб.) СП (76,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (162,9 руб.); 

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная  полиакрилатная;  

- Состав грунтовочный глубокого проникновения; 

- Установка уголков ПВХ на клее (наличников, прим.)  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1.25)  HP (5,69 руб.): 118% *0, 9 от ФОТ (5,26 руб.)  

СП (2,82 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (5,26 руб.); - Наличники из ПВХ, ширина 50 мм; 

Помещение с левой стороны от входного тамбура  - Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью  

отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм НР (36,36 руб.): 79% от ФОТ (46,03 руб.) СП (23,02 руб.): 50% от ФОТ (46,03 руб.); Окраска фасада: - Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗМП=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (860 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (910,05 руб.)  

СП(425,45 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (910,05 руб.); 

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих  отделочных работ  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (4928,11 руб.): 122%Ю,9 от ФОТ (4488,26 руб.)  СП (3052,02 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4488,26 руб.);  - Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами,  

окрашенные; - Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; Окраска стены сцены: - Окраска водно-дисперсионнными акриловыми составами улучшенная: по штукатурку стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1;25 к расх.; ЗП=1,25; ТЗМ=1,25) НР (187,23 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (198,13 руб.) СП (92,63 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (198,13 руб.); 

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная  полиакрилатная;  

- Состав грунтовочный глубокого проникновения; Общестроительные работы: 

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков  отбойных пневматических (прм. к бетон.)  

HP (354,94 руб.): 104%от ФОТ (341,29 руб.) 

СП (204,77 руб.): 60% от ФОТ (341,29 руб.);  - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных  

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (514,5 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (402,58 руб.) СП (325,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (402,58 руб.); 

- Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;  - Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1  

НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ; 

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;  - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных  

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (13,46 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (10,53 руб.)  СП (8,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (10,53руб.);  - Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;  

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1  НР 142% от ФОТ  

СП 95% от ФОТ; 

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;  - Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных  

материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (11,49 руб.): 142%*0,9 от ФОТ(8,99 руб.)  СП (7,26 руб.): 95% *0,85 от ФОТ (8,99 руб.);  - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных  

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (10,58 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (8,28 руб.)  СП (6,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (8,28 руб.);  - Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;  

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1  НР 142% от ФОТ  

 СП 95% от ФОТ; 

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;  

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных  мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (20,19 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (15,8 руб.)  СП (12,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (15,8 руб.);  - Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;  

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1  НР 142% от ФОТ  

СП 95% от ФОТ; 

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;  Площадка:  

- Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном  монтажном слое толщиной 50 мм  

НР (45130,36 руб.): 104% от ФОТ (43394,58 руб.) СП (26036,75 руб.): 60% от ФОТ (43394,58 руб.); - Разборка бортовых камней: на бетонном основании (прим.) 

НР (213,51 руб.): 104% от ФОТ (205,3 руб.)  СП (123,18 руб.); 60% от ФОТ (205,3 руб.);  - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (308,34 руб.): 142% от ФОТ (217,14 руб.)  СП (206,28 руб.): 95% от ФОТ (217,14 руб.);  - Песок природный для строительных: работ средний;  

- Портландцемент с минеральными добавками М300 Д20 (ЦЕМ II 22,5Н);  Розлив вяжущих материалов  

(ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (5,02 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (3,93 руб.)  СП (3,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3,93 руб.);  - Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;  

- Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ= 1,25)  

НР (4357,16 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (3409,36 руб.) СП (2753,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3409,36 руб.); 

- Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером  

цементе; - Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (264,53 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (206,99 руб.)  

СП (167,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (206,99 руб.); - Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3; 

- Демонтаж наружной облицовки поверхности цоколя сайдингом металлическим с  полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (прим.)  

(ОЗП=1,15; ЭМ=125 к расх.; ЗПМ=1,25; ТМЗ=1,25;  

,ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,64; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,64) 

НР (2290,12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2423,41 руб.)  СП (1132,94 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2423,41 руб.);  Устройство теплоизоляции по профилированному настилу:  

- Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм НР (480,97 руб.): 83% от ФОТ (579,48 руб.) СП (376,66 руб.): 65% от ФОТ (579,48 руб.); 

- Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов  насухо  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (12663,94 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (14071,04 руб.)  СП (8372,27 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (14071,04 руб.);  - Плиты минераловатные, на синтетическом связующем, теплоизоляционные, П-175;  

- Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых  материалов)  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (774,26 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (860,29 руб.)  

СП (511,87 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (860,29 руб.); 

- Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых  материалов)  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (774,26 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (860,29 руб.)  

СП (511,87 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (860,29 руб.); - Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм; - Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 

 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (1687,64 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1562,63 руб.)  СП (863,35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1562,63 руб.);  - Раствор готовый кладочный, цементный, М100;  - Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или  

исключать к расценке 12-01-017-01 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (65,11 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (60,29 руб.)  

СП (33,31 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (60,29 руб.); 

- Раствор готовый кладочный, цементный, М100;  Огнезащита перекрытий:  

- Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и  дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (917,12 руб.): 100% *0,9 от ФОТ (1019,02 руб.)  СП (606,32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1019,02 руб.);  - Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции  

конструкций из металла, толщина 20-200 мм; 

- Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора  строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  

НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ; 

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне  карьера на расстояние: I класс груза до 15 км  

НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ; 

Устройство верхней части монолитного пояса:  - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок  

НР (12,02 руб.): 77% от ФОТ (15,61 руб.) СП (7,81 руб.): 50% от ФОТ (15,61 руб.); 

- Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (1481,13 руб.): 122% *0,9 от ФОТ (1348,93 руб.)  СП (917,27руб.): 80%*0.85 от ФОТ(1348,93руб.);  - Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100;  

- Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и  

дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (32,72руб.): 100%*0,9 от ФОТ(36,36 руб.) 

СП (21,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (36,36 руб.);  - Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе  

базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм; - Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (24,75 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (27,5 руб.) СП (16,36 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (27,5 руб.); 

- Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки  35x35 мм;  

- Дюбель фасадный Sormat S-UF 10x115 мм; 

- Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором  по камню и бетону: простая стен  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (165,91 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (175,57 руб.)  СП (82,08 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (175,57руб.);  Опорные стойки эстрады:  

- Укладка лаг: по кирпичным столбикам (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (322,28 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (291,13 руб.)  СП (185,6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (291,13 руб.);  - Раствор готовый кладочный, цементный, М75;  Заполнение дверных проемов:  

- Снятие дверных полотен НР 82% от ФОТ  СП 62% от ФОТ - Снятие наличников  НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ; - Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатура в откосах НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ; 

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь  

проема более 3 м2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (73,81 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (69,5 руб.) СП (37,22 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (69,5 руб.); 

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь  

проема до 3 м2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (852,28руб.): 118%*0,9 от ФОТ (802,52 руб.) СП (429,75 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (802,52 руб.); 

- Блоки дверные внутренние: двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны,  

тонированные; 

- Блоки дверные внутренние: однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны,  

тонированные; 

- Блоки дверные по старым образцам с криволинейным верхом, из массива древесины  

хвойных пород, филенчатые, двупольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов,  

площадь 4,5 м2; 

- Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны,  

тонированные; 

- Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и  

защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2, ДС 19-  

9ГТ, площадь 1,67 м2; - Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (208,59 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (196,41 руб.) СП (105,18 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (196,41 руб.); 

- Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм;  - Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм;  

- Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм;  - Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм;  

- Разборка облицовки из гипсокартонных листов (металлического профиля): стен и  

перегородок (прим.) НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ; Цоколь: 

- Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и  

дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (99,41 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (110,46 руб.)  СП (65,72 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (110,46 руб.);  - Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе  

базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм; 

- Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (75,19 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (83,64 руб.)  СП (49,71 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (83,54 руб.);  - Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки  

35x35 мм; - Дюбель фасадный Sorrnat S-UF 10x115 мм; 

- Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (478,1 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (505,93 руб.)  СП (236,52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (505,93 руб.);  Усиление верхней части стены танцевального зала:  

- Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором НР (142,17 руб.): 86% от ФОТ (165,31 руб.) СП (115,72 руб.): 70% от ФОТ (165,31 руб.); 

- Раствор готовый кладочный, цементный, М100;  - Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях  

горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром; 25 мм НР (22,01 руб.): 110% от ФОТ (20,01 руб.) СП (14,01 руб.): 70% от ФОТ (20,01 руб.); 

- На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке  46-03-002-02  

НР (0,76 руб.): 110% от ФОТ (0,69 руб.) СП (0,48 руб.): 70% от ФОТ (0,69 руб.); - Усиление конструктивных элементов; стен кирпичных стальными тяжами НР (100,36 руб.): 110% от ФОТ (91,24 руб.) СП (63,87 руб.): 70% от ФОТ (91,24 руб.); Металлические конструкции: 

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (964,39 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (1190,6 руб.)  СП (708,41 руб.): 70%*0,855 от ФОТ (1190,6 руб.);  

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (332,24 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (410,17 руб.)  СП (244,05 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (410,17 руб.);  Люки металлические:  

- Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (31,9 руб.): 118%*0,9 от ФОТ(30,04 руб.) 

СП (16,09 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (30,04 руб.);  - Люки металлические противопожарные (Е160);  - Замки для запирания металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ;  

Элементы кровли: - Ограждение кровель перилами  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (42,88 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (39,7 руб.) СП (21,93 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (39,7 рб.); 

- Ограждение кровельное (длиной 1860мм) Цена: 1950/1, 18/7,13;  - Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой  

стали (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (8,82 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (10,89 руб.) СП (7,87 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (10,89 руб.); - Переходной мостик (длиной 1250 мм) 2660/1, 18/7, 13; - Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

HP (108,06 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (133,41 руб.)  СП (96,39 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (133,41 руб.);  - Лестница кровельная стеновая Л-455х1860 Цена: 2550/1, 18/7, 13;  

- Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО Цена: 190/1, 18/7,13;  - Кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР Цена: 220/1, 18/7,13;  

- Кронштейн к стене для лестницы Л-КС Цена: 830/1, 18/7,13; 

- Кронштейн подвесной для лестницы Л-КП Цена: 220/1, 18/7, 13;  

- Поручень для лестницы Л-ПО Цена: 1220/1,18/7,13; - Монтаж снегозадержателя: уголкового (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (16,04 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (14,85 руб.)  СП (8,2 руб.): 65%*0,85 от ФОТ(14,85руб.);  - Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150/3000 Цена: 1980/1,1 8/7, 13;  

- Устройство желобов: подвесных (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (125,51 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (116,21 руб.) СП (64,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (116,21 руб.); - Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет); - Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет); - Заглушка желоба MП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет); - Устройство металлической водосточной системы: колен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (11,4 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (10,56 руб.)  СП (5,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ(10,56 руб.);  - Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет);  

- Устройство металлической водосточной системы: воронок (ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (4,3 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (3,98 руб.)  СП (2,2 руб.): 65% *0,85 от ФО Г (3,98 руб.);  -Воронки выпускные МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет);  

- Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (ОЗП=1,15: ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (8,55 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (7,92 руб.)  СП (4,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (7,92 руб.);  - Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет);  

- Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет); - Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) HP (389,73 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (455,83 руб.) СП (251,85 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (455,83 руб.); 

- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А- I, диаметр 12 мм;  

- Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной  прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм;  

- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм; Водопровод: - Установка смесителей 14 in (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25) 

HP (17,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ(15,49 руб.)  СП (10,93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (15,49 руб.);  

- Дюбели распорные с гайкой; 

- Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным  переключателем, с латунными маховичками, штангой;  

- Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм; - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (5,28 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (4,58 руб.)  СП (3,23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4,58 руб.);  - Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 25 мм;  

- Установка фильтров диаметром: 25 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1.25; T3M=1,25) 

HP (9,9 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (8,59 руб.)  СП (6,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (8,59 руб.);  - Фильтры для очистки воды, ФММ-25, муфтовые;  

Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (9,56 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (13,28 руб.)  СП (6,77руб.): 60%*0,85 от ФОТ (13,28 руб.);  - Штуцеры, длина 200 мм;  

- Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (11,47 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (9,96 руб.)  СП (7,03 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9,96 руб.);  - Установка кранов поливочных диаметром; 25 мм  

(ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (3,82 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (3,32 руб.)  

СП (2,34 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (3,32 руб.)  

- Рукав поливочный, диаметр 25 мм; - Рукав поливочный, диаметр 25 мм; - Кран водоразборный для раковин и моек, латунный, настенный, полированный; - Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный полированный КВ-20; 

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных  

труб диаметром: 80 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; .ТЗМ=1,25) НР (151,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (131,4 руб.) СП (92,7 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (131,4 руб.); 

- Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные о резьбой, обыкновенные,  

номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм; 

- Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина  

стенки 89x6-76x5 мм 

- Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм,  

наружный диаметр и толщина стенки 89x6,0 мм; 

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных  

труб диаметром; 65 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=125 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,23) НР (924,31 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (802,35руб.) СП (566,06 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (802,35 руб.); 

- Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой; обыкновенные,  

номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм; 

- Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65x50 мм,  

наружный диаметр и толщина стенки 76x6-57x5 мм; 

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроаодных оцинкованных  

труб диаметром: 50 мм НР (392,08 руб.): 128% от ФОТ (306,31 руб.) СП (254,24 руб.): 83% от ФОТ (306,31 руб.); 

- Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой; обыкновенные,  

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ; 

- Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2),  

номинальный диаметр 15 мм; 

- Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2);  

номинальный диаметр 15 мм; - Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (ОЗП=1,15) НР (26,44 руб.): 128% от ФОТ (20,66 руб.) СП (17,15 руб.): 83% от ФОТ (20,66 руб.); - Установка моек: на одно отделение (ОЗП=1.15: ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗМ=1,25) НР (20,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (17,68 руб.) СП (12,47 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (17,68 руб.); 

- Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной  

чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800x600x222 мм; - Шкаф-стол под мойку 5М1 "Афина” Цена:2360/7, 13/1, 18 НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ; - Установка писсуаров: настенных (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПM=1,25; T3M=1,125) НР (11,03 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (10,36 руб.) СП (7, 31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (10,36 руб.); 

- Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со  

встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в  

звукоизоляционном стиропоровом кожухе; - Установка трапов диаметром: 50 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (36,53 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (31,71 руб.) СП (22,37 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (31,11 руб.); 

- Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-50,  

размер 260x140x110 мм (в экспортном исполнении); - Установка трапов диаметром: 100 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (10,58 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (9,18 руб.) СП (6,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9,18 руб.); 

- Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т- 

100М, размер 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые; Низковольтное оборудование: 

- Темнитель зрительного зола мощностью: 30 кВт  

НР (130,38 руб.): 95% от ФОТ (137,24 руб.) СП (89,21 руб.): 65% от ФОТ (137,24 руб.); - Темнитель света ТСЗ-5DR 

НР 95% от ФОТ  СП 65% от ФОТ;  - Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт  

HP (78,59 руб.): 95% от ФОТ (82,73руб.) СП (53,77 руб.): 65% от ФОТ (82,73 руб.) - Пульт управления ТС-1; - Ящик с понижающим трансформатором НР (10,99 руб.): 95% от ФОТ (11,67 руб.) СП (7,52 руб.): 65% от ФОТ (11,67 руб.); - Прожектор: мощностью до 3 кВт НР (793,61 руб.): 95% от ФОТ (835,38 руб.) СП (543 руб.): 65% от ФОТ (835,38 руб.); - Светофильтр стеклянный (красный, синий, зеленый) 

НР 95% от ФОТ   СП 85% от ФОТ  - Прожектор театральный Spot-1100  

HP 95% от ФОТ 

 СП 85% от ФОТ;  - Светильник театральный 4x150Вт СТ-4-500  

НР 95% от ФОТ  СП 65% от ФОТ;  - Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ  

НР (797,23 руб.): 95% от ФОТ (839.19 руб.) СП (545,47 руб.): 65% от ФОТ (839,19 руб.); - Светильник театральный 4x150Вт СТ-4-150 

НР 95% от ФОТ  СП 65% от ФОТ;  - Светильник театральный СВТГ-05  

НР 95% от ФОТ  СП 65% от ФОТ;  

- Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые  

галогенные КГ 220-1000-5; 

- Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые  

галогенные КГ 220- 230-500; - Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-300; Прочие изделия: - Электрополотенце НР (48,46 руб.): 95% от ФОТ(48,9 руб.) СП (31,79руб.): 65% от ФОТ(48,9 руб.); 

- Сушилка для рук: в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком,  

мощностью 1,5 кВт; - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д, НР (17,24 руб.): 128% от ФОТ (13,47 руб.) СП (11,18 руб.): 83% от ФОТ (13,47 руб.); - Поручень для крепления ППС-3 (левый); - Настенный поручень для раковины, верхний ПСС-2; - Настенный поручень для сифона раковины, нижний ПСС-3; - Откидной поручень для унитаза, ПОП-1; - Зеркало поворотное, антивандальное; Прочие работы: - Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм (ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (27,52 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (29,12 руб.) СП (13,61 руб.): 55% *0,85 от ФОТ (29,12 руб.); - Вазы цементные гладкие, высота до 500 мм; - Установка контейнеров на готовое основание (прим.) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭМ=1.25; ТЗМ=1,25) НР (1372,14 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1073,66 руб.) СП (866,98 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1073,66 руб.); - Контейнер объемом 0,5 мЗ НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Маm  

толщ. 60 мм. Применительно (ОЗП=1,15, ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (363,98 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (404,42 руб.)  

СП (240,63 руб.): 70% *0,85 от ФОТ (404,42 руб.); 

- Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, гидрофобизированные,  

фольгированные, толщина 60 мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Tex Mam  

толщ. 60мм . Применительно НР (275,97 руб.): 100% от ФОТ (275,97 руб.) СП (193,18 руб.): 70% от ФОТ (275,97 руб.); 

- Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, гидрофобизированные,  

фольгированные, толщина 60 мм; 

- Проволока стальная низкоуглёродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; 

- Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит  

теплоизоляционных с пределом огнестойкости 2,0 часа. Применительно (комплексная огнезащита  

"МБф-60" с пределом огнестойкости El 30) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25) HP (718,24 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (798,04 руб.) СП (474,83 руб.): 70%*0,65 от ФОТ(798.04руб.) 

- базальтовый рулонный фольгированный материал МБФ-7 толщ. 7 мм и жаропрочная  

мастика) Цена: 336/7,13 НР 100% от ФОТ СП 70% от ФОТ; 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Мam  

толщ. 60 мм 139,87=165,88 -0,05x519,80 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (308,64 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (342,93 руб.) СП (204,04 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (342,93 руб.); 

- Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, гидрофобизированные,  

фольгированные, толщина 60 мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; 

- Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит  

теплоизоляционных с пределом огнестойкости 2,0 часа. Применительно (комплексная огнезащита  

"МБФ-60" с пределом огнестойкости EI 30) НР (674 руб.); 100%*0,9 от ФОТ 2 868,75=9992,61-121х26,10-0,064х7590,00-6х580,00 НР (585,71 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (650,79 руб.) СП (397,22руб.): 70%*0,85 от ФОТ(650,79 руб.); 

- базальтовый рулонный фольгированный материал МБФ-7 толщ. 7мм и жаропрочная  

мастика) Цена: 336/7,13 НР 100% от ФОТ СП 70% от ФОТ; 

- Детали к асбестоцементным листам волнистым: обыкновенного профиля, коньковые К-1 и  

К-2; - Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т НР (85,96 руб.): 128% от ФОТ (67,16 руб.) СП (55,74 руб.): 83% от ФОТ (67,16 руб.); 

- Агрегат воздушный отопительный (охладительный) с водяным теплообменником серия  

AOВ 45, расход воздуха 3850 м3/ч, мощностью 255 Вт; 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами RОCRWOLL Тех Маm  

толщ. 80мм .Применительно 139,87=185,86-0,05х519,80 (ОЗП=1,15: ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (161,77руб.): 100%*0,9 от ФОТ(179,74 руб.) СП (106,95 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (179,74 руб.); 

- Маты минераловатные кэшированные фольгой; марка 'Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 80  

мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Tex Mam  

толщ. 80мм. Применительно 139,87 = 165.86 - 0.05 х 519,80 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (12,77руб.): 100%*0,9 от ФОТ (14,19 руб.) 

- Маты минераловатные кэшированные фольгой; марка "Тех мат» ROCKWOOL, толщиной:  

80 мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая розного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Мат  

толщ. 80 мм. Применительно. 139,87=165,86-0,05х519,80 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ХПМ=1,25, ТЗМ=1,25) HP (6,38 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (7,09 руб.) CП (4,22 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (7,09 руб.); 

- Маты минераловатные кэшированные фольгой, марка «Тех мат»  ROCKWOOL, толщиной:  

80 мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм  НР 100% от ФОТ   

СП 70% от ФОТ; 

- Маты минераловатные кэшированные фольгой; марка 'Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 80  

мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; 

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Маm  

толщ. 80мм. Применительно. 139,87= 185.86 - 0,05 х 519,80  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (21.29 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (23,65 руб.) СП (14,07 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (23,65 руб.); 

- Маты минераловатные кэшированные фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной:  

80 мм; 

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0  

мм; Теплоснабжение: 

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб  

диаметром: до 40 мм  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (425,3 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (369,18 руб.) 

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- 

БСт4пс, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм; 

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- 

БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ; 

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- 

БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм; 

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- 

БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм HP 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ; 

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- 

БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм; 

- Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2";  - Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 3/4";  - Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и  

водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм;  

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб  

диаметром: 50 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; T3M=1,25) HP (80,66 руб.): 128%*0.9 от ФОТ(70,02 руб.) СП (49,4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (70,02 руб.); 

- Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и  

водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм;  

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб  

диаметром: 80 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) HP (212,90руб.): 128%*0,6 pm ФОТ(184,86 руб.) СП (130,42 руб.): 83%0,85 от ФОТ (184,86 руб.); 

- Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами дли отопления и  

водоснабжения г наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм;  

- Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на  

трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  (ОЗП=1,15;ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (107,87 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (93,72 руб.)  СП (66,12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (93,72руб.)  - Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный  

диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами; 

- Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный  диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами;  

- Установка вентилей, задвижек; затворов, клапанов обратных, кранов проходных йа  

трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (63,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (55,52 руб.)  СП (39,17 руб.): 83%‘0,05 от ФОТ (55,52 руб.);  - Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный  

диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами; 

- Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты);  - Анкер-шпилька М12x115/20;  

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (13,23 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (16,33 руб.)  СП (9,72 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (16,33руб.);  - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раскх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (13,71 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (16,93 руб.)  СП (10,07 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (16,93 руб.);  - Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на  

синтетическом связующем (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (22,52 руб.):100%*0,9 от ФОТ (25,02 руб.)  СП (14,89 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (25,02 руб.);  - Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на  

синтетическом связующем (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; T3M=1,25) HP (164,81 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (205,34 руб.) СП (122,18 руб.):. 70%*0,85 от ФОТ (205,34 руб.); 

- Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем,  кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 18 мм, толщина 30 мм;  

- Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем,  

кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 30 мм;  

- Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем,  

кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 30 мм;  

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем,  

кешированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 30 мм;  

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем,  

кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 30 мм  

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, Hi синтетическом связующем,  

кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 30 мм; 

- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25) HP (528,87 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (587,63 руб.) СП (349,64 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (567,63руб.); - Фольга алюминиевая для тепло-и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм; Система вентиляции: 

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм  (ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ= 1,25)  

HP (48,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (42, 08 руб.) СП (29,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (42,08 руб.); 

- Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип  

КПС-1 (90), размер 400x400 мм; 

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.) СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.); - Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали, размер 800x600 мм; 

- Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону,  

массой до 20 кг (ОЗП= 1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ= 1,25; ТЗМ= 1,25) НР (57,97 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (50,32 руб.) СП (35,5 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (50,32 руб.); Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического;  

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм  

НР (48,48 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (42,08 руб.)  СП (29,69 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (42,08 руб.);  - Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип  

КПС-1 (90), размер 400x400 мм; 

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (12,89 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (11,19 руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11,19 руб.);  - Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали размер 800х600 мм;  

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (48,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (42,08 руб.)  СП (29,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (42,08 руб.);  - Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип  

КПС-1 (90), размер 300x300 мм; 

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  (ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);  - Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали, размер 600x600 мм;  

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ= 1,25) 

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,  

РВ-1, размер 100x200 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)  СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (22,38 руб.);  Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым;  

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручкой регулировкой периметром до 1600 мм  

НР (48,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (42,08 руб.)  СП (29,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (42,08 руб.);  - Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип  

КПС-1 (90), размер 400x400 мм; - Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);  - Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали, размер 700x400 мм;  

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200x400  мм  

НР (49,77руб.): 128% от ФОТ(38,88 руб.) СП (32,27 руб.): 83% от ФОТ (38,88 руб.); Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым; - Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25) 

 HP (68,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (59.19 руб.)  СП (41,76 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (59,19 руб.)  - Вентиляторы центробежные: Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт;  

- Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР(47,38 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (41,13 руб.)  СП (29,02 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (41,13 руб.);  - Вентиляторы канальные ВКП 40 20 4Е, мощность 0,33 кВт;  

- Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм (ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (15,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (13,19 руб.)  СП (9,31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (13,19 руб.);  - Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000;  

- Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой,  размер 400x200 мм;  

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,  

РВ-1, размер 200x100 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1.25) 

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)  СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (22,38руб.);  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,  

PB-I, размер 100x100 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100x400  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ= 1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)  СП (15,79 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (22,38 руб.)  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым;  

- Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т 

НР (45,71 руб.): 128%"(0б9) от ФОТ (35,71 руб.)  СП (29,64 руб.): 83%*(0б85) от ФОТ (35,71 руб.);  

- Вентиляторы канальные: ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт; - Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм 

НР (11,84 руб.): 128%*(0б9) от ФОТ (9,25 руб.)  СП (7.68 руб.): 83%*(0б85) от ФОТ (9,25 руб.);  - Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 160М, диаметром 160  

мм; - Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР(51,56 руб.): 128%*0,9 от ФОТ(44,76 руб.) 

СП (31,58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (44,76 руб.);  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,  

РВ-1, размер 150x100 мм; - Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм 

НР (225,18 руб.): 128%*(0б9) от ФОТ (175,92 руб.)  СП (146,01 руб.): 83%*(0б85) от ФОТ (175,92 руб.);  - Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной  

стали, диаметр патрубка 500 мм; - Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (144,41 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (125,36 руб.)  

СП (88,44 руб.): 83%90,85 от ФОТ (125,36 руб.); - Клапаны воздушные К-1 (1003 мм), производительность до 40 тыс. мЗ/час; 

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм  (ОЗП=1,15; ЭМ=1.25красх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (30,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (26,14 руб.)  

СП (18,44 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (26,14 руб.); 

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной  стали, диаметр патрубка 160 мм;  

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  

СП (7,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.); 

- Решетки жалюзийные из алюминиевого профиля с порошковым;  

Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм  (ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (30,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (26,14 руб.)  

СП (18,44 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (26,14 руб.); 

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной  стали, диаметр патрубка 160 мм;  

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  НР (12.89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.); 

- Решетки жалюзийные из алюминиевого профиля с порошковым;  

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм  

НР (35,65 руб.): 128%*0,09 от ФОТ (30,95 руб.)  СП (21,84 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (30,95 руб.);  - Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой фунтованной или оцинкованной стали,  

диаметр патрубка 315 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200x400  мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11.19 руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.)  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,  

РВ-1, размер 250x200 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200x600  мм  

(ОЗЛ=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)  СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ(22,38 руб.);  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,  

РВИ, размер 300x200 мм; 

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200x600  мм;  

(ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11.19 руб.);  - Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием  

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (30,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (26,14руб.)  СП (18,44 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (26,14 руб.);  - Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой фунтованной или оцинкованной стали,  

диаметр патрубка 160 мм; - Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (ОЗП=1,15; эм=1,25 к расх: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)  СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.)  Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым  

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм  

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (60,23 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (52,28 руб.) СП (36,88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (52,28 руб.); 

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной  

стали, диаметр патрубка 160 мм; - Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.) СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (22,38 руб.); 

- Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым  

покрытием, размер 250x600 мм; 

-Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте  

этажа до 4 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)  HP (194,16 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (176,83 руб.) СП (120,24 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (176,83 руб.); - Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 

- Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер  

250x120x88 мм, марка 100. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Балаково в пользу муниципального учреждения  

культуры «Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального района  

Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Красный Кут судебные  

расходы за проведение экспертизы в размере 71 540 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Балаково в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 6 000 руб. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  

апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  

раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.11.2020 11:19:40

 Кому выдана ФИО1