АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ ул. Ленина, д. 60, 

<

...> 8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-9178/2025

10 сентября 2025 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кирьянова Д.А., 

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Юрал-К» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о снижении неустойки, удержанной при расчёте по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 31.05.2023 № ЭА-СМР/8-76/2023 за период с 13.09.2023 по 26.09.2023 и взыскании в связи с этим задолженности в сумме 55 643 руб. 44 коп., задолженности за удержанную в счёт исполнения гарантийных работ в сумме 30 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.03.2024 по 01.07.2025 в сумме 7 257 руб. 70 коп.,  

без вызова сторон, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Уменьшить размер неустойки по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 31.05.2023 № ЭА-СМР/8-76/2023 на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юрал-К» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в сумме 55 643 руб. 44 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.04.2024 по 01.07.2025 в сумме 7 074 руб. 10 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 990 руб. 70 коп.   

В удовлетворении требований в остальной части отказать. Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.   

Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).  

Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.  

Судья Д.А. Кирьянов