Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-8139/2018

07 ноября 2019 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению Федерального казенного учреждения "Управление  автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к открытому акционерному обществу "Труд" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению гарантийных обязательств,  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, Федерального казенного учреждения «Межрегиональная дирекция по  дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного  агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток») (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Производство по исковому заявлению Федерального казенного учреждения  "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к открытому акционерному обществу "Труд"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению гарантийных  обязательств в части продольных и поперечных трещин асфальтобетонного покрытия по  участку км 1035-1055 прекратить.  

Обязать открытое акционерное общество "Труд" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу  устранить на автомобильной дороге А-360 «Лена» Невер-Якутск следующие дефекты:  

- продольные и поперечные трещины на асфальтобетонном покрытии км 853+930,  865+650, объем 1 000 п.м.;  

- занижение не укрепленной обочины на км 869+618, объем 10 куб.м.; 

- просадка земляного полотна на км 1029+020, объем 50 кв.м.;  

- разрушение, отслаивание присыпной обочины на км 1020+015, 1021+750,  1023+470, 1024+020, 1025+750, 1027+020, 1027+110, 1027+129, 1027+174, 1027+275,  1027+289, 1027+336, 1027+341, 1027+381, 1027+400, 1027+421, 1027+494, 1027+507,  1028+020, 1028+200, 1031+314, 1031+600, 1031+970, 1032, 1033, 1034, объем 260 кв.м.;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия на км 1037+025, 1037+034, 1041+036,  1043+900, 1045+400, 1045+750, 1046+400, 1046+550, 1047+250, 1051+420, 1053+000,  1053+200, 1041+036 - 1041+134, 1046+394 – 1046+700, объем 140 кв.м.;  

- разрушения, трещины, отслаивание присыпной обочины на км 1035+170, 1036+367,  1036+370, 1036+475, 1036+480, 1036+700, 1042+300, 1042+320, 1045+400, 1046+300,  1051+130, 1051+720, 1052+500, 1052+630;  

- локальную яму на км 1050+100, объем 10 кв.м.. В остальной части иска отказать. 

Взыскать с открытого акционерного общества "Труд" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Федерального казенного учреждения "Управление автомобильной  магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) расходы по госпошлине в размере 18 000 рублей.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А.В. Гуляева