АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть) 

 Дело А59-3436/2015  

02 ноября 2018 года г. Южно-Сахалинск  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судеб- ного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской  

округ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 694500,  Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, пл.Ленина, 1)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт Изыскания»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 107113,  

<

...>) 

об обязании устранить недостатки по муниципальному контракту, взыскании  неустойки,  

при участии в судебном заседании: 

представитель истца ФИО2, по доверенности №  03/18 от 09 января 2018 года,  

ответчик, третье лицо ГКУ «Дирекция по реализации федеральной программы  социально-экономического развития Курильских островов и Сахалинской области» – представителей не направили,  

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

р е ш и л :

Исковые требования администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт 

Изыскания» безвозмездно устранить недостатки выполненной работы по му- ниципальному контракту № 72/2013 от 04 июня 2013 года на производство  

инженерных изысканий для строительства инженерной инфраструктуры мик- рорайона «Маяк» в пгт. Южно-Курильск, остров Кунашир ( в том числе ПИР),  а именно:  

1. Безвозмездно переделать Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям и провести дополнительные изыскательские работы, в том числе:  

- Программу инженерно-геологических изысканий привести в соответствие с пунктом 4.12 СНиП 11-02-96 («СП 47.13330.201), с пунктом 4.8 СП 11- 105-97,  

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям привести  в соответствие с пунктом 6.3 СНиП 11-02-96 (раздел СП 11-105-97, разделы  4,6 СП 47.13330.2012),  

- Провести рекогносцировочные обследования, отразить в отчете, 

- Графические материалы привести в соответствие с Таблицей 2 ГОСТ  21.302-96 (ГОСТ 21.302-2013),  

- Технический отчет привести в соответствие в пунктом 5.2 СП 11-105- 97,  

- Провести исследование химического состава проб грунта согласно смете, отобрать 1 образец и определить коррозионную активность грунтов по от- 

ношению к стали : к образец (4 пробы), 

- Отобрать по количеству и провести полный комплекс испытаний физи- ко-механических свойств грунта, согласно смете с определением сопротивле- 

ния грунта срезу под нагрузкой 0,6 МПа 1 образец (24 пробы), 

- Выполнить пункт 6.25 СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2012),  

- Привести категории опасности природных процессов в соответствие со  СНиП 22-01-95 («СП 115.13330.2016).  

Безвозмездно переделать Технический отчет по инженерно- геодезическим изысканиям и провести дополнительные изыскательные работы, в том числе:  

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям привести  в соответствие с пунктом 5.13 СНиП 11-02-96 разделы 4, 5 (СП  

47.13330.2012), 

- Использовать координаты пунктов опорной геодезической сети приме- нительно к региону,  

- Привести в соответствие лист 4 Технического отчета и Приложение Е,  приложить фотографии пунктов триангуляции, использованные в качестве ис- ходных пунктов,  

- Привести данные о средстве измерения для составления каталога коор- динат и высок точек съемочного обоснования – тахеометре,  

- Привести схему с обоснованием 17 пунктов и картограмму работ, - Привести в соответствие Приложение Д, 

- Указать, как была создана база для режима RTK, описать технологию  измерений, количество приборов для создания базы,  

- Привести данные, как производилась координация существующих инженерных сетей.  

Безвозмездно переделать Технический отчет по инженерно- 

гидрометеорологическим изысканиям и провести дополнительные изыскательские работы, в том числе:  

- Привести вычисления параметров распределения характеристик стока с  

построением кривой обеспеченности при числе лет до 50; привести кривую  расходоы гидравлическим методом; привести данные определения площади  водосбора; привести определение уклона водосбора; указать гидравлическую  

экстраполяцию привой расходов для русла с поймой до расчетного уровня,  произвести расчет испарений с суши; произвести расчет скорости ветра.  

-Привести Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим  изысканиям в соответствие с пунктом 7.14 СНиП 11-02-96 (Раздел 4,7 СП  47.13330.2012), пунктом 4.37 «СП 11-103-97».  

Безвозмездно переделать Технический отчет по инженерно- 

экологическим изысканиям и провести дополнительные изыскательские работы, в том числе:  

- Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по составу сведений привести в соответствие с требованиями пунктов 8.16,  8.18 СНиП 11-02-96 ( пункт 4.1 СП 11-102-97),  

- Программу инженерно-экологических изысканий привести в соответствие с требованиями пункта 3.9 СП 11-102-97,  

- Отобрать для химического анализа и провести испытание проб почво- грунтов согласно смете по следующим видам работ : «Отбор проб почво- 

грунтов для анализа на загрязненность по химическим показателям : 1 проба  (полевые);  

- по химическим показателям 4 пробы, 

- для бактериологического анализа 2 пробы,  

- на радиоактивное загрязнение 2 пробы, - на гельминтологический анализ 2 пробы». 

- Произвести плановую и высотную привязку точек отбора проб I кате- гории сложности на расстоянии 50-100 м: 1 точка (всего 10 точек),  

- В графической части отчета привести точки отбора почво-грунтов,  - Произвести отбор проб грунта и исследование на радиоактивное за- 

грязнение, - Привести данные маршрутной гамма-съемки, - Выполнить измерение потока радона на участке: 20 точек, 

- Привести данные о состоянии животного мира в соответствии с пунк- тами 4.83, 4.84 СП 11-102-97,  

- Привести данные о состоянии растительного мира в соответствии с  

пунктами 4.78, 4.81 СП 11-102-97. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт  Изыскания» безвозмездно устранить недостатки выполненной работы по му- 

ниципальному контракту № 72/2013 от 04 июня 2013 года на производство  инженерных изысканий для строительства инженерной инфраструктуры мик- 

рорайона «Маяк» в пгт. Южно-Курильск, остров Кунашир ( в том числе ПИР)  в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную си- лу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт  Изыскания» в пользу Администрации муниципального образования «Южно- Курильский городской округ» неустойку в размере 635 089 рублей (шестьсот  

тридцать пять тысяч восемьдесят девять рублей). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт  Изыскания» государственную пошлину в доход государства в федеральный  бюджет в сумме 21 702 рубля (двадцать одна тысяча семьсот два рубля).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт  Изыскания» в пользу Администрации муниципального образования «Южно- Курильский городской округ» возмещение понесенных судебных расходов на  

оплату производства экспертизы в сумме 46 791 рубль (сорок шесть тысяч семьсот девяносто один рубль). 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной  инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.  

Судья О.Н. Боярская