ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №

А33-8697/2023

г. Красноярск

09 сентября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена   «28» августа 2024 года. 

Полный текст постановления изготовлен            «09» сентября 2024 года.

 

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Бутиной И.Н., 

судей: Белан Н.Н., Петровской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Солдатовой П.Д., 

при участии: 

от истца по первоначальному иску - общества с ограниченной ответственностью «Термит»: ФИО1, представителя по доверенности от 01.01.2024 №13, диплом, свидетельство о заключении брака от 05.12.2007, паспорт; ФИО2, директора по доверенности от 09.01.2024 №1-Э, решение №054-п от 21.12.2017, паспорт; 

от ответчика по первоначальному иску - общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Техстрой»: ФИО3, представителя по доверенности от 10.04.2023, диплом, паспорт,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Термит» 

на решение Арбитражного суда Красноярского края 

от 30 ноября 2023 года по делу № А33-8697/2023, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Термит» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Техстрой» (далее – ответчик) о взыскании 15 913 011 рублей 95 копеек неустойки.

В материалы дела от представителя ответчика поступило встречное исковое заявление о взыскании 10 611 586 рублей 96 копеек долга по договору, 818 276 рублей 84 копейки неустойки.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 30.11.2023 исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд. 

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.07.2024 апелляционная жалоба принята к производству, судебное разбирательство откладывалось, в составе суда производились замены.

От сторон в материалы дела поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между истцом и ответчиком.

В указанном ходатайстве стороны просили утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Стороны в указанном ходатайстве также указали, что последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, им известны.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы размещена на официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а также в общедоступном информационном сервисе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в сети «Интернет»).

При изложенных обстоятельствах, в силу статей 121-123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции признает лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе закончить дело мировым соглашением.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 24.02.2004 № 1-О, мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав.

В соответствии с частью 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. При этом одной из задач судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 статьи 2 указанного Кодекса). Учитывая изложенное, не допускается использование примирительных процедур, противоречащее достижению указанных задач судопроизводства.

Таким образом, из смысла и содержания норм, регламентирующих примирительные процедуры, а также исходя из задач судопроизводства в арбитражных судах следует, что утвержденное судом мировое соглашение по своей природе является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой ликвидацию спора о праве в полном объеме.

Как следует из разъяснений в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (пункт 9), мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.

Учитывая изложенное, рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, Третий арбитражный апелляционный суд счел возможным утвердить соглашение как не противоречащее закону и не нарушающее права и законные интересы других лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Красноярского края от 30.11.2023 по настоящему делу подлежит отмене.

Согласно пункту 3 части 9 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции истцу подлежит возврату 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Данная норма носит императивный характер, соответственно, применяется также при распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Поскольку условие мирового соглашения о распределении расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска стороны не привели в соответствие с требованиями вышеназванных норм (по условиям мирового соглашения ответчик обязан оплатить истцу расходы по государственной пошлине в полном объеме, исходя из пропорционального распределения), суд самостоятельно определяет размер государственной пошлины, подлежащей уплате ответчиком исходя из части 3 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая положения подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, истцу из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в размере 51 282 рубля 50 копеек, уплаченная по платежному поручению от 28.03.2023 № 952 за рассмотрение иска, ответчику из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в размере 40 074 рубля 50 копеек, уплаченная по платежному поручению от 04.07.2023 № 36 за рассмотрение встречного иска.

Также истцу подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в размере 1500 рублей, уплаченная по платежному поручению от 14.12.2023 № 74408 за рассмотрение апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 49, 139 - 141, 150, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от «30» ноября 2023 года по делу № А33-8697/2023 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Термит» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Техстрой», на следующих условиях:

1.    «Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 49, 138, 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в рамках дела № А33-8697/2023, находящегося на рассмотрении Третьего арбитражного апелляционного суда (далее – суд), для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления в рамках дела № А33-8697/2023 взаимных требований, вытекающих из договора на выполнение проектных работ по разработке технической документации для строительства объекта: «Аквапарк c гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая – ул. Шахтеров» № АР/2018-06 от 21.06.2018 (далее – договор), в рамках которого общество приняло на себя обязательство разработать и передать заказчику техническую документацию для целей строительства аквапарка с гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая – ул. Шахтеров, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400415:42, общей площадью 59 403,00 кв. м, в том числе 530 кв. м - охранная зона инженерных сетей (далее – объект), в составе: эскизный проект, проектная документация, рабочая документация (далее – работы).  

2.    По настоящему мировому соглашению истец производит окончательной расчёт по акту сдачи-приемки выполненных работ № 12/ДС21 от 27.12.2022 в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей, путём перечисления денежных средств на расчетный счет ответчика, не позднее 10 (десять) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения судом. 

3.    Ответчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения от истца денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, направляет в адрес истца по адресу электронной почты aqua@thermit.su ранее принятую без замечаний и оплаченную истцом рабочую документацию по договору, в электронном виде в формате DWG и PDF и форму ИУЛ, соответствующую ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», подписанные электронно-цифровой подписью единоличного исполнительного органа ответчика (ЭЦП). 

4.    Ответчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения от истца денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, производит корректировку разделов рабочей документации, перечисленной в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения, по параметрам, согласованным сторонами в приложении № 2 к настоящему мировому соглашению. Ответчик вправе досрочно передавать истцу откорректированную рабочую документацию, как в полном объеме, так и в объеме отдельных разделов в соответствии с приложением №1 к настоящему мировому соглашению. 

5.    Откорректированная в соответствии с пунктом 4 настоящего мирового соглашения рабочая документация, передаётся ответчиком истцу путём направления в электронной форме по адресу электронной почты aqua@thermit.su в формате DWG и PDF и форму ИУЛ, соответствующую ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», подписанные электронно-цифровой подписью единоличного исполнительного органа ответчика (ЭЦП). 

Вместе с откорректированной рабочей документацией ответчик направляет истцу в системе ЭДО (1С) подписанные со стороны ответчика электронно-цифровой подписью (ЭЦП) акт сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры. 

6.    Истец в сроки не более 20 (двадцати) календарных дней с даты получения электронного варианта откорректированной рабочей документации, рассматривает рабочую документацию, откорректированную и переданную ответчиком в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего мирового соглашения, и при отсутствии замечаний в системе ЭДО (1С) направляет истцу подписанные со стороны ответчика электронно-цифровой подписью (ЭЦП) акт сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры. 

7.    В случае если корректировка документации выполнена в нарушение условий приложения № 2 к настоящему мировому соглашению, применимым стандартам, обязательным для применения нормативным актам, техническим нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и пр.), либо документация содержит описки, опечатки, в сроки, указанные в пункте 6 настоящего мирового соглашения, истец направляет ответчику мотивированный отказ от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ с указанием замечаний. Мотивированный отказ направляется по адресу электронной почты: derugin@rambler.ru, и desiatkin@mail.ru. 

8.    При отсутствии со стороны ответчика возражений по направленным истцом в соответствии с пунктом 7 настоящего мирового соглашения замечаниям, ответчик не позднее 10 (десяти) календарных дней устраняет соответствующие замечания, и повторно направляет истцу откорректированную в соответствии с пунктом 4 настоящего мирового соглашения, рабочую документацию.  

При исполнении настоящего пункта мирового соглашения, порядок направления рабочей документации ответчиком истцу аналогичен порядку, установленному пунктом 5 настоящего мирового соглашения. Порядок и сроки рассмотрения истцом рабочей документации, полученной от ответчика, аналогичны порядку и срокам, указанным в пункте 6 настоящего мирового соглашения.

9.    Ответственные лица за сдачу-приёмку рабочей документации:

- со стороны истца ФИО2  svi-aqua@thermit.su;

- со стороны ответчика ФИО4 desiatkin@mail.ru.

10.     После утверждения судом настоящего мирового соглашения, внесение истцом каких-либо изменений, корректировок, предложений, дополнений к объёму и качеству рабочей документации по договору, не указанных в приложении № 2 к настоящему мировому соглашение, не допускается.

11.     Общая стоимость работ по разделам рабочей документации, подлежащих корректировке согласно приложению № 1 к настоящему мировому соглашению, с учётом исключения стоимости печати документации, составляет 2 846 487 (два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 78 копеек.

Оплата истцом ответчику производится не позднее 10 (десять) календарных дней с момента подписания истцом актов сдачи-приемки выполненных работ в системе ЭДО (1С), указанных в пункте 6 настоящего мирового соглашения, или истечения установленного пунктом 6 настоящего мирового соглашения срока для подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, если в указанные сроки истцом в адрес ответчика не направлены замечания в порядке, установленном пунктом 7 настоящего мирового соглашения. 

12.     Разделы рабочей документации, не подлежащие корректировке в соответствии с приложениями № 1 и № 2 настоящего мирового соглашения: АР2018-061-РД-11-ВК-1.2, АР2018-061-РД-12-ВК-2.2, АР2018-061-РД-13-ВК-3.1, АР2018-061-РД-31-ПС-1, АР2018-061-РД-31-ПС-2, АР2018-061-РД-32-СОУЭ-1, АР2018-061-РД-32-СОУЭ-2, АР2018-061-РД-34-АППЗ-1, АР2018-061-РД-34-АППЗ-2, АР2018-061-РД-35-СКС-1, АР2018-061-РД-35-СКС-2, АР2018-061-РД-38-СКТВ-1, АР2018-061-РД-38-СКТВ-2,   АР2018-061-РД-39-СКУД-1, АР2018-061-РД-39-СКУД-1, АР2018-061-РД-40-СОС-1, АР2018-061-РД-40-СОС-2, АР2018-061-РД-41-СОТ-1, АР2018-061-РД-41-СОТ-2, АР2018-061-РД-44-МОДИ, общая стоимость работ по которым, с учётом исключения стоимости печати документации, составляет 2 473 203 (два миллиона четыреста семьдесят три тысячи двести три) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20%, и оплачиваются истцом ответчику путём перечисления денежных средств на расчетный счет ответчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты передачи ответчиком истцу указанных разделов в электронном виде в формате DWG и PDF и форму ИУЛ, соответствующую ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», подписанные электронно-цифровой подписью единоличного исполнительного органа (ЭЦП) по адресу электронной почты aqua@thermit.su не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ без замечаний. Вместе с рабочей документацией ответчик направляет истцу в системе ЭДО (1С) подписанные со стороны ответчика электронно-цифровой подписью (ЭЦП) акт сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры.

13.      Оплата истцом за принятую без замечаний рабочую документацию производится за фактические сданные ответчиком объёмы по комплектным разделам в соответствии с приложением № 1 к настоящему мировому соглашению.

14.     Стороны договорились, что разделы документации: АР2018-061-РД-43-АДИС-1, АР2018-061-РД-43-АДИС-2 выполнению не подлежат.

15.     После исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим мировым соглашениям, каждая из сторон считается исполнившей свои обязательства перед другой стороной, вытекающие из договора, в полном объеме и надлежащим образом. Иных материальных требований, вытекающих из договора и связанных с его исполнением, не поименованных в настоящем мировом соглашении, стороны друг к другу не имеют. 

16.     Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

17.     Судебные расходы по уплате государственной пошлины и оплату услуги представителя, стороны несут самостоятельно.

18.     Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трёх) идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны и одни экземпляр для суда. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.

19.     Стороны просят Третий арбитражный апелляционный суд на основании статей 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу № А33-8697/2023 в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

20.     Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

 

                  Приложение № 1

к мировому соглашению от 14.08.2024 

по делу № А33-8697/2023

 

Расчёт стоимости и оплаты работ

МАРКА КОМПЛЕКТА Рабочей документации

Наименование комплекта

рабочей документации

Стоимость разделов по Дополнительному соглашению № 21 подлежащих передаче (руб. с НДС 20%)

Стоимость выполненных работ сданных по Акту №12/ДС21 от 27.12.2022г. подлежащих передаче, (руб. с НДС 20%)

Стоимость работ подлежащих корректировке и сдаче, (руб. с НДС 20%)

Стоимость работ подлежащих сдаче, (руб. с НДС 20%)

Стоимость работ исключаемых из состава работ и не подлежащих оплате, (руб. с НДС 20%)

Итоговая стоимость работ разделов подлежащих сдаче с учетом исключения стоимости печати документации, (руб. с НДС 20%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

СПОЗУ (Генеральный план)

АР2018-061-РД-

1-ГП-1

Общие данные

15 000,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-2

Общие данные. Технические указания.

15 000,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-3

Схема планировочной организации земельного участка. М = 1 : 500

247 500,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-4

Разбивочный план

25 000,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-5

План организации рельефа

98 000,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-6

План дорожных покрытий

50 000,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-7

План благоустройства

35 000,00

АР2018-061-РД-

1-ГП-8

Сводный план инженерных сетей. М = 1 : 500

65 000,00

 

 

2

АР (Архитектурные решения)

 

2.1.

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

2-АР-1.1

Общие чертежи АР. Задание смежным разделам. (согласовываются Заказчиком)

8 288 247,95

АР2018-061-РД-

2-АР-1.2

Задание смежным разделам. Чертежи потолков с обозначением типа и отметки потолка.

205 140,59

АР2018-061-РД-

2-АР-1.3

Задание смежным разделам. Расстановка сантехники и трапов.

126 690,60

АР2018-061-РД-

2-АР-1.4

Задание смежным разделам. Вертикальный транспорт.

325 280,86

АР2018-061-РД-

2-АР-1.5

Лестничные клетки и внутренние лестницы.

105 399,01

АР2018-061-РД-

2-АР-1.6

Стартовые площадки и лестницы в зоне аттракционов

191 419,73

АР2018-061-РД-

2-АР-1.7

Фасады. Развертки фасадных стен. Задание по фасадным системам.

599 710,93

199 710,93

119 826,56

АР2018-061-РД-

2-АР-1.8

Фасады. Козырьки, приямки, наружные лестницы и пандусы

199 903,65

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.9

Фасады. Кровля

62 906,75

62 906,75

37 744,05

АР2018-061-РД-

2-АР-1.10

Чертежи стен и перегородок в подвале. Блок "2".

304 277,76

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.11

Чертежи стен и перегородок в подвале. Блок "3".

201 301,57

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.12

Чертежи стен и перегородок в подвале. Блок "R".

188 720,22

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.13

Чертежи стен и перегородок на первом этаже. Блок "2".

398 409,38

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.14

Чертежи стен и перегородок на первом этаже. Блок "3".

314 533,71

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.15

Чертежи стен и перегородок на первом этаже. Блок "R".

251 626,97

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.16

Чертежи стен и перегородок на втором этаже

524 222,85

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.17

Чертежи стен и перегородок на третьем этаже

272 595,89

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.18

Чертежи стен и перегородок на четвертом этаже

188 720,22

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.19

Внутренние отделочные работы, полы

191 419,73

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.20

Внутренние отделочные работы, потолки

391 419,73

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.21

Внутренние отделочные работы, стены

391 419,73

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.22

Внутренние отделочные работы, отделка санузлов

391 419,73

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.23

Внутренние отделочные работы, подоконники

237 647,69

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.24

Внутренние отделочные работы, отделка банного блока

698 963,81

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.25

Внутренние отделочные работы, отделка бассейнов банного блока

568 860,18

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.26

Внутренние отделочные работы, отделка водной зоны аквапарка

466 715,11

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.27

Внутренние отделочные работы, отделка бассейнов аквапарка

922 632,21

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.28

Внутренние отделочные работы, отделка бассейна фитнеса

265 606,25

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.29

Заполнение проемов внутренних стен. Двери.

223 668,42

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.30

Заполнение проемов внутренних стен. Окна и витражи.

307 544,06

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.31

Кабины для переодевания

153 772,04

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.32

Шкафы для переодевания.

153 772,04

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.33

Изделия из стали. Ходовые мостики, ограждения.

279 585,52

279 585,52

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.34

Изделия из нержавеющей стали. 

335 502,63

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.35

Стойки гардеробов, баров и кассовых блоков

209 689,14

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.36

Вешала гардеробов верхней одежды. 

41 937,83

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.37

Перегородки душевых и санузлов

69 896,38

-

АР2018-061-РД-

2-АР-1.38

Общие чертежи АС окончательные. Планы и разрезы.

663 342,08

663 342,08

398 005,25

АР2018-061-РД-

2-АР-1.39

Строительные детали

698 963,81

698 963,81

359 117,07

 

 

2.2.

2 этап строительства 

АР2018-061-РД-

2-АР-2.1

Общие чертежи АС. Задание смежным разделам. (согласовываются Заказчиком)

1 480 875,38

АР2018-061-РД-

2-АР-2.2

Задание смежным разделам. Чертежи потолков.

51 805,55

АР2018-061-РД-

2-АР-2.3

Задание смежным разделам. Расстановка сантехники и трапов.

51 805,55

АР2018-061-РД-

2-АР-2.4

Задание смежным разделам. Вертикальный транспорт.

87 946,09

АР2018-061-РД-

2-АР-2.5

Задание смежным разделам. Лестничные клетки и внутренние лестницы.

82 272,16

АР2018-061-РД-

2-АР-2.6

Фасады. Развертки фасадных стен. Задание по фасадным системам и заполнению проемов.

113 478,82

13 478,82

8 087,29

АР2018-061-РД-

2-АР-2.7

Фасады. Козырьки, приямки, наружные лестницы и пандусы

66 487,42

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.8

Фасады. Кровля

59 206,35

59 206,35

35 523,81

АР2018-061-РД-

2-АР-2.9

Чертежи стен и перегородок в подвале. 

121 866,40

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.10

Чертежи стен и перегородок на первом этаже. 

74 007,93

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.11

Чертежи стен и перегородок на втором и 2+ этаже

66 607,14

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.12

Чертежи стен и перегородок на третьем этаже

126 553,57

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.13

Чертежи стен и перегородок на типовых этажах

108 544,98

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.14

Чертежи стен и перегородок на 11 этаже

АР2018-061-РД-

2-АР-2.15

Чертежи стен и перегородок на 12 этаже

АР2018-061-РД-

2-АР-2.16

Внутренние отделочные работы, полы

88 148,15

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.17

Внутренние отделочные работы, потолки

115 945,76

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.18

Внутренние отделочные работы, стены

125 813,48

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.19

Внутренние отделочные работы, отделка санузлов

96 210,32

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.20

Внутренние отделочные работы, подоконники

49 338,62

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.21

Заполнение проемов внутренних стен. Двери.

56 739,42

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.22

Заполнение проемов внутренних стен. Окна и витражи.

81 408,73

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.23

Изделия из стали. 

71 541,01

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.24

Изделия из нержавеющей стали. 

27 136,24

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.25

Стойки гардеробов, баров и кассовых блоков

24 669,31

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.26

Вешала гардеробов верхней одежды.

37 003,96

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.27

Перегородки душевых и санузлов

14 801,59

-

АР2018-061-РД-

2-АР-2.28

Общие чертежи АС окончательные. Планы и разрезы.

82 552,90

82 552,90

49 531,74

АР2018-061-РД-

2-АР-2.29

Строительные детали

88 809,51

88 809,51

53 285,71

 

 

3

ИНТ (Дизайн интерьеров)

АР2018-061-РД-

3-АИ-1

Центральный вестибюль с расчетным узлом аквапарка.

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-2

Зал ресторана в вестибюле.

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-3

Раздевально-душевая группа помещений аквапарка. Общее решение, подбор отделочных материалов и оборудования. Лифтовой холл и круглая лестница входит в объем работ. 

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-4

Многосветный объем с бассейнами и аттракционами (Аквапарк). Общее решение, подбор отделочных материалов и оборудования.

750 000,00

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-5

Кафе аквапарка на 2 этаже.

100 000,00

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-6

Кафе аквапарка на 3 этаже.

100 000,00

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-7

Многосветный объем с бассейнами, банями и игровым городком (Термы). Общее решение, подбор отделочных материалов и оборудования.

750 000,00

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-8

Зал кафе терм на 1 этаже.

100 000,00

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-9

Зал бара игрового городка на 1 этаже. 

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-10

Кафе терм на 2 этаже.

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-11

Спортивный бассейн

40 000,00

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-12

Зона праздничных мероприятий на 3 этаже.

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-13

Интерьеры гостиница. 1 этаж.

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-14

Интерьеры гостиница. 2 этаж.

-

-

АР2018-061-РД-

3-АИ-15

Интерьеры гостиница. 4-8 этажи

-

-

 

Архитектурные строительные чертежи выполняются по согласованным интерьерным решениям.

 

 

4

КР (Конструктивные решения)

АР2018-061-РД-

4-КР-2.1

Конструктивные решения Блока 1

3 540 000,00

-

АР2018-061-РД-

4-КР-2.2

Конструктивные решения Блока R

4 000 000,00

-

АР2018-061-РД-

4-КР-2.3

Конструктивные решения блока 2

4 000 000,00

-

АР2018-061-РД-

4-КР-2.4

Конструктивные решения блока 3

4 000 000,00

-

 

 

5

КР 1 (Конструктивные решения. Опалубки бассейнов, лестниц лифтовых шахт, стартовых площадок, задания для КР)

АР2018-061-РД-

5-КР-1.1

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи по шахтам вертикального транспорта.

208 543,16

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.2

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи по лестничным клеткам.

159 332,61

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.3

Задание по КЖ. Развертки фасадных стен (опалубочные чертежи) блока "2 и 3".

284 898,27

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.4

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи бассейнов блока "2".

409 062,89

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.5

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи технических баков блока "2".

26 559,80

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.6

Задание по КЖ. Развертки фасадных стен (опалубочные чертежи) блока "1".

276 664,61

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.7

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи бассейнов блока "3".

651 060,42

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.8

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи технических баков блока "3".

26 559,80

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.9

Задание по КЖ. Развертки фасадных стен (опалубочные чертежи) блока "R".

160 665,84

-

АР2018-061-РД-

5-КР-1.10

Задание по КЖ. Опалубочные чертежи бассейнов фитнеса.

99 599,26

-

 

 

6

КР КД (Конструктивные решения. Деревоклееные фермы)

АР2018-061-РД-

6-КР-КД-1

Конструкции деревоклееные блок 2

400 000,00

АР2018-061-РД-

6-КР-КД-2

Конструкции деревоклееные блок 3

400 000,00

АР2018-061-РД-

6-КР-КД-3

Конструкции деревоклееные блок R

100 000,00

 

 

7

КР ИНТ (Конструктивные решения. Дизайн интерьеров без гостиницы)

АР2018-061-РД-

7-КР-КИ-1

Конструктивные элементы интерьеров без гостиницы

-

 

 

 

Электроснабжение и электроосвещение

 

8

ЭМ (Электроснабжение)

 

8.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.1

Планы размещения электрощитовых и зоны электроснабжения. 

89 714,95

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.2

Выдача строительного и инженерного задания

46 410,00

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.3

Планы электрообогрева и принципиальные схемы

50 719,50

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.4

Планы трасс распределительных сетей и принципиальные схемы

48 288,50

48 288,50

28 973,10

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.5

Планы трасс лотков, уравнивания потенциалов и схема

48 730,50

48 730,50

29 238,30

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.6

Планы э.с. слаботочных систем и принципиальные схемы

48 620,00

48 620,00

29 172,00

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.7

Планы э.с. водоподготовки и принципиальные схемы

48 730,50

48 730,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.8

Планы э.с. противодымной защиты и принципиальные схемы

52 377,00

52 377,00

31 426,20

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.9

Планы э.с. вентиляции, холодоснабжения и принципиальные схемы

52 377,00

52 377,00

31 426,20

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.10

План розеточной сети на -1 этаж.

52 708,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.11

План розеточной сети на +1 этаж.

52 708,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.12

План розеточной сети на +2 этаж.

52 708,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.13

План розеточной сети на +3 этаж.

52 708,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.14

План розеточной сети на +4 этаж.

52 819,00

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.15

План розеточной сети на кровле.

46 189,00

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.16

Схемы розеточной сети на -1 этаж.

46 189,00

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.17

Схемы розеточной сети на +1 этаж.

45 636,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.18

Схемы розеточной сети на +2 этаж.

45 636,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.19

Схемы розеточной сети на +3 этаж.

45 636,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.20

Схемы розеточной сети на +4 этаж.

45 636,50

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.21

Схемы розеточной сети на кровле.

45 747,00

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-1.22

Общие данные, структурные и принципиальные схемы, спецификации

46 410,00

46 410,00

27 846,00

 

 

8.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.1

Планы размещения электрощитовых и зоны электроснабжения. 

7 679,79

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.2

Выдача строительного и инженерного задания

6 678,08

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.3

Планы электрообогрева и принципиальные схемы

6 678,08

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.4

Планы трасс распределительных сетей и принципиальные схемы

6 678,08

6 678,08

4 006,85

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.5

Планы трасс лотков, уравнивания потенциалов и схема

6 678,08

6 678,08

4 006,85

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.6

Планы э.с. слаботочных систем и принципиальные схемы

6 678,08

6 678,08

4 006,85

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.7

Планы э.с. водоподготовки и принципиальные схемы

6 678,08

6 678,08

4 006,85

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.8

Планы э.с. противодымной защиты и принципиальные схемы

6 678,08

6 678,08

4 006,85

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.9

Планы э.с. вентиляции, холодоснабжения и принципиальные схемы

6 678,08

6 678,08

4 006,85

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.10

План розеточной сети на -1 этаж.

6 678,08

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.11

План розеточной сети на +1 этаж.

6 678,08

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.12

План розеточной сети на +2 этаж.

6 678,08

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.13

План розеточной сети на +3 этаж, технический.

6 678,08

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.14

План розеточной сети на 4 этаж.

7 568,49

-

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.15

План розеточной сети на 5-10, типовой этаж.

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.16

План розеточной сети на 11 этаж.

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.17

План розеточной сети на 12 этаж, технический.

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.18

План розеточной сети на кровле.

7 568,49

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.19

Схемы розеточной сети на -1 этаж.

7 568,49

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.20

Схемы розеточной сети на +1 этаж.

7 568,49

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.21

Схемы розеточной сети на +2 этаж.

7 568,49

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.22

Схемы розеточной сети на +3 этаж, технический.

7 568,49

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.23

Схемы розеточной сети на +4 этаж, офис.

7 568,49

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.24

Схемы розеточной сети на 5-10, типовой этаж.

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.25

Схемы розеточной сети на 11 этаж.

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.26

Схемы розеточной сети на 12 этаж, технический

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.27

Схемы розеточной сети на кровле.

6 232,88

АР2018-061-РД-

8-ЭМ-2.28

Общие данные, структурные и принципиальные схемы, спецификации

6 232,93

 

 

9

ЭО, ЭС, ЭН (Внутреннее электроосвещение, внутриплощадочные сети)

 

9.1

ЭО 1 этап строительства

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.1

Планы размещения щитов освещения.

109 200,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.2

Выдача строительного и инженерного задания

63 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.3

План сетей электроосвещения на -1 этаж.

77 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.4

План сетей электроосвещения на +1 этаж.

77 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.5

План сетей электроосвещения на +2 этаж.

77 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.6

План сетей электроосвещения на +3 этаж.

77 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.7

План сетей электроосвещения на +4 этаж.

77 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.8

План сетей электроосвещения на кровле.

56 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.9

Принципиальные схемы.

56 000,00

-

АР2018-061-РД-

9-ЭО-1.10

Общие данные, спецификации

49 000,00

-

 

 

9.2

ЭО 2 этап строительства

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.1

Планы размещения щитов освещения.

25 470,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.2

Выдача строительного и инженерного задания

11 850,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.3

План сетей и оборудования электроосвещения

11 850,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.4

План сетей электроосвещения на -1 этаж.

9 375,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.5

План сетей электроосвещения на 1 этаж.

9 375,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.6

План сетей электроосвещения на 2 этаж.

9 375,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.7

План сетей электроосвещения на +3 этаж, технический.

9 375,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.8

План сетей электроосвещения на 4-8 этаж.

9 375,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.9

План сетей электроосвещения на 5-10, типовой этаж.

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.10

План сетей электроосвещения на 11 этаж.

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.11

План сетей электроосвещения на 12 этаж, технический

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.12

План сетей электроосвещения на кровле.

9 375,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.13

Принципиальные схемы.

10 350,00

АР2018-061-РД-

9-ЭО-2.14

Общие данные, спецификации

10 350,00

 

 

9.3

ЭС. ЭН Сети электроснабжения, внутриплощадочные. Освещение територии.

АР2018-061-РД-

9-ЭС-3.1

План прокладки электроснабжения и сетей наружного освещения.

33 000,00

АР2018-061-РД-

9-ЭС-3.2

Схема электроснабжения.

33 000,00

АР2018-061-РД-

9-ЭС-3.3

Схема сети наружного освещения.

33 000,00

АР2018-061-РД-

9-ЭС-3.4

Расчёты

33 000,00

АР2018-061-РД-

9-ЭС-3.5

Общие данные, спецификации

18 000,00

 

 

9.4

ТП (Трансформаторная подстанция)

АР2018-061-РД-

9-ЭС-4.1

Планы, разрезы.

75 000,00

АР2018-061-РД-

9-ЭС-4.2

Электротехническая часть

87 500,00

АР2018-061-РД-

9-ЭС-4.3

Спецификация обрудования

87 500,00

 

 

АР2018-061-РД-

10-ЭМ.МЗ

ЭМ.МЗ Молниезащита и заземляющее устройство

117 210,00

 

 

 

Водоснабжение и водоотведение

 

11

ВК-1 Система водоснабжения.

 

11.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

30 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.2

План на отм. -5,40(-3,90)

228 000,00

228 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.3

План на отм. -0,60

228 000,00

228 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.4

План на отм. 0,00

144 000,00

144 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.5

План на отм. +2,70

144 000,00

144 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.6

План на отм. +6,00

144 000,00

144 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.7

План на отм. +12,00

144 000,00

144 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.8

План на отм. +18,00

144 000,00

144 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.9

Аксонометрические Схемы

228 000,00

228 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.1.10

Спецификации

111 600,00

111 600,00

-

 

 

11.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

35 875,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.2

План -1 этаж.

65 000,00

40 000,00

24 000,00

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.3

План 1 этаж.

95 000,00

95 000,00

57 000,00

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.4

План 2 этаж.

85 000,00

85 000,00

51 000,00

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.5

План 3 этаж, технический.

85 000,00

50 000,00

30 000,00

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.6

План 4-8 этаж

85 000,00

50 000,00

30 000,00

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.7

План 5-10, типовой этаж.

35 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.8

План 11 этаж.

35 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.9

План 12 этаж, технический

35 000,00

-

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.10

Аксонометрические Схемы

75 000,00

45 000,00

27 000,00

АР2018-061-РД-

11-ВК-1.2.11

Спецификации

105 000,00

105 000,00

63 000,00

 

 

АР2018-061-РД-

11-НВК-1

НВК-1 Наружные сети водоснабжения (внутриплощадочные)

330 750,00

 

 

12

ВК-2 Внутренние сети фекальной канализации

 

12.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

30 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.2

План на отм. -5,40(-3,90)

228 000,00

228 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.3

План на отм. -0,60

228 000,00

228 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.4

План на отм. 0,00

144 000,00

144 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.5

План на отм. +2,70

144 000,00

144 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.6

План на отм. +6,00

144 000,00

144 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.7

План на отм. +12,00

144 000,00

144 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.8

План на отм. +18,00

144 000,00

144 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.9

Аксонометрические Схемы

228 000,00

228 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.1.10

Спецификации

111 600,00

111 600,00

 

 

12.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

35 875,00

-

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.2

План -1 этаж.

65 000,00

40 000,00

24 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.3

План 1 этаж.

95 000,00

95 000,00

57 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.4

План 2 этаж.

85 000,00

85 000,00

51 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.5

План 3 этаж, технический.

85 000,00

50 000,00

30 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.6

План 4-8 этаж

85 000,00

50 000,00

30 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.7

План 5-10, типовой этаж.

35 000,00

-

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.8

План 11 этаж.

35 000,00

-

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.9

План 12 этаж, технический

35 000,00

-

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.10

Аксонометрические Схемы

125 000,00

70 000,00

42 000,00

АР2018-061-РД-

12-ВК-2.2.11

Спецификации

55 000,00

55 000,00

33 000,00

 

 

АР2018-061-РД-

12-НВК-2

НВК-2 Наружные сети фекальной канализации (внутриплощадочные)

784 639,50

 

 

13

ВК-3 Внутренние сети ливневой канализации

 

13.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

30 000,00

-

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.2

План на отм. -5,40(-3,90)

208 800,00

208 800,00

125 280,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.3

План на отм. -0,60

208 800,00

208 800,00

125 280,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.4

План на отм. 0,00

132 000,00

132 000,00

79 200,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.5

План на отм. +2,70

132 000,00

132 000,00

79 200,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.6

План на отм. +6,00

132 000,00

132 000,00

79 200,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.7

План на отм. +12,00

132 000,00

132 000,00

79 200,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.8

План на отм. +18,00

132 000,00

132 000,00

79 200,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.9

Аксонометрические Схемы

208 800,00

208 800,00

125 280,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.1.10

Спецификации

96 000,00

96 000,00

57 600,00

 

 

13.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

30 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.2

План -1 этаж.

58 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.3

План 1 этаж.

75 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.4

План 2 этаж.

69 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.5

План 3 этаж, технический.

69 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.6

План 4-8 этаж

69 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.7

План 5-10, типовой этаж.

27 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.8

План 11 этаж.

27 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.9

План 12 этаж, технический

27 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.10

Аксонометрические Схемы

65 000,00

АР2018-061-РД-

13-ВК-3.2.11

Спецификации

85 000,00

 

 

АР2018-061-РД-

13-НВК-3

НВК-3 Наружные сети ливневой канализации (внутриплощадочные)

784 639,50

 

 

14

НС Насосная станция

АР2018-061-РД-

14-НС-1

Принципиальная схема насосной станции

63 481,75

АР2018-061-РД-

14-НС-2

План помещения

63 481,75

АР2018-061-РД-

14-НС-3

Спецификация

63 481,75

АР2018-061-РД-

14-НС-4

Водомерный узел

63 481,75

 

 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

 

15

ОВ-1 Отопление

 

15.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

25 000,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.2

План на отм -5,40 (-3,90)

73 674,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.3

План на отм. -0,60

73 674,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.4

План на отм. 0,00

49 116,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.5

План на отм. +2,70

49 116,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.6

План на отм. +6,00

49 116,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.7

План на отм. +12,00

49 116,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.8

План на отм. +18,00

49 116,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.9

Аксонометрические схемы системы отопления

72 790,00

-

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.1.10

Спецификация

25 000,00

-

 

 

15.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

10 235,50

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.2

План -1 этаж.

68 209,00

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.3

План 1 этаж.

68 209,00

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.4

План 2 этаж.

58 853,00

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.5

План 3 этаж, технический.

80 955,20

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.6

План 4-8 этаж

80 955,20

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.7

План 5-10, типовой этаж.

32 977,60

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.8

План 11 этаж.

32 977,60

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.9

План 12 этаж, технический

32 977,60

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.10

Аксонометрические схемы системы отопления

155 330,00

АР2018-061-РД-

15-ОВ-1.2.11

Спецификации

61 776,00

 

 

16

ОВ-2 Общеобменная вентиляция

 

16.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

25 000,00

-

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.2

Таблица характеристика оборудовании

31 023,00

31 023,00

18 613,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.3

План на отм -5,40 (-3,90)

232 677,00

232 677,00

139 606,20

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.4

План на отм. -0,60

155 118,00

155 118,00

93 070,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.5

План на отм. 0,00

155 118,00

155 118,00

93 070,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.6

План на отм. +2,70

201 653,00

201 653,00

120 991,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.7

План на отм. +6,00

155 118,00

155 118,00

93 070,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.8

План на отм. +12,00

155 118,00

155 118,00

93 070,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.9

План на отм. +18,00

155 118,00

155 118,00

93 070,80

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.10

Аксонометрические схемы система вентиляция (П)

77 559,00

77 559,00

46 535,40

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.11

Аксонометрические схемы система вентиляция (ПВ)

77 559,00

77 559,00

46 535,40

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.12

Аксонометрические схемы система вентиляция (В)

77 559,00

77 559,00

46 535,40

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.1.13

Спецификация оборудования

130 119,00

130 119,00

78 071,40

 

 

16.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

30 000,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.2

Таблица характеристика оборудовании

80 000,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.3

План -1 этаж.

158 000,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.4

План 1 этаж.

295 800,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.5

План 2 этаж.

380 000,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.6

План 3 этаж, технический.

295 800,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.7

План 4 этаж

177 008,66

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.8

План 5

177 008,66

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.9

План 6 и 7 этаж.

177 008,66

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.10

План 8 этаж

177 008,66

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.11

Аксонометрические схемы система вентиляция (ПУ)

177 008,66

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.12

Аксонометрические схемы система вентиляция (В)

80 000,00

АР2018-061-РД-

16-ОВ-2.2.13

Спецификация оборудования

177 008,70

 

 

17

ОВ-3 Теплоснабжение. Внутренние системы и наружные внутриплощадочные сети.

 

17.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

13 000,00

-

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.1.2

Планы теплоснабжения

185 000,00

185 000,00

111 000,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.1.3

Аксонометрические схемы системы теплоутилизации

29 000,00

29 000,00

17 400,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.1.4

Аксонометрические схемы системы теплоснабжения ПУ

29 000,00

29 000,00

17 400,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.1.5

Схема подключения приточных установок

29 000,00

29 000,00

17 400,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.1.6

Спецификация

15 000,00

15 000,00

9 000,00

 

 

17.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

15 000,00

-

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.2.2

Планы теплоснабжения

290 000,00

290 000,00

174 000,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.2.3

Аксонометрические схемы системы теплоутилизации

60 000,00

60 000,00

36 000,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.2.4

Аксонометрические схемы системы теплоснабжения ПУ

60 000,00

60 000,00

36 000,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.2.5

Схема подключения приточных установок

60 000,00

60 000,00

36 000,00

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3.2.6

Спецификация

40 000,00

40 000,00

24 000,00

 

 

АР2018-061-РД-

17-ОВ-3НСТС

НС-ТС. Наружные сети теплоснабжения Узел учета

-

 

 

18

ОВ-4 Индивидуальный тепловой пункт

АР2018-061-РД-

18-ОВ-4.1

План ИТП

196 297,50

196 297,50

АР2018-061-РД-

18-ОВ-4.2

Принципиальная схема ИТП

196 297,50

196 297,50

АР2018-061-РД-

18-ОВ-4.3

Функциональная Схема ИТП

157 038,00

157 038,00

АР2018-061-РД-

18-ОВ-4.4

Спецификация

157 038,00

157 038,00

АР2018-061-РД-

18-ОВ-4.5

Узел учета

78 519,00

78 519,00

 

 

19

ОВ-5 Холодоснабжение

 

19.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

8 919,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.2

План на отм -5,40 (-3,90)

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.3

План на отм. -0,60

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.4

План на отм. 0,00

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.5

План на отм. +2,70

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.6

План на отм. +6,00

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.7

План на отм. +12,00

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.8

План на отм. +18,00

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.9

Аксонометрические схемы системы Холодоснабжения Приточных установок

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.10

Аксонометрические схемы системы Холодоснабжения фанкойлов

19 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.11

Схема Подключения Приточных установок

9 000,00

-

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.1.12

Холодоснабжение Спецификция

9 000,00

-

 

 

19.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

7 946,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.2

План -1 этаж.

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.3

План 1 этаж.

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.4

План 2 этаж.

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.5

План 3 этаж, технический.

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.6

План 4-8 этаж

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.7

План 5-10, типовой этаж.

10 800,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.8

План 11 этаж.

10 800,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.9

План 12 этаж, технический

10 800,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.10

Аксонометрические схемы системы Холодоснабжения Приточных установок

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.11

Аксонометрические схемы системы Холодоснабжения фанкойлов

51 600,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.12

Схема Подключения Приточных установок

46 000,00

АР2018-061-РД-

19-ОВ-5.2.13

Холодоснабжение Спецификция

46 000,00

 

 

20

ОВ-6 Противодымная вентиляция

 

20.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.1

Выдача задания для АР и КЖ

35 934,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.2

Таблица характеристика оборудовании

35 940,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.3

План дымоудаления на отм -5,40 (-3,90)

71 880,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.4

План дымоудаления на отм. -0,60

71 880,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.5

План дымоудаления на отм. 0,00

107 820,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.6

План дымоудаления на отм. +2,70

71 880,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.7

План дымоудаления на отм. +6,00

71 880,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.8

План дымоудаления на отм. +12,00

71 880,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.9

План дымоудаления на отм. +18,00

71 880,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.10

Аксонометрические схемы

107 820,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.1.11

Спецификация

35 940,00

 

 

20.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.1

Выдача задания для АР и КЖ

25 000,00

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.2

Таблица характеристика оборудовании

103 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.3

План -1 этаж.

103 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.4

План 1 этаж.

177 138,40

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.5

План 2 этаж.

177 138,40

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.6

План 3 этаж, технический.

93 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.7

План 4 этаж

93 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.8

План 5 этаж.

93 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.9

План 6 и 7 этаж.

93 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.10

План 8 этаж

93 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.11

Аксонометрические схемы

93 892,80

-

АР2018-061-РД-

20-ОВ-6.2.12

Спецификация

93 222,10

-

 

 

21

ОВ-7 Теплый пол и обогрев бань

АР2018-061-РД-

21-ОВ-7.1

План на отм 0,00

101 000,00

АР2018-061-РД-

21-ОВ-7.2

План на отм. +6,00 и +12,00

101 000,00

АР2018-061-РД-

21-ОВ-7.3

План магистралей ТС теплых полов бассейнов и бань

111 000,00

АР2018-061-РД-

21-ОВ-7.4

Теплый пол на сиденьях и стенах бань

81 000,00

АР2018-061-РД-

21-ОВ-7.5

Схема системы теплого пола и нагрев бань

95 000,00

АР2018-061-РД-

21-ОВ-7.6

Спецификация

35 437,00

 

 

 

Технологические решения

 

22

ТХ – 1. Технологические решения аквапарка

АР2018-061-РД-

22-ТХ-1.1

План на отм. 0,00

330 000,00

АР2018-061-РД-

22-ТХ-1.2

План на отм. +6,00

625 000,00

АР2018-061-РД-

22-ТХ-1.3

Спецификации технологического оборудования

100 000,00

 

 

23

ТХ – 2. Технологические решения термального блока.

АР2018-061-РД-

23-ТХ-2.1

План на отм. 0,00

600 000,00

АР2018-061-РД-

23-ТХ-2.2

План на отм. +6,00

600 000,00

АР2018-061-РД-

23-ТХ-2.3

Планы расположения технологического оборудования. Схемы

200 000,00

АР2018-061-РД-

23-ТХ-2.4

Спецификации технологического оборудования

100 000,00

 

 

24

ТХ – 3. Технологические решения водоподготовки.

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.1

Схемы принципиальные водоподготовки

699 050,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.2

Спецификации оборудования

650 000,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.3

Планы размещения оборудования

490 000,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.4

Технические задания смежным разделам проекта

110 000,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.5

Строительные задания на ванны бассейнов и технологические баки

400 000,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.6

Планы фундаментов технологического оборудования

220 000,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.7

Планы и изометрические схемы технологических трубопроводов аквапарка

1 005 000,00

АР2018-061-РД-

24-ТХ-3.8

Планы и изометрические схемы технологических трубопроводов банного блока и фитнеса

1 005 000,00

 

 

25

ТХ – 4. Технологические решения водоснабжения аттракционов

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.1

Схемы принципиальные водоснабжения аттракционов

50 352,50

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.2

Спецификации оборудования

31 250,00

-

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.3

Планы размещения оборудования

50 000,00

-

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.4

Технические задания смежным разделам проекта

24 000,00

-

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.5

Строительные задания

62 000,00

-

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.6

Планы фундаментов технологического оборудования

23 000,00

-

АР2018-061-РД-

25-ТХ-4.7

Планы и изометрические схемы технологических трубопроводов аттракционов

185 000,00

-

 

 

26

ТХ – 5. Технологические решения водных аттракционов. Адаптация документации иностранной компании.

АР2018-061-РД-

26-ТХ-5.1

Размещение трасс аттракционов, согласования

400 000,00

АР2018-061-РД-

26-ТХ-5.2

План размещения стартовых площадок и финишей.

100 000,00

АР2018-061-РД-

26-ТХ-5.3

Технологическое задание для разработки разделов АР и КР.

100 000,00

 

 

27

ТХ – 6. Технологические решения предприятий общественного питания

 

27.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.1

Планы с компоновочными решениями (размещение технологических помещений)

319 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.2

Планы расстановки оборудования

175 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.3

Технологическое задание для разработки раздела ВК

175 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.4

Технологическое задание для разработки раздела ЭМ

175 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.5

Технологическое задание для разработки раздела ОВиК

141 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.6

Спецификации оборудования.

95 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.1.7

Выводы точек подключения технологического оборудования

95 000,00

 

 

27.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.1

Планы с компоновочными решениями (размещение технологических помещений)

36 550,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.2

Планы расстановки оборудования

21 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.3

Технологическое задание для разработки раздела ВК

21 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.4

Технологическое задание для разработки раздела ЭМ

21 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.5

Технологическое задание для разработки раздела ОВиК

17 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.6

Спецификации оборудования.

21 000,00

АР2018-061-РД-

27-ТХ-6.2.7

Выводы точек подключения технологического оборудования

21 000,00

 

 

28

ТХ – 7 Технологические решения прачечной

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.1

Планы с компоновочными решениями (размещение технологических помещений)

54 000,00

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.2

Планы расстановки оборудования

26 000,00

-

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.3

Технологическое задание для разработки раздела ВК

26 000,00

-

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.4

Технологическое задание для разработки раздела ЭМ

26 000,00

-

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.5

Технологическое задание для разработки раздела ОВиК

18 000,00

-

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.6

Спецификации оборудования.

20 000,00

-

АР2018-061-РД-

28-ТХ-7.7

Выводы точек подключения технологического оборудования

20 000,00

 

 

29

ТХ – 8. Технологические решения автоматизированной платежно – пропускной системы

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.1

Функциональная схема ППС

177 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.2

Функциональная схема Автоматизированная система предприятий питания

176 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.3

Функциональная схема Гостиничная система

176 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.4

Планы расположения оборудования

272 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.5

Схемы установки турникетов

53 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.6

Схемы подключения турникетов

53 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.7

Схема подключения контроллеров

53 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.8

Структурная схема локальной сети.

203 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.9

Схема размещения оборудования в коммуникационном шкафу.

66 000,00

АР2018-061-РД-

29-ТХ-8.10

Спецификация оборудования

121 000,00

 

 

30

ТХ – 9. Технологические решения гостиницы

АР2018-061-РД-

30-ТХ-9.1

Планы размещения оборудования

75 500,00

75 500,00

АР2018-061-РД-

30-ТХ-9.2

Технологические задания для разделов ЭМ и ЭО

75 500,00

75 500,00

АР2018-061-РД-

30-ТХ-9.3

Спецификации оборудования

35 165,00

35 165,00

 

 

 

Системы пожарной безопасности

 

31

ПС. Система пожарной сигнализация

 

31.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

31-ПС-1.1

Размещение оборудования и прокладка шлейфов

170 000,00

170 000,00

102 000,00

АР2018-061-РД-

31-ПС-1.2

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

45 000,00

45 000,00

27 000,00

 

 

31.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

31-ПС-2.1

Размещение оборудования и прокладка шлейфов

27 000,00

27 000,00

16 200,00

АР2018-061-РД-

31-ПС-2.2

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

8 000,00

8 000,00

4 800,00

 

 

32

СОУЭ. Система оповещения и управления эвакуацией

 

32.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.1

Размещение оборудования и прокладка кабелей

30 000,00

30 000,00

18 000,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.2

Структурные схемы соединений

30 000,00

30 000,00

18 000,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.3

Схема соединений Стационарное оборудование системы СОУЭ

30 000,00

30 000,00

18 000,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.4

Схема подключения приборов обратной связи

30 000,00

30 000,00

18 000,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.5

Схемы электрических соединений

30 000,00

30 000,00

18 000,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.6

Габаритные размеры и схемы крепления оборудования системы СОУЭ

30 000,00

30 000,00

18 000,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-1.7

Спецификация

30 000,00

30 000,00

18 000,00

 

 

32.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.1

Размещение оборудования и прокладка кабелей

6 000,00

6 000,00

3 600,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.2

Структурные схемы соединений

6 000,00

6 000,00

3 600,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.3

Схема соединений Стационарное оборудование системы СОУЭ

6 000,00

6 000,00

3 600,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.4

Схема подключения приборов обратной связи

6 000,00

6 000,00

3 600,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.5

Схемы электрических соединений

6 000,00

6 000,00

3 600,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.6

Габаритные размеры и схемы крепления оборудования системы СОУЭ

6 000,00

6 000,00

3 600,00

АР2018-061-РД-

32-СОУЭ-2.7

Спецификация

4 000,00

4 000,00

2 400,00

 

 

33

ВПТ (АУПТ) Водяное пожаротушение

 

33.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.1

Принципиальная Схема Спринклерного и водяного Пожаротушения Комплекса

39 000,00

39 000,00

 

23 400,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.2

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. - 5,40(-3,90)

22 000,00

22 000,00

 

13 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.3

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. 0,00

22 000,00

22 000,00

 

13 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.4

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. -0,60

22 000,00

22 000,00

 

13 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.5

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. 0,00

22 000,00

22 000,00

 

13 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.6

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. + 2,70

17 000,00

17 000,00

 

10 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.7

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. + 6,00

17 000,00

17 000,00

 

10 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.8

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. + 12,00

17 000,00

17 000,00

 

10 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.9

Спринклерное и водяное пожаротушение на отм. + 18,00

17 000,00

17 000,00

 

10 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-1.10

Спецификация Системы АУПТ

15 000,00

15 000,00

 

9 000,00

 

 

 

33.2

2 этап строительства

 

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.1

Принципиальная Схема Спринклерного и водяного Пожаротушения Комплекса

7 000,00

7 000,00

 

4 200,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.2

План -1 этаж.

4 000,00

4 000,00

 

2 400,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.3

План 1 этаж.

4 000,00

4 000,00

 

2 400,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.4

План 2 этаж.

4 000,00

4 000,00

 

2 400,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.5

План 3 этаж, технический.

4 000,00

4 000,00

 

2 400,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.6

План 4-8 типовой этаж

4 000,00

4 000,00

 

2 400,00

АР2018-061-РД-

33-АУПТ-2.7

Спецификация Системы АУПТ

1 000,00

1 000,00

 

600,00

 

 

34

АППЗ. Автоматика систем противопожарной защиты

 

34.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.1

Структурная схема принципиальная

38 000,00

38 000,00

22 800,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.2

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. - 5,40(-3,90)

21 000,00

21 000,00

12 600,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.3

Планы кабельных трасс и оборудованияна отм. 0,00

21 000,00

21 000,00

12 600,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.4

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. -0,60

21 000,00

21 000,00

12 600,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.5

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. 0,00

21 000,00

21 000,00

12 600,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.6

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. + 2,70

15 000,00

15 000,00

9 000,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.7

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. + 6,00

15 000,00

15 000,00

9 000,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.8

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. + 12,00

15 000,00

15 000,00

9 000,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.9

Планы кабельных трасс и оборудования на отм. + 18,00

15 000,00

15 000,00

9 000,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.10

Щиты АСУД

14 000,00

14 000,00

8 400,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-1.11

Кабельный журнал

14 000,00

14 000,00

8 400,00

 

 

-

 

34.2

2 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.1

Структурная схема принципиальная

5 000,00

5 000,00

3 000,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.2

План -1 этаж.

4 000,00

4 000,00

2 400,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.3

План 1 этаж.

4 000,00

4 000,00

2 400,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.4

План 2 этаж.

4 000,00

4 000,00

2 400,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.5

План 3 этаж, технический.

4 000,00

4 000,00

2 400,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.6

План 4-8 типовой этаж

4 000,00

4 000,00

2 400,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.7

Щиты АСУД

2 000,00

2 000,00

1 200,00

АР2018-061-РД-

34-АППЗ-2.8

Кабельный журнал

1 000,00

1 000,00

600,00

 

 

-

 

Системы связи и системы безопасности

-

 

35

СКС. Структурированная кабельная сеть

-

 

35.1

1 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.1

Схема структурная.

19 000,00

19 000,00

11 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.2

Схема соединений.

19 000,00

19 000,00

11 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.3

Планы установки оборудования. Кабельные линии связи

19 000,00

19 000,00

11 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.4

Коммуникационные устройства.

19 000,00

19 000,00

11 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.5

Таблица соединений зональных кабельных магистралей.

19 000,00

19 000,00

11 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.6

Таблица соединений центральных кабельных магистралей.

19 000,00

19 000,00

11 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-1.7

Спецификация

11 000,00

11 000,00

6 600,00

 

 

-

 

35.2

2 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.1

Схема структурная.

4 000,00

4 000,00

2 400,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.2

Схема соединений.

3 500,00

3 500,00

2 100,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.3

Планы установки оборудования. Кабельные линии связи

3 500,00

3 500,00

2 100,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.4

Коммуникационные устройства.

3 500,00

3 500,00

2 100,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.5

Таблица соединений зональных кабельных магистралей.

3 500,00

3 500,00

2 100,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.6

Таблица соединений центральных кабельных магистралей.

3 500,00

3 500,00

2 100,00

АР2018-061-РД-

35-СКС-2.7

Спецификация

3 500,00

3 500,00

2 100,00

 

 

36

РФ. Система радиофикации

 

36.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

36-РФ-1.1

Структурная схема

43 000,00

АР2018-061-РД-

36-РФ-1.2

Планы кабельных трасс и оборудования

25 000,00

АР2018-061-РД-

36-РФ-1.3

Спецификация

17 000,00

 

 

36.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

36-РФ-2.1

Структурная схема

7 000,00

АР2018-061-РД-

36-РФ-2.2

Планы кабельных трасс и оборудования

4 500,00

АР2018-061-РД-

36-РФ-2.3

Спецификация

3 500,00

 

 

37

ЭЧ. Система электрочасификации

 

37.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

37-ЭЧ-1.1

Структурная схема

43 000,00

АР2018-061-РД-

37-ЭЧ-1.2

Планы кабельных трасс и оборудования

25 000,00

АР2018-061-РД-

37-ЭЧ-1.3

Спецификация

17 000,00

 

 

37.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

37-ЭЧ-2.1

Структурная схема

7 000,00

АР2018-061-РД-

37-ЭЧ-2.2

Планы кабельных трасс и оборудования

4 500,00

АР2018-061-РД-

37-ЭЧ-2.3

Спецификация

3 500,00

 

 

38

СКТВ. Система телевидения

 

38.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

38-СКТВ-1.1

Структурная схема

43 000,00

43 000,00

25 800,00

АР2018-061-РД-

38-СКТВ-1.2

Планы кабельных трасс и оборудования

25 000,00

25 000,00

15 000,00

АР2018-061-РД-

38-СКТВ-1.3

Спецификация

17 000,00

17 000,00

10 200,00

 

 

-

 

38.2

2 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

38-СКТВ-2.1

Структурная схема

7 000,00

7 000,00

4 200,00

АР2018-061-РД-

38-СКТВ-2.2

Планы кабельных трасс и оборудования

4 500,00

4 500,00

2 700,00

АР2018-061-РД-

38-СКТВ-2.3

Спецификация

3 500,00

3 500,00

2 100,00

 

 

-

 

39

СКУД. Система контроля и управления доступом

-

 

39.1

1 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.1

Общие данные

46 000,00

46 000,00

27 600,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.2

Планы установки оборудования. Кабельные линии связи

46 000,00

46 000,00

27 600,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.3

Структурная схема

46 000,00

46 000,00

27 600,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.4

Схема установки оборудования на дверь

46 000,00

46 000,00

27 600,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.5

Схема подключения контроллера

46 000,00

46 000,00

27 600,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.6

Схема подключения СКУД

46 000,00

46 000,00

27 600,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-1.7

Спецификация

30 000,00

30 000,00

18 000,00

 

 

-

 

39.2

2 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.1

Общие данные

8 000,00

8 000,00

4 800,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.2

Планы установки оборудования. Кабельные линии связи

8 000,00

8 000,00

4 800,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.3

Структурная схема

8 000,00

8 000,00

4 800,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.4

Схема установки оборудования на дверь

8 000,00

8 000,00

4 800,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.5

Схема подключения контроллера

8 000,00

8 000,00

4 800,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.6

Схема подключения СКУД

8 000,00

8 000,00

4 800,00

АР2018-061-РД-

39-СКУД-2.7

Спецификация

4 900,00

4 900,00

2 940,00

 

 

-

 

40

СОС. Система охранной сигнализации

-

 

40.1

1 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

40-СОС-1.1

Общие данные

26 000,00

26 000,00

15 600,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-1.2

Схема структурная

26 000,00

26 000,00

15 600,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-1.3

Функциональная схема

26 000,00

26 000,00

15 600,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-1.4

План установки оборудования. Кабельные линии связи

26 000,00

26 000,00

15 600,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-1.5

Схема подключения

26 000,00

26 000,00

15 600,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-1.6

Спецификация

13 000,00

13 000,00

7 800,00

 

 

-

 

40.2

2 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

40-СОС-2.1

Общие данные

4 600,00

4 600,00

2 760,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-2.2

Схема структурная

4 600,00

4 600,00

2 760,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-2.3

Функциональная схема

4 600,00

4 600,00

2 760,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-2.4

План установки оборудования. Кабельные линии связи

4 600,00

4 600,00

2 760,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-2.5

Схема подключения

4 600,00

4 600,00

2 760,00

АР2018-061-РД-

40-СОС-2.6

Спецификация

2 300,00

2 300,00

1 380,00

 

 

-

 

41

СОТ. Система охранного телевидения

-

 

41.1

1 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

41-СОТ-1.1

Общие данные

17 500,00

17 500,00

10 500,00

АР2018-061-РД-

41-СОТ-1.2

Структурная схема.

67 000,00

67 000,00

40 200,00

АР2018-061-РД-

41-СОТ-1.3

Планы кабельных трасс и оборудования

67 000,00

67 000,00

40 200,00

АР2018-061-РД-

41-СОТ-1.4

Спецификация

17 000,00

17 000,00

10 200,00

 

 

-

 

41.2.

2 этап строительства

-

АР2018-061-РД-

41-СОТ-2.1

Общие данные

3 000,00

3 000,00

1 800,00

АР2018-061-РД-

41-СОТ-2.2

Структурная схема.

11 000,00

11 000,00

6 600,00

АР2018-061-РД-

41-СОТ-2.3

Планы кабельных трасс и оборудования

11 000,00

11 000,00

6 600,00

АР2018-061-РД-

41-СОТ-2.4

Спецификация

3 351,00

3 351,00

2 010,60

 

 

-

 

Системы автоматизации

-

 

42

АВП. Автоматика систем водоподготовки

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-1

Общие данные

8 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-2

План расстановки шкафов автоматизации

64 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-3

Схемы подключения шкафов автоматизации

64 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-4

Схемы подключения технологического оборудования

64 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-5

Схемы внешних подключений

64 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-6

План прокладки кабелей

64 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-7

Кабельный журнал

64 000,00

-

АР2018-061-РД-

42-АВП-8

Спецификации

8 000,00

-

 

 

-

 

43

АДИС. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

-

 

43.1

1 этап строительства

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.1

Общие данные

26 200,00

26 200,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.2

Схема функциональная ЩА-01.1

42 000,00

42 000,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.3

Структурная схема автоматизации и диспетчеризации инженерных систем

42 000,00

42 000,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.4

Схема внешних соединений ША-01.1

42 000,00

42 000,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.5

Планы установки оборудования 

42 000,00

42 000,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.6

Кабельный журнал

42 000,00

42 000,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-1.7

Схема подключения периферийного оборудования

42 000,00

42 000,00

 

 

43.2

2 этап строительства

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.1

Общие данные

4 760,00

4 760,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.2

Схема функциональная ЩА-01.1

7 400,00

7 400,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.3

Структурная схема автоматизации и диспетчеризации инженерных систем

7 400,00

7 400,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.4

Схема внешних соединений ША-01.1

7 400,00

7 400,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.5

Планы установки оборудования 

7 400,00

7 400,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.6

Кабельный журнал

7 400,00

7 400,00

АР2018-061-РД-

43-АДИС-2.7

Схема подключения периферийного оборудования

7 400,00

7 400,00

 

 

44

Прочее

АР2018-061-РД-

44-МОДИ

МОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

112 554,33

112 554,33

67 532,58

 

 

 ИТОГО стоимость в рублях, в том числе НДС 20% 

80 603 074,53

4 333 871,02

4 844 581,63

4 122 005,33

327 360,00

5 319 690,96

Окончательная стоимость работ, подлежащих сдаче и оплате, 

в том числе НДС 20%

 

2 000 000,00

 2 846 487,78* 

 2 473 203,18** 

 

 

Вся документация подлежит передаче в электронной форме по адресу электронной почты aqua@thermit.su в формате DWG и PDF и форму ИУЛ, соответствующую ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», подписанные электронно-цифровой подписью единоличного исполнительного органа ответчика (ЭЦП)

Стоимость работ по печати документации в 4-х экземплярах (предложение на печать документации «Аврора Принт» 3 039 080 х 1,2 = 3 646 896 руб. с НДС).

Общая стоимость работ, подлежащих оплате составляет: (4 606 581,63+4 360 005,00)-3 646 896= 5 319 690,96 рублей.

* Стоимость работ, подлежащих корректировке и сдаче, (руб. с НДС 20%) уменьшенная на стоимость печати.

** Стоимость работ, подлежащих сдаче, (руб. с НДС 20%) уменьшенная на стоимость печати.

 

Приложение № 2

к мировому соглашению от 14.08.2024 

по делу № А33-8697/2023

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по корректировке рабочей документации

 

Раздел АР2018-061-РД-2-АР-1.7. 

Проект получен в электронном виде 28.02.2023 г.

Замечания выданы 01.03.2023 г.

1. Предоставить план стен из сэндвич-панелей, выполненных в блоках R, 2 и 3.

2. Дополнить спецификации для вентрешеток (деталь Ф-19). Указать из какого материала должны быть выполнены.

Раздел АР2018-061-РД-2-АР-1.9.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г.

1. В проект добавить выходы на кровлю всех вентиляционных шахт и примыканий кровли к вентиляционным шахтам.

2. В спецификации должны быть учтены все объёмы примыканий к вентиляционным шахтам.

Раздел АР2018-061-РД-2-АР-1.19.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г.

1. Исправить полы минус первого этажа согласно проектам разделов КР.

Разделы АР2018-061-РД-2-АР-1.30, АР2018-061-РД-2-АР-2.22.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Промаркировать двери в стеклянных перегородках.

2. Добавить в спецификации двери, установленные в стеклянных перегородках.

Раздел АР2018-061-РД-2-АР-1.38.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. представить окончательные исправленные чертежи, в том числе с планом новой вентиляционной камеры на четвёртом этаже в блоке 2.

2. На листе 9 возле лестничной клетки ЛК-3.2 вдоль оси 3.3 показано огромное количество проёмов в плите перекрытия. В разделе КЖ данных проёмов нет. И усилений нет. Необходимо выдать задание для корректировки раздела КЖ.

Разделы АР2018-061-РД-4-КР-2.2, АР2018-061-РД-4-КР-2.3, АР2018-061-РД-4-КР-2.4. Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Исправить проекты согласно заданий на проёмы, указанные в проекте по вентиляции АР2018-061-РД-15-ОВ.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.4.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Отсутствуют таблицы с расчётом мощностей и токов ГРЩ1, ГРЩ2 и ГРЩ3 в зимнем, летнем, аварийном (период отключения ГВС) режимах работы аквапарка.

2. Группа ЩТП2 от первой секции ГРЩ1 предусматривает подключение щитов 2ЩТП-1, 2 ЩТП-2 и 2ЩТП-3 одним кабелем, но при этом в разделе АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.3 подключение данных щитов указано отдельными кабельными линиями, лист 8.

3. Отсутствуют наименования потребителей с группы №06 по №37 и с группы №41 по №70 щита 01АВР1-1, листы 11, 12 ,13.

4. Отсутствуют наименования потребителей с группы №01 по №46 щита 01АВР1-2, лист 14.

5. Указать каким образом будут прокладываться отходящие кабельные линии от ГРЩ1, ГРЩ2, ГРЩ3. В стенах? В лотках?

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.3.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В спецификации не соответствует количество кабеля отходящих линий ППГнг(А)-HF 5х2,5 и ППГнг(А)-HF 3х2,5, лист 32.

2. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно от какой секции какого ГРЩ они подключены), листы 22, 23, 24, 25 ,27, 29.1.

3. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

4. Привести в соответствие наименование листа (план щитов освещения на -1 этаже!!!) в соответствие, лист 16.

5. В спецификации отсутствуют данные о лотках (количество, марка) и о крепёжных изделиях для него, лист 32.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.5.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Отсутствуют схемы прокладки заземляющих проводников системы уравнивания потенциалов.

2. Из представленных планах лотков абсолютно непонятно для каких кабельных линий они предназначаются. Силовых? Отходящих? Слаботочных? Противопожарных? И соответственно был ли сделан расчёт их несущей способности? Лист 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Отсутствуют данные о высоте установки кабельных лотков от уровня пола. Листы 2,3,4,5,6,7.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.6.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно откуда они подключены). Листы 7,8,12,14,15.

2. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.7

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно от какой секции какого ГРЩ они подключены).

2. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.8

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Отсутствуют наименования потребителей с группы №06 по №37 и с группы №41 по №70 щита 01АВР1-1. Лист 7,8,9.

2. Отсутствуют наименования потребителей с группы №01 по №46 щита 01АВР1-2. Лист 10.

3. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.9.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно от какой секции какого ГРЩ они подключены). Лист 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36.

2. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.10-1.21

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно от какой секции какого ГРЩ они подключены).

Листы 8, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 34, 37, 41, 42, 43, 45.

2. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.22.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1.Не учтены проводники заземления системы уравнивания потенциалов.

2. Не учтены полосы заземления (стальные и медные).

3. С учётом корректировки количества прокладки кабельных лотков внести данные по ним в каждый раздел спецификации.

4. Включить спецификацию раздела АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.3 в раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.22.

5. Привести в соответствие спецификацию кабельной продукции, а именно в раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-1.4 (кабельная продукция) включить все отходящие линии от ГРЩ1, ГРЩ2, ГРЩ,3, а для других разделов их (вводные) исключить.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.4.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Отсутствуют наименования потребителей с группы №02 по №05 и с группы №21 по №24 щита 01АВР1-Г1.

2. Указать каким образом будут прокладываться отходящие кабельные линии от 01АВР1-Г1 и РП-Г1. В стенах? В лотках?

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.3.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В спецификации не соответствует количество кабеля отходящей линии ППГнг(А)-HF 3х1,5. Лист 18.

2. В однолинейной схема щита отсутствует номер вводных линий (неизвестно от чего он подключён). Лист 16.

3. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

4. В спецификации отсутствуют данные о лотках (количество, марка) и о крепёжных изделиях для него. Лист 18.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.5.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Отсутствуют схемы прокладки заземляющих проводников системы уравнивания потенциалов.

2. Из представленных планах лотков абсолютно непонятно для каких кабельных линий они предназначаются. Силовых? Отходящих? Слаботочных? Противопожарных? И соответственно был ли сделан расчёт их несущей способности? Листы 2,3,4,5,6.

3. Отсутствуют данные о высоте установки кабельных лотков от уровня пола.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.6.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно откуда они подключены). Листы 11. 13.

2. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.8.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Отсутствуют наименования потребителей с группы №02 по №05 и с группы №21 по №24 щита 01АВР1-Г1. Лист 5.

2. В Щите 01АВР1-Г1 дважды указана группа №04. Лист 5.

3. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.9.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно от чего они подключены). Листы 8,11,12,13.

2. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

Раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.10-2.21.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. В однолинейных схемах щитов отсутствуют номера вводных линий (неизвестно от какой секции какого ГРЩ они подключены). Листы 14, 15, 16.1-16.6, 17, 18.1-18.6, 19.1-19.4.

2. Исключить спецификацию из раздела, т.к. она есть в АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.21.

3. Отсутствуют схемы расположения лотков, предназначенных для прокладки отходящих кабельных линий от щитов с указанием марки, размеров лотка и высоты подвеса.

4. Не учтены проводники заземления системы уравнивания потенциалов.

5. Не учтены полосы заземления (стальные и медные).

6. С учётом корректировки количества прокладки кабельных лотков внести данные по ним в каждый раздел спецификации.

7. Включить спецификацию раздела АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.3 в раздел АР2018-061-РД-8-ЭМ-2.21.

Раздел АР2018-061-РД-16-ОВ-2.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1. Необходимо сделать полные и правильные условные обозначения. Где вытяжные устройства, где приточные? Клапана противопожарные? Нет гибких подводок.

2. На аксонометрических схемах условные обозначения не отражены на вент. агрегатах. Показать все стены и колоны на планах, тогда сразу будет видно правильность расположения оборудования.

3. Почему установки П69.6-П69.8 располагаются вне помещений вент камеры? Откуда данные установки берут чистый воздух?

4. Почему в установках ПВ69.1-ПВ69.4 нет противопожарных клапанов, а в установках ПВ69.5-ПВ69.8 противопожарные клапана есть. Хотя эти установки расположены должны быть в одном и том же помещении.

5. В спецификации для установок ПВ69.3-ПВ69.8 нет вент. решёток. Как осуществляется забор в помещение аквапарка? В схемах на листе 32 подписана какая-то сетка. Что это такое?

6. Почему в блоке 2 в помещении аквапарка будет распределённая вытяжка только от двух воздуховодов В69.1 и В69.2. Почему остальные 6 систем будут высасывать воздух только в одном месте? Обоснуйте пожалуйста.

7. Транзит воздуховодов через серверную запрещён. СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 п.5.1.6.

8. Почему в блоке №3 на 4 этаже над зоной терм совсем нет воздуховодов?

9. Для установок ПВ71.4-ПВ71.6 в спецификации нет вент решёток. На 22 листе система В38.4 в каких помещениях?

10. На листе 12 безымянные воздуховоды пересекают лестничные клетки ЛК-R1 и ЛК-R2. Согласно СП 60.13330.2012 п.7.11.11 а) не допускается прокладывать транзитные воздуховоды через лестничные клетки. Необходимо исправить.

11. На листе 5 огромное количество воздуховодов проходит транзитом через помещения №0.02.18 (Дозаторная кислоты) и №0.02.19 (Дозаторная гипохлорита). Разве так можно делать? Ведь это помещения с весьма специфичной технологией?

12. На листе 9 возле лестничной клетки ЛК-3.2 вдоль оси 3.3 показано огромное количество проёмов в плите перекрытия. В разделе КЖ данных проёмов нет. И усилений нет. Необходима корректировка раздела КЖ.

Нужен новый план задание с проёмами от раздела вентиляция, чтобы можно было сравнить с запроектированными проёмами в разделе КЖ.

13. Не на всех планах указаны огнезадерживающие клапана (например, Лист 3, 4, 5 и т.д), так же не на всех планах ОЗК подписаны (Лист 8, 11, 16, 18 и т.д)

14. Не все системы и сечения подписаны на планах.

15. Вытяжные вентиляционные устройства систем В68 и В70 необходимо оформить и промаркировать согласно чертежей АР (детали ВУ1, ВУ2, ВУ3). В проект необходимо приложить данные детали. Эти объёмы необходимо внести в спецификацию, а не нужные объёмы убрать.

16. обосновать для чего в проекте АР2018-061-РД-15-ОВ-2.1_20_11_22 заложены сопла с электроприводом в системах вентиляции ПВ69 и ПВ71 Просим Вас обосновать необходимость данного оборудования. Особенно в системах вытяжной вентиляции.

17. Почему нет никакой вентиляции в помещениях №2.05.05, 2.05.11, 2.05.12, 2.07.02?

Почему нет вентиляции в помещениях №2.05.04 (Горячий цех) и 2.05.08 (Холодный цех), 2.05.09 (Кладовая ресторана) это ведь производственные изолированные помещения комбината питания?

18. Система ПВ70, вытяжка куда уходит? По схеме на листе 57 вытяжка из установки заканчивается на отм -4,768.

19. Как будет выполнена вытяжная вентиляция системы В44.1 для душевой «Октобус» №2.09.03? А главное зачем? Это декоративная душевая без потолка.

20. На листе 26 добавить высотные отметки.

21. Системы В11, В12, В13, В14, В71, В69, В2, В3, В5, В19, В15, В6, В20, В29, В46, В49, В65, В60, В61, В66, В67, В40, В52, В51, В 64, В62, В63, В64, В24, В25, В17, В18, В20, В28, В29, В30, В31, В32, В40, В36, В35, В38, В45, В38, В39, В44, В49, В68, В70 на каких высотных отметках вытяжки выходят на улицу?

22. Обязательно нужны разрезы по коридорам, где проходит скопление воздуховодов.

23. Лист 5 нечитаемый. Непонятно, где вент. агрегаты, где воздуховоды? А если его распечатать в чёрно-белом, то просто будет сплошное чёрное пятно. Данный лист нужно исправить и разделить.

Раздел АР2018-061-РД-17-ОВ.

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г. 

1.                       Представить исправленный проект, с учётом изменений проекта вентиляции и согласно новым планировочным решениям, в том числе с изменённой венткамерой на 4 этаже в блоке 2.

Раздел АР2018-061-РД-33-АУПТ

Проект получен в электронном виде 28.02.2023г.

Замечания выданы 01.03.2023 г.

1. Не оборудованы АУПТ помещения "План -1 этажа" (ГЧ лист 3-5): 0.05.09 (клад. муки); ??? (коридор пом.02.02.21,20,03); 0.05.12.3 (получение яичной массы);??? (пом. вых. ЛК-R2); 0.15.05 (приёмка грязного белья); 0.15.12 (сорт. чист белья); 0.04.02 (пом. на 10 РМ); 0.04.49 (хоз. пом.); 0.04.57 (экспедиторская).  Под вопросом: 0.05.17 (кладовая отходов).

2. Не оборудованы АУПТ помещения "План 1 этажа» (ГЧ лист 7-9): 1.05.025 (раздаточная); 1.05.17 (сан. гардероб); 1.05.05 (буфет разд. кафе); 1.16.07 (подс. пом.);1.04.27 (служ. пом.); 1.14.01 (рецепшн фитнеса); 1.13.07 (душ. холл); 1.02.10 (тех. антресоль); 1.02.01 (антресоль нас.атр.); 1.01.13 (холл).

3. Не оборудованы АУПТ помещения "План 2 этажа" (ГЧ лист 12-14): 2.05.11(раздаточная); 2.14.39 (пом. тренеров); 2.09.21 (ком. релаксации). Под вопросом: 2.05.19 (тамбур пом. Запаса передв. точ. продаж); 2.14.05(тамбур); 2.14.21 (тамбур).

4. Не оборудованы АУПТ помещения "План 3 этажа" (ГЧ лист 16-18): 3.05.01(пом. сервировочной); 3.05.02 (сбор гр. посуды); 3.05.03 (санитарный гардероб); 3.01.010 (комната мат. и реб.); 3.04.06 (пом. службы клининга) Под вопросом: 3.11.17 (инвентарная бассейна); 3.01.01 (распределительный холл аквапарка); 3.14.12 (трен. зона сухого плаванья).

5. Не оборудованы АУПТ помещения "План 4 этажа" (ГЧ лист 21-23): 4.01.01(коридор)

6. Не подключена к ПВ в помещении 8Г.04.02, устанавливаемая согласно технологии, камера очистки мусоропровода с автоматическим устройством пожаротушения.

7. Не оборудованы ПТ не категорийные помещения 0Г.01.07 и 2Г.04.04.

8. Осуществить сплинкерное пожаротушение воздуховодов диаметром и шириной более 750 мм.

Ответчик обязуется в ходе исправления вышеуказанных замечаний внести изменения в ранее согласованные разделы рабочей документации в случае, если в этом возникает необходимость и это не требует повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации.

Внесение дополнительных замечаний, не вошедших в настоящее мировое соглашение, не допускается».

 

Производство по делу № А33-8697/2023 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Термит» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 51 282 рублей 50 копеек, уплаченную по платежному поручению от 28.03.2023 № 952 за рассмотрение иска.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Техстрой» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 40 074 рубля 50 копеек, уплаченную по платежному поручению от 04.07.2023 № 36 за рассмотрение встречного иска.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Термит» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1500 рублей, уплаченную по платежному поручению от 14.12.2023 № 74408 за рассмотрение апелляционной жалобы.

 

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий

 

И.Н. Бутина

Судьи:

 

Н.Н. Белан

 

О.В. Петровская