АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

29 июня 2023 года

Дело №

А21-8521/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2023 года.

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Пряхиной Ю.В., судей Власовой М.Г.,                  Куприяновой Е.В., 

при участии от Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» представителя ФИО1 по доверенности от 30.04.2021, от общества с ограниченной ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг» представителя ФИО2 по доверенности от 16.12.2022, от  общества с ограниченной ответственностью «Маринсис» представителя Ратушной А.К. по доверенности от 02.03.2023,

рассмотрев 26.06.2023 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.12.2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 по делу № А21-8521/2022,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг», адрес: 350059, 

<

...>, лит. И,                            ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее - Общество), обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию «Росморпорт», адрес: 127030,                 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее - Предприятие), об изменении условий договора подряда от 29.04.2021 № КУ-90/21 в части срока выполнения работ, а именно, Общество просило установить срок выполнения работ до 30.09.2023 (пункт 3.1); изменить условия договора в части порядка оплаты работ и оборудования в редакции общества (пункты 2.4, 2.4.1 - 2.4.4) (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнений).

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 07.11.2022 приняты к рассмотрению встречные требования Предприятия о расторжении договора подряда от 29.04.2021 № КУ-90/21, о взыскании неустойки в сумме 5 794 889,94 руб.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 14.11.2022 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено общество с ограниченной ответственностью «Маринсис», адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А, пом. 4Н, оф. 313 Р.М. 2, ОГРН 

<

***>,               ИНН 

<

***>.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 29.12.2022 в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 решение суда первой инстанции отменено в части отказа в удовлетворении встречных требований; апелляционным судом расторгнут договор подряда от 29.04.2021 № КУ-90/21, взыскано с Общества в пользу Предприятия  5 794 889,94 руб. неустойки, 62 974 руб. в возмещение затрат на оплату государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе; в остальной части решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.12.2022 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Общество обратилось в Арбитражный суд Северо-Западного округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, а также на неправильное применение судами норм материального права и нарушение ими норм процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении первоначального иска и отказе в удовлетворении встречных требований.

После принятия кассационной жалобы к производству от Общества поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного сторонами 05.06.2023.

В судебном заседании представители Общества и Предприятия просили суд утвердить мировое соглашение, производство по делу прекратить; представитель третьего лица против утверждения мирового соглашения не возражал.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассмотрен судом округа в порядке статьи 141 АПК РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

В соответствии с частью 6 статьи 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Исследовав материалы дела, изучив условия мирового соглашения сторон, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах представленное сторонами мировое соглашение подлежит утверждению судом кассационной инстанции.

Согласно части 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.12.2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 подлежат отмене, а производство по делу - прекращению.

Руководствуясь статьями 139, 141, 150, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

Утвердить мировое соглашение от 05.06.2023, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг» и  Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт», в следующей редакции:

«В целях урегулирования спора по делу №А21-8521/2022, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ФГУП «Росморпорт» в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг» в лице генерального директора               ФИО4, действующего на основании Устава (далее - Стороны), заключили настоящее Мировое соглашение в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда о нижеследующем:

1. Считать договор подряда № КУ-90/21 от 29.04.2021, заключенный между Истцом и Ответчиком (далее - Договор), действующим и подлежащим исполнению Сторонами в порядке и на условиях, установленных Договором и настоящим Мировым соглашением.

2. Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

2.1. Дополнить пункт 1.2 Договора абзацем в следующей редакции:

«На момент окончания работ, программное обеспечение должно быть в установленном порядке зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и подана заявка на включение в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», размещенный на сайте Минцифры России».

2.2. Абзац 2 пункта 2.4 Договора изложить в следующей редакции:

«Авансовый платеж зачитывается пропорционально при оплате принятых Заказчиком оборудования и/или фактически выполненных работ».

2.3. Пункт 2.4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Оплата не смонтированного оборудования производится по факту поставки в соответствии п. 3.2.2 Договора в течение не более 15 рабочих дней после подписания товарной накладной (ТОРГ-12) и предъявления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, с учетом пропорционального зачета ранее выплаченной суммы аванса».

2.4. Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: 

«2.5. Оплата фактически выполненных работ по Договору производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и получения от Подрядчика счета, выставленного на основании подписанных Сторонами без замечаний следующих документов: акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, с учетом пропорционального зачета ранее выплаченной суммы аванса».

2.5. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ - до 29.12.2023 (включительно). Начало выполнения работ - следующий день за днем подписания настоящего Договора».

2.6. Пункт 3.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2.1 Подрядчик корректирует рабочую документацию в соответствии с поставленным и смонтированным оборудованием и согласовывает ее с Заказчиком.

Сдача-приемка работ по корректировке рабочей документации оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

Со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме  КС-2 по корректировке рабочей документации, последняя становится неотъемлемой частью Договора».

2.7. Пункт 3.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2.2. Поставка Оборудования.

Подрядчик вправе осуществить передачу оборудования в не смонтированном виде.

В таком случае обязательства по поставке оборудования считаются исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон накладной ТОРГ-12 и предоставления счета-фактуры, с указанием сведений о стране происхождения товара, сертификатов соответствия, паспортов.

В случае если документ составлен на иностранном языке, Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом, оформленный перевод этой документации на русский язык.

При приемке оборудования Заказчик проводит его проверку на предмет соответствия количеству и комплектности, указанным в товарной накладной, а также целостности и товарному виду.

Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования сведениям, указанным в товарной накладной, Заказчик информирует об этом Исполнителя в письменном виде.

Подрядчик обязуется за свой счет заменить/допоставить Оборудование Заказчику по адресу, указанному Заказчиком, в срок, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

Указанный срок замены/допоставки Оборудования не продлевает срока выполнения Работы по настоящему Договору.

Проверка работоспособности поставленного оборудования производится Заказчиком после монтажных и пусконаладочных работ, при сдаче-приемке выполненных работ по Договору.

Подрядчик вправе передать оборудование в смонтированном виде в момент сдачи-приемки фактически выполненного объема работ, в таком случае обязательства считаются исполненными в порядке, предусмотренном п. 3.2.4.1 Договора».

2.8. Изложить пункты 3.2.4 и 3.2.4.1. Договора в следующей редакции:

«3.2.4. Сдача-приемка Работ и Оборудования по Договору».

3.2.4.1. Сдача-приемка Работ и Оборудования осуществляется Подрядчиком исходя из фактически выполненного объема работ и подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актов скрытых работ.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставляется Подрядчиком с приложением указанных в настоящем пункте документов в двух подлинных экземплярах.

Счет-фактура и счет на оплату фактически выполненных работ передаются Подрядчиком Заказчику не позднее 3-х рабочих дней со дня приемки работ по акту КС-2.».

2.9. Абзац 2 пункта 6.3 Договора изложить в следующей редакции:

«Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 0,03 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать пени из любых платежей, причитающихся Подрядчику».

2.10. Дополнить Договор пунктом 9.1.3 в следующей редакции:

«9.1.3. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить новую Гарантию, уменьшенную на сумму пропорционально исполненных обязательств, приемка которых осуществлена в порядке, предусмотренном разделом III Договора, при этом размер новой Гарантии не может быть менее  10 % (десяти) процентов от цены Договора».

2.11. Приложения № 5 и № 6 к Договору исключить.

3. Остальные условия Договора остаются без изменения.

4. ООО «ТМЮ» обязуется уплатить ФГУП «Росморпорт» в рассрочку на 2 (два) года неустойку в размере 5 794 889 (пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 94 копейки (далее - задолженность) за период нарушения срока исполнения обязательств по Договору с 26.07.2022 по 31.10.2022.

Неустойка перечисляется Подрядчиком Заказчику равными ежемесячными платежами в размере 241 453,75 рублей, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утверждено настоящее мировое соглашение, по реквизитам, указанным в разделе XIII Договора.

Подрядчик уплачивает сумму начисленных процентов одновременно с производимыми ежемесячными платежами не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным.

На сумму ежемесячных платежей начисляются проценты по следующей формуле:

- за период по 30.11.2024 включительно: ключевая ставка, установленная Банком России (далее - КС) + 0,82 % годовых;

- за период с 01.12.2024 по 30.06.2025 включительно: КС + 1,65 % годовых; 

- при погашении неустойки (ее части) после 30.06.2025 к непогашенной части применяется ставка КС + 2,5 % годовых.

Проценты, начисленные на сумму задолженности, оплачиваются одновременно с оплатой части задолженности.

При досрочном погашении неустойки применению подлежит ставка процента, указанная в настоящем пункте Мирового соглашения для периода, в котором фактически производится погашение.

Подрядчик имеет право на досрочную оплату неустойки в полном объеме без согласования с Заказчиком и без уплаты процентов, указанных в настоящем пункте Мирового соглашения за оставшийся период.

5. Подрядчик обязуется не позднее 10 рабочих дней после утверждения настоящего Мирового соглашения отказаться от требований по делу                        № А40-99696/2023.

6. ФГУП Росморпорт обязуется не позднее 2 рабочих дней со дня вступления в законную силу определения Арбитражного суда Северо-Западного округа об утверждении настоящего Мирового соглашения уведомить Федеральную антимонопольную службу об исключении сведений об ООО «ТМЮ» из реестра недобросовестных поставщиков (номер реестровой записи Р2313406, дата включения сведений в реестр - 16.05.2023) путем предоставления в ФАС России Определения Арбитражного суда Северо-Западного округа.

7. В соответствии с пунктом 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что все судебные расходы, понесенные сторонами в связи с рассмотрением Арбитражным судом Калининградской области, Тринадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Северо-Западного округа дела №А21-8521/2022, не подлежат компенсации.

8. Настоящим Стороны подтверждают наличие у них полномочий на подписание настоящего Мирового соглашения, получение всех необходимых разрешений, согласований и одобрений для заключения настоящего Мирового соглашения.

9. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, а также один экземпляр для приобщения в материалы дела №А21-8521/2022.

10. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам разд. VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

11. Исполнительный лист от 30.03.2023 серии ФС № 041305957, выданный в соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 исполнению не подлежит.

12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

13. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу.

14. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные               ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны».

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.12.2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 по делу № А21-8521/2022 отменить.

Производство по делу № А21-8521/2022 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг», адрес: 350059, 

<

...>, лит. И,                            ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, из федерального бюджета 7800 руб. государственной пошлины.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «Росморпорт», адрес: 127030, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, из федерального бюджета 20 392,20 руб. государственной пошлины.

 

Председательствующий

Ю.В. Пряхина

 

Судьи

 

М.Г. Власова

 

Е.В. Куприянова