Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тамбов

«15» ноября 2018 года                       Дело № А64-8018/2017

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2018 года

Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2018 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Подольской О.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рязановой Е.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Администрации Тамбовского района Тамбовской области, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),к Обществу с ограниченной ответственностью «Звезда», п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),третье лицо: Казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой», г.Тамбов,об обязании устранить недостатки выполненных работ  

         при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом.

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

установил:

Администрация Тамбовского района Тамбовской области, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Звезда», п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,  об обязании общества с ограниченной ответственностью «Звезда 2» безвозмездно устранить недостатки работ, выявленные по муниципальному контракту №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области.           Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 26.01.2018 по делу №А64-8018/2017, для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, назначена  экспертиза, производство которой поручено Автономной некоммерческой организации «Тамбовский центр судебных экспертиз», эксперту ФИО1. 

     Производство по делу №А64-8018/2017 приостановлено до получения заключения экспертизы, определением арбитражного суда от 30.08.2018 производство по делу возобновлено.       В процессе рассмотрения дела истец в порядке ст.49 АПК РФ  уточнил исковые требования, просил обязать ООО «Звезда-2»  безвозмездно устранить недостатки работ, выявленные по муниципальному контракту №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области в том числе:

-  произвести монтаж бордюрного камня по двум сторонам по всей строительной длине автодорог микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей  строительной длине, досыпать и уплотнить основания, с последующим устройством нового асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей длине микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж существующих уширений проезжей части ул.Сиреневая, ул.Кленовая с последующей досыпкой и уплотнения основания с учетом проектной ширины проезжей части 5,5 м. и уровнем существующей проезжей части по указанным улицам  с нормативными требованиями;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия автодороги, с последующей досыпкой, уплотнением и устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями проекта (соблюдение вертикального и поперечного профилей) и требованиями нормативной документации по следующим участкам:

- пересечение ул.Восточной с улицами Мира, Изумрудная, Цветочная и на участке ул.Восточная от ул.Цветочная до ул.Придорожная, на участке ул. Восточная от ул.Кленовая до ул.Мира;

- пересечение ул.Придорожная и ул.Тургеневская, на участке ул.Тургеневская от ул.Придорожной до ул.Цветочной, пересечение ул.Цветочная и Тургеневская и ул.Тургеневская и Цветочная;

- пересечение ул.Рубиновая от ул.Изумрудная до п. Изумрудный;

- на участке ул.Сиреневая возле дома №10, по ул.Мира возле дома №10А и 16/15, по улице Изумрудной возле дома №2/5 и 9М, по ул.Цветочная возле дома №13, на пересечении ул.Рубиновая и Придорожная.  Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

     В  процессе рассмотрения дела истец в порядке ст.49 АПК РФ  уточнил исковые требования, просил обязать ООО «Звезда-2»  безвозмездно устранить недостатки работ, выявленные по муниципальному контракту №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области в том числе:

-  произвести монтаж бордюрного камня по двум сторонам по всей строительной длине автодорог микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей  строительной длине, досыпать и уплотнить основания, с последующим устройством нового асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей длине микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж существующих уширений проезжей части ул.Сиреневая, ул.Кленовая с последующей досыпкой и уплотнения основания с учетом проектной ширины проезжей части 5,5 м. и уровнем существующей проезжей части по указанным улицам  с нормативными требованиями;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия автодороги, с последующей досыпкой, уплотнением и устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями проекта (соблюдение вертикального и поперечного профилей) и требованиями нормативной документации по следующим участкам:

- пересечение ул.Восточной с улицами Мира, Изумрудная, Цветочная и на участке ул.Восточная от ул.Цветочная до ул.Придорожная, на участке ул. Восточная от ул.Кленовая до ул.Мира;

- пересечение ул.Придорожная и ул.Тургеневская, на участке ул.Тургеневская от ул.Придорожной до ул.Цветочной, пересечение ул.Цветочная и Тургеневская и ул.Тургеневская и Цветочная;

- пересечение ул.Рубиновая от ул.Изумрудная до п. Изумрудный;

- на участке ул.Сиреневая возле дома №10, по ул.Мира возле дома №10А и 16/15, по улице Изумрудной возле дома №2/5 и 9М, по ул.Цветочная возле дома №13, на пересечении ул.Рубиновая и Придорожная, в течение 30 дней с даты вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу. Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

     В судебном заседании рассматривается ходатайство представителя истца о принятии к рассмотрению в порядке ст.49 АПК РФ заявления об уточнении исковых требований, в котором истец просит обязать Общество с ограниченной ответственностью «Звезда 2» устранить недостатки работ, выявленные по муниципальному контракту  №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, а именно:

-  произвести монтаж бордюрного камня по двум сторонам по всей строительной длине автодорог микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей  строительной длине, досыпать и уплотнить основания, с последующим устройством нового асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей длине микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж существующих уширений проезжей части ул.Сиреневая, ул.Кленовая с последующей досыпкой и уплотнения основания с учетом проектной ширины проезжей части 5,5 м. и уровнем существующей проезжей части по указанным улицам с последующим устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии  с действующими нормативными требованиями;- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия автодороги, с последующей досыпкой, уплотнением и устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями проекта (соблюдение вертикального и поперечного профилей) и требованиями нормативной документации по следующим участкам:

- пересечение ул.Восточной с улицами Мира, Изумрудная, Цветочная и на участке ул.Восточная от ул.Цветочная до ул.Придорожная, на участке ул. Восточная от ул.Кленовая до ул.Мира;

- пересечение ул.Придорожная и ул.Тургеневская, на участке ул.Тургеневская от ул.Придорожной до ул.Цветочной, пересечение ул.Цветочная и Тургеневская и ул.Тургеневская и ул.Изумрудная;

- пересечение ул.Рубиновая от ул.Изумрудная до п. Изумрудный;

- на участке ул.Сиреневая возле дома №10, по ул.Мира возле дома №10А и 16/15, по улице Изумрудной возле дома №2/5 и 9М, по ул.Цветочная возле дома №13, на пересечении ул.Рубиновая и Придорожная. Указанные недостатки необходимо устранить в течение 30 дней с даты вступления судебного акта в законную силу. Данные уточнения приняты с удом к рассмотрению.

     Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

     Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

    На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон по имеющимся материалам.

     Рассмотрев материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению, руководствуясь при этом следующим.

     Как следует из материалов дела, 16.11.2009 по итогам проведения открытого аукциона (протокол от 02.11.2009 №5) между  Администрацией Тамбовского района Тамбовской области (муниципальный заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Звезда-2» (генподрядчик) был заключен  муниципальный контракт №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, в соответствии с условиями которого, генподрядчик обязуется, в установленный контрактом срок выполнить по заданию муниципального заказчика подрядные работы по строительству автомобильных дорог: микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, а муниципальный заказчик обязуется создать генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить  в порядке установленном настоящим контрактом (п.1.1 контракта).

     Муниципальный заказчик передает часть функций по реализации условий, указанных в п.1.1 контракта, Заказчику-застройщику в порядке, установленном постановлением администрации Тамбовской области от 21.05.2002 №370 «Об утверждении Положения об областной адресной инвестиционной программе и порядке её финансирования за счет средств областного бюджета» (с последующими изменениями и дополнениями) (п.1.3 контракта).

     Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 166 594 330 руб., включая стоимость строительных материалов, расходы на перевозку и налоговые платежи (п.3.1 контракта).

     Начало выполнения работ: с даты заключения контракта, окончание работ: декабрь 2010. Работы 2009 года выполняются в объеме выделенного лимита до 25.12.2009 (п.5.1 контракта.

     Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком-застройщиком по мере поступления бюджетных средств с лицевого счета открытого в Отделении по г. Тамбову и Тамбовскому району управления Федерального  казначейства по Тамбовской области, на расчетный счет Генподрядчика за фактически выполненные работы после представления им документации, подтверждающей выполнение данных работ – актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата производится в рублях, в течение 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Заказчика-застройщика и подписания документации, подтверждающей выполнение данных работ (формы КС-2, КС-3) (п.4.1 контракта).

    В соответствии с п.11.1 контракта генподрядчик принимает на себя обязательства по устранению выявленных дефектов в период гарантийного срока, за свой счет.

    В ходе эксплуатации объекта муниципальным заказчиком совместно с заказчиком-застройщиком обнаружены дефекты (разрушение тротуаров, просадка дорожного покрытия и разрушение асфальтобетонного покрытия).

     Учитывая, что муниципальным контрактом, а также гарантийным паспортом объекта установлен гарантийный срок эксплуатации объекта и порядок устранения недостатков, то подрядчик в установленные сроки обязан безвозмездно устранить выявленные заказчиком дефекты.

     Направленные в адрес ответчика письма исх.№01-20/1011 от 28.09.2015, №01-18/845 от 29.09.2015, №01-20/111 от 29.02.2016, №01-17/33 о 29.02.2016, №01-20/1227 от 03.12.2012, №01-20/1181 от 17.11.2015, №01-20/1203 от 26.10.2016, №01-20/414 от 11.07.2016, претензия исх.№1/8922 от 08.09.2017 с требованием устранить выявленные недостатки (дефекты), оставлены без удовлетворения.

     Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Администрации Тамбовского района Тамбовской области  в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

       В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности из договоров.

        В силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

        В рассматриваемом случае обязательства сторон установлены муниципальным контрактом  №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области от 16.11.2009.

        В соответствии с частью 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд  подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

        Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

        Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, руководствуясь положениями действующего гражданского законодательства, арбитражный суд квалифицировал спорные правоотношения между сторонами как возникшие в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору подряда и регулирующиеся главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и общими положениями гражданского законодательства об обязательствах и договорах.

        В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

      На основании статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

       Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

   В силу пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

        В ходе эксплуатации объекта муниципальным заказчиком совместно с заказчиком-застройщиком обнаружены дефекты (разрушение тротуаров, просадка дорожного покрытия и разрушение асфальтобетонного покрытия).

       Для исследования значимых по делу обстоятельств, по ходатайству истца, определением арбитражного суда от 26.01.2018 по делу была назначена экспертиза, производство которой было поручено Автономной некоммерческой организации Тамбовский центр судебных экспертиз, эксперту ФИО1. На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1) Имеются ли в выполненных ООО «Звезда-2» работах на объекте: «Строительство автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области» недостатки? Если да, то какие? 

2) Установить перечень работ по устранению выявленных недостатков.

       Из заключения эксперта №177/50 от 27.08.2018 следует, имеется следующая совокупность недостатков работ, выполненных ООО «Звезда-2» в рамках муниципального контракта №21 от 16.11.2009, по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, ставших причиной возникновения дефектов, изложенных в исследовательской части заключения экспертов:

- несоответствие толщины асфальтобетонного покрытия автодороги и тротуаров в местах имеющихся дефектов, а именно:

* толщина асфальтобетонного покрытия автодороги составляет от 30 до 40 мм. при определенном проектом толщине 60 мм;

* толщина асфальтобетонного покрытия тротуаров составляет от 20 до 25 мм. при определенной проектом толщине 30 мм. Несоответствие толщины основания под покрытие из асфальтобетонной смеси требованиям проекта;

- отсутствие предусмотренных проектом бортовых камней по краям автодороги и тротуаров, а также укрепленных обочин автодороги, приводящее к разрушению кромок покрытий и образованию выбоин, разрушению под воздействие дикой растительности;

- несоответствие вертикального и поперечного покрытия автодороги в местах имеющихся дефектов, при отсутствии водоотводных устройств (оборудования водоотводных канав, сливов и т.д.), способствующих застою атмосферной влаги;

- устройство неплотного и неровного с нарушением вертикального уровня уширения полотна автодороги по улицам Сиреневая, Кленовая;

- несоответствие ширины проезжей части автодороги по ул.Сиреневая от ул. Восточная до ул.Юбилейная (ширина 5м. при проектной ширине 5,5 м.)

- несоблюдение требований устройства и уплотнения основания, послужившее причиной возникновения просадок, трещин покрытия автодорог по ул.Сиреневая возле дома №10, по ул.Мира возле дома №10А и 16/15; по ул.Изумрудная возле  дома №2/5 и 9М; по ул.Цветочная возле дома №13, на пересечении ул.Рубиновая и Придорожная.

       Для устранения выявленных недостатков работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, выполненных ООО «Звезда-2» в рамках муниципального контракта №21 от 16.11.2009, необходимо выполнить следующий перечень мероприятий:

- монтаж бордюрного камня по двум сторонам по всей строительной длине  автодорог микрорайона «Солнечный»;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей строительной длине , досыпка и уплотнение основания, с последующим устройством нового  асфальтобетонного покрытия по всей длине тротуаров мкрн. Солнечный;

- демонтаж существующих уширений проезжей части ул.Сиреневая и Кленовая, с последующей досыпкой и уплотнением основания с учетом проектной ширины проезжей части 5,5 м. и уровнем существующей проезжей части по указанным улицам, с последующим устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии с  действующими нормативными требованиями;

- демонтаж асфальтобетонного покрытия автодороги, с последующей досыпкой, уплотнением и устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями проекта (соблюдение вертикального и поперечного профилей) и требований нормативной документации по следующим участкам:

* Пересечение ул.Восточная с улицами Мира, ул.Изумрудная, ул.Цветочная, и на участке ул.Восточная от ул.Цветочная до ул.Придорожная, на участке по ул.Восточная от ул.Кленовая до ул.Мира;

* Пересечение улиц Придорожная и Тургеневская, на участке ул.Тургеневская от ул.Придорожная до ул.Цветочная, пересечение ул.Цветочная и ул.Тургеневская, пересечение ул.Тургеневская и ул.Изумрудная;

* на участке улицы Рубиновая от ул.Изумрудная до пер.Изумрудный;

* на участке по ул.Сиреневая возле дома №10; по ул.Мира возле дома №10А и 16/15; по ул.Изумрудная возле дома №2/5 и 9М; по ул.Цветочная возле дома №13; на пересечении ул.Рубиновая и Придорожная. 

        На основании вышеизложенного, выявленные недостатки явились следствием выполнения ответчиком работ ненадлежащего качества по  строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области. 

       В силу положений пункта 2 статьи 755 ГК РФ и положений статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств, которые исключают обязанность подрядчика по устранению возникших недостатков, относится на подрядчика. 

       Ответчиком не представлены доказательства возникновения дефектов выполненных в результате нормального износа, неправильной эксплуатации, или иных причин исключающих вину подрядчика. 

         Согласно пунктами 3, 4 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

         Согласно гарантийному паспорту на законченное Строительство автомобильных дорог мкрн. «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, принятого в эксплуатацию приемочной комиссией 11.08.2011, гарантийные сроки на земляное полотно составляют 8 лет., основание дорожной одежды – 6 лет, верхний слой покрытия – 4 года, обустройство дороги (дорожные знаки) – 2 года.

         Требование об устранении недостатков заявлено подрядчику в пределах гарантийного срока (письма исх.№01-20/1011 от 28.09.2015, №01-18/845 от 29.09.2015, №01-20/111 от 29.02.2016, №01-17/33 о 29.02.2016, №01-20/1227 от 03.12.2012, №01-20/1181 от 17.11.2015, №01-20/1203 от 26.10.2016, №01-20/414 от 11.07.2016, претензия исх.№1/8922 от 08.09.2017). 

         Право заказчика по своему выбору потребовать от подрядчика в случае некачественного выполнения работ или невозможности использования объекта по назначению, в том числе, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок установлено статьей 723 ГК РФ. 

         Суд считает возможным возложить на ответчика обязанность по устранению выявленных недостатков. 

          Указанный способ защиты права корреспондируется с нарушением обязательства в части соответствия качества в период гарантийного срока и ведет к восстановлению нарушенного права, являющегося предметом настоящего иска. Выбор способа защиты является правом истца. 

         В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

         Исходя из сроков выполнения работ по муниципальному контракту №21 от 16.11.2009, требований статьи 723 ГК РФ о необходимости применения критерия разумности при установлении сроков устранения недостатков, суд считает необходимым установить срок для исполнения решения суда – 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

       Таким образом, суд пришел к выводу, что заявленные требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

       В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа  состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

        Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

      Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по существу. 

     Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на ответчика, учитывая предоставление истцу отсрочки ее уплаты.

      Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕШИЛ:

   Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Звезда 2» устранить недостатки работ, выявленные по муниципальному контракту  №21 на выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района Тамбовской области, а именно:

-  произвести монтаж бордюрного камня по двум сторонам по всей строительной длине автодорог микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей  строительной длине, досыпать и уплотнить основания, с последующим устройством нового асфальтобетонного покрытия тротуаров по всей длине микрорайона «Солнечный» Тамбовского района Тамбовской области;

- произвести демонтаж существующих уширений проезжей части ул.Сиреневая, ул.Кленовая с последующей досыпкой и уплотнения основания с учетом проектной ширины проезжей части 5,5 м. и уровнем существующей проезжей части по указанным улицам с последующим устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии  с действующими нормативными требованиями;

- произвести демонтаж асфальтобетонного покрытия автодороги, с последующей досыпкой, уплотнением и устройством асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями проекта (соблюдение вертикального и поперечного профилей) и требованиями нормативной документации по следующим участкам:

- пересечение ул.Восточной с улицами Мира, Изумрудная, Цветочная и на участке ул.Восточная от ул.Цветочная до ул.Придорожная, на участке ул. Восточная от ул.Кленовая до ул.Мира;

- пересечение ул.Придорожная и ул.Тургеневская, на участке ул.Тургеневская от ул.Придорожной до ул.Цветочной, пересечение ул.Цветочная и Тургеневская и ул.Тургеневская и ул.Изумрудная;

- пересечение ул.Рубиновая от ул.Изумрудная до п. Изумрудный;

- на участке ул.Сиреневая возле дома №10, по ул.Мира возле дома №10А и 16/15, по улице Изумрудной возле дома №2/5 и 9М, по ул.Цветочная возле дома №13, на пересечении ул.Рубиновая и Придорожная.

       Указанные недостатки необходимо устранить в течение 30 дней с даты вступления судебного акта в законную силу. 

       Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

      Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения в мотивированном виде, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

        Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Тамбовской области.

            Судья                         О.А. Подольская