48_14247757  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-88247/22

19 июля 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к ООО МУЛЬТИСИСТЕМА (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о безвозмездном устранении недостатков работ по договору № 1547-К от  18.12.2018, взыскании неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Мультисистема» безвозмездно устранить в месячный срок со дня  вступления в силу решения Арбитражного суда Московской области выявленные недостатки  (дефекты), указанные в Рекламационном акте от 13.05.2022, на фасаде и системе наружного  водостока многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения недостатков  работ, определенных в Рекламационном акте, в размере 161883, 16 руб. за период с  15.06.2022 по 20.10.2022; а также за период с 21.10.2022 по дату фактического исполнения  обязательства по устранению недостатков (дефектов) капитального ремонта, начисленную на  сумму 2192167 рублей 84 копеек, исходя из 1/130 действующей на дату уплаты неустойки  ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебную неустойку в размере 1 000 руб. (одна тысяча  рублей 00 копеек) за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда  Московской области;  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебные расходы по оплате государственной пошлины  в размере 11856 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская