РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-305814/18-110-2421

26 июля 2019 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 26 июля 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «МИАНСТРОЙ» (ОГРН 1075047014460, 141700 Московская область город Долгопрудный улица Летная 9) к обществу с ограниченной ответственностью  «А-7 ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1185053018875, 143985 Московская область город Балашиха улица Автозаводская (Железнодорожный Мкр.) дом 36 литер Б офис 348 этаж 3) о взыскании 10 176 882,59 руб.,

882,59 руб.,

при участии:

по протоколу, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МИАНСТРОЙ» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «А-7 ИНЖИНИРИНГ» о взыскании 9 841 207,20 руб. неотработанного аванса по Договору подряда №19/05/06 от 30.08.2018, 335 675,39 руб. пеней за неисполнение обязательств по соблюдению сроков выполнения работ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Мианстрой» (Истец/Подрядчик) и ООО «А-7 Инжиниринг» (далее - Ответчик/Субподрядчик) был заключен договор подряда № 19/05/06 от 30.08.2018 г. (далее - Договор) в соответствии с условиями Субподрядчик обязуется выполнить подрядные работы по: «Строительству дороги Солнцево-Бутово-Видное. 1 Этап. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе. Адрес строительства: Троицкий административный округ города Москвы, Новомосковский административный округ города Москвы» (далее - Объект).

Стоимость работ согласно п.3.1. Договора составляет 10 165 719,20 рублей, в том числе НДС 18% 9 946 330,10 рублей.

В соответствии с п. 4.1. Договор Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные в Графике производства работ (приложение № 1 к Договору).

При это стороны установили дату начала Работ (07.08.2018 г.) и дату окончания работ (до 20.09.2019 г. включительно) (п.4.2. Договора).

В соответствии с п. 1. ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 4.7. Договора Субподрядчик обязался соблюдать сроки выполнения работ, в том числе промежуточные сроки этапов работ, указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору).

В соответствии с п. 5.2.2. Договора Субподрядчик с учетом положений п.п. 5.1, 5.2.1 Договора до 20 (двадцатого) числа отчетного месяца выполнения Работ, представляет Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), завизированный представителями Заказчика и Подрядчика, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Таким образом, Стороны установили в Договоре ежемесячный прием этапов работ в срок до 20 числа отчетного месяца.

В соответствии с п. 3.1.3 Подрядчик вправе произвести выплату аванса Субподрядчику в части стоимости подрядных работ. Размер аванса, порядок его выплаты и погашения регламентируются Дополнительным соглашением к Договору, заключаемым Сторонами.

04.09.2018 г. между Истцом и Ответчиком было подписано Соглашение о зачете встречных однородных требований (далее - Соглашение) согласно условиям которого, сумма аванса в размере 2 254 000,00 рублей, ранее перечисленная Истцом по договору № 353/02-2018 г. от 17.08.2018 г. после подписания Соглашения является суммой аванса по Договору.

20.09.2018 г. между Истцом и Ответчиком было подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору, согласно условиям которого Субподрядчик обязался выполнить дополнительные работы по Договору.

Согласно п. 2.1. Дополнительного соглашения № 1 стоимость дополнительных работ составляет 3 11 414, 67 рублей, в том числе НДС 18% 474 470,03 рублей. Общая стоимость работ по Договору установлена в размере 13 276 133,87 рублей, в том числе НДС 18% 2 025 172,96 рублей (п. 2.3 Дополнительного соглашения № 1). При этом срок окончания работ, согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1, установлен до 14.10.2018 г. включительно

В соответствии с п. 3.1. Дополнительного соглашения Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс на общую сумму 2 000 000 рублей, в том числе НДС -18% в размере 305 084,75 рублей.

Доказательством исполнения Подрядчиком обязательства по перечислению аванса являются следующие документы: платежное поручение № 1489 от 07.09.2018 г. на сумму 2 000 000,00 рублей;

В силу п. 3.3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору Субподрядчик обязался погасить (отработать) всю сумму аванса, полученного от Подрядчика по Соглашению, в срок не позднее 14.10.2018 г. В случае нарушения указанного обязательства, Субподрядчик обязался вернуть Подрядчику непогашенную часть авансового платежа в течение 7 (семи) с даты, указанной в п. 3.3 Дополнительного соглашения (п. 4 Дополнительного соглашения № 1 к Договору).

03.10.2018 г. между Истцом и Ответчиком было подписано Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее - Дополнительное соглашение № 2), согласно условиям которого Субподрядчик обязался выполнить дополнительные работы по Договору.

Согласно п. 2.1. Дополнительного соглашения № 2 стоимость дополнительных работ составляет 4 192 981 рублей, в том числе НДС 18% 639 607 рублей. При этом срок окончания работ, согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2, установлен до 26.10.2018 г. включительно.

В соответствии с п. 3.1 Дополнительного соглашения № 2 Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс на общую сумму 3 387 207,20 рублей, в том числе НДС -18% в размере 516 692,62 рублей.

Доказательством исполнения Подрядчиком обязательства по перечислению аванса являются следующие документы:

платежное поручение № 1730 от 12.10.2018 г. на сумму 887 207,20 рублей;

платежное поручение № 1833 от 24.10.2018 г. на сумму 500 000 рублей;

платежное поручение № 1947 от 07.11.2018 г. на сумму 1 000 000 рублей;

платежное поручение № 1949 от 07.11.2018 г. на сумму 1 000 000 рублей

В силу п. 3.3 Дополнительного соглашения № 2 к Договору Субподрядчик обязался погасить (отработать) всю сумму аванса, полученного от Подрядчика по Соглашению, в срок не позднее 26.10.2018 г. В случае нарушения указанного обязательства, Субподрядчик обязался вернуть Подрядчику непогашенную часть авансового платежа в течение 7 (семи календарных дней с даты, указанной в п. 3.3. Дополнительного соглашения № 2 (п. 3.4 Дополнительного соглашения № 2 к Договору).

10.10.2018 г. между Истцом и Ответчиком было подписано Дополнительное соглашение № 3 к Договору (далее - Дополнительное соглашение № 3), согласно условиям которого Субподрядчик обязался выполнить дополнительные работы по Договору.

Согласно п. 2.1. Дополнительного соглашения № 2 стоимость дополнительных работ составляет 2 595 493,92 рублей, в том числе НДС 18% 415 132,03 рублей. При этом срок окончания работ, согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 3, установлен до 30.10.2018 г. включительно.

В соответствии с п. 3.1 Дополнительного соглашения № 3 Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс на общую сумму 2 200 000 рублей, в том числе НДС -18% 335 593,22 рублей.

Доказательством исполнения Подрядчиком обязательства по перечислению аванса являются следующие документы:

платежное поручение № 1760 от 17.10.2018 г. на сумму 1 200 000 рублей;

платежное поручение № 1948 от 07.11.2018 г. на сумму 1 000 000 рублей;

В силу п. 3.3 Дополнительного соглашения № 2 к Договору Субподрядчик обязался погасить (отработать) всю сумму аванса, полученного от Подрядчика по Соглашению, в срок не позднее 30.10.2018 г. В случае нарушения указанного обязательства, Субподрядчик обязался вернуть Подрядчику непогашенную часть авансового платежа в течение 7 (семи календарных дней с даты, указанной в п. 3.3. Дополнительного соглашения № 3 (п. 3.4 Дополнительного соглашения № 3 к Договору).

Общая сумму аванса по Договору перечисленная Истцом Ответчику составляет 9 841 207,20 рублей.

По состоянию на 22.11.2018 г. и до настоящего времени Субподрядчик не исполнил своих обязательств по Договору, Работы не были выполнены в полном объеме, полученный аванс в размере 9 841 207,20 рублей не возвращен.

Истец неоднократно обращался в адрес Ответчика с требованиями приступить к выполнению работ, предоставить документы, подтверждающие выполнение работ, однако данные обращения остались без ответа со стороны Ответчика.

Принимая во внимание, что Ответчиком Работы не были выполнены в полном объеме, а просрочка даты окончания Работ составляет более 20 дней, при этом Ответчик оставил без внимания обращения Истца о необходимости выполнения работ и соблюдения сроков, предусмотренных Договором Истец, в порядке, предусмотренном п.2 ст. 715 ГК РФ уведомил Ответчика об одностороннем отказе от исполнения Договора с даты получения уведомления.

Согласно п. 3 ст.450 ГК РФ права законом либо соглашением сторон также может быть предусмотрен односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично при определенных условиях. Такой отказ приводит к тому, что договор считается соответственно расторгнутым или измененным

Согласно п. 2. ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, при реализации Истцом права на односторонний отказ от исполнения Договора, которое влечет за собой расторжение договора, не требуется обращения в суд.

Уведомление об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения Договора (исх. № 139/1 от 22.11.2018 г.) было получено Ответчиком 04.12.2018 г., что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 14398529012738.

Таким образом, Договор подряда № 19/05/06 от 30.08.2018 г. был расторгнут 04.12.2018 г.

В силу пункт 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения обязательства по договору, следовательно, все неисполненное по сделке подлежит возврату.(п. 4 ст. 453 ГК РФ).

В данном случае для Истца неисполненным по сделке является перечисленная и неосвоенная Ответчиком сумма аванса.

После расторжения Договора оснований удержания суммы в размере 9 841 207,20 рублей Ответчика не имеется.

При указанных обстоятельствах иск в этой части  подлежит удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п. 12.4 Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от Стоимости Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

Учитывая, что Субподрядчиком работы не были выполнены в полном объеме, начисление пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1, п. 4.2 и п. 4.7 Договора, подлежит в полном объеме от Стоимости Договора.

Таким образом, сумма пени за неисполнение Субподрядчиком обязательств по соблюдение сроков выполнения Работ, что по расчету истца за период с 01.09.2018 по 20.11.2018,проверенному судом  составляет 335 675,39 рублей.

При  этом суд считает доводы  ответчика несостоятельными,  поскольку  достоточным,  допустимых и достоверных доказательств  фактического выполнения работ на спорную сумму не представлено,  а односторонние акты в данном случае таковыми не являются,  заказчиком представлен был мотивированный отказ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью  "А-7 ИНЖИНИРИНГ"  в пользу  общества с ограниченной ответственностью МИАНСТРОЙ"  сумму аванса  в размере 9 841 207 руб. 20 коп. , 335 675 руб. 35 коп. неустойки, 73 884  руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко