Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 66954/21-3-470

г. Москва

10 сентября  2021 года

Резолютивная часть объявлена 08 июля   2021 года 

Дата изготовления решения в полном объеме 10 сентября  2021 года  

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Конструкция" (672030, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.04.2011, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" (125252, Москва город, 3-я Песчаная улица, дом 2а, офис башня северо-западная(красная)эт.6 пом.1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.10.2015, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по договорам подряда №5501180029 от 13.04.2018 г., №5501180039 от 19.04.2018 г., №5501180043 от 20.04.2018 г., №5501180079 от 27.07.2018 г., №5501180080 от 27.07.2018 г. в размере 3 187 384 руб. 63 коп., пени в размере 318 738 руб. 46 коп., штрафа по Соглашению от 01.09.2020 г. в размере 318 738 руб. 47 коп.,

В судебное заседание представители сторон не явились,

У С Т АН О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью "Конструкция" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" о взыскании задолженности по договорам подряда №5501180029 от 13.04.2018 г., №5501180039 от 19.04.2018 г., №5501180043 от 20.04.2018 г., №5501180079 от 27.07.2018 г., №5501180080 от 27.07.2018 г. в размере 3 187 384 руб. 63 коп., пени в размере 318 738 руб. 46 коп., штрафа по Соглашению от 01.09.2020 г. в размере 318 738 руб. 47 коп.

Представители сторон не явились, заявили ходатайства об отложении судебного разбирательства в целях заключения мирового соглашения. 

Суд считает ходатайства сторон об утверждении мирового соглашения не подлежащим удовлетворению, исходя из следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

При этом мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (ч.2 ст. 140 АПК РФ).

Таким образом, мировое соглашение по своей сути представляет собой гражданскую сделку в порядке ст. 153 ГК РФ, заключаемой сторонами под контролем суда на предмет его соответствия закону и законным интересам других лиц (ч.3 ст. 139 АПК РФ).

Доказательств о предложении реструктуризации долга, переписки сторон о возможности заключения мирового соглашения суду не представлено. Таким образом, довод сторон о добровольном урегулировании возникшего спора во внесудебном порядке не нашел документального подтверждения.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 138 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Поскольку взаимного согласия на подписание мирового соглашения сторонами не достигнуто, ходатайства сторон об отложении судебного разбирательства не подлежит удовлетворению в целях экономии процессуального времени. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между Обществом с ограниченной ответственностью "Конструкция" (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" (Заказчик) были  заключены договоры № 5501180029 от 13.04.2018 г., № 5501180039  от 19.04.2018 г., № 5501180043,  от 20.04.2018 г., № 5501180079 от 27.07.2018 г., № 5501180080 от 27.07.2018 г.

В соответствии с договором № 5501180029 от 13.04.2018 г. по настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный срок в соответствии с требованиями, определенными Договором, выполнить на Объекте: «Отопительная котельная со складом угля» в составе объекта капитального строительства «Быстринский горно-обогатительный комбинат» (Газимуро-Заводский район Забайкальского края) работы по теплоизоляции трубопроводов в Котельной, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также Ведомостью объемов, стоимости работ и сроков выполнения работ (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, предусмотренном Договором.

В силу п. 4.1 договора работы должны быть выполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оплаты аванса, указанного в п. 10.1.1. Договора.

Срок выполнения работ начинается со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки и получения от Заказчика полного комплекта документации, согласованной к производству работ.

В соответствии с п. 5.1 цена Договора составляет 2 354 985,00 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять, 00/100) руб., в том числе НДС 18% - 359 235,00 руб.

В соответствии с п. 10.1.1 договора Заказчик оплатит Подрядчику аванс в размере 1 177 492,50 (один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста девяносто два, 50/100) руб., в том числе НДС 18% - 179 617,50 руб., что составляет 50% от цены Работ, указанной в п. 5.1. Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора, при условии получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Подрядчика на аванс.

Сумма авансового платежа является твердой и не подлежит пересмотру на все время действия Договора. Подрядчик не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты получения авансового платежа, предоставит Заказчику оригинал счета-фактуры на сумму полученного авансового платежа с выделением суммы НДС «в том числе» и со ссылкой на дату и номер платежного поручения.

В соответствии с договором № 5501180039 от 19.04.2018 г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный срок в соответствии с требованиями, определенными Договором, выполнить на Объекте: «Отопительная котельная со складом угля» в составе объекта капитального строительства «Быстринский горно-обогатительный комбинат» (Газимуро-Заводский район Забайкальского края) работы по автоматизации систем вентиляции и монтажу систем автоматизации аспирационных установок, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также Ведомостью объемов, стоимости работ и сроков выполнения работ (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, предусмотренном Договором.

Согласно п. 4 .1 договора Работы должны быть выполнены в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в Приложении №2 к Договору.

Срок выполнения работ начинается со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки и получения от Заказчика полного комплекта документации, согласованной к производству работ.

В силу п. 5.1 договора цена Договора составляет 2 150 095,70 (два миллиона сто пятьдесят тысяч девяносто пять, 00/100) руб., в том числе НДС 18% - 327 980,70 руб.

Платежи за выполненные Работы, указанные в статье 1 Договора и Приложении №2 к Договору, будут осуществляться Заказчиком за счет средств, полученных от Основного заказчика, в рублях путем банковского перевода со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанные в Договоре, в следующем порядке:

Заказчик оплатит Подрядчику аванс в размере 645 028,71 (шестьсот сорок пять тысяч двадцать восемь, 71/100) руб., в том числе НДС 18% - 98 394,21 руб., что составляет 30% от цены Работ, указанной в п. 5.1. Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора, при условии получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Подрядчика на аванс.

Сумма авансового платежа является твердой и не подлежит пересмотру на все время действия Договора. Подрядчик не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты получения авансового платежа, предоставит Заказчику оригинал счета-фактуры на сумму полученного авансового платежа с выделением суммы НДС «в том числе» и со ссылкой на дату и номер платежного поручения.

60% от цены фактически выполненных работ, что составляет 1 290 057,42 (один миллион двести девяносто тысяч пятьдесят семь, 42/100) руб., в том числе НДС 18% - 196 788,42 руб., будет оплачено Заказчиком по мере выполнения Работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком оригиналов:

счета Подрядчика на 100% цены выполненных Работ с указанием суммы вычитаемого аванса, указанного п. 10.1.1. Договора и суммы вычитаемых гарантийных удержаний согласно п. 10.1.3. Договора, и суммы к платежу; Акта сдачи-приёмки исполнительной документации, подписанного обеими сторонами; Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3);

счета-фактуры на 100% цены выполненных Работ; Отчет об использовании давальческих материалов.

Основанием для отказа от оплаты может служить отсутствие любого из вышеперечисленных документов.

10% от цены фактически выполненных Работ, что составляет 215 009,57 (двести пятнадцать тысяч девять, 57/100) руб., в том числе НДС 18% - 32 798,07 руб., будут оплачены после подписания обеими Сторонами Акта приемки всего объема работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика; подписанного Основным Заказчиком Акта законченного строительством объекта по форме КС 11.

В соответствии с договором № 5501180043 от 20.04.2018 г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный срок в соответствии с требованиями, определенными Договором, выполнить на Объекте: «Отопительная котельная со складом угля» в составе объекта капитального строительства «Быстринский горно-обогатительный комбинат» (Газимуро-Заводский район Забайкальского края) работы по монтажу отопления, вентиляции, кондиционирования и прочих монтажных работ, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также Ведомостью объемов, стоимости работ и сроков выполнения работ (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, предусмотренном Договором.

В силу п. 4.1 договора работы должны быть выполнены в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в Приложении №2 к Договору

В соответствии с п. 5.1 договора цена договора составляет 19 342 560,61 (девятнадцать миллионов триста сорок две тысяч пятьсот шестьдесят, 61/100) руб., в том числе НДС 18% - 2 950 560,09 руб.

Согласно п. 10 договора платежи за выполненные Работы, указанные в статье 1 Договора и Приложении №2 к Договору, будут осуществляться Заказчиком за счет средств, полученных от Основного заказчика, в рублях путем банковского перевода со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанные в Договоре, в следующем порядке:

Заказчик оплатит Подрядчику аванс в размере 1 ООО 000,00 (один миллион, 00/100) руб., в том числе НДС 18% - 152 542,37 руб., что составляет 5,169946% от цены Работ, указанной в п. 5.1. Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора, при условии получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Подрядчика на аванс.

Учитывая, что между Заказчиком и Подрядчиком заключен договор займа №5501180021 от 29.03.2018, по которому Заказчик оплатил Подрядчику 1 000 000,00 (один миллион рублей, 00/100) руб. и теперь Подрядчик имеет обязательство по возврату суммы займа, то в соответствии со ст.410 ГК РФ Стороны имеют право произвести зачет встречных однородных требований.

Сумма авансового платежа является твердой и не подлежит пересмотру на все время действия Договора. Подрядчик не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты получения аванса, предоставит Заказчику оригинал счета-фактуры на сумму полученного авансового платежа с выделением суммы НДС «в том числе» и со ссылкой на дату и номер платежного поручения.

84,830054%   от  цены  фактически  выполненных  работ,  что  составляет  16 408 304,55 (шестнадцать миллионов четыреста восемь тысяч триста четыре, 55/100) руб., в том числе НДС 18% -2 502 961,71 руб., будет оплачено Заказчиком по мере выполнения Работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком оригиналов: счета Подрядчика на 100% цены выполненных Работ с указанием суммы вычитаемого аванса, указанного п. 10.1.1. Договора и суммы вычитаемых гарантийных удержаний согласно п. 10.1.3. Договора, и суммы к платежу; Акта сдачи-приёмки исполнительной документации, подписанного обеими сторонами; Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3);

счета-фактуры на 100% цены выполненных Работ; Отчет об использовании давальческих материалов.

Основанием для отказа от оплаты может служить отсутствие любого из вышеперечисленных документов.

        10% от цены фактически выполненных Работ, что составляет 1 934 256,06 (один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят шесть, 06/100) руб., в том числе НДС 18% -295 056,01 руб., будут оплачены после подписания обеими Сторонами Акта приемки всего объема работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика, подписанного основным заказчиком акта законченного строительством объекта по форме КС-11.

В соответствии с договором № 5501180079 от 27.07.2018 г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный срок в соответствии с требованиями, определенными Договором, выполнить на Объекте: «Отопительная котельная со складом угля» в составе объекта капитального строительства «Быстринский горно-обогатительный комбинат» (Газимуро-Заводский район Забайкальского края) работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и оборудования Котельной, именуемые в дальнейшем Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, предусмотренном Договором.

Согласно п. 4.1 договора работы должны быть выполнены в сроки: начало Работ - 01 июля 2018 г., завершение Работ - 31 августа 2018 г.

В силу п. 5.1 договора Цена Договора составляет 1 115 761,98 (Один миллион сто пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят один, 98/100) руб., в том числе НДС 18% - 170 200,98 руб.

В соответствии с п. 10 договора  платежи за выполненные Работы, указанные в статье 1 Договора и Приложении №2 к Договору, будут осуществляться Заказчиком за счет средств, полученных от Основного заказчика, в рублях путем банковского перевода со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанные в Договоре, в следующем порядке: 90% от цены фактически выполненных работ, что составляет 1 004 185,78 (Один миллион четыре тысячи сто восемьдесят пять, 78/100) руб., в том числе НДС 18% - 153 180,88 руб., будет оплачено Заказчиком по мере выполнения Работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком оригиналов: счета Подрядчика на 100% цены выполненных Работ с указанием суммы вычитаемых гарантийных удержаний согласно п. 10.1.2. Договора, и суммы к платежу; Акта сдачи-приёмки исполнительной документации, подписанного обеими сторонами; Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3); счета-фактуры на 100% цены выполненных Работ; Отчет об использовании давальческих материалов.

Основанием для отказа от оплаты может служить отсутствие любого из вышеперечисленных документов.

10% от цены фактически выполненных Работ, что составляет 111 576,20 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть, 20/100) руб., в том числе НДС 18% - 17 020,10 руб., будут оплачены после подписания обеими Сторонами Акта приемки всего объема работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика; подписанного Основным Заказчиком Акта законченного строительством объекта по форме КС-11.

В соответствии с договором № 5501180080 от 27.07.2018 г. по настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный срок в соответствии с требованиями, определенными Договором, выполнить на Объекте: «Отопительная котельная со складом угля» в составе объекта капитального строительства «Быстринский горно-обогатительный комбинат» (Газимуро-Заводский район Забайкальского края) работы по изготовлению и монтажу фасонных элементов зданий и сооружений, именуемые в дальнейшем Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, предусмотренном Договором.

В силу п. 4.1 договора работы должны быть выполнены в сроки: начало работ - с даты подписания Договора, завершение работ - 31 августа 2018 г.

В соответствии с п. 5.1 договора Цена Договора составляет 3 650 300,38 (Три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч триста, 38/100) руб., в том числе НДС 18% - 556 825,48 руб.

Согласно п. 10 договора Платежи за выполненные Работы, указанные в статье 1 Договора и Приложении №2 к Договору, будут осуществляться Заказчиком за счет средств, полученных от Основного заказчика, в рублях путем банковского перевода со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанные в Договоре, в следующем порядке:

90% от цены фактически выполненных работ, что составляет 3 285 270,34 (Три миллиона двести восемьдесят пять тысяч двести семьдесят, 34/100) руб., в том числе НДС 18% - 501 142,93 руб., будет оплачено Заказчиком по мере выполнения Работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком оригиналов: счета Подрядчика на 100% цены выполненных Работ с указанием суммы вычитаемых гарантийных удержаний согласно п. 10.1.2. Договора, и суммы к платежу; Акта сдачи-приёмки исполнительной документации, подписанного обеими сторонами; Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3); счета-фактуры на 100% цены выполненных Работ; Отчет об использовании давальческих материалов.

Основанием для отказа от оплаты может служить отсутствие любого из вышеперечисленных документов.

10% от цены фактически выполненных Работ, что составляет 365 030,04 (Триста шестьдесят пять тысяч тридцать, 04/100) руб., в том числе НДС 18% - 55 682,55 руб., будут оплачены после подписания обеими Сторонами Акта приемки всего объема работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком оригиналов: счета Подрядчика.

В обоснование исковых требований истец указывает, что работы принятые работы оплачены с нарушением установленного договорами сроков, в соответствии с заключенным между сторонами соглашением от 01.09.2020 г. ответчик признает задолженность по указанным договорам в размере 3 187 384 руб. 65 коп. 

Истец указывает, что в соответствии с п. 10.1.3 договоров, между основным заказчиком и ответчиком были подписаны КС-11. 

В связи с чем у ответчика  возникло обязательство по оплате суммы контрактов в соответствии с п. 10.1.3 договоров с 01.03.2020 г.

В соответствии с п. 1 соглашения задолженность ООО «ИК «Технопромэкспорт» перед ООО «Конструкция»  по договорам № 5501180029 от 13.04.2018 г., № 5501180039 от 19.04.2018 г., № 5501180043 от 20.04.2018 г., № 5501180079 от 27.07.2018 г., № 5501180080 от 27.07.2018 г. составляет  3 187 384,65 рублей. 

Согласно п. 2 соглашения ООО «ИК «Технопромэкспорт» обязуется погасить задолженность в следующем порядке: до 01.10.2020 г. включительно – 1 593 692,32 руб., до 01.01.2021 г. включительно-1 593 692,32 руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. между сторонами задолженность по состоянию на 31.12.2019 г. составила 3 252 375,67 руб. 

Истец указывает, что работы были выполнены в полном объеме и приняты заказчиком. 

В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию №67 от 24.02.2021 г. с требованием оплатить задолженность.

Претензионные требования ответчиком не исполнены, в связи с чем истец обратился с настоящим иском. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий  и  требований  -  в  соответствии с обычаями или  иными  обычно предъявляемыми  требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ - односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Исходя из ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Как следует из материалов дела, заказчиком исполнены надлежащим образом  договорные обязательства. Задолженность по указанным договорам и соглашению ответчиком не оспаривается. 

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчик не доказал оплату выполненных истцом работ в полном объеме, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, исковые требования по взысканию задолженности правомерны и подлежат удовлетворению в полном объеме в размере 3 187 384,63  руб.

 Также истцом заявлено требование о взыскании суммы пени за нарушение сроков оплаты принятых работ в размере 318 738,46 руб., согласно проверенному и признанному судом обоснованным расчету.

Согласно п. 17.12. договора, в случае если Заказчик нарушил свои обязательства по оплате выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями договора на срок свыше 15 (Пятнадцати) рабочих дней, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задержанного/просроченного платежа.

   В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Таким образом, сумма начисленной пени в размере 318 738,46 рублей  подлежит взысканию с ответчика, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего  исполнения  условий  Договора.

Также истцом заявлено требование о взыскании суммы штрафа в размере 318 738,47 руб.

В соответствии с п. 3 соглашения при неисполнении ответчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1, 2.2 соглашения, штрафная санкция за просрочку оплаты по договорам № 5501180029 от 13.04.2018 г., № 5501180039 от 19.04.2018 г., № 5501180043 от 20.04.2018 г., № 5501180079 от 27.07.2018 г., № 5501180080 от 27.07.2018 г. составит 318 738,47 руб. и подлежит оплате в срок, не позднее 01.02.2021 г. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Поскольку соглашение о штрафе определено сторонами в положениях соглашения от 01.09.2020 г. и неисполнение ответчиком обязательства по нему подтверждено материалами дела, требование истца о взыскании штрафа является обоснованным.

С учетом нарушения сроков оплаты задолженности по соглашению от 01.09.2020 г. сумма штрафа в размере 318 738,47 руб. подлежит взысканию  с ответчика.

            В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по госпошлине в размере 42 124 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" (125252, Москва город, 3-я Песчаная улица, дом 2а, офис башня северо-западная(красная)эт.6 пом.1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.10.2015, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Конструкция" (672030, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.04.2011, ИНН: 

<

***>) задолженность по договорам подряда №5501180029 от 13.04.2018 г., №5501180039 от 19.04.2018 г., №5501180043 от 20.04.2018 г., №5501180079 от 27.07.2018 г., №5501180080 от 27.07.2018 г. в размере 3 187 384 (Три миллиона сто восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 63 коп., пени в размере 318 738 (Триста восемнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 46 коп., штраф в размере 318 738 (Триста восемнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 47 коп.,  расходы по уплате госпошлины в размере 42 124 (Сорок две тысячи сто двадцать четыре) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья:                                     А.А. Федоточкин