100020_1436976 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-10475/2016

25 мая 2017 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Т.В. Чумаченко при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению жилищно-строительного  кооператива «Дольщик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 311190314500022) об устранении недостатков работ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск частично. 

 Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 в срок, не  превышающий 30 дней с момента вступления решения в законную силу, за счет  собственных средств устранить недостатки в жилом доме по адресу: 

<

...> народов, 41, а именно:  

- обеспечить техническое освидетельствование лифтов в 3-ем и 4-ом подъездах,  

- обеспечить ввод в эксплуатацию лифтов в 3-ем и 4-ом подъездах, 

- обеспечить составление и регистрацию декларации о соответствии лифтов  требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС  011/2011),  

- устранить вмятины на металлочерепице, коньковом элементе, оцинкованной  кровельной стали в местах стыков уклонов кровли 2-ой очереди строительства (блок-секции  в осях 1-9 и А-К),  

- установить отсутствующие фартуки из оцинкованной кровельной стали в  местах примыкания вентиляционных шахт к кровле 2-ой очереди строительства  

(блок-секции в осях 1-9 и А-К), 

- устранить дефекты монтажа фартуков из оцинкованной кровельной стали в  местах примыкания вентиляционных шахт к кровле 2-ой очереди строительства  

(блок-секции в осях 1-9 и А-К), 

- выполнить герметизацию в местах примыкания материалов  (оцинкованная кровельная сталь и металлочерепица) друг к другу на кровле 2-ой очереди  строительства (блок-секции в осях 1-9 и А-К),  

- осуществить заделку фартуков из оцинкованной кровельной стали к  вентиляционным шахтам монтажной пеной с нанесением защиты монтажной пены от  прямых солнечных и дождевых (талых) вод на кровле 2- ой очереди строительства  

(блок-секции в осях 1-9 и А-К), 

- осуществить зашивку щелей в местах перепада кровли 2-ой очереди  строительства (блок-секции в осях 1-9 и А-К),  

- установить отсутствующие зонты вентиляционных шахт на кровле 2-ой  очереди строительства (блок-секции в осях 1-9 и А-К),  

- осуществить обшивку (наружную отделку) вентиляционных шахт на кровле  

2- ой очереди строительства (блок-секции в осях 1-9 и А-К), 

- убрать строительный мусор с кровли 2-ой очереди строительства (блок-секции  

в осях 1-9 и А-К), 

- установить дверцы, не имеющие признаков деформации, на слуховые окна  

кровли 2- ой очереди строительства (блок-секции в осях 1-9 и А-К), - осуществить отделки стен у кнопок вызова лифта в 3-ем и 4-ом подъездах, 

- осуществить очистку ограждений лестниц в 3-ем и 4-ом подъездах от стойких  

загрязнений, 

- устранить дефекты обрамлений окон мансардного этажа,  

- устранить препятствие в использовании пандуса на входе в 4 подъезд 2-ой  

очереди строительства, выраженное в виде перегораживающей правую колею пандуса  

металлической опоры. Отказать в удовлетворении остальной части иска. 

2. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в  

пользу жилищно-строительного кооператива «Дольщик» 31 500 (тридцать одну тысячу  

пятьсот) руб., в том числе 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 25 500  

руб. расходов по оплате экспертизы. 

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Т.В. Чумаченко