4041/2021-20121(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Резолютивная часть решения

 

21 января 2021 года. Дело № А56-76820/2020  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная  инжиниринговая компания «СИНКО» исполнить перед акционерным обществом  «Оборонэнерго» обязательства по договору № 122-СЗФ-2019 от 15.11.2019, а именно:  

- разработать, согласовать и утвердить у заказчика программы и задания на  выполнение инженерных изысканий, выполнить инженерные изыскания, согласовать с  заказчиком технический отчет по инженерным изысканиям;  

- получить и согласовать всю исходно-разрешительную документацию; 

- разработать, согласовать и утвердить у Заказчика задание на  проектирование, разработку проектной документации, согласовать проектную  документацию со всеми заинтересованными организациями и ведомствами и с  заказчиком;  

- утвердить проектную документацию у заказчика; 

- направить от имени заказчика проектную документацию на экспертную оценку  проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения  сметной стоимости строительства и сноса объектов капитального строительства (далее  по тексту – экспертная оценка проектной документации) и получить положительное  заключение уполномоченной организации, утвердить проектную документацию у  Заказчика;  

- разработать рабочую документацию, согласовать рабочую документацию с  Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями и ведомствами,  утвердить рабочую документацию у Заказчика;  

- осуществить мероприятия по получению и оформлению прав на земельные  участки (при необходимости, а в случае объектов недвижимости - в обязательном  порядке, получить и оформить от имени Заказчика права на земельные участки, либо  разрешения на использование земельных участков, необходимые для выполнения  проектно-изыскательских работ и последующего строительства Объекта и сноса  Объекта сноса, включая изготовление схемы расположения земельного участка или  земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат  характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе  координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости,  подготовить проект межевания территории и проект планировки территории, и/или  подготовить градостроительный план земельного участка и согласовать их со всеми  заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовить и согласовать  акт выбора трассы кабельной (воздушной) линии, поставить земельные участки на  кадастровый учет, установить сервитут, подготовить проект рекультивации земель,  изменение разрешенного использования земельного участка, получить разрешение на  вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта  натурного технического обследования участка);  

- осуществить мероприятия по установлению охранных зон объектов  электросетевого хозяйства (далее по тексту – объекты ЭСХ), включая, но не  ограничиваясь:  

- подготовить сведения о границах охранных зон, которые должны содержать  графическое описание местоположения границ охранных зон, перечень координат  характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН,  

- подать заявление от имени Заказчика об установлении охранной зоны с  приложением документов, предусмотренных законодательством Российской  Федерации, в органы государственной власти или органы местного самоуправления,  уполномоченные на принятие решений об установлении охранной зоны,  

- получить выписки из ЕГРН с информацией о внесении сведений об охранной  зоне в ЕГРН;  

- выполнить работы по сносу объекта сноса; - выполнить строительные и монтажные работы; - выполнить пуско-наладочные работы. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  инжиниринговая компания «СИНКО» в пользу акционерного общества  «Оборонэнерго» 3 186 876,15 руб. неустойки за период с 01.01.2020 по 19.11.2020;  39 426 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  инжиниринговая компания «СИНКО» в доход федерального бюджета 5 508 руб.  государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Стрельчук У.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.09.2020 8:02:58

 Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна