48_13185056  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-81134/21

24 ноября 2022 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО "МОСОБЛГАЗ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных работ по договору   № РУШ-2016 от 16.02.2016, обязании совершить определенные действия, взыскании  судебной неустойки,  

руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать ООО "КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  безвозмездно в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления решения в законную силу  устранить недостатки работ, выполненных по Договору от 16.02.2016 № РУШ-2016 на  объекте «Здание корпуса «Б» Административно-делового центра многофункционального  назначения», по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, 

<

...> км Рублево-Успенского шоссе, д.1, а именно:  

1. Заменить поврежденные декоративные панели (площадью 15 кв.м.) на стене  помещения лифтового холла на 1 этаже здания.  

2. Заменить поврежденные керамогранитные плиты на полу (площадью 6 кв.м.) в  лифтовых холлах на 3,4,5,8 и 9 этажах здания.  

3. Заменить поврежденные стеклянные ограждения (площадью 30 кв.м.) на  балконах 2, 3, 5, 6 и 9 этажах здания.  

4. Заменить поврежденную потолочную панель (1 шт.) в коридоре 3-го этажа  здания.  

5. Переустановить отошедший от основания лист стемалита (1 шт.) справа от  входной двери кабинета № 912 на 9 этаже здания.  

6. Установить недостающую декоративную рейку (1 шт.) потолка в фитобаре на  10 этаже здания.  

7. Переустановить конструкцию фальшпола и переложить керамогранитные  плиты напольного покрытия (площадью 14 кв.м.) в зоне фитобара на 10 этаже здания.  

8. Заменить керамогранитные плиты (площадью 48 кв.м.) на стенах в душевых  кабинах на 10 этаже здания.  

9. Переустановить потолочные панели подвесного потолка площадью 6 332,5  

кв.м с 1 по 9 этажи здания. 

10. Заменить поврежденную плитку напольного покрытия (10 шт.) на балконах 3,  

5, 7, 8 и 9 этажей здания. 

11. Заменить поврежденные подоконные доски из ПВХ (площадью 13 кв.м.) с  

устройством деформационных швов в спортзале на 10 этаже здания. 

12. Заменить поврежденные керамогранитные плиты напольного покрытия  

(площадью 10 кв.м.) в холле столовой перед VIP-залом на 1 этаже здания. 

13. Установить недостающую защитную накладку (1 шт.) на дверь в помещении  

мойки столовой на 1 этаже здания. 

Взыскать с ООО "КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу АО "МОСОБЛГАЗ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за неисполнение  решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-81134/21 в части  требования об обязании устранить недостатки работ судебную неустойку в размере 2 000  рублей за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за днем  вступления решения суда в законную силу, по дату фактического исполнения судебного  акта.  

Обязать ООО "КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  течение 30 (тридцати) дней с даты вступления решения в законную силу передать АО  «Мособлгаз» общие журналы работ (форма № КС-6) в количестве 6 шт., оформленных в  ходе выполнения работ по Договору от 16.02.2016 № РУШ-2016 на объекте «Здание корпуса  «Б» Административно-делового центра многофункционального назначения», по адресу:  Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, 

<

...> км Рублево-Успенского шоссе, д. 1.  

Взыскать с ООО "КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу АО "МОСОБЛГАЗ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за неисполнение  решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-81134/21 в части  требования об обязании передачи общих журналов работ судебную неустойку в размере 2  000 рублей за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за днем  вступления решения суда в законную силу, по дату фактического исполнения судебного  акта.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с ООО «Капстроительство» в пользу АО «Мособлгаз» в возмещение расходов  по уплате государственной пошлины 6000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская