АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-10759/2022

г. Чебоксары

21 мая 2024 года

Арбитражный суд в составе: судьи Кисаповой Н.В.,  при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания Александровой Е.В. рассмотрев в заседании суда дело по иску 

некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта  многоквартирных домов", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

Россия 428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Энгельса д. 42А 

к обществу с ограниченной ответственностью "ЗП-Диана", ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>, Россия 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул.  Университетская д. 48, оф. 26  

об устранении недостатков, 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований на предмет спора, общества с ограниченной ответственностью  управляющая компания «Горжилком»,  

без участия сторон 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ЗП «Диана»  безвозмездно в течение 1 месяца с момента вступления судебного решения в  законную силу, устранить недостатки работ, выполненных по договору № 73-КР от  23.09.2017г. по адресу: 

<

...>, и провести качественный  капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в соответствии с  действующими строительно-техническими нормами, выполнив следующие работы:  

- подъезды № 1 и № 2: - устройство плоских однослойных кровель из ПВХ  мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю,  несущее основание из бетона (прим. демонтаж ПВХ мембраны) - 358,63 кв.м.;  

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  листовой оцинкованной стали (прим. демонтаж парапетного фартука) - 39,72 кв.м.;  - ограждение кровель перилами (прим. демонтаж перил) - 66,2 м;  

- установку дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (прим. демонтаж  кровельного аэратора) - 4 шт.;  

- устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм316,68 кв.м.;  

- устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой  полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из  бетона (прим. монтаж ПВХ мембраны) — 358,63 кв.м.;  

 - устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до  450 мм с одним фартуком 66,2 кв.м.;  

- устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до  600 мм без фартука - 39,96 кв.м.;  

- ограждение кровель перилами - 66,2 кв.м.; - установку дефлекторов  диаметром патрубка 280 мм (прим. установка кровельного аэратора) - 4 шт.;  

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону  цементноизвестковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м. толщиной  слоя до 20 мм - 38,61 кв.м.;  

- окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами простую по  штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - 38,61  кв.м.; подъезды № 3 и № 4:  

-установку дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (прим. установка  кровельного аэратора) - 3 шт.; подъезды № 5 и № 6:  

 - ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону  цементноизвестковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м. толщиной  слоя до 20 мм - 50,57 кв.м.;  

- окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами простую по  штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - 50,57  кв.м.  

- демонтировать воронки - 2 шт.; -демонтировать ПВХ мембрану и геотекстиль - 59 кв.м.; 

- пробить отверстие в стенах и полах толщиной 100 мм отв. пл. до 500 кв.см.  - 4 шт.;  

-демонтаж труб оцинкованных ф110 мм. в железобетонных плитах покрытий  - 2,4 п.м.;  

- установка воронок кровельных - 2 шт.; -заделка отверстий в местах прохода  трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных - 4 шт.;  

- стяжка цементно-песчаная по 27 кв.м. 2 места - 54 кв.м.; 

-устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембраны с укладкой  разделительного слоя по утеплителю;  

- устранить протекание воронки в 5-ом подъезде 5-ого этажа. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЗП-Диана» в  пользу некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального  ремонта многоквартирных домов пени в размере 200`000 (Двести тысяч) рублей,  8`000 (Восемь тысяч) руб.00 коп. расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Н.В. Кисапова