АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2017 года

Дело №

А42-8855/2016

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Малышевой Н.Н., судей Боголюбовой Е.В., Константинова П.Ю., 

при участии от общества с ограниченной ответственностью «Арктик ТИСИз» Будника В.А. (доверенность от 25.12.2015),

рассмотрев 30.08.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Апатит» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2017 (судьи Згурская М.Л., Дмитриева И.А., Лущаев С.В.) по делу № А42-8855/2016,

у с т а н о в и л:

Акционерное общество «Апатит», место нахождения: 162622, Вологодская обл., г Череповец, Северное ш., д. 75, ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023 (далее – АО «Апатит»), обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Арктик ТИСИз», место нахождения: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 12, ОГРН 1145190015475, ИНН 5190042037 (далее – ООО «Арктик ТИСИз»), о взыскании 950 000 руб. аванса по договору от 05.11.2015 № АТ-16-215, 1 356 625,37 руб. пеней за период с 13.11.2015 по 14.11.2016, 82 342,72 руб. штрафной неустойки за период с 13.11.2015 по 14.11.2016, 4 153,01 руб. процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также процентов по статье 395 ГК РФ, начисленных с 01.12.2016 по дату фактической уплаты задолженности.

Решением суда от 02.02.2017 иск удовлетворен в полном объеме.

Постановлением апелляционного суда от 24.05.2017 решение от 02.02.2017 изменено, с общества с ограниченной ответственностью ООО «Арктик ТИСИз» взыскано в пользу акционерного общества «Апатит»              950 000 руб. основного долга,  82 342,72 руб. штрафной неустойки, 4153,01 руб. процентов по статье 395 ГК РФ, а также проценты по статье 395 ГК РФ на сумму основного долга с 01.12.2016 по ключевой ставке Банка России до дня фактической уплаты суммы основного долга. 

В удовлетворении остальной части иска отказано. В соответствии с принятым решением апелляционным судом распределены расходы по государственной пошлине.

В кассационной жалобе АО «Апатит», ссылаясь на нарушение апелляционном судом норм материального права, просит постановление в части отказа во взыскании с ООО «Арктик ТИСИз» 519 793,96 руб. пеней, предусмотренных договором за несвоевременное начало работ, за период с 13.11.2015 по 14.11.2016 отменить, его иск в этой части удовлетворить. 

Податель жалобы утверждает, что апелляционным судом необоснованно отказано во взыскании пеней за несвоевременное начало работ, поскольку дополнительное соглашение № 1 свидетельствует об устранении препятствий для временного приостановления работ; указанным соглашением стороны утвердили новое техническое задание, изменив состав работ и количество плотин, определив в техническом задании конкретный срок начала работ – с момента подписания договора.

По мнению подателя жалобы, так как сторонами в дополнительном соглашении № 1 был изменен предмет договора, то с 25.04.2016 исполнитель обязан был приступить к выполнению работ. 

В судебном заседании представитель ООО «Арктик ТИСИз», указав на правомерность постановления апелляционного суда, просил оставить его без изменения.

Жалоба рассмотрена кассационным судом без участия представителей АО «Апатит», извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Как установлено судами и следует из материалов дела, АО «Апатит» (заказчик) и ООО «Арктик ТИСИз» (исполнитель) заключили договор от 05.11.2015 № АТ-16-215 на выполнение работ по установке пьезометров (далее – Договор), в соответствии с которым, в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016  № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) и от 10.05.2016 № 2, исполнитель принимает на себя обязательства по установке пьезометров, контрольных реперов и марок на объекте «Гидротехнические сооружения Восточного рудника (плотины № 10, №11, № 12, №14)» (пункт 1.1 Дополнительного соглашения № 1).

Начало производства работ стороны определили датой подписания Договора (пункт 1.3.1 Договора), а окончание работ, с учетом пункта 3.1.2 Дополнительного соглашения № 1 –  30.10.2016. 

Стоимость работ по Договору составляет 3 686 482 руб. (пункт 2.1 Дополнительного соглашения № 1).

В пункте 2.2 Договора стороны предусмотрели, что до начала производства работ заказчик перечисляет исполнителю аванс в размере        950 000 руб.

В случае несоблюдения исполнителем сроков оказания услуг заказчик - согласно пунктам 1.3.1, 1.3.2 Договора - вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки (пункт 7.7 Договора).

В случае нарушения исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вне зависимости от количества дней просрочки, исполнитель в течение 10 дней с момента неисполнения обязательств обязуется вернуть выплаченный ему аванс и выплатить заказчику штрафную неустойку за пользование авансом в размере, предусмотренном статьей 395 ГК РФ (пункт 7.8 Договора).

Стороны договорились, что Договор может быть расторгнут заказчиком досрочно в одностороннем порядке, если исполнителем нарушены условия Договора по качеству и срокам выполнения работ, а также если дальнейшее производство работ признано нецелесообразным, путем письменного уведомления об этом другой стороны за 15 рабочих дней до расторжения (пункты 8.1 и 8.2 Договора).

АО «Апатит»  перечислило ООО «Арктик ТИСИз» 950 000 руб. аванса (платежное поручение от 12.11.2015 № 2643).

В адрес ООО «Арктик ТИСИз» 17.10.2016 АО «Апатит» направило уведомление от 13.10.2016 № ФАЧ-К.424.01/10/706 об отказе от Договора в одностороннем порядке с требованием о возврате аванса и выплате неустойки.

ООО «Арктик ТИСИз» означенное уведомление получило 21.10.2016. Судами установлено, что в соответствии с пунктом 8.1 Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с 15.11.2016.

В связи с тем что требование АО «Апатит» о возврате перечисленного во исполнение Договора аванса в размере 950 000 руб. ООО «Арктик ТИСИз» не исполнил, АО «Апатит» обратилось с иском в суд.

За период с 13.11.2015 по 14.11.2016 на основании пунктов 7.7 и 7.8 Договора АО «Апатит» начислило пени в размере 1 356 625,37 руб. и штрафную неустойку в размере 82 342,72 руб.; просило также взыскать с ООО «Арктик ТИСИз» проценты по статье 395 ГК РФ за период с 15.11.2016 по 30.11.2016 в размере 4 153,01 руб. и проценты, начисленные на сумму основного долга (аванса) с 01.12.2016 до дня фактической уплаты денежных средств.

Суд первой инстанции, посчитав требования истца обоснованными, иск удовлетворил в полном объеме.

Апелляционный суд посчитал неправомерным взыскание пеней за нарушение срока начала выполнения работ, изменил решение суда, отказав во взыскании 1 356 625,37 руб. пеней. 

Изучив материалы дела, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310   ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлена ответственность подрядчика за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330    ГК РФ).

В соответствии с пунктом 7.7 Договора в случае несоблюдения исполнителем сроков оказания услуг заказчик - согласно пунктам 1.3.1, 1.3.2 Договора - вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.

В силу пункта 1.3.1 Договора срок производства работ определен сторонами датой подписания Договора – 05.11.2015.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как установлено апелляционным судом, письмом от 03.12.2015                       № АП-115/05/1138-2015 заказчик уведомил исполнителя о временной приостановке работ по Договору в связи с проведением дополнительного детального обследования плотин Восточного рудника № 10, 11 и 12, указав, что ориентировочная дата возобновления работ – июль 2016 года. 

АО «Апатит» в материалы дела представлено письмо от 12.09.2016            № АП-204/5/0026-2016, подписанное начальником ОНиКЭГТС АО «Апатит»             А. Б. Братковым, в котором он просит ООО «Арктик ТИСИз» лишь сообщить о дате начала производства работ.

Данное письмо является единственным документом, свидетельствующим об интересе заказчика к дате начала производства работ, но не к их исполнению.

Документ, фиксирующий дату начала производства работ, как правомерно указал апелляционный суд,  Договором не предусмотрен, поэтому суд правомерно заключил, что в отсутствие доказательств, достоверно подтверждающих нарушение исполнителем срока начала выполнения работ – к тому же при их приостановке по воле заказчика – нет оснований для взыскания пеней. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Северо-Западного округа считает, что апелляционным судом с учетом требований статей 67, 68, 71 АПК РФ исследованы и оценены все представленные сторонами доказательства.

 Доводы, изложенные в кассационной жалобе, направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судом апелляционной инстанции, что в силу  статьей 286, 287  АПК РФ не входит в полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2017 по делу № А42-8855/2016 оставить без изменения, а кассационную жалобу акционерного общества «Апатит» - без удовлетворения. 	

 

Председательствующий

Н.Н. Малышева

Судьи

Е.В. Боголюбова

 П.Ю. Константинов