﻿     

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Воронеж                                                                         Дело NА14-11586/2021 

« 10 » ноября 2021 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена 10.11.2021.

Решение изготовлено в полном объеме  10.11.2021.                                                                       

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Филипцовой Е.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВСБ», г. Воронеж (ОГРН 1033600079633, ИНН 3664052322) 

к обществу с ограниченной ответственностью «НаДО», Самарская обл., г. Отрадный  (ОГРН 1046302613961, ИНН 6372018785)

о взыскании задолженности и неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца: Титов В. Г., представитель по доверенности №1/21 от 01.02.2021;

от ответчика: Перешвили Е.А., представитель по доверенности от 01.07.2021;

от Левобережного РОСП г. Воронежа: явка представителя не обеспечена, извещен;

установил:

общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВСБ» (далее - истец) обратилось в суд с требованиями  к обществу с ограниченной ответственностью «НаДО» (далее - ответчик) о взыскании 1 478 564, 39 руб. задолженности по договору №50-9/19 от 01.10.2019, 6 625 352, 40 руб. задолженности и 1 950 168, 84 руб. неустойки по договору №25-3/20 от 01.04.2020, 5 066 625, 20 руб. задолженности и 2 923 397, 52 руб. неустойки по договору №50-8/19 от 01.10.2019, 15 299 111, 60 руб. задолженности и 7 749 546, 26 руб. неустойки по договору №50-10/19 от 01.10.2019 (с учетом принятого определением от 05.10.2021 уточнения иска).

Судебный пристав-исполнитель Левобережного РОСП г. Воронежа Внукова Н. В., в судебное заседание не явился. На основании статей 123, 156 АПК РФ  судебное заседание проводится в отсутствие судебного пристава-исполнителя, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.      

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, представил копию постановления о наложении ареста на имущество от 23.06.2021.

Ответчик представил расчет задолженности, копию постановления о наложении ареста на имущество от 26.03.2021, копию постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 16.04.2021, копии платежных поручений № 975 от 15.10.2021, № 940 от 13.10.2021, №886 от 12.10.2021.

Судом приобщены представленные документы к материалам дела.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 09.11.2021 по 10.11.2021.

Из материалов дела следует, что между  истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 25-3/20 от 01.04.2020 согласно условиям которого, генподрядчик обязуется выполнить в  соответствии с заданием заказчика работы по устройству внутреннего и наружного водопровода и канализация 2 очереди (далее - «работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 2.1 договора  сроки выполнения работ: начало работ: «01» апреля 2020 г.;  окончание работ: «31» декабря 2020 г.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 01.09.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы по монтажу пожарного водопровода системы В2, хозяйственно-бытового водопровода системы В1, ВЗ (вторая очередь строительства) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод я овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением (пункт 1 дополнительного соглашения).

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 1 856 208 руб., на основании локального сметного расчета №02-01-04-6 (приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору согласно дополнительному соглашению составляет 6 625 352, 40 руб. на основании локальных сметных расчетов №02-01-04-4, №02-01-04-4-5 , 06-01-04 (приложения №1, №2, №З к

договору), локального сметного расчета №02-01-04-6 (приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению).

Работы по договору № 25-3/20 от 01.04.2020 сданы подрядчиком по актам КС-2          №1 от 31.08.2020, №2 от 31.08.2020, №3 от 31.08.2020, №1 от 30.10.2020, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 31.08.2020, №2 от 30.10.2020.

Также между  истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 50-8/19 от 01.10.2019 согласно условиям которого, генподрядчик обязуется выполнить в  соответствии с заданием заказчика работы но устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения и кабельных колодцев 2 очереди (далее - «работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 2.1 договора  сроки выполнения работ: начало работ: «01» октября 2019 г.;  окончание работ: «31» декабря 2019 г.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 31.12.2019 генподрядчик обязуется выполнить работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения и электроосвещении (вторая очередь строительства) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод но переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять ш оплатить, на условиях предусмотренных договором н настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 804 207, 60 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-04-05, №02-04-06 (приложения №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 6 066 625,20 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-04-03, №02-04-04 (приложения №1, №2 к договору), локальных сметных расчетов №02-04-05, №02-04-06 (приложения №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Работы по договору №50-8/19 от 01.10.2019 сданы подрядчиком по актам КС-2 №1 от 31.12.2019, №2 от 31.12.2019, №1 28.02.2020, №1 от 31.03.2020, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 31.12.2019, №2 от 28.02.2020, №3 от 31.03.2020.

Также между  истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда №50-10/19 от 01.10.2019 согласно условиям которого, генподрядчик обязуется выполнить в  соответствии с заданием заказчика работы по демонтажу и монтажу блока вертикальных связей в осях Е/7-8 на отм. +6000 мм (ВС2.1 - 1 шт; ВС2.2 - 1 шт; ВС2.3 - 1 шт) и монтажу металлических колонн по оси 7-11 и А-А/3, металлических колонн по оси Д-Ж/9-14 2 очереди (далее - «работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее -«объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 2.1 договора  сроки выполнения работ: начало работ: «01» октября 2019 г.;  окончание работ: «31» декабря 2019 г.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 09.01.2020 подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу металлоконструкций А-А/3-7, 7- 11, Д-Ж, 9-14 и мелких металлоконструкций (вторая очередь строительства) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод но переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 6 549 518, 40 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-01-02-18, №02-01-02-19 (приложения №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 8 236 872 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-01-02-16, №02-01-02-17 (приложения №1, №2 к договору), локальных сметных расчетов №02-01-02-18, №02-01-02-19 (приложения №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Согласно дополнительному соглашению №2 от 31.01.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы по монтажу металлоконструкций А-А/3-7, 7-11, Д-Ж, 9-14 и 1/8-В/Д, 1/6-Д/Ж, Б/В-8 (вторая очередь строительства) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 13 661 016 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-01-02-20, №02-01-4) 2-21 (приложения № 1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 21 897 888 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-01-02-16, №02-01-02-17 (приложения №1, №2 к договору), локальных сметных расчетов №02-01-02-18, №02-01-02-19 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №1), локальных сметных расчетов №02-01-02-20, №02-01-02-21 (приложения №1,№2 к настоящему дополнительному соглашению).

Согласно дополнительному соглашению №3 от 01.04.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы но монтажу металлоконструкций в осях х 1(А-Ж; 1-2 (А-Ж), 1-2 (Д), 1-2 (Е), 1 (А-Б), 1 (Б-В), 1 (Г-Д), 1 (Б-Б/3), 2-9 (Б-В), 1/А-Ж, 1-2/Е-Ж, 1-2 (А-Б), 8 (Б-Б/В), 1-2/А-Б. 2-3/А, 2-3/Б, 2-3/А, 2-3/Б, монтажу и демонтажу металлоконструкций в осях: А (1-7), А (11-21), 2-3 (A/2-Б/2), 6-7 (Б/2), 12-13 (А2-Б/2), 19-20 (А/2-Б/2), 6-7/(Б-В), 12-14/Е-Ж (вторах очередь строительства) (далее - «дополнительные работы») ил объекте «Завод но переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)». Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 6 114 045 руб., на основании Локальных сметных расчетов №02-01-02-22, №02-01-02-23 (Приложение №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 28 011 933 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-01-02-16, №02-01-02-17 (приложения №1, №2 к договору), локальных сметных расчетов №02-01-02-18, №02-01-02-19 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №1), локальных сметных расчетов №02*01-02-20, №82-01-02-21 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №2), локальных сметных расчетов №02-01- 02-22, №02-01-02-23 (приложения №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению).

Согласно дополнительному соглашению №4 от 01.09.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу металлоконструкций в осях: Д-Ж (11-20) (вторая очередь) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод н овощей)». Воронежская область, Индустриальный парк ((Масловский» кадастровый помер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 474 531, 60 руб., на основании локального сметного расчета №02-01-02-24 (приложения №3 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 28 486 465, 20 руб., на оснований локальных сметных расчетов №02-01-02-16, №02-01-02-17 (приложения №1, №2 к договору), локальных сметных расчетов №02-01-02-18, №02-01-02-19 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №1), локальных сметных расчетов №02-01-02-20, №02-01-02-21 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №2), локальных сметных расчетов №02-01-02-22, №02-01-02-23 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №3), локального сметного расчета №02-01-02-24 (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению).

Работы по договору №50-10/19 от 01.10.2019  сданы подрядчиком по актам КС-2          №1 от 31.12.2019, №2 от 31.12.2019, №1 от 31.01.2020, №2 от 31.01.2020, №1 от 28.02.2020, №1 от 31.03.2020, №1 от 31.08.2020, № 2 от 31.08.2020, №1 от 30.01.2020, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 31.12.2019, №2 от 31.01.2020, №3 от 28.02.2020, №4 от 31.03.2020, №5 от 31.08.2020, №6 от 30.10.2020.

Также между  истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 50-9/19 от 01.10.2019 согласно условиям которого, генподрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием заказчика работы по устройству потолка котельной н подстанции, внутренней отделке помещений, устройству навеса из профлиста над завальной ямой весовой, кирпичной перегородки из керамического кирпича, монтажу перил из нержавеющей стали, устройству чистовых полов 2 очереди (далее - «работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 2.1 договора  сроки выполнения работ: начало работ: «01» октября 2019 г.;  окончание работ: «31» января 2020 г.

Согласно дополнительному соглашению №2 от 31.01.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы по монтажу перекрытий ПмЗ на отм.+6000 между осями 9-10 и Д-Е, перекрытий Пм5 между осями 9-11 и А-А/3 с низом на отм. +4.550, перекрытий Пм4 на отм. +7.680 оси 9-11 и Е-Ж, перекрытий Пм2 на отм. +6.050 между осями 1-6 и Д-Ж (вторая очередь строительства) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором в настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 7 412 586 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-01-33, №02-01-34, №02-01-36, №02-01-37 (приложения №1, №2, №3, №4 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 11 299 799, 27 руб., на основании локальных сметных расчетов №02-001-01-24, №02-01-27, №02-01-19, №02-01-24, №02-01-26, №02-01-31 (приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 к договору), локальных сметных расчетов №02-01-32, плановой калькуляции Д01 -10-01 (приложения №1, №2 к дополнительному соглашению №1), локальных сметных расчетов №02-01-33, №02-01-34, №02-01-36, №02-01-37 (приложения №1, №2, №3, №4 к настоящему дополнительному соглашению).

Согласно дополнительному соглашению №3 от 01.04.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы по внутренней отделке помещений, устройству перекрытий Пм2 на отм. +6.050 между осями 1-6 и Д-Ж, ПмЗ на отм.+.6000 между осами 1-6 и Д-Ж, лестницы между осями 5/6-ЕЗ/Ж, 1-2/Д-Д1, устройству полов в осях 1-3/В-Д и в осях В-Д/4-8 (далее - дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 5 426 964, 99 руб. на основании локальных сметных расчетов №02-01-37, №02-01-32, №02-01-38, №02-01-39, №02-01-36а №02-01-39а, №02-01-41 (приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 16 726 764, 26 руб.

Согласно дополнительному соглашению №4 от 01.09.2020 генподрядчик обязуется выполнить следующие работы:

-         отделочные работы. Лестница между осями 8-9/БЗ-В, КТП №2, лестница в осях 5-6/ЕЗ-Ж, стены между осями ЕЗ-Ж, на откос Ж/9 (котельная),

-          отделочные работы. Котельная, лестница, санитарные узлы,

-         отделочные работы в осях 8-9/Бз-В,

-         внутренняя отделка помещений,

-          устройство полов в осях В-Д/4-8;

-         перекрытия Пм4 между осями 11-12 и Е - Ж,

-         перекрытия Пм2 на отм. между осями 1-6 и Д - Ж,

-         полы. Подготовительные работы (вторая очередь ) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным  соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 10 132 456, 80 руб. на основании локальных сметных расчетов №02-01-44, №02-01-43, №02-01-42, №02-01-40, №02-01-41а, №02-01-366, №02-01-37а, №02-01-45 (приложения №1, №2, №3, №4, №5. №6, №7, №8 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 26 859 221, 06 руб.

Согласно дополнительному соглашению №6 от 01.11.2020 генподрядчик обязуется выполнить работы по устройству полов в осях 1-3/Д-Ж и в осях 1-3/Б-В (вторая очередь) (далее - «дополнительные работы») на объекте «Завод по переработке сельскохозяйственного сырья (фруктов, ягод и овощей)», Воронежская область, Индустриальный парк «Масловский» кадастровый номер земельного участка 36:16:5500006:177 (далее - «объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить, на условиях предусмотренных договором и настоящим дополнительным соглашением.

Стоимость выполнения дополнительных работ составляет 2 863 492, 80 руб., на основании локального сметного расчета №02-01-47 (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению).

Общая стоимость работ по договору составляет 33 422 963, 06 руб.

Работы по договору №50-9/19 от 01.10.2019 сданы подрядчиком по актам КС-2 №1 от 31.12.2019,  №2 от 31.12.2019, №5 от 31.12.2019, №1 от 31.01.2020,  №2 от 31.01.2020, №3 от 31.01.2020,  №4 от 31.01.2020,  №1 от 28.02.2020, №2 от 28.02.2020, №1 от 31.03.2020,  №2 от 31.03.2020, №1 от 31.08.2020,  №2 от 31.08.2020, №3 от 31.08.2020,  №4 от 31.08.2020,  №5 от 31.08.2020,  №6 от 31.08.2020,  №7 от 31.08.2020,  №1 от 30.10.2020, №2 от 30.10.2020,  №3 от 30.10.2020, №4 от 30.10.2020, №5 от 30.10.2020, №6 от 30.10.2020, №7 от 30.10.2020, №8 от 30.10.2020, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 31.12.2019, №2 от 31.01.2020, №3 от 28.02.2020, №4 от 31.03.2020, №5 от 31.08.2020, №6 от 30.10.2020, №7 от 30.10.2020, №8 от 30.11.2020.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия № 87 от 17.12.2021 с требованием об оплате задолженности.

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящими исковыми требованиями.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения сторон, оценив все в совокупности, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Исходя из существа заявленных исковых требований и правовой природы отношений сторон, вытекающих из договоров  №25-3/20 от 01.04.2020, №50-8/19 от 01.10.2019, №50-9/19 от 01.10.2019, №50-10/19 от 01.10.2019 к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о договорах подряда.

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно п. 3.3 договоров оплата осуществляется за фактически выполненные генподрядчиком, и принятые заказчиком работы, в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 АПК РФ).

Факт выполнения работ по договорам №25-3/20 от 01.04.2020, №50-8/19 от 01.10.2019, №50-9/19 от 01.10.2019, №50-10/19 от 01.10.2019  подтверждается актами о приемке выполненных работ ф. КС-2 №1 от 31.08.2020, №2 от 31.08.2020, №3 от 31.08.2020, №1 от 30.10.2020 (договор № 25-3/20 от 01.04.2020), №1 от 31.12.2019, №2 от 31.12.2019, №1 28.02.2020, №1 от 31.03.2020 (договор №50-8/19 от 01.10.2019), №1 от 31.12.2019, №2 от 31.12.2019, №1 от 31.01.2020, №2 от 31.01.2020, №1 от 28.02.2020, №1 от 31.03.2020, №1 от 31.08.2020, № 2 от 31.08.2020, №1 от 30.01.2020 (договор №50-10/19 от 01.10.2019), №1 от 31.12.2019,  №2 от 31.12.2019, №5 от 31.12.2019, №1 от 31.01.2020,  №2 от 31.01.2020, №3 от 31.01.2020,  №4 от 31.01.2020,  №1 от 28.02.2020, №2 от 28.02.2020, №1 от 31.03.2020,  №2 от 31.03.2020, №1 от 31.08.2020,  №2 от 31.08.2020, №3 от 31.08.2020,  №4 от 31.08.2020,  №5 от 31.08.2020,  №6 от 31.08.2020,  №7 от 31.08.2020,  №1 от 30.10.2020, №2 от 30.10.2020,  №3 от 30.10.2020, №4 от 30.10.2020, №5 от 30.10.2020, №6 от 30.10.2020, №7 от 30.10.2020, №8 от 30.10.2020 (договор №50-9/19 от 01.10.2019)  и справками о приемке выполненных работ ф. КС-3 №1 от 31.08.2020, №2 от 30.10.2020 (договор № 25-3/20 от 01.04.2020), №1 от 31.12.2019, №2 от 28.02.2020, №3 от 31.03.2020  (договор №50-8/19 от 01.10.2019), №1 от 31.12.2019, №2 от 31.01.2020, №3 от 28.02.2020, №4 от 31.03.2020, №5 от 31.08.2020, №6 от 30.10.2020 (договор №50-10/19 от 01.10.2019), №1 от 31.12.2019, №2 от 31.01.2020, №3 от 28.02.2020, №4 от 31.03.2020, №5 от 31.08.2020, №6 от 30.10.2020, №7 от 30.10.2020, №8 от 30.11.2020 (договор №50-9/19 от 01.10.2019).

Доводы ответчика об отсутствии у истца оснований для взыскания с ответчика спорной суммы задолженности, поскольку постановлением судебного пристава-исполнителя Левобережного РОСП г. Воронежа от 26.03.2021 в рамках сводного исполнительного производства наложен арест на дебиторскую задолженность должника в размере 28 176 544, 48 руб., в том числе взыскиваемую в рамках настоящего дела, отклоняется судом в связи со следующим.

Как следует из положений п. 1 ст. 75 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику имущественные права, в том числе - право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним как кредитором, в том числе право требования по оплате фактически поставленных должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг (дебиторская задолженность).

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на дебиторскую задолженность состоит в переходе к взыскателю права должника на получение дебиторской задолженности в размере задолженности, определяемом в соответствии с ч. 2 ст. 69 настоящего Федерального закона, но не более объема дебиторской задолженности, существовавшего на день обращения взыскания, и на тех же условиях (п. 1).

Согласно п. 6 ст. 76 Федерального закона N 229-ФЗ со дня получения дебитором постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность исполнение дебитором соответствующего обязательства осуществляется путем внесения (перечисления) денежных средств на указанный в постановлении депозитный счет службы судебных приставов. Такое исполнение обязательства дебитором считается исполнением надлежащему кредитору. Права дебитора по отношению к должнику при этом не изменяются.

В силу п. 1, п. 4 ст. 83 Федерального закона N 229-ФЗ арест дебиторской задолженности состоит в объявлении запрета на совершение должником и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также на уступку права требования третьим лицам. Со дня получения дебитором уведомления о наложении ареста на дебиторскую задолженность и до дня реализации прав требования или получения дебитором уведомления о переходе прав требования к новому кредитору дебитор не вправе изменять правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность.

Исходя из системного анализа указанных положений, наложение ареста на дебиторскую задолженность не влечет автоматического перехода прав кредитора к взыскателям, а подтверждение наличия задолженности решением суда не препятствует совершению исполнительных действий в ходе реализации дебиторской задолженности.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 23.06.2015 по делу №А09-7987/2014.

С учетом положений п. 6 ст. 76 Федерального закона N 229-ФЗ исполнение ответчиком обязательства по перечислению 1 080 000 руб. по платежным поручениям №952 от 14.05.2021, №943 от 14.05.2021, №957 от 17.05.2021, №968 от 19.05.2021, №973 от 20.05.2021, №1029 от 25.05.2021, №1216 от 21.06.2021, №1247 от 25.06.2021, №1438 от 15.07.2021, №91 от 23.07.2021, №118 от 27.07.2021, №178 от 29.07.2021, №198 от 30.07.2021, №238 от 02.08.2021, №227 от 09.08.2021, №462 от 30.08.2021, №606 от 15.09.2021, №612 от 16.09.2021, №940 от 13.10.2021, №975 от 15.10.2021, №886  от 12.10.2021 считается исполнением надлежащему кредитору.

Вместе с тем, согласно Определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.01.2014 N ВАС-5243/06 выдача исполнительного листа на сумму добровольно не погашенной дебиторской задолженности означает, что соответствующая сумма для целей применения Закона об исполнительном производстве перестает быть дебиторской задолженностью и преобразуется в право требования по исполнительному документу, подлежащее взысканию конкретному лицу.

Из вышеуказанного следует, что в период действия запрета должнику и дебитору совершать любые действия, приводящие к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, не может быть выдан и исполнительный лист на арестованную  дебиторскую задолженность должника.

Общий размер задолженности ответчика до перечисления денежных средств в соответствии с Постановлением судебного пристава-исполнителя Левобережного РОСП г. Воронежа от 26.03.2021 составлял 28 469 653, 58 руб. 

Учитывая изложенное, требования истца о взыскании 27 389 653, 58 руб. задолженности подлежат удовлетворению. В остальной части требований следует отказать.

Истцом также заявлены требования о взыскании неустойки в размере 1 950 168, 84 руб.  по договору №25-3/20 от 01.04.2020 за период с 08.09.2020 по 16.07.2021, в размере 2 923 397, 52 руб. по договору №50-8/19 от 01.10.2019 за период с 23.01.2020 по 16.07.2021, в размере 7 749 546, 26 руб. по договору №50-10/19 от 01.10.2019 за период с 17.02.2020 по 16.07.2021.

В силу статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), т.е. определенной законом или договором денежной суммой, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

На основании пункта 6.1 договоров №25-3/20 от 01.04.2020, №50-8/19 от 01.10.2019, №50-9/19 от 01.10.2019 за нарушение сроков  оплаты, предусмотренных договоров, заказчик обязуется по требованию генподрядчика уплатить неустойку в размере 0, 1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

Проверив расчет неустойки по договорам №25-3/20 от 01.04.2020 и №50-10/19 от 01.10.2019, суд признает его обоснованным и арифметически верным.

Учитывая частичное удовлетворение требований истца о взыскании задолженности и предоставлении ответчиком  доказательств погашения задолженности в соответствии с Постановлением судебного пристава-исполнителя Левобережного РОСП г. Воронежа от 26.03.2021, суд считает необходимым отнести указанную оплату в ранее возникшую задолженность по договору №50-8/19 от 01.10.2019.

С учетом указанного, размер неустойки по договору №50-8/19 от 01.10.2019  за период с 23.01.2020 по 16.07.2021 составляет 2 904 507, 53 руб. 

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Согласно пункту 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Ответчик ходатайство о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности, суду не предъявил.

Установленный в договоре процент неустойки (0,1%) не является чрезмерным, поскольку такой размер неустойки является обычно принятым в деловом обороте и не считается чрезмерно высоким (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2012 N ВАС-3875/12).

С учетом положений Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, оснований для уменьшения размера неустойки в порядке положений статьи 333 ГК РФ судом не усматривается.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в размере 12 604 222, 63 руб. В остальной части исковых требований следует отказать.

С учетом правовой позиции, изложенной  в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.01.2014 N ВАС-5243/06 исполнительный лист на принудительное исполнение в порядке ст. 319 АПК РФ в период действия постановления судебного пристава-исполнителя Левобережного РОСП г. Воронежа от 26.03.2021 может быть выдан на сумму 293 109, 10 руб. задолженности (28 469 653, 58  руб. общий размер задолженности до оплат по постановлению -  28 176 544, 48 руб. арестованной дебиторской задолженности) и 12 604 222, 63 руб. неустойки.

При подаче иска истцом по платежному поручению № 270 от 13.07.2021 уплачена государственная пошлина в сумме  20 000 руб.

Размер государственной пошлины по делу с учетом уточненных исковых требований составляет 200 000 руб.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом частичного удовлетворения заявленных требований, с ответчика в пользу истца следует взыскать 14 651, 66 руб. расходов по государственной пошлине, а также в доход федерального бюджета  180 000 руб. государственной пошлины. В остальной части (5 348, 34 руб.) судебные расходы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181  АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НаДО», Самарская обл., г. Отрадный  (ОГРН 1046302613961, ИНН 6372018785) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВСБ», г. Воронеж (ОГРН 1033600079633, ИНН 3664052322)  27 389 653, 58 руб. задолженности, 12 604 222, 63 руб. неустойки и 14 651, 66 руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НаДО», Самарская обл., г. Отрадный  (ОГРН 1046302613961, ИНН 6372018785) в доход федерального бюджета РФ 180 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

 

Судья                                                                                        Е.С. Завидовская