АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-5567/2023

04 сентября 2023 г.

г. Севастополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2023 года           

Решение в полном объёме изготовлено 04 сентября 2023 года   

 

Арбитражный суд  города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А. рассмотрев в судебном заседании дело № А84-5567/2023 по иску исх. № 18/05/23 от 18.05.2023,

Общества с ограниченной ответственностью "Байдарбетон-Плюс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Город Севастополь) 

к Общество с ограниченной ответственностью "Путеводная звезда" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Город Севастополь) 

о взыскании суммы задолженности,      

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Акционерное общество  «Севастопольстройпроект»,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности от 08.11.2022; 

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 21..06.2023 №87,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО3,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился к ответчику с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности в размере 2 861 093,22 руб. (два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девяносто три руб. 22 коп.), из которых сумма задолженности по договору субподряда в размере 2 754 593,98 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто четыре руб. 03 копеек); проценты, начисленные за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ в размере 106 499,24 (сто шесть тысяч четыреста девяносто девять руб. 24 коп.); неустойку, начисленную за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, до момента фактического исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Путеводная звезда» обязательства, включительно, расходов на оплату государственной пошлины в размере 37 305 руб.

Определением от 22.05.2023 исковое заявление к производству.

Определением от 30.06.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: АО «Севастопольстройпроект» (ОГРН: 

<

***>).

13.07.2023 от АО "Севастопольстройпроект" поступил отзыв на исковое заявление.

Очередное судебное заседание назначено на 28.08.2023. 

Сведения о времени и месте судебного разбирательства 28.08.2023 размещены в сети Интернет на сайте www.arbitr.ru.  

Согласно части 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Поскольку ответчик не воспользовался своими процессуальными правами, он в силу статьи 9 АПК РФ несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий.

В соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по  имеющимся  в  деле  доказательствам. Стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. 

С учетом изложенного, по мнению суда, материалы дела достаточно характеризуют спорные правоотношения, основания для отложения рассмотрения дела отсутствуют, а дело подлежит рассмотрению по имеющимся в деле материалам.

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 15.02.2022 между ООО «Байдарбетон-Плюс» (Генеральный подрядчик) и ООО «Путеводная звезда» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № 1-СП-ББ-ПЗ, в соответствии с условиями которого Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт ГБДОУ «Детский сад № 126» на условиях и в полном соответствии с требованиями Договора.

Пунктом 1.7. Договора субподряда предусмотрено, что настоящий договор заключен во исполнение Договора подряда от 14.02.2022 № 2022КР01 на выполнение работ по капитальному ремонту ГБДОУ «Детский сад № 126» по адресу: 

<

...> д.З, заключенного между Заказчиком (Генеральным подрядчиком) - АО «Севастопольстройпроект» и Подрядчиком - ООО «Байдарбетон-Плюс».

Пунктом 2.1 Договора предусмотрен срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 29.04.2022 (включительно).

Цена Договора составляет 86 910 764,19 руб., в т.ч. НДС 14 485 127,37 руб. (пункт 3.1 Договора).

В соответствии с пунктами 3.7.3, 3.7.3,1 Договора Авансовые, платежи по Договору предусмотрены в размере 50%. Авансовый платеж перечисляется на основании заявки в течение 10 рабочих дней с даты предоставления счета на выплату аванса путем перечисления денежных средств на лицевой счет Субподрядчика.

22.08.2022 Субподрядчиком переданы, а Генеральным подрядчиком приняты выполненные работы на сумму 691 968,89 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 от 22.08.2022, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 22.08,2022, № 2 от 22.08.2022, № 3 от 22.08.2022.

14.10.2022 Субподрядчиком переданы, а Генеральным подрядчиком приняты выполненные работы на сумму 13 673 758,42 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 № 2 от 14.10.2022, Акт о приемке выполненных работ № 5 от 14.10.2022, № 4 от 14.10.2022.

26.10.2022 Субподрядчиком переданы, а Генеральным подрядчиком приняты выполненные работы на сумму 6 204 400,40 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 № 3 от 26.10.2022, Акт о приемке выполненных работ № 6 от 26.10.2022, № 7 от 26.10.2022.

15.11.2022 Субподрядчиком переданы, а Генеральным подрядчиком приняты выполненные работы на сумму 3 938 691,60 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 № 4 от 15.11.2022, Акт о приемке выполненных работ № 8 от 15.11.2022.

05.12.2022 Субподрядчиком переданы, а Генеральным подрядчиком приняты выполненные работы на сумму 3 037 120,88 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 № 5 от 05.12.2022, Акт о приемке выполненных работ № 9 от 05.12.2022.

В ходе выполнения указанного Договора субподряда, в соответствии с актами № БП00- 005710 от 22.08.2022 (КС-3 № 1 от 22.08.2022) на сумму 691 968,89 руб., № БПО0-005783 от 14.10.2022 (КС-3 № 2 от 14.10.2022) на сумму 13 673 758,42 руб., № БП0О-007166 от 26.10.2022 (КС-3 № 3 от 26.10.2022) на сумму 6 204 400,40 руб., № БП00-007167 от 15.11.2022 (КС-3 № 4 от 15.11.2022) на сумму 3 938 691,60 руб., № БП00-007168 от 05.12.2022 (КС-3 №5 от 95.12.2022) на сумму 3 037 120,88 руб., ООО «Путеводная звезда», как Субподрядчиком по договору субподряда, выполнено работ на общую сумму 27 545 939,79 руб.

В силу п.3.7.5, указанного Договора Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Генеральному подрядчику в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по Договору, указанной в подписанных Сторонами, Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справках о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 за отчетный месяц, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Генеральным подрядчиком Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.

Во исполнении условий Договора субподряда, ООО «Байдарбетон-ГІлюс» в адрес ООО «Путеводная звезда» были направлены следующие Акты об указанных услугах субподрядчика 10%:

-        № 1572 от 07.10.2022 согласно КС-3 № 1 от 22.08.2022 на сумму 69 196,90 руб.;

-        № 1573 от 26.10.2022 согласно КС-3 № 2 от 14.10.2022 на сумму 1 367 375,84 руб.;

-        № 1332 от 26.10.2022 согласно КС-3 № 3 от 26.10.2022 на сумму 620 440,04 руб.;

-        № 1628 от 15.11.2022 согласно КС-3 №4 от 15.11.2022 на сумму 393 869,16 руб.;

-        № 1870 от 05.12.2022 согласно КС-3 № 5 от 05.12.2022 на сумму 303 712,09 руб.

ООО «Байдарбетон-Плюс» в адрес ООО «Путеводная звезда» были выставлены соответствующие счета на оплату: № 1432 от 07.10.2022, № 1433 от 26.10.2022, № 1617 от 26.10.2022, № 1619 от 15.11.2022, № 1618 от 05.12.2022.

Однако по состоянию на 18.05.2023 услуги Генеральному подрядчику в предусмотренном пунктом 3.7.5 Договора субподряда размере, а именно 2 754 593,98 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три руб. 98 коп.), на расчетный счет ООО «Байдарбетон-Плюс» не поступали.

Истец начислил ответчику проценты по статье 395 ГК РФ на сумму задолженности за период с 17.10.2022 по16.05.2023 в сумме 106 499,24 руб.

15.02.2023 на юридический адрес ответчика были направлены претензии за исх. № 15/02, а также 05.04.2023 за исх. № 05/04/01, которые получены ООО «Путеводная звезда» 01.03.2023 и 10.04.2023 соответственно.

Однако полученные претензии остались со стороны ООО «Путеводная звезда» без ответа, денежные средства в счет оплаты услуг ООО «Байдарбетон-Плюс» не поступали.

При таких обстоятельствах, ООО «Байдарбетон-Плюс» обратилось в суд с исковым заявлением за защитой нарушенных прав.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

К отношениям сторон подлежат применению общие нормы о договоре подряда и обязательствах, которые регламентируются положениями статей 702, 708, 711, 720, 740, 746, 758, 763, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям статей 708, 709 ГК РФ в договоре подряда указываются сроки выполнения работ и цена договора.

В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В силу п.3.7.5 договора Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Генеральному подрядчику в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по Договору, указанной в подписанных Сторонами, Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справках о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 за отчетный месяц, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Генеральным подрядчиком Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.

Иные условия финансирования выполняемых Субподрядчиком работ, положениями Договора не предусмотрены, графика проведения финансирования сторонами не подписывалось, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В ходе выполнения работ по договору Субподрядчиком работы в порядке статьи 719 ГК РФ не приостанавливались.

В ходе выполнения указанного договора субподряда, в соответствии с актами № БП00- 005710 от 22.08.2022 (КС-3 № 1 от 22.08.2022) на сумму 691 968,89 руб., № БПО0-005783 от 14.10.2022 (КС-3 № 2 от 14.10.2022) на сумму 13 673 758,42 руб., № БП0О-007166 от 26.10.2022 (КС-3 № 3 от 26.10.2022) на сумму 6 204 400,40 руб., № БП00-007167 от 15.11.2022 (КС-3 № 4 от 15.11.2022) на сумму 3 938 691,60 руб., № БП00-007168 от 05.12.2022 (КС-3 №5 от 05.12.2022) на сумму 3 037 120,88 руб., ООО «Путеводная звезда» выполнило работы на общую сумму 27 545 939,79 руб.

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору, на основании, в т.ч. счетов, выставленных ООО «Путеводная звезда», в целях осуществления Субподрядчиком работ по договору субподряда, ООО «Байдарбетон-Плюс» были перечислены платежи.

ООО «Байдарбетон-Плюс» в адрес ООО «Путеводная звезда» были направлены акты об указанных услугах субподрядчика 10 %:

-        № 1572 от 07.10.2022 согласно КС-3 № 1 от 22.08.2022 на сумму 69 196,90 руб.;

-        № 1573 от 26.10.2022 согласно КС-3 № 2 от 14.10.2022 на сумму 1 367 375,84 руб.;

-        № 1332 от 26.10.2022 согласно КС-3 № 3 от 26.10.2022 на сумму 620 440,04 руб.;

-        № 1628 от 15.11.2022 согласно КС-3 №4 от 15.11.2022 на сумму 393 869,16 руб.;

-        № 1870 от 05.12.2022 согласно КС-3 № 5 от 05.12.2022 на сумму 303 712,09 руб.

Кроме того, ООО «Байдарбетон-Плюс» в адрес ООО «Путеводная звезда» были выставлены соответствующие счета на оплату: № 1432 от 07.10.2022, № 1433 от 26.10.2022, № 1617 от 26.10.2022, № 1619 от 15.11.2022, № 1618 от 05.12.2022.

Таким образом, из представленных доказательств следует, что обязательства ООО «Байдарбетон-Плюс» по внесению аванса исполнено в полном соответствии с условиями пункта 3.7.3 Договора, на расчетный счет ООО «Путеводная звезда» перечислены авансовые платежи в общем размере 57 682 159,00 руб.

В части доводов ответчика относительно неисполнения истцом условий договора по принятию выполненных работ, следует указать следующее.

Порядок приемки выполненных работ предусмотрен разделом 5 договора.

Так, Субподрядчик после завершения выполнения работ представляет Генеральному подрядчику комплект отчетной (исполнительной) документации, состоящей из документов, указанных в пункте 5.2 Договора.   

Предоставление вышеуказанных документов не в полном объеме и/или оформленными ненадлежащим образом являются безусловным основанием для их возврата Субподрядчику и рассмотрения таких документов для целей Договора как не поданные (положения п.5.2 Договора).

Поскольку Субподрядчиком полный комплект отчетной (исполнительной) документации не представлен, направленные в адрес Генерального подрядчика Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 не рассматривались, о чем Субподрядчик был уведомлен.

Соответственно, окончательный расчет за фактически выполненные Субподрядчиком объемы работы в порядке пункта 3.7.4. Договора между сторонами не производился.

С учетом изложенного, доводы ответчика о неисполнении истцом встречных обязательств по финансированию производства работ, а также приема выполненных работ, не принимаются судом.

Исходя из буквального толкования условий пункта 3.7.5. Договора, обязанность по уплате истцу услуг Генерального подрядчика возникает у ответчика с момента принятия и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за соответствующий период.

С учетом изложенного, задолженность ООО «Путеводная звезда» перед ООО «Байдарбетон-Плюс» по оплате услуг Генерального подрядчика в порядке, установленном пунктом 3.7.5. Договора, с учетом принятых истцом выполненных работ, составляет 2 754 593,98 руб. 

При указанных обстоятельствах, суд признаёт требования истца о взыскании задолженности по оплате услуг Генерального подрядчика в сумме 2 754 593,98 руб. обоснованными.

Поскольку со стороны ответчика допущена просрочка исполнения обязательств по оплате, истцом заявлено требование о взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в общем размере 106 499,24 руб.

В денежных обязательствах, предусматривающих обязанность должника уплатить денежные средства, на просроченную уплатой сумму подлежат начислению проценты на основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются мерой гражданско-правовой ответственности, которая наступает вследствие ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства. 

В силу ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Расчет процентов судом проверен и признан верным, не нарушающим прав ответчика, ответчик мотивированных возражений, контррасчета не представил.

Таким образом, проценты  на сумму неосновательного обогащения, исчисленные по правилам ст.395 ГК РФ, за период с 17.10.2022 по 16.05.2023 составляют 106 499,24 рублей.

В силу пункта 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 разъяснено, что проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. 

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, имевшим место в соответствующие периоды после вынесения решения (пункт 1 статьи 395 ГК РФ). 

На основании изложенного, судом произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на дату оглашения резолютивной части решения, которые составили за период с 17.05.2023 по 28.08.2023 - 65 280 руб. 11 коп. 

На основании изложенного требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.10.2022 по 28.08.2023 в сумме 65 280 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 29.08.2023 по день фактической уплаты суммы долга, является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. 

С учётом положений пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины по настоящему делу, исходя из суммы иска на момент рассмотрения спора 2 926 373, 33 руб., размер государственной пошлины составляет 37 632 рублей.

 С учетом итогов рассмотрения дела, государственная пошлина в размере 37 305 рублей  подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, а сумма государственной пошлины в размере 327 рублей подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению исх. № 18/05/23 от 18.05.2023 удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Путеводная звезда» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Байдарбетон-Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь) сумму 2 926 373, 33 руб. (Два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч триста семьдесят три рубля 33 копейки), из которых 2 754 593 рубля 98 копеек – основной долг, 171 779 рублей 35 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами на дату оглашения резолютивной части решения 28.08.2023, а также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей в соответствующие периоды с 29.08.2023 по день фактической оплаты, а также взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 37 305 руб. (Тридцать семь тысяч триста пять рублей 00 копеек).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Путеводная звезда» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 327 руб. (Триста двадцать семь рублей 00 копеек).

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья         

Р.А. Ражков