Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 (Резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-29794/2023  «12» февраля 2024 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В.  рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению государственного  казённого учреждения Волгоградской области «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Федеральному  государственному унитарному предприятию «Главное строительное управление  Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о понуждении исполнить гарантийный обязательства по контракту,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, по доверенности; после перерыва - не явился,  извещен;  

от ответчика – не явился, извещен; после перерыва - не явился, извещен; 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное  строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в рамках исполнения гарантийных  обязательств по контракту от 12.04.2019г. № 40-Е на строительство объекта:  «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Романовка Ольховского муниципального  района Волгоградской области» в течение тридцати календарных дней со дня  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу за свой счет  устранить недостатки выполненных работ, а именно:  

- устранить просадку и разрушение асфальтового покрытия вокруг септика,  восстановить первоначальный вид;  

- восстановить съезд для инвалидов на тротуарные дорожки, привести в  первоначальный вид;  

- восстановить асфальтовое покрытие отмостки, привести в первоначальный  вид;  

- установить качественное запорное устройство на въездные ворота. 

В случае неисполнения Федеральным государственным унитарным  предприятием «Главное строительное управление Федеральной службы  

исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) решения суда в  течение тридцати календарных дней, государственное казенное учреждение  Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) вправе осуществить соответствующие  действия за счет Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с взысканием с последнего  необходимых расходов на выполнение работ в рамках гарантийных  обязательств предусмотренных контрактом от 12.04.2019г. № 40-Е.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

 Судья Л.В. Напалкова