Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-78375/2018

31 января 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  31 января 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" (адрес:  Россия 196650, г Колпино, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Титан Демонтаж Строй" (адрес:  Россия 195252, г Санкт-Петербург, 

<

...>/литер А, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 1585028.36

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 08.08.18,

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 24.12.18,

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" предъявило иск о взыскании с ООО "Титан Демонтаж Строй" 1 585 028 руб. 36 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств  по государственному контракту №92/3 от 06.10.17.

Ответчик иск отклонил и заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Определением от 17.08.18 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

В соответствии с государственным контрактом № 92/3 от 06.10.2017 (далее - Контракт), заключенным между Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" и ООО «Титан Демонтаж Строй», ответчик принял на себя обязательство по выполнению работ по комплексному благоустройству дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов по адресам: Санкт-Петербург, 

<

...> очередь).

Согласно пункту 3.1. Контракта начало выполнения работ - с момента получения подрядчиком от заказчика ордера ГАТИ. В течение двух дней с момента получения ГАТИ заказчик передает, а подрядчик принимает по акту приема-передачи: проект, объект с выходом на место, копию ордера ГАТИ. Срок окончания выполнения работ - не позднее 01.12.2017.

Пунктом 4.2.2. Контракта установлено, что Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Контрактом работы, согласно локальной сметы (Приложение № 1 к Контракту), рабочим проектом (Приложение № 3 к Контракту), в соответствии с конкретными показателями товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к Контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов).

В соответствии с пунктом 2.1. Контракта общая цена контракта составляет 31 700 567 руб. 24 коп.

Срок окончания работ – не позднее 01.12.17.

В нарушение принятых обязательств ООО «Титан Демонтаж Строй» не выполнило работы, предусмотренные Контрактом, в полном объеме. Всего ООО «Титан Демонтаж Строй» выполнено, а Колпинским РЖА принято работ на сумму 19 752 025 руб. 59 коп. по подписанным формам КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2017.

В связи с неисполнением обязательств в полном объеме Сторонами было подписано Соглашение № 1 от 29.12.2017 о расторжении Контракта.

В соответствии с п.6.2 договора ответчик обязан уплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 1 585 028 руб. 36 коп. 

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

При этом суд учитывает дату заключения контракта – 06.10.17, задержку в получении ордера ГАТИ (13.10.17), неблагоприятные погодные условия для укладки асфальтобетона, о чем ответчик сообщил в письме от 29.11.17 исх. №1к-15 и просил увеличить сроки выполнения работ. Работы по благоустройству дворов на сумму 31 700 567 руб. 24 коп. предполагалось произвести в период с октября по декабрь 2017 г., что с учетом погодных условий города Санкт-Петербурга выполнить не представилось возможным, в том числе по объективным причинам – из-за климатических условий данного региона.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным на основании ст. 333 ГК РФ по ходатайству ответчика уменьшить неустойку до 300 000 руб. 00 коп.

Расходы по государственной пошлине в размере 28 850 руб. 00 коп. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Титан Демонтаж Строй" в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" 300 000 руб. 00 коп. штрафа и 28 50 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.