АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 13.01.2025)

Дело № А82-14866/2024

г. Ярославль

12 февраля 2025 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шмидько Е.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тищенко А.В.,      

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества «Жилтранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

об обязании дать указание на перечисление денежных средств, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Прокуратуры Ярославской области (ИНН 

<

***>), публичного акционерного общества «Сбербанк» (ИНН 

<

***>,), Правительства Ярославской области (ИНН 

<

***>), территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов (ИНН 

<

***>), министерства жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (ИНН 

<

***>), непубличного акционерного общества «Управдом Фрунзенского района» (ИНН 

<

***>), ФИО1.

при участии:

от истца –  ФИО2, по доверенности от 09.01.2024, диплому; 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом;

от Прокуратуры Ярославской области – ФИО3 по доверенности от 08.11.2024, удостоверению;

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом.

установил:

Акционерное общество «Жилтранс» (далее – АО «Жилтранс», истец)   обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (далее – Фонд, ответчик) :

- об обязании Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области выдавать ежемесячно в срок до 25 числа указание кредитной организации на перечисление денежных средств со специального расчетного счета                             № 40604810077030001387 открытого в ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 СБЕРБАНКА РОССИИ БИК 042908612 корр/с 30101810100000000612 ) в адрес Акционерного общества «Жилтранс» по договору от 24.08.2023 № 142/2023/ЖТ (

<

...>) в размере поступивших от собственников помещений на специальный счёт средств вплоть до полного погашения стоимости выполненных работ по договору;

- о взыскании с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области государственную пошлину в размере 6000 рублей;

- о взыскании в пользу акционерного общества «Жилтранс» на случай неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок, неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки по день фактического исполнения решения суда. 

Определением суда от 28.08.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Прокуратура Ярославской области, публичное акционерное общество «Сбербанк», Правительство Ярославской области, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области, непубличное акционерное общество «Управдом Фрунзенского района», ФИО1. 

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные требования в полном объеме. 

Ответчик в заседание не явился, в ходе рассмотрения спора направлял в суд отзыв на иск, в котором возражал против удовлетворения иска, указал, что действующим законодательством не предусмотрены сроки рассмотрения пакета документов, предъявленных в Фонд для дачи указания банку на перечисление денежных средств со специального счета, условия указанные в договоре подряда №142/2023/ЖТ (далее - Договор) не могут порождать права и обязанности у ответчика, так как Региональный фонд не является стороной договора, соответственно принятие решения о даче указания банку в срок 45 рабочих дней в соответствии с Приказом Регионального фонда №204 от 16.08.2021 «Об утверждении Порядка совершения операций, предусмотренных подпунктом 1 части 1 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации, по специальным счетам регионального оператора» письменное заявление о проведении операции по специальному счету по выплате аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту или о проведении операции по специальному счету по окончательному расчету за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту» является правомерным. Поясни, что Фондом в установленный Приказом Регионального фонда №204 от 16.08.2021 срок были рассмотрены представленные истцом документы и в соответствии со ст. 177 ЖК РФ дано указание банку о перечислении денежных средств по спорному договору, что подтверждается платежным поручением от 10.09.2024 №2615  на сумму                                                2 147 805,20 руб. (в размере имеющихся на специальном счете денежных средств). 14.10.2024 банком по поручению Регионального фонда произведен следующий платеж на сумму 108 700 руб. (размер имеющихся на специальном счете денежных средств). Таким образом, пакет документов на перечисление денежных средств рассматривается Региональным фонд однократно при поступлении, однократно по нему принимается решение об оплате либо об отказе в оплате. При принятии решения об оплате, дается указание банку на перечисление денег, в случае недостаточности денежных средств, данное перечисление осуществляется ежемесячно до полной оплаты суммы по договору. Соответственно, какого-либо дополнительного заявления от подрядчика либо заказчика не требуется; так же не требуется отдельного решения суда о перечислении денежных средств. В связи с отсутствием нарушения прав истца со стороны Регионального фонда, ежемесячным осуществлением банком по указанию Регионального фонда перечислений денежных средств по договору, полагает, что основания для удовлетворения исковых требований истца отсутствуют.

Представитель Прокуратуры Ярославкой Области поддержал пояснения на иск, указал, что в рассматриваемом случае установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме открыли специальный счет для формирования фонда капитального ремонта дома, владельцем которого определен региональный оператор. На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного протоколом от 28.07.2023 № 1/ЕР/2023, заключен договор и выполнены работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. В связи с чем, полагает, что истец обоснованно обратился в суд с требованием о перечислении спорных денежных средств в счет оплаты работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома к ответчику, как владельцу специального счета. Таким образом, на Фонде лежала обязанность на перечисление денежных средств в сроки и объемы, установленные заключенным договором. Довод ответчика относительно того, что ответчик не является стороной спорного договора и должен руководствоваться лишь приказом, не состоятелен ввиду установленных законодателем норм. Более того, указанный довод свидетельствует о волеизъявлении ответчика не исполнять требования заключенного договора. Вместе с тем, пунктом 3.7 договора предусмотрена обязанность перечислять денежные средства ежемесячно в срок до 25 числа в размере поступивших от собственников помещений на специальный счет средств вплоть до полного погашения стоимости работ. Идентичные требования не предусмотрены установленным порядком, что свидетельствует об отсутствии гарантий исполнения заявленных требований в добровольном порядке без вынесения судебного акта. Просил   удовлетворить уточненные исковые требования.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие представителей ответчика и иных третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, по имеющимся в деле материалам.

Изучив представленные в материалы дела доказательства, выслушав позицию представителей сторон в судебных заседаниях, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 28.07.2023 общим собрание собственников помещений МКД, расположенном по адресу: 

<

...> оформленным Протоколом общего собрания № 1/КР/2023, приняты решения об утверждении перечня работ по капитальному ремонту общедомового имущества – капитальный ремонт крыши, утверждены сроки выполнения работ, предельная стоимость работ по капитальному ремонту крыши– 3 647 805 руб. 20 коп., источник финансирования  - денежные средства, накопленные за счет взносов на капитальный ремонт, перечисляемых на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта. В случае недостаточности денежных средств на специальном счете, оплата производится путем ежемесячного перечисления на расчетный счет подрядчика всех денежных средств, поступивших от собственников помещений на специальный счет, открытый в целях формирования фонда капитального ремонта, вплоть до полного погашения стоимости работ, выбрана подрядная организация АО «Жилтранс», а также уполномоченный представитель собственников МКД – ФИО1

24.08.2023 между АО «Жилтранс» (подрядчик) и собственниками помещений в многоквартирном доме в лице уполномоченного представителя ФИО1 (заказчик) заключен договор № 142/2023/ЖТ на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

Срок выполнения работ по договору: начало работ - в течение 10 (десяти) дней с даты получения авансового платежа, окончание работ – 30.06.2024. При этом подрядчик вправе начать выполнение работ до момента получения авансового платежа (с учетом дополнительного соглашения от 30.11.2023) (пункт 2.1 договора). 

Стоимость работ составляет 3 647 805 рублей 20 копеек (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 3.6 договора оплата по договору производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ (этапа работ) по договору в течение 20 календарных дней с даты направления в Региональный фонд распоряжения на оплату авансового платежа.

- окончательный расчет в размере стоимости работ по договору за вычетом авансового платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ по форме КС-2 (в т.ч в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 Договора) и направления в Региональный фонд распоряжения на окончательный расчет заказчиком или подрядчиком.

В случае недостаточности средств на специальном счете для осуществления окончательного расчета на момент исполнения распоряжения на оплату оставшаяся сумма перечисляется  Региональным фондом ежемесячно в срок до 25 числа в размерен поступивших от собственников помещений на специальный счет средств вплоть до полного погашения стоимости работ по настоящему договору (пункт 3.7 договора).

Работы по капитальному ремонту крыши выполнены в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 16.05.2024, справкой о стоимости выполненных работ от16.05.2024.

10.07.2024 письмом истец обратился к ответчику с требованием о перечислении денежных средств за выполненные по договору работы со специального счета многоквартирного дома по адресу: 

<

...> представив протокол общего собрания от 28.07.2023№ 1/КР/2023, договор от 24.08.2023 № 142/2023/ЖТ; акт о приемке выполненных работ от 16.05.2024, справку о стоимости выполненных работ от 16.05.2024, счет на оплату от 20.05.2024 № 24 а также иные документы, необходимые для рассмотрения заявления.

Однако в установленный договором срок, операция по перечислению денежных средств по спорному договору  за выполненные работы  не была осуществлена, что послужило основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями. 

В ходе рассмотрения спора истец, в порядке статьи 49 АПК РФ, уточнил исковые требования, поскольку ответчик добровольно исполнил требования истца о перечислении денежных средств по счету от 20.05.20024 № 24 по спорному договору в части, что подтверждается платежными поручениями от 10.09.2024 № 2615 на сумму 2 147 805,20 руб., от 13.11.2024 № 3223 на сумму 24 000 руб.

С учетом принято в порядке статьи 49 АПК РФ уточнения иска, суд рассматривает требование об обязании Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области выдавать ежемесячно в срок до 25 числа указание кредитной организации на перечисление денежных средств со специального расчетного счета № 40604810077030001387 открытого в ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 СБЕРБАНКА РОССИИ БИК 042908612 корр/с 30101810100000000612 ) в адрес акционерного общества «Жилтранс» по договору от 24.08.2023 № 142/2023/ЖТ (

<

...>) в размере поступивших от собственников помещений на специальный счёт средств вплоть до полного погашения стоимости выполненных работ по договору.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, является установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права и охраняемого законом интереса, факта его нарушения и нарушения права истца ответчиком.

Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 ГК РФ способами, а также иными способами, предусмотренными законом. Под способами защиты гражданских прав понимаются закреплённые законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав. При этом избранный способ защиты должен быть направлен на восстановление нарушенного или оспоренного права или законного интереса. Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом, однако этот выбор является правомерным и может быть поддержан судом только в том случае, если он соответствует характеру нарушенного права и действительно приведет к реальной защите законного интереса.

Право на получение денежных средств подрядчиком в счет стоимость подлежащих выполнению работ согласовано сторонами в договоре. Согласно иску, реализации данного права препятствует  ответчик, в данной части истец является заинтересованным лицом, которому в силу ст. 4 АПК РФ, принадлежит право требования исполнения обязанности.

В соответствии со статьей 210 ГК РФ, частью 1 статьи 39 ЖК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статьей 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Изложенные положения также указаны в части 2 статьи 39 ЖК РФ.

Статьей 153 ЖК РФ предусмотрена обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя взнос на капитальный ремонт (пункт 2 части 2 статьи 154 ЖК РФ).

По смыслу статьи 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.

По общему правилу пункта 1 статьи 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 3 статьи 170 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать способ формирования фонда капитального ремонта путем перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет или на счет регионального оператора.

В силу части 4 статьи 170 ЖК РФ, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены, в частности, владелец специального счета и кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета (часть 3 статьи 175 ЖК РФ).

Исходя из положений пункта 2 части 1 статьи 180 ЖК РФ в функции регионального оператора входит открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета. Региональный оператор не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета.

В силу части 1 статьи 174 ЖК РФ средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. При этом за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, могут осуществляться финансирование только работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 ЖК РФ, и работ, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами.

Частью 4 статьи 177 ЖК РФ предусмотрено, что операции по перечислению со специального счета денежных средств могут осуществляться банком по указанию владельца специального счета в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при предоставлении следующих документов:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение такого собрания об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусматривающий в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;

3) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору, указанному в пункте 2 статьи 177 ЖК РФ. Такой акт приемки не предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем тридцать процентов от стоимости таких услуг и (или) работ по договору, указанному в в пункте 2 статьи 177 ЖК РФ.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 44 ЖК РФ принятие решения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 1 статьи 189 ЖК РФ решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В силу части 2 указанной статьи собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, регионального оператора либо по собственной инициативе.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 3) ремонт крыши; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома (часть 1 статьи 166 ЖК РФ).

Согласно ст. 190 Жилищного Кодекса Российской Федерации региональный оператор обеспечивает финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе работ по разработке проектной документации или отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не указанных в части 1 статьи 166 настоящего Кодекса и нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, принятом в соответствии с частью 2 статьи 166 настоящего Кодекса, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Работы выполнены и приняты уполномоченным представителем собственников в полном объеме, доказательств наличия замечаний и недостатков работ в материалы дела не представлено. 

Суд отмечает, что в рассматриваемой ситуации с учетом особенностей порядка выплаты денежных средств со специального счета, установленными ЖК РФ, Общество не имеет иных способов защиты, чем обращение с настоящим иском. 

Принимая во внимание, что одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (статья 2 АПК РФ), а в сложившейся ситуации истец доказал факт нарушения со стороны ответчика своих прав и законных интересов, суд находит требования ООО «Жилтранс» подлежащим удовлетворению в части сроков, в которые истец просит обязать дать указание кредитной организации, суд соглашается с их обоснованностью: данные сроки являются достаточными для исполнения решения суда. 

Также истец просил взыскать с ответчика судебную неустойку на случае неисполнения решения суда.

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В постановлении Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пунктах 28, 31 и 32).

При этом уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения предусмотренных статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

По смыслу статей 308.3 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления для него неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Согласно пункту 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

При указанных обстоятельствах, суд, учитывая, что должник не исполняет обязанность, установленную законом, с целью его побуждения, а также принципа соразмерности, справедливости и при соблюдении баланса интересов сторон, пришел к выводу о необходимости взыскания судебной неустойки, определив следующий размер и порядок ее взыскания: 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 6-го рабочего дня с даты вступления в законную силу решения суда до момента фактического исполнения судебного акта.

Указанный размер неустойки суд считает достаточным с учетом существа заявленных требований, учитывая предмет исполнения, оснований для установления неустойки в меньшем размере суд не усматривает. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом, относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) выдавать ежемесячно в срок до 25 числа указание кредитной организации на перечисление денежных средств со специального расчетного счета № 40604810077030001387 открытого в ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 СБЕРБАНКА РОССИИ БИК 042908612 корр/с 30101810100000000612) в адрес акционерного общества «Жилтранс» по договору от 24.08.2023 № 142/2023/ЖТ (

<

...>) в размере поступивших от собственников помещений на специальный счёт средств вплоть до полного погашения стоимости выполненных работ по договору.

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Жилтранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки по день фактического исполнения решения суда. 

Взыскать с  Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Жилтранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Е.Ю. Шмидько