Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  № 09АП-14436/2024-ГК

Дело № А40-149627/23

город Москва

22 апреля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Стешана Б.В., судей Захаровой Т.В., Кухаренко Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО «ОЭК» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2024 по делу № А40-149627/23 по иску АО «ОЭК» (ИНН: 

<

***>) к ООО «Логистика 21 Век» (ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 по доверенности от 07.11.2023, от ответчика: не явился, извещен, 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ОЭК» обратилось с иском о взыскании с ООО «Логистика 21 Век»  задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям от 21.03.2016 № 31596-01-ДО в размере 494 914,61 руб., неустойки  за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере  678 515,86 руб., неустойки за просрочку внесения платы за технологическое  присоединение с 07.02.2022 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 24.05.2023 в размере 533  517,94 руб. с последующим начислением с 25.05.2023 по дату оплаты задолженности,  как произведение 0,014 на 11% и общего размера платы в размере 1 207 108,80 руб. за  каждый день просрочки.  

В суде первой инстанции истцом заявлено ходатайство об отказе от исковых  требований в части взыскания задолженности в полном объеме и увеличении суммы  неустойки с учетом перерасчета по состоянию на 04.09.2023 до 726 848 руб. 49 коп.,  которое удовлетворено судом в соответствии со статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решением от 24.01.2024 Арбитражный суд города Москвы прекратил  производство по делу в части требований о взыскании задолженности в размере  494 914 руб. 61 коп.; взыскал с ответчику в пользу истца 967 786 руб. 68 коп. неустойки  и 30 069 руб. государственной пошлины; в удовлетворении остальной части иска  отказал.  

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный  апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда  отменить и удовлетворить иск в полном объеме.  

Заявитель апелляционной жалобы указал, что суд не полностью выяснил  обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют  обстоятельствам дела, и суд неправильно применил нормы материального и  процессуального права.  

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с  соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель  ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, иск  удовлетворить.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного  разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил.  

Арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 123, 156, 184  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел настоящее  дело в отсутствие ответчика.  

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции  проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и  оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной  жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и  обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для  его отмены.  

При исследовании обстоятельств дела установлено, что между АО «ОЭК» и ООО  «Логистика 21 Век» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям № 31596-01-ДО от 21.03.2016, предметом  которого является технологическое присоединение 200 кВт с целью электроснабжения  ВРУ здания Бассейна, расположенного по адресу г. Москва, район Южное Бутово, ул.  Бартеневская, вл. 19.  

Между сторонами подписан акт об осуществлении технологического  присоединения от 04.02.2022 № 31596-01-07, который подтверждает, что АО «ОЭК»  оказало услугу по технологическому присоединению.  

Размер платы за технологическое присоединение по договору в соответствии с п.  10 договора (в ред. ДС от 28.09.2021 № 2) составляет 1 207 108,80 руб.  

Согласно п. 11 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 28.09.2021   № 2) ООО «Логистика 21 Век» внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется в следующем порядке: платеж № 1 в размере 712 194,19 руб.  (оплачено); платеж № 2 в размере 12 071,09 руб. в течение 15 дней со дня заключения  дополнительного соглашения от 28.09.2021 № 2, т.е. до 14.10.2021; платеж 3 в размере  362 132,64 руб. в течение 15 дней со дня фактического присоединения, то есть до  19.02.2022; платеж 4 в размере 120 710,88 руб. в течение 10 дней со дня подписания  акта об осуществлении технологического присоединения, то есть до 14.02.2022.  

Размер основной задолженности по договору составляет 494 914,61 руб. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускается.  

После подачи иска ответчиком в полном объеме погашена задолженность по  договору, в связи с чем истцом заявлено соответствующее ходатайство об отказе от  иска в данной части.  

Согласно протоколу согласования разногласий от 28.09.2021 к дополнительному  соглашению от 28.09.2021 № 2 ООО «Логистика 21 Век» обязалось оплатить АО  «ОЭК» неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому  присоединению в размере 678 515,86 руб. в течение 30 календарных дней с даты  подписания указанного дополнительного соглашения, то есть до 28.10.2021.  

В соответствии с п. 17 договора, в случае нарушения одной из сторон сроков  исполнения своих обязательств но договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней  со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную,  как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату  заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по  договору за каждый день просрочки.  

С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к  значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. В  соответствии с информацией Банка России от 31.07.2015 «О ключевой ставке Банка  России» ключевая ставка на 21.03.2016 составляла 11%.  

Из представленного истцом уточненного расчета следует, что размер начисленной  неустойки за период с 07.02.2022 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 04.09.2023 составляет  726 848 руб. 49 коп.  

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции, руководствуясь положениями  ст.ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что  требования истца являются законными и обоснованными, расчеты произведены верно,  в то время как ответчик доводы иска документально не опроверг.  

При этом, рассмотрев ходатайство ответчика о снижении неустойки, суд посчитал  возможным применить положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации и снизить размер подлежащих взысканию пени до 967 786 руб. 68 коп.  

Истец в апелляционной жалобе указал, что суд первой инстанции необоснованно  применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав,  что ответчик не привел правовых и фактических оснований для снижения неустойки.  

Суд апелляционной инстанции не соглашается с доводами апелляционной  жалобы и отмечает следующее.  

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство  нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе  уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.  

Пунктом 2 указанной статьи определено, что уменьшение неустойки,  определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если  будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может  привести к получению кредитором необоснованной выгоды.  

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской  Федерации, изложенной в определении № 277-0 от 21.12.2000, именно законодатель  устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод  конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц (часть 3  статьи 55 Конституции Российской Федерации). Это касается и свободы договора.  

В определениях Конституционного суда РФ от 22.03.2012 № 424-0-0 и от 26.05.2011   № 683-0-0 указано, что пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки,  если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Предоставленная  суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с  последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов,  предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом  свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию  требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой  осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и  свободы других лиц. Именно поэтому в статье 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации идет речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности  установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в  результате конкретного правонарушения.  

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о неустойке не  содержат каких-либо ограничений для определения сторонами обязательства размера  обеспечивающей его неустойки. Вместе с тем положения пункта 1 статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают право суда уменьшить  неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним  из предусмотренных законом правовых способов, направленных против  злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу,  - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации,  согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс  предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет  адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не  обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского  кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие  последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего  при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на  изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или  рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных  курсов и т.д.) (пункт 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств»).  

Суд апелляционной инстанции считает правомерным снижение размера  неустойки до 967 786 руб. 68 коп., так как определенный судом первой инстанции  размер неустойки, подлежащей взысканию, является соразмерным допущенному  ответчиком нарушению обязательств, справедливым и соответствующим фактическим  обстоятельствам спора.  

Основания для изложения иных выводов апелляционный суд не усматривает. 

При этом сам по себе факт применения положений статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации к требованиям о взыскании неустойки, при условии  наличия соответствующего заявления со стороны ответчика, не может служить  обстоятельством, свидетельствующим о нарушении судом первой инстанции норм  

материального или процессуального права, в связи с чем апелляционная жалоба  отклоняется судом апелляционной инстанции.  

Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции  при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения,  круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих  исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные  нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка  всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного  процессуального законодательства.  

Вместе с тем, заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы  дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы  заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были  бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы  юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на  обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой  инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции  несостоятельными.  

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой  инстанции по настоящему делу не имеется.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение  апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.  

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый  арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2024 по делу   № А40-149627/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Взыскать с АО «ОЭК» (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.  

Председательствующий судья Б.В. Стешан 

Судьи: Т.В. Захарова 

Ю.Н. Кухаренко