АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, 

<

...> 

Тел./ факс 

<

***>, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-10727/2024

г. Белгород

07 апреля 2025 года

Арбитражный суд Белгородской области:  

в составе судьи Танделовой З. М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и видеозаписи секретарём судебного заседания Хахалевой И.Н.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ОАО "СУ-8 Белгородстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третьи лица: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 Алексеевского городского округа»  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств,  

 при участии в судебном заседании: 

от истца: представитель ФИО1, доверенность № 255-11/10285 от 22.12.2023;  

от ответчика: генеральный директор – ФИО2- паспорт РФ, приказ № 2 от 10.06.2022; от третьего лица: не явился, извещен. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Обязать ОАО "СУ-8 Белгородстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области устранить недостатки и дефекты выполненных работ по договору от 17.05.2019 № 17с/96 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МДОУ д/с комбинированного вида № 2 г. Алексеевка» и договору от 20.07.2020 № 13с/90 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МДОУ д/с комбинированного вида № 2 г. Алексеевка» (дополнительные работы), а именно:  

- произвести финишное окрашивание в кабинетах логопеда, психолога, группы «Непоседы»;  

- произвести внутренние отделочные работы: в игровой и раздевалке группы «Бабочки», в игровой и раздевалке группы «Непоседы»; в игровой и раздевалке группы "Подсолнушки"; в игровой и раздевалке группы "Семицветик"; в кабинете заведующего, потолка стеклянного перехода  

 - устранить течь в стеклянном переходе, в лестничном марше гр "Речецветик" . В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОАО "СУ-8 Белгородстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.