Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-30029/2019

28 октября 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2019 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Констракшн» к Государственному бюджетному учреждению Московской области «МОСАВТОДОР» о взыскании задолженности по контракту,

третье лицо - Министерство экономики и финансов Московской области,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, диплом, по дов. исх. № НД-24 от 22.08.2019,

от ответчика – ФИО3, диплом, по дов. № 15 от 09.01.2019, ФИО4 по дов. № 332 от 27.02.2019,

от третьего лица - не явились, извещено,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Констракшн» (далее – ООО «ДЕЛЬТА Констракшн», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Государственному бюджетному учреждению Московской области «МОСАВТОДОР» (далее – ГБУ МО «МОСАВТОДОР», ответчик) о взыскании 71 933 341 руб. 43 коп. задолженности по контракту от 10.08.2018 № 0148200005418000268 (с учетом уточнений).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство экономики и финансов Московской области.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать по доводам, изложенным в отзыве.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача по акту результата работ заказчику и принятие его последним.

Как усматривается из материалов дела, 10.08.2018 между ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» (подрядчик) и ГБУ МО «МОСАВТОДОР» (заказчик) заключен контракт № 0148200005418000268, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству дополнительными линиями наружного освещения аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на востоке Московской области (далее - объекты) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 5 к контракту), в объеме, установленном в Ведомости объемов работ (приложение № 6 к контракту) и в сроки, установленные графиком исполнения контракта (приложение № 7 к контракту), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Выполнение работ осуществляется по этапам в соответствии с графиком исполнения контракта (приложение № 7 к контракту) (пункт 1.1 контракта).

Решением от 17.01.2019 исх. № 1389/2019 заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 8.2.1 контракта заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от контракта в любое время до сдачи заказчику результата работы, уплатив подрядчику часть цены контракта пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения контракта (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Таким образом, в случае отказа заказчика от контракта он обязан оплатить фактически выполненные работы.

22.03.2019 ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» направило ГБУ МО «МОСАВТОДОР» акты о приемке выполненных работ, согласно представленным в материалы дела реестрам.

В соответствии с пунктом 4.5 контракта заказчик в течение 18 (восемнадцати) рабочих дней с даты предоставления подрядчиком документов, указанных в пункте 4.2 контракта  в соответствии с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, проводит экспертизу результатов выполненных работ, а также отдельных этапов выполнения работ (далее - экспертиза), предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта и оформляет экспертное заключение.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оформления экспертного заключения заказчик осуществляет приемку выполненных работ, либо направляет мотивированный отказ, содержащий перечень выявленных недостатков и срок их устранения, который составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа подрядчиком (пункт 4.7 контракта).

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Факт выполнения истцом работ на сумму 319 564 545 руб. 98 коп., их стоимость подтверждены достоверными и достаточными доказательствами и по существу ответчиком не оспорены.

Выполненные работы оплачены ответчиком частично на сумму 247 631 204 руб. 55 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Ответчик просит в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на предоставление им мотивированного отказа от подписания актов.

Однако представленный ответчиком мотивированный отказ от подписания актов от 27.03.2019 № исх.-10562/2019 не содержит замечаний к работам и их объемам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Оплата за выполненные работы ответчиком в полном объеме не произведена, в связи с чем его долг на дату рассмотрения дела судом составляет 71 933 341 руб. 43 коп., который подлежит взысканию в пользу истца.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения Московской области «МОСАВТОДОР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Констракшн» 71 933 341 руб. 43 коп. задолженности и 200 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. 

Судья                                                                                                             М.В. Досова