И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва                                                                              дело № А40-198894/23-151-1620

17.01.2024 года                                                                                                       

Резолютивная часть решения объявлена 12.12.2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 17.01.2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В.

при ведении секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ОГРН: 

<

***>)

к ответчику АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 2 707 274, 40 руб.

при участии

от истца: представитель не явился

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 13.10.2023 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании стоимости выполненных работ по договору субподряда 24209/21/017-дсп от 20.02.2021 в размере 2 704 274 руб. 40 коп.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

От истца поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в связи с чем, в порядке ст. 156 АПК РФ, судебное заседание проведено в отсутствие надлежащим образом извещенного истца.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между АО «ТВЭЛ-Строй» (Подрядчик) и ООО «Энергосервис» (Субподрядчик) был заключен договор субподряда от 20.02.2021 № 24-24209/21/017-дсп, из п. 2.1. данного договора следует, что Субподрядчик обязуется собственными силами, за свой риск, по заданию Подрядчика в соответствии с техническим заданием (Приложение № 7) и утвержденной технической документацией выполнить модернизацию приточных установок, тепло и холодоснабжения в основном технологическом корпусе (далее по тексту «работы») на объекте АО «ПО ЭХЗ», расположенном по адресу: 663690, 

<

...> промышленная, д. 1, Промплощадка №1 (далее по тексту «объект») и передать их Подрядчику. Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором цену.

14.04.2021 между АО «ТВЭЛ-Строй» (Подрядчик) и ООО «Энергосервис» (Субподрядчик) было заключено дополнительное соглашение, в котором стороны согласовали общую стоимость работ в размере 22478782 рублей 12 копеек и срок выполнения работ с 20.02.2021 по 31.12.2022.

В соответствии с п. 4.2. договора субподряда при осуществлении расчетов за фактически выполненные работы Подрядчик оплачивает принятые от Субподрядчика работы по ценам, определяемым в соответствии со сметной документацией, составленной в базовых ценах 2000 года с применением следующих индексов и коэффициентов:

-          ежеквартального изменения сметной стоимости по статьям затрат, разработанного КГАУ «ККГЭ» и согласовано министерством строительства Красноярского края, действующего на 4 квартал 2020 года;

-          индекса фактического роста цен инвестиционного назначения в разделе «Строительство», по Красноярскому краю к декабрю предшествующего года, публикуемого  на  сайте  Федеральной  службы  государственной  статистики  rosstat.dov.ru, действующих на дату подписания Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-          среднегодового коэффициента на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 4,6 %;

-          при возведении временных зданий и сооружений (ВЗиС) на основании документов, подтверждающие фактические затраты на ВЗиС, но не более 2,64%;

-          договорного коэффициента Пнаодрядчика, предложенного в коммерческом предложении к начальной максимальной цене договора с Заказчиком к=1,0;

-          понижающего коэффициента Субподрядчика, предложенного в заявке на участие в закупочной процедуре с учетом протокола преддоговорных переговоров к начальной максимальной цене договора КХ),99999;

-          НДС согласно действующему законодательству на момент приемки выполненных работ.

ООО «Энергосервис» выполнило часть работ по настоящему договору на общую сумму 4477939 рублей 20 копеек, что подтверждается подписанными сторонами актами по форме КС-2 от 18.03.2021 № 050-117ст, от 04.06.2021 № 050-1102Э, от 10.09.2021 № 050-108ст, от 24.09.2021 № 050-99ст, от 01.10.2021 № 050-108ст-1, от 01.10.2021 № 050-108ст-2, от 22.11.2021 № 050-99ст, от 17.12.2021 № 050-99 ст-1, от 17.12.2021 № 050-99 ст-2. Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 18.03.2021 № 1, от 04.06.2021 № 2, от 10.09.2021 № 3, от 24.09.2021 №4, от 01.10.2021 № 5, от 22.11.2021 №6, от 17.12.2021 №7.

Подрядчик оплатил частично выполненные Субподрядчиком работы на общую сумму 2865881 рублей 08 копеек, что подтверждается платежными поручениями от 12.04.2021 № 1996, от 28.06.2021 №3512, от 30.09.2021 №5438, от 15.10.2021 № 5862, от 25.10.2021 № 5995, от 17.12.2021 № 7120, от 19.01.2021 № 335. На сумму в размере 1486643 рублей 39 копеек стороны произвели зачет взаимных требований, что подтверждается актами зачета взаимных требований № 08БП-59 от 11.08.2021, № 08БП-16 от 25.03.2022.

21.11.2022 письмом № 12-07-01/787 АО «ТВЭЛ-Строй» уведомило ООО «Энергосервис» о расторжении договора субподряда № 24-24209/21/017-дсп от 20.02.2021.

В период действия договора ООО «Энергосервис» выполняло работы, которые не были приняты и оплачены со стороны АО «ТВЭЛ-Строй» на общую сумму в размере 2704274 рублей 40 копеек.

В соответствии с п. 6.1. договора субподряда факт выполнения субподрядчиком работ и их стоимость подтверждаются актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и по форме КС-3 (далее - акты КС-2 и справками по форме КС-3), журналами учета выполненных работ по форме КС-ба. По завершению комплекса работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру, а также первичные учетные документы о выполненных работах, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим законодательством (с приложением комплекта необходимой документации):

-          в трех экземплярах: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-          в трех экземплярах: акт о передаче демонтированного оборудования и материалов (Приложение № 10);

-          по завершению всех работ по договору в двух экземплярах: акт приемки-сдачи полностью выполненных работ (Приложение № 1).

31.05.2022 ООО «Энергосервис» предоставило нарочно в АО «ТВЭЛ-Строй» сопроводительным письмом № 22/01-05-03/291 от 18.05.2022 следующие документы:

- счет на оплату № 765 от 17.05.2022 на сумму 874777 рублей 20 копеек, включая НДС 20%;

- счет фактура № 705 от 17.05.2022 на сумму 874777 рублей 20 копеек, включая НДС 20%

- акт по форме КС-3 № 8 от 17.05.2022 на сумму 874777 рублей 20 копеек, включая НДС 20%;

- акт по форме КС-2 № 050-117 от 17.05.2022 на сумму 728981 рублей без учета НДС 20%.

09.10.2022 ООО «Энергосервис» представило нарочно в АО «ТВЭЛ-Строй» сопроводительным письмом № 22/01-05-03/467 от 07.10.2022 следующие документы:

- счет на оплату № 766 от 07.10.2022 на сумму 1829497 рублей 20 копеек в том числе НДС 20%;

- счет фактура № 706 от 07.10.2022 на сумму 1829497 рублей 20 копеек в том числе НДС 20%;

- акт по форме КС-3 № 8 от 07.10.2022 на сумму 1829497 рублей 20 копеек в том числе НДС 20%;

- акт по форме КС-2 № 050-107ст от 07.10.2022 на сумму 1524581 рублей без учета НДС 20%.

Истец указывает, что акты КС-2 и КС-3 со стороны ответчика не подписаны, мотивы отказа в подписании представленных документов не указаны, замечаний к качеству или объемам выполненных работ не представлено. В связи с чем, факт выполнения работ подтверждается односторонними актами.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении требований, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Вступившим в законную силу решением суда от 04.04.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2023 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.10.2023 в рамках дела №А40- 286143/22 установлены обстоятельства, что Субподрядчиком выполнены работы по договору субподряда от 20.02.2021 № 24-24209/21/017-дсп на сумму 4 477 939 (Четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 20 коп, которая оплачена Подрядчиком, выполнение каких-либо иных работ не подтверждено и не доказано. В связи с чем судом взыскана сумма неотработанного аванса в полном объеме.

Подрядчик в соответствии с п. 6.1.1 Договора 26.03.2021 выплатил Субподрядчику аванс в размере 6 743 634 руб. 64 коп. в том числе НДС в сумме 1 123 939  руб. 11 коп., что подтверждается платежным поручением № 1715 от 26.03.2021.

Субподрядчик выполнил часть работ по Договору на сумму 4 477 939 руб. 20 коп., что подтверждается актами приемки выполненных работ по форме КС-2 от 18.03.2021 № 050-117ст, от 04.06.2021 №050-1102Э, от 10.09.2021 № 050-108ст, от 24.09.2021 №№ 050-99ст, от 01.10.2021 №№ 050-108ст-1, от 01.10.2021 № 050-108ст-2, от 22.11.2021 №050-99ст, от 17.12.2021 №050-99ст-1, от 17.12.2021 №50-99ст-2, Справками о стоимости выполненных работ и затрат от 18.03.2021 №1, от 04.06.2021 № 2, от 10.09.2021 № 3, от 24.09.2021 № 4, от 01.10.2021 № 5, от 22.11.2021 № 6, от 17.12.2021 № 7.

Подрядчик оплатил частично выполненные Субподрядчиком работы на общую сумму 2 865 881 руб. 08 коп., что подтверждается платежными поручениями от 12.04.2021 № 1996, от 28.06.2021 № 3512, от 30.09.021 № 5438, от 15.10.2021 № 5862, от 25.10.2021 № 5995, от 17.12.2021 № 7120, от 19.01.2021 № 335.

На сумму 268 676 руб. 36 коп. в т.ч. НДС стороны произвели зачет взаимных требований по оплате Субподрядчиком услуг Подрядчика в соответствии с п. 6.7 Договора, что подтверждается актами зачета взаимных требований от 26.03.2021, 28.06.2021, 24.09.2021, 11.10.2021, 24.11.2021, 29.12.2021. На сумму 1 217 967  руб. 03 коп. в т.ч. НДС стороны произвели зачет взаимных требований по договорам субподряда от 20.02.2021 № 24-24209/21/018 - дсп, от 26.02.2021 № 24-26367/21/015, от 05.04.2021 № 24-26412/21/028-дсп, что подтверждается актами зачета взаимных требований от 15.04.2022, 05.05.2022, 19.10.2022.

Таким образом, сумма неотработанного Субподрядчиком аванса составила 4 182 285 (Четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) руб. 85 коп.

В соответствии с п. 13.4 Договора, об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик уведомляет Субподрядчика в письменном виде. Действие Договора прекращается с момента доставки уведомления Подрядчика в адрес Субподрядчика.

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» уведомил субподрядчика об отказе от Договора, что подтверждается уведомлением от 21.11.2022 года полученным Субподрядчиком 04.12.2022 г.

В соответствии с п. 13.8 Договора, при досрочном прекращении (расторжении) договора, денежные средства, полученные Субподрядчиком в качестве аванса и не засчитанные в счет стоимости выполненных и принятых работ (неосвоенная часть аванса) подлежат возврату Подрядчику в течение 10 дней с момента прекращения Договора либо иной срок, предусмотренный соответствующим уведомлением о расторжении Договора.

В связи с прекращением Договора на стороне Субподрядчика возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 4 182 285 (Четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) руб. 85 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2023 по делу № А40-286143/2022 (оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2023 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.10.2023) с ООО «Энергосервис» взыскана сумма неотработанного аванса по договору 24-24209/21/017-дсп от 20.02.2021 г. в размере 4 182 285 (четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) руб. 85 копеек.

В связи с чем, заявленные требования суд расценивает как направленные на переоценку доводов и обстоятельств, установленных во вступивших в законную силу судебных актах.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей  8, 10, 12, 309, 310, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                    К.В. Вольская