АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-16062/2020

11 ноября 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 03 ноября 2020 года, полный текст решения изготовлен 11 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Малыгиной Е.В.,                                        при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к Фонду развития жилищного строительства Омской области «Жилище» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 835 894 руб. 86 коп.,

в заседании суда приняли участие: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 17.11.2019 № 17, личность удостоверена паспортом РФ;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 18.07.2018, личность удостоверена паспортом РФ;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» (далее –                        ООО «МонтажСтройСервис», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к Фонду развития жилищного строительства Омской области «Жилище» (далее – Фонд «Жилище», ответчик) о взыскании 835 894 руб. 86 коп., из которых: 668 486 руб. 64 коп. задолженности по договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18, 46 254 руб. 82 коп. задолженности по договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18-2, 121 153 руб. 40 коп. задолженности (неоплаченный остаток) по договору уступки прав требований от 12.12.2017 № 12/12/17.

Определением суда Арбитражного суда Омской области от 24.09.2020 указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 03.11.2020.

В предварительном судебном заседании 03.11.2020, представитель ответчика представил к материалам дела отзыв на иск с приложением реестра текущей задолженности, пояснил, что задолженность в размере 835 894 руб. 86 коп. включена в реестр текущих требований Фонда «Жилище», относительно удовлетворения исковых требований не возражал.

Суд приобщил отзыв на иск с приложением реестра текущей задолженности к материалам дела.

Представитель истца заявленные требования поддержал, настаивал на их удовлетворении, представил на обозрение суда оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению в копиях. Суд обозрел оригиналы документов, возвратил истцу.

Определением Арбитражного суда Омской области от 24.09.2020 стороны были уведомлены, что в случае их надлежащего  извещения о месте и времени рассмотрения  предварительного судебного заседания и  судебного разбирательства по существу, они не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд, признав дело подготовленным, вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Поскольку стороны против рассмотрения дела по правилам первой инстанции не возражали, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил подготовку дела к судебному разбирательству и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Определением Арбитражного суда Омской области от 15.06.2017 по делу А46-15629/2016 в отношение Фонда «Жилище» введена процедура наблюдения.

Определением Арбитражного суда Омской области от 23.01.2018 Фонда «Жилище» введена процедура финансового оздоровления на 24 месяца (до 23.01.2020).

Решением Арбитражного суда Омской области от 26.05.2020 по делу А46-15629/2016 в отношении Фонда «Жилище» введена процедура конкурсного производства.

Между ООО «МонтажСтройСервис» и Фонд «Жилище» заключены договоры:

- договор подряда от 01.06.2018 №01-06/18, 

- договор подряда от 01.06.2018 №01-06/18-2, 

- договор уступки прав требований от 12.12.2017 № 12/12/17.

Согласно договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18, ООО «МонтажСтройСервис» (подрядчик) обязуется по заданию Фонда «Жилище» (заказчик) выполнить строительно-монтажные работы в многоэтажном жилом доме № 4 в квартале «Б» жилищного комплекса «Московка-2», а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что объем и стоимость работ определяются локальными сметными расчетами. В процессе работ объемы могут корректироваться согласно фактически выполненным работам с обязательным составлением дополнительного соглашения.

Цена работ по договору определяется локальным сметным расчетом и составляет 668 486 руб. 64 коп., в том числе - НДС 18% (пункт 2.1 договора).

При этом  оплата    выполненных    подрядчиком    работ   производится    заказчиком    в   течение   90 банковских дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставления подрядчиком счета (пункт 2.2 договора). 

Акты приемки выполненных работ (форма № КС - 2), в свою очередь, заполняются на основании данных о фактически выполненных в отчетном периоде работах (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 2.4 договора оплата за фактически выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств   на   расчетный   счет   подрядчика   с   расчетного   счета   заказчика.   Датой   оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

Разделом 3 договора определен срок выполнения работ, согласно которому: начало работ определено как 01.06.2018, окончание работ как 30.06.2018. Но сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон.

Разделом 4 настоящего договора предусмотрено, что подрядчик обязан выполнить работы, согласно приложению № 1 к договору, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, деталями, конструкциями и оборудованием, и в установленный для окончания работ срок предъявить заказчику результат работ для его приемки.

Заказчик в свою очередь обязан принять выполненные   подрядчиком   работы   в   порядке   и   сроки,   установленные договором, а также произнести  оплату  выполненных  подрядчиком  работ.  

Согласно договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18-2, ООО «МонтажСтройСервис» (подрядчик) обязуется по заданию Фонда «Жилище» (заказчик) выполнить строительно-монтажные работы в многоэтажном жилом доме № 4 в квартале «Б» жилищного комплекса «Московка-2», а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что объем и стоимость работ определяются локальными сметными расчетами. В процессе работ объемы могут корректироваться согласно фактически выполненным работам с обязательным составлением дополнительного соглашения.

Цена работ по договору определяется локальным сметным расчетом и составляет 46 254руб. 82 коп., в том числе - НДС 18% (пункт 2.1 договора).

При этом  оплата    выполненных    подрядчиком    работ   производится    заказчиком    в   течение   90 банковских дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставления подрядчиком счета (пункт 2.2 договора). 

Акты приемки выполненных работ (форма № КС - 2), в свою очередь, заполняются на основании данных о фактически выполненных в отчетном периоде работах (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 2.4 договора оплата за фактически выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств   на   расчетный   счет   подрядчика   с   расчетного   счета   заказчика.   Датой   оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

Разделом 3 договора определен срок выполнения работ, согласно которому: начало работ определено как 01.06.2018, окончание работ как 30.06.2018. Но сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон.

Разделом 4 настоящего договора предусмотрено, что подрядчик обязан выполнить работы, согласно приложению № 1 к договору, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, деталями, конструкциями и оборудованием, и в установленный для окончания работ срок предъявить заказчику результат работ для его приемки.

Заказчик в свою очередь обязан принять выполненные   подрядчиком   работы   в   порядке   и   сроки,   установленные договором, а также произнести  оплату  выполненных  подрядчиком  работ.  

Согласно договору уступки прав требований от 12.12.2017 № 12/12/17, заключенному между  обществом с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» (первоначальный кредитор) и ООО «МонтажСтройСервис» (новый   кредитор), первоначальный кредитор передает новому кредитору право требования к Фонду «Жилище» (должник) по оплате выполненных работ в сумме 121 153 руб. 40 коп.

Пунктом 1.2 настоящего договора предусмотрено, что уступаемое право требования к должнику возникло на основании акта о приемке выполненных работ №37-1 от 10.11.2017, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 37 от 10.11.2017 к договору строительного подряда на строительство многоквартирного дома №4 (стр.) в квартале «Б» жилищного комплекса «Московка-2» в Ленинском АО г. Омска № 01/08/2014 от 14.08.2014 в части суммы 121 153 руб. 40 коп.

В соответствии с пунктом 1.3 договора, первоначальный кредитор уступает право требования оплаты работ по акту о приемке выполненных работ № 37-1 от 10.11.2017. справке о стоимости выполненных работ и затрате №37 от 10.11.2017 в части суммы 121 153 руб. 40 коп.

Разделом 2 договора предусмотрены условия уступки, согласно которым, права (требования) переходят к новому кредитору на тех условиях, которые существуют к моменту их перехода.

С момента заключения настоящего договора первоначальный кредитор выбывает из обязательства, переданного новому кредитору в сумме указанной  пунктом 1.1.

Стороны оценили стоимость уступаемых прав в размере 121 153 руб. 40 коп. (пункт 3.1 договора).

Расчет производится путем зачета взаимных требований первоначального кредитора к Новому кредитору по договору подряда от 01.08.2016 на выполнение работ на жилом доме № 4 (стр.) в квартале «Б» жилищного комплекса «Московка-2» в Ленинском АО г. Омска (пункт 3.2 договора).

Кроме того, уведомлением от 12.12.2017 ООО «МонтажСтройСервис» уведомило Фонд «Жилище», что является новым кредитором по возврату долга.

Как указал истец, все работы по договорам были выполнены в сроки, указанные в договорах.

Кроме того, акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 по обозначенным договорам, ответчиком подписаны без замечаний.

Однако ответчик, приняв результаты работ, оплату по ним в полном объеме не произвел, вследствие чего у Фонда «Жилище» перед ООО «МонтажСтройСервис» образовалась задолженность.

В целях досудебного урегулирования спора, ООО «МонтажСтройСервис» в адрес Фонда «Жилище» направило претензию о необходимости погашения задолженности в размере 835 894 руб. 86 коп., из которых: 668 486 руб. 64 коп. задолженности по договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18, 46 254 руб. 82 коп. задолженности по договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18-2, 121 153 руб. 40 коп. задолженности (неоплаченный остаток) по договору уступки прав требований от 12.12.2017 № 12/12/17 по оплате выполненных работ.

Отсутствие действий со стороны ответчика по погашению задолженности явилось основанием для предъявления настоящего иска в суд.

Оценив предоставленные доказательства, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности.

В рассматриваемом случае правоотношения сторон регулируются положениями параграфа 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями

Исходя из анализа данных норм права и пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Предъявляя требование об оплате выполненных работ, подрядчик должен доказать фактическое выполнение работ и их стоимость.

Факт выполнения работ истцом и принятие их ответчиком подтверждается представленным в материалы дела актами о приемке выполненных работ за июнь 2018 от 27.06.2018 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 27.06.2018 № 1 на сумму 668 486 руб. 64 коп., актом о приемке выполненных работ за июнь 2018 от 27.06.2018 № 1 на сумму 46 254 руб. 82 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 27.06.2018 № 1 на сумму 46 254 руб. 82 коп., актом о приемке выполненных работ за октябрь 2017 от 02.10.2018 № 5/2 на сумму 1 587 094 руб. 10 коп., содержащими подписи представителей и оттиски печатей сторон, о фальсификации представленных документов ответчиком не заявлено.

Более того, наличие задолженности в указанном размере подтверждается двусторонним актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.12.2019, на котором также имеется оттиск печати и подпись ответчика, о фальсификации данного документа заявлено не было.

Кроме того, суд учитывает позицию ответчика об отсутствии возражений по существу заявленных требований и включение указанной задолженности в реестр текущих требований  Фонда «Жилище».

Проверив расчет задолженности в размере 835 894 руб. 86 коп., суд пришел к выводу, что в связи с текущим характером требования (статья 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» они подлежат рассмотрению в исковом порядке.

Согласно абзацам 1 и 2 пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» текущими платежами в деле о банкротстве и в процедурах банкротства являются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур банкротства не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

Принимая во внимание, что материалами дела подтверждена и ответчиком не оспорена задолженность в размере 835 894 руб. 86 коп., учитывая, что доказательств оплаты в названной сумме Фондом «Жилище» не представлено, суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению требование ООО «МонтажСтройСервис» о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 835 894 руб. 86 коп., из которых: 668 486 руб. 64 коп. задолженности по договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18, 46 254 руб. 82 коп. задолженности по договору подряда от 01.06.2018 №01-06/18-2, 121 153 руб. 40 коп. задолженности (неоплаченный остаток) по договору уступки прав требований от 12.12.2017 № 12/12/17.

В главе 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определен общий порядок разрешения вопросов о судебных расходах. Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

При подаче искового заявления истцом в доход федерального бюджета была уплачена государственная пошлина в размере 19 718 руб. (чек-ордер ПАО Сбербанк Омское отделение от 08.09.2020 № 481)

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с удовлетворением иска судебные расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с Фонда развития жилищного строительства Омской области «Жилище» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 835 894 руб. 86 коп., а также 19 718 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                     Е.В. Малыгина