АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-18692/2022

г. Ставрополь

29 марта 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоремонт», ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, п. Анджиевский, к муниципальному бюджетному учреждению спортивная  школа олимпийского резерва № 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Пятигорск, с  привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, МКУ «Управление капитального строительства,  ИНН 2632811007, г. Пятигорск,   о продлении сроков исполнения обязательств по контракту.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

принять уточненные требования. истца. 

Внести в государственный контракт № 0121300035322000004 от 15.03.2021,  заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Югэнергоремонт», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, п. Анджиевский, и муниципальным бюджетным  учреждением спортивная школа олимпийского резерва № 1, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г. Пятигорск, изменения в части сроков выполнения работ, изложив пункт 4.1 в  следующей редакции:  

«Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных разделом 1  настоящего Контракта с момента заключения контракта.  

Срок выполнения работ: начало выполнения – с момента заключения контракта, срок  окончания работ выполнения работ – 14.07.2023.  

Работы должны выполняться в три этапа. 

Срок выполнения работ по первому этапу: с момента заключения контракта до  29.04.2023.  

Второй этап: Срок выполнения работ по второму этапу: с 30.04.2023 по 22.06.2023. Третий этап: Срок выполнения работ по третьему этапу: с 23.06.2023 по 14.07.2023». Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова