Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«08» сентября  2021 года

Дело №А12-11026/2021

Резолютивная часть оглашена 20 июля 2021 года

Полный текст изготовлен 08 сентября 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности, пени; третье  лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТОМАТИКА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

В судебном заседании участвовали:

от истца: ФИО1, доверенность от 22.12.2020,

от ответчика: ФИО2, доверенность  от 12.01.2021.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к Администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба (далее – ответчик) о взыскании задолженности по муниципальному контракту №032920006222004760 на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Мельничная р.п. Средняя Ахтуба от 25.08.2020 в размере 876 875 руб., пени в размере 15 783 руб. 75 коп. за период с 02.12.2020 по 31.03.2021, а так же расходов по оплате государственной пошлины в размере 20 853 руб.

            Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд

установил:

Между Администрацией городского поселения р.п. Средняя АхтубаСреднеахтубинского муниципального района Волгоградской области (Заказчик) и ООО«ЭКСТРИМ» (Подрядчик) 25.08.2020 был заключен муниципальный контракт№0329200062220004760 (далее Контракт), по условиям которого подрядчик обязуетсясобственными силами, своевременно на условиях Контракта выполнить ремонтасфальтобетонного покрытия дороги ул. Мельничная р.п. Средняя Ахтуба и сдатьрезультат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его всоответствии с условиями Контракта.

Стоимость услуг определена в размере  5 321 441 рубль 34 копейки (п.2.1).

Оплата производится за фактически выполненные работы, в безналичном порядкепутем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетныйсчет Подрядчика не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчикомдокумента о приемке.  Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены (п. 2.3).

В процессе исполнения условий Контракта были выявлены работы, которые были нецелесообразны к выполнению (п.9 локального сметного расчета - расклинцовка асфальтобетонного слоя до 4 см.).

В адрес ответчика было направлено письмо исх. № 25 от 15.09.2020 года с предложением пересогласовать «Расклинцовку асфальтобетонным слоем до 4 см.» на «Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм, площадью ремонта до 5м. кв.» в связи с актуализацией выполнения данного вида работ вместо указанного в смете.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм был 

выполнен. Стоимость работ составила 876 875 рублей.

Администрация городского поселения р.п. Средняя Ахтуба  работы не оплатила. 

Согласно  пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации погосударственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ длягосударственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнитьстроительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектовпроизводственного и непроизводственного характера работы и передать ихгосударственному    или муниципальному заказчику,   а          государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии со статьей 711, пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодексаРоссийской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену послеокончательной сдачи результатов работ; при этом подрядчик обязан осуществлятьстроительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией,определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и сосметой, определяющей цену работ.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполнятьсянадлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии собычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства иодностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,предусмотренных законом.

Ответчик  факт выполнения работ не оспаривал.

В соответствии с ч.1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признаетсяопределенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатитькредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, вчастности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредиторне обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.9 Контракта, в случае просрочки исполнения Заказчикомобязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияЗаказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начинаясо дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполненияобязательств. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотойдействующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РоссийскойФедерации от не уплаченной в срок суммы.

Ответчику начислена пеня за период с 02.12.2020  по 31.03.2021 года  в размере  15 783 рубля 75 копеек. Расчет судом проверен и принят, ответчиком не оспорен.

При разрешении вопроса по уплате государственной пошлины суд принимает во внимание, что ответчик от ее уплаты освобожден. 

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 876 875 руб., неустойку в размере 15 783,75 руб.

            Выдать  обществу с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 20 853 руб.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                Попова Т.В.