Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-40571/23

28 июля 2023 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 27 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 28 июля 2023 года.

Судья Арбитражного суда  Московской области Р.С. Солдатов ,

при ведении протокола секретарем А.И. Руш

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-40571/23

по исковому заявлению АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО" ЗеленИнвест Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении договора №32211276450 от 19.04.2022,

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о расторжении договора от 19.04.2022 №32211276450 заключенный с ООО" ЗеленИнвест Строй"  на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проектированию инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса (котельной №7), расположенной по адресу: 

<

...>.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Просил исковые требования удовлетворить по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

19.04. 2022 г. между ООО «ЗеленИнвест Строй» (Подрядчик) и АО «Красногорская теплосеть» (Заказчик) согласно требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ был заключен договор № 32211276450 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проектированию инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса (котельной № 7), расположенного по адресу: 

<

...> (далее по тексту - контракт). 

Согласно пункту 1.1. контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по проектированию инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса (котельной № 7), расположенного по адресу: 

<

...> (далее - «работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к Договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Пунктом 4.1 договора установлено, что срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору составляет: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.

Согласно Пункта 4.2. договора, окончание срока действия договора не влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

В соответствии с п. 12.1 Договора договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 30.07.2022. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Спорные отношения, возникшие в связи с исполнением договора, по своей правовой природе являются подрядными, также подлежат регулированию общими гражданско-правовыми нормами об обязательствах, специальными положениями главы 37 ГК РФ.

Положениями Главы 37 ГК РФ "Подряд" предусмотрены специальные нормы (ст. 715 и 717 ГК РФ), предусматривающие порядок одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда.

В частности, в силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в установленный срок этого требования отказаться от договора подряда.

В свою очередь, ст. 717 ГК РФ предусматривает безусловное правило, согласно которому: если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23.09.2008 N 5103/08, в случае, если заказчик отказался от договора подряда в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств по договору, а в дальнейшем выяснилось, что нарушений со стороны подрядчика не имелось, то договор считается расторгнутым в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.

При наличии у заказчика безусловного права отказаться от исполнения договора для реализации данного права достаточно самого факта письменного уведомления заказчиком подрядчика об отказе от исполнения договора.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

10.04.2023г.  АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" направило в адрес ООО "ЗеленИнвест Строй" уведомление об одностороннем отказе от договора № 05/25-2278. 

Согласно пункта 9.7. контракта, в предусмотренных Договором случаях одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Договора он прекращается с даты, указанной в соответствующем уведомлении инициирующей Стороны, содержащем мотивированные причины такого отказа.

Таким образом, основания для удовлетворения требования о расторжении договора отсутствуют в порядке ст. 450 ГК РФ, в связи с тем, что обязательства сторон в настоящий момент расторгнуты.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами в соответствии со ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                       Р.С. Солдатов