Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-55430/2017

г. Москва

17 января 2018 года.

Резолютивная часть решения объявлена 10 января 2018 года.

Мотивированное решение изготовлено 17 января 2018 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А41-55430/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «Вилком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 140104 

<

...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Еврогеопроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 443110 

<

...>), с участием в деле третьего лица – ОАО «Связьтранснефть» о взыскании 63904 руб. 89 коп. неустойки по контракту №СП-43-2014-130 от 15.10.2014 за период с 01.10.2016 по 31.10.2016,

при участии:

согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Вилком» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Еврогеопроект» о взыскании 63904 руб. 89 коп. неустойки по контракту №СП-43-2014-130 от 15.10.2014 за период с 01.10.2016 по 31.10.2016. 

Исковые требования мотивированны нарушением ответчиком срока выполнения работ по спорному договору.

Определением от 14.11.2017 Арбитражного суда Московской области к участию в деле №А41-55430/2017 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено - ОАО «Связьтранснефть».

В судебном заседании представители истца и третьего лица требования искового заявления поддержали в полном объёме, а представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, полагая доводы истца необоснованными. 

Рассмотрев материалы искового заявления ООО «Вилком», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Согласно материалам дела, 15.10.2014 между ООО «Вилком» (заказчик) и ООО «ЕвроГеоПроект» (подрядчик) заключен контракт №СП- 43-2014-130 на выполнение работ и услуг по отводу земельных участков для выполнения строительно-монтажных работ на объекте ОАО «Связьтранснефть»: ВОЛП на участке «УС Самара РНУ-УС Комсомолец. Строительство». 

В силу пункта 5.1 договора работы должны быть выполнены в срок не позднее 30.03.2016. 

Истец, ссылаясь на положения пункта 20.1.1 договора, предусматривающих оплату подрядчиком неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, направил в адрес ответчика претензию от 29.03.2017 №209 с требованием в течение 15 календарных дней с даты получения претензии оплатить неустойку в размере 63904 руб. 89 коп. за период с 01.10.2016 по 31.10.2016 в добровольном порядке.

Поскольку ответчик оставил претензию истца без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Таким образом, ответственность за нарушение сроков завершения этапов работ установлена законом (статья 708 ГК РФ).

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 20.1.1 контракта предусмотрено, что в случае если подрядчик допустил срыв согласованного заказчиком помесячного графика производства работ, подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в виде штрафа в размере 0,05% от контрактной стоимости работы/этапа, по которым допущен срыв графика производства работ за каждый день просрочки, но не более 2,5% от контрактной стоимости работы/этапа, по которой допущен срыв графика производства работ. Если вследствие допущенного отставания подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше должна быть оплачена по каждому месяцу отдельно.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующем факт нарушения при выполнении работ, услуг в текущем месяце, является акт, составленный заказчиком.

В связи с просрочкой выполнения ответчиком работ по договору, истец заявил требования о взыскании 63904 руб. 89 коп. неустойки, начисленной за период с 01.10.2016 по 31.10.2016.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ей приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность заявленной к взысканию суммы неустойки последствиям нарушения своих обязательств ответчик не представил.

Принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, длительность неисполнения ответчиком своих обязательств по договору, отсутствие признаков явной несоразмерности подлежащей взысканию неустойки нарушенному обязательству, суд не находит предусмотренных законом бесспорных оснований для снижения суммы неустойки согласно положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании 63904 руб. 89 коп. неустойки по контракту №СП-43-2014-130 от 15.10.2014 за период с 01.10.2016 по 31.10.2016 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Доводы ООО «ЕвроГеоПроект» о продлении сторонами срока выполнения работ до 15.07.2016, в связи с чем, помесячного срыва работ ответчиком не допущено, документально не подтверждены. 

Доказательств (дополнительных соглашений), изменяющих пункт 5.1 контракта относительно продления сроков выполнения работ ответчиком в материалы дела не представлено. 

Довод ответчика о том, что ООО «ЕвроГеоПроект» не подписывал помесячные акты срыва работ, суд считает несостоятельным, поскольку в силу пункта 20.1.1 контракта указанные акты подписываются заказчиком в одностороннем порядке. 

Следует отметить, что ответчик не оспаривал факт того, что фактически работы выполнены им с нарушением установленных сроков, поскольку письмами ответчик № 05 от 11.01.2017 и №181 от 27.02.2017 направил истцу уведомления о том, что работы завершены с приложением акта фактически выполненных работ, счета, счета-фактуры и исполнительной сметы.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в указанном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Еврогеопроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 443110 

<

...>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Вилком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 140104 

<

...>) 63904 руб. 89 коп. неустойки по контракту №СП-43-2014-130 от 15.10.2014, а также 2556 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья                                 П.И. Машин