ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-20442/2024

г. Новосибирск

17 сентября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трубицыным  Д.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального  казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»  Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

к акционерному обществу по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по государственному  контракту № 39-22 от 11.03.2022 (исковое заявление № 2292 от 07.06.2024),  

по исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Федеральное  управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

к акционерному обществу по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по государственному  контракту № 39-22 от 11.03.2022 (исковое заявление № 3012 от 01.08.2024)  

при участии представителей: 

истца – ФИО1, доверенность от 09.01.2024, диплом, паспорт;  ответчика – ФИО2, доверенность от 15.08.2024,диплом, паспорт;,  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Федерального казенного учреждения «Федеральное  управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ОГРН  

<

***>) удовлетворить.  

Обязать акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (ОГРН  

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения в законную силу, при  наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и летом при температуре  окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить следующие  недостатки (дефекты) в выполненных работах по государственному контракту № 39-22  от 11.03.2022 по введенной в эксплуатацию автомобильной дороге Р-255 «Сибирь»  Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск на участке км 75+000 - км 88+000,  Новосибирская область:  

- продольные трещины на асфальтобетонном покрытии проезжей части, место: км  75+000 – км 77+000, км 79+400 - км 79+700 слева, км 83+150 справа, км 87+400 – км  87+600 слева, количество: 3120 п.м.;  

- сетка трещин на асфальтобетонном покрытии проезжей части, место: км 82+700  справа, км 82+900 справа, км 83+200 справа, км 86+500 слева, км 87+300 слева,  количество: 245 м2;  

- выбоина на асфальтобетонном покрытии проезжей части, место: км 82+700  справа, количество: 35 м2.  

Взыскать с акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  

6 000 рублей. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со  дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом  

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья В.Г. Осипов