Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5751/2022

03 октября 2022 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Терских В. С. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 13.07.2022  № 119/7570 к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Капитал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки 684 644,99 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 16 693 руб.

Истцом заявлено о взыскании неустойки по договору подряда № 50401-22 от 29.03.2022 за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по первому этапу работ за период с 02.05.2022 по 14.06.2022 и по второму этапу с 16.05.2022 по 14.06.2022.

№ этапа

Наименование этапа (состав работ)

Начало работ по договору

Окончание работ по договору

Начало периода просрочки

Стоимость этапа, руб.

Количество дней просрочки

Сумма неустойки

1

Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ яч. №30/40

29.03.2022

01.05.2022

02.05.2022

4 150 567,80

44

365 249,72

2

Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ яч. № 10/11

02.04.2022

16.05.2022

17.05.2022

5 506 815,60

29

319 395,27

Суд, проверив расчет неустойки, находит его неверным.

Истцом при расчете неустойки за просрочку выполнения работ по 1 этапу не учтены положения статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Поскольку первым рабочим днем после 01.05.2022 является 04.05.2022, расчет неустойки следует производить с 05.05.2022.

С учетом изложенного расчет неустойки должен быть следующим.

Стоимость этапа

Период просрочки

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

4 150 567,80

05.05.2022

14.06.2022

41

4 150 567,80 × 41 × 0.2%

340 346,56 р.

 

Стоимость этапа

Период просрочки

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

5 506 815,60

17.05.2022

14.06.2022

29

5 506 815,60 × 29 × 0.2%

319 395,30 р.

Таким образом, требования истца обоснованы лишь в размере 659 741,83 руб. (96,36 % от заявленных требований). 

В остальной части иск удовлетворению не подлежит.

Понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Капитал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за период с 05.05.2022 по 14.06.2022 в размере 659 741,83 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 085,34 руб.

В остальной части отказать.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд  в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационной системе «Картотека арбитражных дел» - kad.arbitr.ru.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

 

Судья

В.С.Терских