Арбитражный суд Московской области

   107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

гор. Москва

 

«26» мая 2020 года                                    

Дело № А41-7746/20

 

                 Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2020 года.

                 Полный текст решения изготовлен 26 мая 2020 года. 

 

             Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску АО "МОСКОВСКОЕ" ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ" к ООО "БИЛЛИОН СТРОЙ" о взыскании 1 225 324 руб. 30 коп., 

            При участии в судебном заседании – представителя истца,  согласно протоколу, 

 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

У С Т А Н О В И Л:

АО «МОСКОВСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «БИЛЛИОН СТРОЙ» о взыскании неотработанного аванса по договору № 47-3/08-2019 от 27.08.2019 в размере 1 225 324 руб. 30 коп.

В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по выполнению работ, вытекающих из названного договора подряда, в результате чего истец требует взыскать с ответчика сумму перечисленного, но не отработанного  ООО «БИЛЛИОН СТРОЙ» аванса. 

В качестве материально-правового основания иска указаны  статьи 309, 310, 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Надлежаще извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела ответчик явку представителя для участия в судебном заседании не обеспечил, отзыв на иск не представил, требования АО «МОСКОВСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ» не оспорил.  Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителя истца, присутствующего в судебном заседании, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

По материалам дела судом установлено, что 27.08.2019 года между  АО «Московское» по племенной работе» и ООО «Биллион Строй» заключен договор №47-3/08-2019. В соответствии с указанным договором ООО «Биллион Строй» принял на себя обязательства выполнить следующие работы: проведение капитального ремонта Здания Лаборатории 1-ая очередь усл.номер 50-50-35/016/2006-052, расположенного по адресу 

<

...>  для нужд АО «Московское» по племенной работе».

Заказчиком в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора уплачен аванс (предварительная оплата) в сумме 1928000 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением №2321 от 28.08.2019 года.

Согласно пункту 9.1 указанного  договора:  «Срок выполнения работ 60 дней с даты заключения договора».

Однако, как пояснено истцом, работы подрядчиком не завершены и в полном объеме заказчику не сданы, материалы по смете в полном объеме не закуплены.

 Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ, в том числе  стоимость строительных материалов составляет 702675 рублей 70 копеек, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №403/А от 10.12.2019.

        Поскольку претензия с уведомлением о расторжении договора от 10.12.2019, содержащая требования о возврате неотработанного авансового платежа в сумме 1 225 324 руб. 30 коп., была оставлена последним без удовлетворения, ООО «Биллион Строй» обратилось в суд с настоящим иском. 

Из существа спора следует, что правоотношения сторон, по своей правовой природе, являются подрядными, регулируются, помимо общих норм об обязательствах, положениями главы 37 ГК РФ.           

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (часть 1 статьи 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

         На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается.

 Из пункта 2 статьи 715 ГК РФ следует, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором, либо не вытекает из существа обязательства (пункт 4 статьи 453 ГК РФ).

Исходя из положений статьи 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.   

Согласно статье 68 АПК РФ  обстоятельства дела, которые согласно закону  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Доказательств выполнения работ в полном объеме в установленный сторонами срок путем передачи их результата истцу в порядке, установленном названной нормой материального права, ответчиком суду не представлены. 

Факт отсутствия надлежащего встречного предоставления по договору с его стороны  ответчиком не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).   

Учитывая изложенное, суд считает, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт того, что ответчик свои обязательства не исполнил – оплаченные работы в установленный Договором срок не произвел, доказательств возврата предоплаты истцу не предъявил, расчет задолженности не оспорил, следовательно, требование о взыскании суммы неотработанного аванса, признается судом законным и обоснованным, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объеме.

        Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче настоящего иска, относится на ответчика по правилам статьи 110 АПК РФ.    

        На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "БИЛЛИОН СТРОЙ" в пользу АО "МОСКОВСКОЕ" ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ" 1 225 324 руб. 30 коп. – неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, 25 253 руб. – расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

 

СУДЬЯ

Т. В. СОРОЧЕНКОВА