АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

                                ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                                 

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-79012/19-96-699

05 июня 2019 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена  04 июня 2019 года    

Полный текст решения изготовлен 05 июня 2019 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кюребековой А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ПСМ» к ООО «АККОРД-СТРОЙ» о взыскании задолженности в размере 4 801 525,83 руб., неустойки за период с 14.11.2017 по 28.03.2019 в размере 360 735,35 руб.

В судебное заседание явились: 

от истца: Роменский Ю.В. по доверенности от 01.02.2019 г.;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО «ПСМ», с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, обратился в Арбитражный су города Москвы к ООО «АККОРД-СТРОЙ» о взыскании задолженности по договорам №343АС-17/01-04/17 от 01.04.2017 г., №344АС-18/01-04/17 от 01.04.2017 г, №345АС-19/01-04/17 от 01.04.2017 г., №346АС-20/01-04/17 от 01.04.2017 г. в размере 4 801 525,83 руб., неустойки за период с 14.11.2017 по 28.03.2019  в размере 360 735,35 руб.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что 01 апреля 2017 г. между ООО «Аккорд-Строй» (Генподрядчик) и ООО «ПроектСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 343АС-17/01-04/17, в соответствии с п. 1.1. которого Подрядчик обязался выполнить работы по монтажу индивидуального теплового пункта (далее - «ИТП») для жилого дома №17 Жилого микрорайона «Пироговская Ривьера», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, западнее п. Пироговский с согласованием выполненных работ с Ростехнадзором (и иными заинтересованными организациями) и вводу ИТП в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации.

Согласно п. 3.1. Договора  № 343АС-17/01-04/17 общая стоимость работ составляет 750 000 руб.

В связи с проведением дополнительных работ по поставке оборудования для индивидуального теплового пункта (ИТП), общая стоимость работ составила 973 020,00 руб., в т. ч. НДС18% согласно п. 2 заключенного сторонами дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 г., (750 000,00 руб. + 223 020,00 руб.= 973 020,00 руб.).

С учетом п. 1 заключенного сторонами дополнительного соглашения №2 от 22.11.2017 г. и Приложения №1 (Расчет стоимости устройства индивидуального теплового пункта) к нему общая стоимость работ составила 1 138 700,71 руб., в т. ч. НДС 18%).

Согласно п. 3.3. Договора № 343 оплата выполненных работ производится с пропорциональным удержанием перечисленного аванса на основании оформленных актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости работ по Договору № 343 и предоставления Подрядчиком Генподрядчику счет-фактуры и счета на оплату не позднее 30-ти банковских дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ.

В соответствии с п. 5.3 договора Генподрядчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ требованиям рабочей документации и условий договора, а также требованиям действующегозаконодательства и нормативных документов Российской Федерации (п. 5.4 Договора).

В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приёмки работ, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (п. 5.5 Договора).

Работы истцом выполнены в объеме на сумму 1 138 700,71 руб., что подтверждается материалами дела, в частности, оформленными и подписанными сторонами Актами по форме КС-2 и Справками по форме КС-3 (Актом о приемке выполненных работ №1 от 28.02.2018 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №1 от 28.02.2018 г. на сумму 980 511,28 руб. (с НДС 18%), Актом о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2019 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2019 г. на сумму 158 189,43 руб. (980 511,28 руб.+ 158 189,43 руб. = 1 138 700,71 руб.).

В связи с тем, что ответчик уклонялся от приемки работ Акт о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2018 г., Справка стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2018 г. на сумму 158 189,43 руб. были подписаны в одностороннем порядке и направлены заказчику, что подтверждается Сопроводительным письмом за исх. №384 от 26.03.2019 г., отправленным заказным почтовым отправлением с описью вложения (РПО№14100233011873). Указанные документы получены ответчиком 16.04.2019.

Возражений на акт по форме КС-2 в соответствии с п. 5.3 Договора в адрес истца не поступало. Сроки на рассмотрение и возражения согласно п. 5.3 Договора истекли. Таким образом, общая сумма выполненных работ составляет 1 138 700,71 руб.

Поскольку договором предусмотрено гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) (п. 3.3, 3.4 договора ), то сумма к оплате по данному договору составляет 1 081 765,67 руб.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки по спорному договору в размере 56 935,05 руб.

Согласно п. 6.2. Договора №343 за уклонение от оплаты или при несвоевременной оплате выполненных работ Генподрядчик уплачивает Подрядчику по его требованию за каждый день просрочки - 0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему Договору (п.3.1.).

Согласно п. 6.5 Договора №343 Штрафные санкции выплачиваются виновной Стороной в течение 3 (трех) рабочих дней после соответствующего письменного требования другой Стороны. Требование об оплате.

Претензия с требованием об оплате долга в адрес ответчика была направлена за Исх. №220 от 18.02.2019.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. 

Также судом установлено, что 01 апреля 2017 г. между ООО «Аккорд-Строй» (Генподрядчик) и ООО «ПроектСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 344АС-18/01-04/17, в соответствии с п. 1.1. которго Подрядчик обязался выполнить работы по монтажу индивидуального теплового пункта (далее - «ИТП») для жилого дома № 18 Жилого микрорайона «Пироговская Ривьера», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, западнее п. Пироговский с согласованием выполненных работ с Ростехнадзором (и иными заинтересованными организациями) и вводу ИТП в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации.

Согласно п. 3.1. Договора № 344АС-18/01-04/17 общая стоимость работ составляет 750 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%, и определяется расчетом стоимости (Приложение №1 Договора).

В связи с проведением дополнительных работ по поставке оборудования для индивидуального теплового пункта (ИТП), общая стоимость работ составила 973 020,00 руб., в т. ч. НДС 18% согласно п. 2 заключенного сторонами дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 г., (750 000,00 руб. + 223 020,00 руб.= 973 020,00 руб.).

С учетом п. 1 заключенного сторонами дополнительного соглашения №2 от 22.11.2017 г. и Приложения №1 (Расчет стоимости устройства индивидуального теплового пункта) к нему общая стоимость работ составила 1 141 086,84 руб., в т. ч. НДС 18%.

Согласно п. 3.7. Договора № 344АС-18/01-04/17 оплата выполненных работ производится с пропорциональным удержанием перечисленного аванса на основании оформленных актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости работ по Договору № 343 и предоставления Подрядчиком Генподрядчику счет-фактуры и счета на оплату не позднее 30-ти банковских дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ.

Согласно п. 5.3 Договора № 344АС-18/01-04/17 Генподрядчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ требованиям рабочей документации и условий договора, а также требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации (п. 5.4 Договора).

В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приёмки работ, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (п. 5.5 Договора).

Работы истцом выполнены в объеме на сумму 1 141 086,74 руб., что подтверждается материалами дела, в частности, оформленными и подписанными сторонами Актами по форме КС-2 и Справками по форме КС-3 (Актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2017 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2017 г. на сумму 349 491,59 руб. (с НДС 18%), Актом о приемке выполненных работ №2 от 28.02.2018 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №2 от 28.02.2018 г. на сумму 638 506,92 руб., в т. ч. НДС 18%., Актом о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2019 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2019 г. на сумму 153 088,33 руб. (349 491,59 руб.+ 638 506,92 руб.+ 153 088,33 руб. = 1 141 086,84 руб.)

В связи с тем, что ответчик уклонялся от приемки работ Акт о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2018 г., Справка стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2018 г. на сумму 153 088,33 руб. были подписаны в одностороннем порядке и направлены заказчику, что подтверждается Сопроводительным письмом за исх. №384 от 26.03.2019 г., отправленным заказным почтовым отправлением с описью вложения (РПО№14100233011873). Указанные документы получены ответчиком 16.04.2019 г. Возражений на акт по форме КС-2 в соответствии с п. 5.3 Договора в адрес истца не поступало.

Сроки на рассмотрение и возражения согласно п. 5.3 Договора истекли. Таким образом, общая сумма выполненных работ составляет 1141 086,84 руб. 

Поскольку  договором  предусмотрено  гарантийное  удержание  в  размере  5%  (пяти процентов) (п. 3.7, 3.8 договора), то сумма к оплате по данному договору составляет 1 084 032,50 руб.

Также истцом начислена неустойка в сумме 114 108,70 руб.

Согласно п. 7.2. Договора №344 за уклонение от оплаты или при несвоевременной оплате выполненных работ Генподрядчик уплачивает Подрядчику по его требованию за каждый день просрочки - 0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему Договору (п.3.1.).

Согласно п. 7.5 Договора №344 Штрафные санкции выплачиваются виновной Стороной в течение 3 (трех) рабочих дней после соответствующего письменного требования другой Стороны требование об оплате.

Претензия с требованием об оплате долга в адрес ответчика была направлена за Исх. №220 от 18.02.2019 г.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. 

Также судом установлено, что 01 апреля 2017 г. между ООО «Аккорд-Строй» (Генподрядчик) и ООО «ПроектСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 345АС-19/01-04/17.

Согласно п. 1.1. Договора № 345АС-19/01-04/17 Подрядчик обязался выполнить работы по монтажу индивидуального теплового пункта (далее - «ИТП») для жилого дома № 19 Жилого микрорайона «Пироговская Ривьера», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, западнее п. Пироговский с согласованием выполненных работ с Ростехнадзором (и иными заинтересованными организациями) и вводу ИТП в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации.

Согласно п. 3.1. Договора № 345 общая стоимость работ составляет 750 000,00 руб., в т. ч. НДС 18%, и определяется расчетом стоимости.

В связи с проведением дополнительных работ по поставке оборудования для индивидуального теплового пункта (ИТП), общая стоимость работ составила 968 300 020,00 руб., в т. ч. НДС 18% согласно п. 2 заключенного сторонами дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 г., (750 000,00 руб. + 218 300,00 руб.= 968 300,00 руб.).

С учетом п. 1 заключенного сторонами дополнительного соглашения №2 от 26.01.2018 г., в соответствии с которым обязанности по закупке материалов и оборудования возложены на субподрядчика общая стоимость работ составила 1 250 056,46 руб., в т. ч. НДС 18%.

Согласно п. 3.3. Договора № 345 оплата выполненных работ производится с пропорциональным удержанием перечисленного аванса на основании оформленных актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости работ по Договору № 345 и предоставления Подрядчиком Генподрядчику счет-фактуры и счета на оплату не позднее 30-ти банковских дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ.

Согласно п. 5.3 Договора №345 Генподрядчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ требованиям рабочей документации и условий договора, а также требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации (п. 5.4 Договора).

В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приёмки работ, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (п. 5.5 Договора).

Работы истцом выполнены в объеме на сумму 1 250 056,46 руб., что подтверждается материалами дела, в частности, оформленными и подписанными сторонами Актами по форме КС-2 и Справками по форме КС-3 (Актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2017 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2017 г. на сумму 318 902,04 руб. (с НДС 18%), Актом о приемке выполненных работ №2 от 28.02.2018 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №2 от 28.02.2018 г. на сумму 496 178,68 руб., в т. ч. НДС 18%., Актом о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2019 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2019 г. на сумму 434 975,74 руб. (318 902,04 руб. + 496 178,68 руб.+ 434 975,74 руб. = 1 250 056,46 руб.).

В связи с тем, что ответчик уклонялся от приемки работ Акт о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2018 г., Справка стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2018 г. на сумму 434 975,74 руб. были подписаны в одностороннем порядке и направлены заказчику, что подтверждается Сопроводительным письмом за исх. №384 от 26.03.2019 г., отправленным заказным почтовым отправлением с описью вложения (РПО№14100233011873). Указанные документы получены ответчиком 16.04.2019 г. Возражений на акт по форме КС-2 в соответствии с п. 5.3 Договора в адрес истца не поступало.

Таким образом, общая сумма выполненных работ составляет 1 250 056,46 руб. 

Поскольку договором предусмотрено гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) (п. 3.3, 3.4 договора №345), то сумма к оплате по данному договору составляет 1 187 553,64 руб.

Истцом также заявлено о взыскании неустойки по договору в размере 123 092,80 руб.

Согласно п. 6.2. Договора №345 за уклонение от оплаты или при несвоевременной оплате выполненных работ Генподрядчик уплачивает Подрядчику по его требованию за каждый день просрочки - 0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему Договору (п.3.1.).

Согласно п. 6.5 Договора №345 Штрафные санкции выплачиваются виновной Стороной в течение 3 (трех) рабочих дней после соответствующего письменного требования другой Стороны. Требование об оплате.

Претензия с требованием об оплате долга в адрес ответчика была направлена за Исх. №220 от 18.02.2019 г. Ответ истцом не получен, требования ответчиком не исполнены.

Расчет неустойки представленный истцом судом проверен, признан верным. 

Также судом установлено, что 01 апреля 2017 г. между ООО «Аккорд-Строй» (Генподрядчик) и ООО «ПроектСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 346АС-20/01-04/17, в соответствии с п. 1.1. которого Подрядчик обязался выполнить работы по монтажу индивидуального теплового пункта (далее - «ИТП») для жилого дома № 20 Жилого микрорайона «Пироговская Ривьера», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, западнее п. Пироговский с согласованием выполненных работ с Ростехнадзором (и иными заинтересованными организациями) и вводу ИТП в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации.

Согласно п. 3.1. Договора № 346 общая стоимость работ составляет 750 000,00 руб., в т. ч. НДС18%,и определяется расчетом стоимости (Приложение №1 Договора).

В связи с проведением дополнительных работ по поставке оборудования для индивидуального теплового пункта (ИТП), общая стоимость работ составила 968 300 020,00 руб., в т. ч. НДС 18% согласно п. 2 заключенного сторонами дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 г. (750 000,00 руб. + 218 300,00 руб.= 968 300,00 руб.).

С учетом п. 1 заключенного сторонами дополнительного соглашения №2 от 26.01.2018 г., в соответствии с которым обязанности по закупке материалов и оборудования возложены на субподрядчика, общая стоимость работ составила 1 524 393,81 руб., в т. ч. НДС 18%.

Согласно п. 3.3. Договора № 346АС-20/01-04/17 оплата выполненных работ производится с пропорциональным удержанием перечисленного аванса на основании оформленных актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости работ по Договору № 345 и предоставления Подрядчиком Генподрядчику счет-фактуры и счета на оплату не позднее 30-ти банковских дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ.

Согласно п. 5.3 Договора №346 Генподрядчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ требованиям рабочей документации и условий договора, а также требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации (п. 5.4 Договора).

В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приёмки работ, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (п. 5.5 Договора).

Работы истцом выполнены в объеме на сумму 1 524 393,81 руб., что подтверждается материалами дела, в частности, оформленными и подписанными сторонами Актами по форме КС-2 и Справками по форме КС-3 (Актом о приемке выполненных работ №1 от 30.06.2018 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.06.2018 г. на сумму 768 678,90 руб. (с НДС 18%), Актом о приемке выполненных работ №2 от 31.03.2019 г., Справкой стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.03.2019 г. на сумму 755 714,91 руб. (768 678,90 руб. + 755 714,91 руб. = 1 524 393,81 руб.).

В связи с тем, что ответчик уклонялся от приемки работ Акт о приемке выполненных работ №2 от 31.03.2018 г., Справка стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.03.2018 г. на сумму 755 714,91 руб. были подписаны в одностороннем порядке и направлены заказчику, что подтверждается Сопроводительным письмом за исх. №384 от 26.03.2019 г., отправленным заказным почтовым отправлением с описью вложения (РПО№14100233011873). Указанные документы получены ответчиком 16.04.2019 г. Возражений на акт по форме КС-2 в соответствии с п. 5.3 Договора в адрес истца не поступало.

Сроки на рассмотрение и возражения согласно п. 5.3 Договора ответчиком пропущены. Таким образом, общая сумма выполненных работ составляет 1 524 393,81 руб.

Поскольку договором предусмотрено гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) (п. 3.3, 3.4 договора №346), то сумма к оплате по данному договору составляет 1 448 174,12 руб.

Также истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 66 598,80 руб.

Согласно п. 6.2. Договора №346 за уклонение от оплаты или при несвоевременной оплате выполненных работ Генподрядчик уплачивает Подрядчику по его требованию за каждый день просрочки - 0,04% от суммы просроченного платежа, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему Договору (п.3.1.).

Согласно п. 6.5 Договора №346 Штрафные санкции выплачиваются виновной Стороной в течение 3 (трех) рабочих дней после соответствующего письменного требования другой Стороны. Требование об оплате.

Претензия с требованием об оплате долга в адрес ответчика была направлена за Исх. №220 от 18.02.2019 г. Ответ истцом не получен, требования ответчиком не исполнены.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. 

Статьей 309 ГК РФ определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статья 746 ГК РФ устанавливает, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Пунктом 4 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу абз. 7 п. 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. N 51 в соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании задолженности по договорам №343АС-17/01-04/17 от 01.04.2017 г., №344АС-18/01-04/17 от 01.04.2017 г, №345АС-19/01-04/17 от 01.04.2017 г., №346АС-20/01-04/17 от 01.04.2017 г. В размере  4 801 525 руб.83 коп. и неустойки в размере 360 735 руб. 35 коп. подлежат удовлетворению. 

Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии с ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 167-176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «АККОРД-СТРОЙ» в пользу ООО «ПСМ» задолженность по договорам №343АС-17/01-04/17 от 01.04.2017 г., №344АС-18/01-04/17 от 01.04.2017 г, №345АС-19/01-04/17 от 01.04.2017 г., №346АС-20/01-04/17 от 01.04.2017 г. в размере 4 801 525,83 руб., неустойку за период с 14.11.2017 по 28.03.2019 в размере 360 735,35 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47 448 руб. 

Взыскать с ООО «АККОРД-СТРОЙ» в доход федерального бюджета 1 363 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                 П.С. Гутник