АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-10467/2023

17 октября 2023 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 17 октября 2023 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Дёминой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело № А60-10467/2023 по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ЕТК г. Реж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр энергетических компетенций» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об истребовании документов по договорам оказания услуг,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 27.07.2023.

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 24.03.2023, ФИО5, представитель по доверенности от 20.03.2023.

от третьего лица: не явились, извещены.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

 

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЕТК г. Реж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр энергетических компетенций» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об истребовании документов по договорам оказания услуг.

Определением от 10.03.2023 исковое заявление оставлено без движения до 10.04.2023.

Недостатки иска устранены 14.03.2023.

Определением от 20.03.2023 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 26.04.2023.

От ответчика 21.04.2023 поступил отзыв на исковое заявление.

В предварительном  судебном заседании 26.04.2023 истец поддерживает заявленные исковые требования, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела письменных объяснений, поддерживает ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица – ФИО2.

Ответчик оставляет удовлетворение ходатайства на усмотрение суда.

Ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора – ФИО2 судом рассмотрено, удовлетворено на основании ст. 51 АПК РФ.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

Определением от 03.05.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 20.06.2023.

От истца 09.06.2023 поступили возражения на отзыв ответчика.

От ответчика 13.06.2023 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела  дополнительных документов (1 коробка).

Документы приобщены.

От третьего лица 13.06.2023 поступил отзыв.

В судебном заседании 20.06.2023 истец указал на необходимость ознакомления с представленными ответчиком документами, в связи с чем, 19.06.2023 было подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Ходатайство судом удовлетворено.

Определением от 20.06.2023 судебное заседание отложено на 08.08.2023.

От истца 07.08.2023 поступили пояснения.

Определением от 15.08.203 судебное заседание отложено.

От ответчика 04.09.2023 в материалы дела поступили письменные объяснения и дополнительные документы.

В судебном заседании 08.09.2023 истец заявил ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с документами, представленными ответчиком 04.09.2023.

Ответчик не возражает.

Ходатайство судом удовлетворено.

Определением от 13.09.2023 судебное заседание отложено на 10.10.2023.

От истца 04.10.2023 поступило ходатайство об уточнении исковых требований, а именно истцом заявлено требования о взыскании с ответчика на случай неисполнения решения суда судебного штрафа / неустойки в размер 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда в законную силу до его фактического исполнения. В остальной части просительная часть иска оставлена без изменения.

В судебном заседании 10.10.2023 истец поддерживает ходатайство от 04.10.2023 об уточнении исковых требований.

Уточнение иска принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Ответчиком посредством ИС «Мой Арбитр» 06.10.2023 было подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Ходатайство было удовлетворено судом 10.10.2023, между тем, ответчик указал, что необходимость ознакомления с материалами дела отсутствует.

При таких обстоятельствах, в настоящем судебном заседании дело рассмотрено судом по существу. 

Истец настаивает на удовлетворении исковых требований с учетом уточнения иска от 04.10.2023.

Ответчик просит в иске отказать.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен договор №2 от 05.08.2020, по условиям которого заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:

п. 1.1.1. ведение бухгалтерского, налогового, финансового и управленческого учета в соответствии с действующим законодательством РФ на основании первичных документов, предоставленных Заказчиком. Перечень оказываемых услуг установлен разделом 2.1. настоящего договора.

п. 1.1.2. оказание услуг по правовому обеспечению деятельности предприятия Заказчика. Перечень оказываемых услуг определен разделом 2.2. настоящего договора.

В соответствии с п. 2.1. договора исполнитель принимает на себя обязательства на оказание следующих видов услуг Заказчику:

2.1.1.      предоставление устных и письменных консультаций и разъяснений по бухгалтерскому, налоговому, финансовому, и управленческому учету в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом особенностей деятельности Заказчика;

2.1.2.      формирование принципов и методов учетной политики Заказчика;

2.1.3.      восстановление утраченной отчетности и документов за прошлые периоды (в случае необходимости);

2.1.4.      разработка положений, инструкций и методик по финансово-экономическому, бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету;

2.1.5.      организация и ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета Заказчика, в том числе:

• проверка первичных учетных документов на предмет их надлежащего оформления и соответствия действующему законодательству РФ; подготовка сводных учетных документов, ведение регистров бухгалтерского и налогового учета;

• ввод в программу «1С: Бухгалтерия» первичных учетных документов, представленных Заказчиком и оформленных его контрагентами;

• создание первичных учетных документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика;

• расчет заработной платы работникам Заказчика с оформлением и ведением соответствующей  документации  (ведомости  начисления  заработной  платы, расчетно-платежные ведомости); расчет пособий, больничных, отпускных, а также начислений и удержаний при увольнении работников; расчет вознаграждений по договорам ГПХ; начисление налогов с фонда оплаты труда и взносов во внебюджетные фонды;

• проведение инвентаризации;

• составление, представление на утверждение и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности Заказчика в налоговые органы, в Пенсионный Фонд, в Фонд социального страхования, в Федеральную Службу Статистики и иные государственные органы в соответствии со сроками, утвержденными действующим законодательством РФ;

• подготовка и представление документов, ответов на запросы и требования в Государственные органы, связанные с исполнением обязанностей в рамках данного договора, в соответствии со сроками, утвержденными действующим законодательством РФ;

• ведение электронного документооборота с налоговыми органами, внебюджетными фондами и органами государственной статистики посредством системы «Контур-экстерн»;

2.1.6.      организация и предоставление доступа к электронному архиву документов, принятых от Заказчика, а также документов, оформленных Исполнителем в период действия договора в связи с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика;

2.1.7.      внедрение прогрессивных методов учета и отчетности;

2.1.8.      автоматизация бизнес - процессов Заказчика при выделении дополнительного финансирования со его стороны;

2.1.9.      разработка и внедрение процесса бюджетирования;

2.1.10.    ежемесячное составление и предоставление БДДС, БДР и иных форм управленческого учета и анализа отклонений Заказчику;

2.1.11.    подготовка предложений по снижению затрат Заказчика;

2.1.12.    подготовка проектов и/или осуществление бухгалтерской и налоговой экспертизы внутренней и договорной документации Заказчика;

2.1.13.    своевременное информирование Заказчика о сроках исполнения обязательств по уплате налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2.1.14.    осуществление платежей в соответствии с утвержденным заказчиком бюджетом и реестрами платежей;

2.1.15.    представление интересов Заказчика во всех видах проверок государственных органов, связанных с выполнением функций в рамках данного договора;

2.1.16.    ведение учета и подготовка документов в рамках Концессионного соглашения заказчика;

2.1.17.    предоставление документов в рамках аудиторских проверок и получение положительного аудиторского заключения;

2.1.18.    предоставление права подписывать документы за главного бухгалтера в соответствии с законодательством РФ;

2.1.19.    иные услуги в рамках компетенции исполнителя.

Согласно п. 2.2. договора в рамках оказания услуг по правовому сопровождению деятельности Заказчика, Исполнитель выполняет следующее:

-  устные и письменные юридические консультации по корпоративному, гражданскому, административному, налоговому, антимонопольному, таможенному, трудовому законодательству при личном присутствии или по средствам телефонной связи.

-  защита интересов Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Ведение претензионно-исковой работы предприятия, подготовка исков, отзывов, жалоб и передача их в судебные органы.

-  подготовка проектов и/или осуществление юридической экспертизы внутренней документации предприятия Заказчика.

-  осуществление юридической экспертизы писем, гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых Заказчиком с контрагентами.

-  подготовка заключения гражданско-правовых договоров.

-  участие в переговорах с контрагентами Заказчика по заключению договоров и соглашений.

-  осуществление работы по исполнению судебных актов в интересах Заказчика.

-  представление интересов Заказчика в административных органах, в том числе при проверках, проводимых контролирующими органами.

-  юридическое сопровождение кадровой работы.

-  оценка перспективности судебных разбирательств, с выдачей устного или письменного заключения по требованию Заказчика;

юридическое сопровождение реализации Заказчиком Концессионного Соглашения от 07.04.2020г. в отношении объектов теплоснабжения Режевского городского округа;

-  иные услуги в рамках компетенции Исполнителя.

Согласно п. 5.1. договора исполнитель ежемесячно представляет Заказчику Акт оказанных услуг не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца.

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость оказываемых услуг составляет 240.000,00 (двести сорок тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 40.000,00 (сорок тысяч) рублей.

Согласно п. 11.1. договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020.

Дополнительным соглашением от 30.12.2020 стороны продлили срок действия договора до 31 декабря 2021 года включительно.

Дополнительным соглашением от 07.03.2021 стороны согласовали, что стоимость оказываемых услуг составляет 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей.

Кроме того, между истцом (заказчик) и ответчиком (технический заказчик)  заключен договор №1/ТЗ от 01.03.2021, согласно условиям которого Технический заказчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1) оказать комплекс услуг по осуществлению функций Технического заказчика, а Заказчик обязуется финансировать понесенные затраты, а также оплатить Техническому заказчику стоимость его услуг в порядке и размере, установленном в настоящем Договоре (п. 2.1. договора).

В соответствии с п. 4.1.27 договора технический заказчик обязан хранить, и не позднее 20 (двадцати) календарных дней по окончании строительно-монтажных работ Объекта, передать Заказчику по акту приема-передачи документацию, сформированную Генеральным подрядчиком/Генеральным проектировщиком в процессе проектирования и строительства, ремонта и/или реконструкции Объекта;

Согласно п. 4.1.28 договора  технический заказчик обязан ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным представлять Заказчику Отчет Технического заказчика, Акт об оказанных услугах, счет-фактуру.

В соответствии с п. 4.1.29  к Отчету Технического заказчика могут быть приложены:

- копии счетов-фактур, полученных Техническим заказчиком от продавцов товаров (работ, услуг), с которыми Техническим заказчиком во исполнение настоящего Договора заключены договоры на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и т.п.

Согласно п. 5.4. договора сумма ежемесячного вознаграждения Технического заказчика определяется в соответствии со стоимостью оказания услуг, рассчитанной на основании Методики определения затрат на осуществление функции технического заказчика, утвержденной приказом Минстроя России от 02.06.202 №297/пр или в соответствии с иным действующим на дату вознаграждения правовым актом;

Проанализировав условия данных договоров, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе они являются договорами возмездного оказания услуг. 

Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В силу ст. 779, 781 ГК РФ исполнение обязательств сторон по договору возмездного оказания услуг носит встречный характер (ст. 328 ГК РФ), где на стороне заказчика лежит обязанность оплатить исполнителю оказанные им услуги в сроки и порядке, предусмотренные таким договором.

Оплате подлежат фактически оказанные услуги (ст. 781 ГК РФ).

В соответствии со ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (ст. 702 - 729) и положения о бытовом подряде (ст. 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. 779 - 782 настоящего кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

По смыслу ст. 720 ГК РФ необходимым и достаточным доказательством выполнения подрядных работ является подписанный между сторонами акт приемки. При этом в отсутствие двустороннего акта приемки подрядчик не лишен права доказывать факт выполнения работ иными доказательствами, в том числе односторонним актом приемки, если мотивы отказа заказчика от его подписания не обоснованы (ч. 4 ст. 753 ГК РФ).

Истец, обращаясь с исковым заявлением, указывает, что ответчиком не исполнена обязанность по передаче документов, ссылаясь на то, что в силу п. 4.1. договора №2 от 05.08.2020 исполнитель обязуется по факту оказания услуг правового характера предоставлять Заказчику подготовленные документы, указывает, что в процессе исполнения договоров между истцом и ответчиком были подписаны акты об оказанных услугах с приложением отчетов исполнителя, а именно:

по договору №2 от 03.08.2020 подписаны акты: от 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 30.12.2020, 29.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021,

по договору № 1/ТЗ от 01.03.2021 подписаны акты: от 30.04.2021 г. – Акт № ТС -1, Акт № ТС -2, Акт № ТС -3, Акт № ТСкв -1, Акт № ТСкв -2, Акт № ТЭЦ -1, Акт № ТЭЦ -2, Акт № ЦТП -1, Акт № ЦТП -2; от 31.05.2021 г. – Акт № ТСкв-3, Акт № ТЭЦ-3, Акт № ЦТП-3; от 12.07.2021 г. – Акт № ТЭЦ-4, Акт № ЦТП-4; от 31.07.2021 г. – Акт № ТС-4, Акт № ТС-5, Акт № ТЭЦ-5, Акт № ЦТП-5; от 31.08.2021 г. – Акт № ТС-6, Акт № ТЭЦ-6, Акт № ЦТП-6; от 31.09.2021 г. – Акт № ТС-7, Акт № ЦТП-7; от 31.10.2021 г. – Акт № ТС-8, Акт № ЦТП-8; от 30.12.2021 г. – Акт № ТС-9, Акт № ТС-10, Акт № ЦТП-9, Акт № ЦТП-10,

в которых  содержалась информация о передаче от ответчика к истцу первичных учетных документов, а также иных документов финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, просит обязать ответчика передать истцу документы, которые составлялись по результатам оказания услуг по договору № 1/ТЗ на выполнение функций технического заказчика от 01.03.2021:

• документы по результатам рассмотрения предварительной трассировки магистральных тепловых сетей;

• документы по результатам анализа гидравлического расчета по тепловым сетям микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» выполненные ООО «Полюс» поверочным расчетом в программе «ЗУЛУ»;

• техническое задание № 3 от 26.04.21 г на выполнение инженерных изысканий для Объекта;

• запрос № 32 от 19.04.21 г. в Администрацию Режевского городского округа о предоставлении правоустанавливающих документов на Объект (кадастровые документы, техпаспорт БТИ), на получение существующей проектной и исполнительной документации по Объекту;

• "Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов «Гавань» и «Быстринский» МУП РГО «РежПром» № 524/1 от 16.04.21 г.;

• утвержденный гидравлический расчет 0001-2021-00-ГР участков ГТ ТЭЦ-ЦТП микрорайона «Гавань» и ГТ ТЭЦ-ЦТП №2 микрорайона «Быстринский» (исх. 57 от 26.05.2021 года);

• запрос № 55 от 24.05.21 г. в Администрацию Режевского городского округа о получении вы-писки из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП;

• технические требования ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань», составляющая 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.);

• дополнительный запрос № 65 от 10.06.21 г в Администрацию Режевского городского округа о получении дополнительных данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП;

• исходные данные ЕГРН по земельным участкам согласно предоставленной информации из Администрации Режевского городского округа (исх. № 69 от 18.06.2021 г.);

• замечания по направленному на согласование ТЗ № 3 на производство инженерных изысканий по объекту «Строительство тепловых сетей города Реж» (Исх. № 73 от 21.06.2021 г.);

• предпочтительный вариант трассировки тепловых сетей от ГТ ТЭЦ к ЦТП микрорайона «Гавань» (исх. № 71 от 21.06.2021 г.);

• запрос № 98 от 13.07.21г в Администрацию Режевского городского округа о получении допол-нительных данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП;

• корректировка границ инженерных изысканий в соответствии с запросом ООО «Полюс» № И-ПlО-192 от 08.07.2021 года (Исх. № 96 от 12.07.2021 г. ООО «ЦЭК»);

• замечания по направленному на согласование ТЗ № 3 на производство инженерных изысканий по объекту «Строительство тепловых сетей города Реж» (Исх. № 96 от 12.07.2021 г.);

• документы, связанные с актуализацией необходимого списка ИРД в соответствии с исх. № И-ПlО-218 от 23.07. 2021 г. ООО «Полюс»;

• дополнительный запрос № 158 от 27.08.21 г. в Администрацию Режевского городского округа о получении необходимых данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения проектирования (выбора трассировки) магистральных тепловых сетей;

• карта зонирования Режевского городского округа исх. №130 для выполнения проектирования линейных объектов;

• исх. № 142 от 12.08.2021 года координаты земельных участков в соответствии с картой зонирования;

• замечания в ООО «Полюс» исх. № 139 от 11.08.2021 года по предоставленным на согласование обследованиям ТП №1-4,6;

• замечания в ООО «Полюс» исх. № 147 от 18.08.2021 года по предоставленным на согласование обследованиям ТП №1-4,6;

• заключение ООО «Геокрафт» в соответствии с договором №142-2021/В от 29.07.2021 года «Об отсутствии кадастровых ошибок» по спорным участкам исх. № 145 от 16.08.2021 года;

• тепловые нагрузки объектов концессии исх. №159/1 от 31.08.2021 года согласно запросу И-ПlО-286 от 31.08.2021 года;

• письмо исх. № 166 от 17.09.2021 года в Администрацию Режевского городского округа о согласовании выполнения пробных скважин для выполнения инженерно-геодезических изысканий под магистральные ТС;

• письмо исх. № 168 от 20.09.2021 года в Администрацию Режевского городского округа о наложении сервитута на существующие земельные участки, попадающие в полосу отвода под маги-стральные ТС (2 земельных участка);

• письмо исх. № 173 от 22.09.2021 года в ООО «Полюс» об обязательном выполнении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий линейных объектов на основании ответа ФАУ «Главгосэкспертиза» № 01-01-17/ 12737-еБ от 13.08.2021 года;

• документы, подтверждающие выполнение прочих работ в рамках исполнения функций Технического заказчика по Договору № 1/ТЗ от 01.03.2021 г. (Приложение 1);

• результаты рабочего совещания, проведенного 01.10.2021 года с ООО «Полюс» и оформлением протокола о текущем состоянии дел по проектированию объектов концессии. Выполнение изысканий. Трассировка ТС;

• письмо исх. № 184 от 15.10.2021 в ООО "Полюс" о необходимости предоставления отчетов инженерных изысканий в Администрацию ГО г. Реж для получения ГПЗУ под ТС;

• письмо-запрос исх. № 185 от 15.10.2021 года в Администрацию о рассмотрении возможности прокладки ТС без необходимости наложения сервитутов;

• результаты рабочего совещания 18.10.2021 года с ООО «Полюс» и оформлением протокола о текущем состоянии дел по проектированию объектов концессии.

• документы, подтверждающие выполнение изысканий, направленными на согласование ППО по магистральным сетям от ГТ ТЭЦ до микрорайона «Быстринский»;

• результаты рабочего совещания 27.10.2021 г. с ООО «Полюс» и оформлением протокола о текущем состоянии дел по проектированию объектов концессии;

• документы, подтверждающие выполнение изысканий трассировки ТС;

• документы, подтверждающие согласование с собственниками ЗУ (Гаражей) наложения сервитута охранной зоной тепловых сетей;

• выписка (по запросу) ЗУ, попадающему в створ схемы ТС в направлении "Гавань" от Администрации РГО с кадастровым номером 66:22:1913010:137 от Администрация Режевского городского округа письмом от 01.11.2021 № 5892 от 01.11.2021;

• письмо исх. № 202 от 10.11.2021 года в ООО "Полюс" с просьбой разработать и направить на согласование корректированный график выполнения проектных работ по объектам концессии;

• письмо исх. № 203 от 11.11.2021 года в ООО "Полюс" с информацией о необходимости про-хождения государственной экспертизы проектной документации по объектам концессии;

• письмо исх. № 205 от 12.11.2021 года в ООО "Полюс" с просьбой предоставить заключение по способу прокладки квартальных тепловых сетей (реконструкция/новое строительство);

• письмо исх. № 209 от 18.11.2021 года в ООО "Полюс" о предоставлении информации с пояснениями по способу прокладки квартальных сетей по микрорайону "Быстринский";

• документы, подтверждающие участие в оперативном совещании от 19.11.2021 года с обсуждением следующих: вопросов: 1) ООО «Полюс» предоставить заключение о целесообразности прокладки новых квартальных сетей по микрорайону "Быстринский"; 2) обследование существующих квартальных сетей целесообразно провести для определения объемов реконструкции только после принятия решения о целесообразности строительства;

• ПД месте с выполненным Заключением экспертизы УрТПП в соответствии с исх. И-П1 О-375 от 23.11.2021 ответ на 426, 422 и 195;

• график выполнения проектных работ к Приложению № 2 ГП 24.11.21. с целью сокращения от-ставания по проектным работам для направления его ГП;

• письмо исх. № 216 от 25.11.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости предоставить ТЭО по прокладке магистральных/квартальных сетей по микрорайону "Быстринский";

• документы, подтверждающие участие в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 08.12.2021 года;

• письмо исх. № 219 от 14.12.2021 года в ООО "Полюс" о проведении совещания 15.12.2021 г. в 15.00 по проектированию линейных объектов Концессионного соглашения;

• документы, подтверждающие участие в оперативном совещании по вопросам "О реализации от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа» от 16.12.2021 г. в Администрации РГО. Вопросы согласования схемы те от ГТ ТЭЦ до ЦТП "Гавань" после проведения согласований пересечений с собственниками коммуникаций;

• документы, подтверждающие проведение рабочего совещания 17.12.2021 года в ООО "Полюс" с обсуждением и решением текущих вопросов по проектированию объектов теплоснабжения с оформлением протокола совещания;

• письмо исх.   № 224 от        2 1.12.2021 года        в ООО "Полюс"        о необходимости руководствоваться утвержденной схемой движения документов для            согласования трассировки  ТС;

• письмо исх. №227 от 22.12.2021 года в ООО "Полюс" протокол оперативного совещания от 17.12.2021 г. по вопросам окончания работ по изысканиям под линейные объекты в срок до 25.12.2021 года;

• документы, подтверждающие согласование пересечений ТС от ГТ ТЭЦ г. Реж до ЦТП направлении микрорайона "Гавань" с ГАЗЭКС;

• письмо исх. № 230 от 27.12.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости направления проектно-сметной         документации           по ТС на государственную экспертизу сметной стоимости и ПД;

• письмо исх. № 229 от 27.12.202 1 года в ООО "Полюс" о срыве сроков передачи на экспертизу ПД по ТС;

• документы, подтверждающие согласование пересечений ТС в направлении микрорайона "Гавань" с МУП РГО РежПром;

• документы, подтверждающие участие в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 08.12.2021 года;

• письмо исх. № 219 от 14.12.2021 года в ООО "Полюс" о проведении совещания 15.12.2021 года в 15.00 по проектированию линейных объектов Концессионного соглашения;

• документы, подтверждающие рассмотрение предварительной трассировки квартальных тепловых сетей и мест размещения ТП-Быстринский (1,2,3 ,4);

• запрос № 32 от 19.04.21г. в Администрацию Режевского городского округа о предоставлении правоустанавливающих документов на Объект (кадастровые документы, техпаспорт БТИ), на получение существующей проектной и исполнительной документации по Объекту;

• "Технические требования на подключение ПТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов "Гавань" и "Быстринский» МУП РГО "РежПром" № 52411 от 16.04.21 г.;

• технические требования от ООО «ЦЭК» к ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.);

• справка для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту строительства от "Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"(№ОМ-11-260/317 от 19.03.2021)

• Договор №1 Д-21-03-22 от 26.03.2021 г. на проведение археологического обследования на предмет наличия объектов культурного наследия объектов культурного наследия с ООО "НПП Археобюро";

• документы, подтверждающие организацию и участие в совещаниях по проектированию ГТ ТЭЦ;

• запрос 03/08/2-3422 от 09.04.21 года для получения ТУ на газ 1,2 Мпа;

• акт № 195 о привязке точек пересечения на местности от 26.03.21 года с определением предварительной точки подключения газопровода и предварительная схема прокладки газопровода с давлением 1,2 МПа с БПГ от магистральных сетей;

• согласие на технические требования и условия № 1 от 23.04.21, от Администрации Режевского городского округа, на автомобильную дорогу общего пользования местного назначения IV категории ул. Заводская, инд. номер 66-486 ОП МГ 66НО28;

• согласование ООО "РегионТранснефть № РТН-185 от 28.04.21 о резервировании, хранении и поставки дизельного топлива для нужд ПТЭЦ;

• справка заключение 03г-21 о величине расчетной силы сейсмического воздействия на планируемый к строительству объект "Газотурбинная станция " по адресу 

<

...> кад. номер 66:22:1913008:775 от Института Геофизики им. Ю. М. Булашевича Уральского отделения Росийской академии наук (ИГФ УрО РАН) №16361-67 от 08.02.2021 г.;

• технические условия для подключения к городским водопроводным сетям (письмо № 231 от 14.04.2021 года) МУП "Реж-Водоканал" для проектируемого объекта с кадастровым номером 66:22:1913008:775 Режевского городского округа;

• " Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов «Гавань» и «Быстринский» МУП РГО "РежПром" № 524/ 1 от 16.04.21 г.;

• замечания по ОТР, дополнительная проработка поставки аналога газовой турбины российскими производителями, в том числе «РЭП Холдинг» «Невский завод» исх.54 от 24.05.2021 года.

• технические требования ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.);

• замечания по вендор-листу основного технологического оборудования (исх. № 77 от 23.06.2021 г.);

• предварительная схема сетей водоснабжения и водоотведения от ГТ ТЭЦ (исх. № 74 от 21.06.2021 г.);

• принципиальная тепловая схема РЕЖ-ОТР-ТМ-ГЧ, л.1. (исх. № 76 от 22.06.2021 г.);

• запрос данных в ООО «Полюс» для получения разрешения на пользование водным объектам (исх.75 от 22.06.2021 г.);

• схема изысканий для выполнения проекта по временному электроснабжению;

• замечания исх. №110 от 20.07.21 года к направленным ПЗ, ОТР ООО «Полюс» на согласование ОТР;

• актуализация необходимого списка ИРД в соответствии с исх. № И-ПlО-218 от 23.07. 2021 г. ООО «Полюс»;

• акт приема-передачи строительной подготовительной площадки под строительство ГТ ТЭЦ (исх.№345 от 20.07.2021 работы года) в соответствии с договором Генерального подряда № 9 от 16.07.2021 года;

• акт разбивки геодезической основы, исх. №118 от 28.07.2021 года дополнение к письму № 345 от работы 20.07.21 года о передаче строительной площадки для строительства ГТ ТЭЦ;

• запрос в ООО «Полюс» о предоставлении дополнительной информации по сервисному обслуживанию газотурбинной установки типа Титан 250 (срок, стоимость) и стоимости этапов работ проектирование, СМР, ПНР П ТЭЦ и др. информации (исх. № 117 от 27.07.2021 года.);

• документы, подтверждающие рабочую командировку на АО «ОДК Авиадвигатель» и действующие энергоустановки с целью рассмотрения применения отечественных аналогов ПУ в проекте;

• письмо исх. 38-01-23/2642 от 03.08.2021 года от Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о размещении земельного участка под ПЗ строительство ГТ ТЭЦ вне охранной и защитной зоны объектов культурного наследия, включенных в единый госу-дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и согласие с заключением ГИКЭ;

• запрос в ООО «Полюс» исх. № 129 от 03.08.2021 года о расшифровке стоимости в укрупненном сметном расчете;

• запрос в ООО «Полюс» исх. № 133 от 06.08.2021 года о предоставлении дополнительной ин-формации по ГТУ для объективности сравнения газотурбинных установок;

• запрос границ осей земельного участка площадки строительства ПТЭЦ ООО «Геокрафт» 18 августа 2021 года;

• письмо исх. № 377 от 17.08.2021 г. о передаче земельного участка площадки строительства ПТЭЦ в ООО «Полюс» по Акту разбивки геодезической основы;

• документы, придтверждающие результаты археологических изысканий, выполненные на территории площадки строительства ГТ ТЭЦ, направленные в ООО «Полюс» исх. №154 от 24.08.2021 года;

• заключение от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-ловской области исх. 38-01-23/2642 от 03.08.2021 года о размещении земельного участка вне охранной и защитной зоны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

• документы, подтверждающие определение места размещения нового ЦТП в микрорайоне «Гавань», согласовано с администрацией Режевского городского округа;

• "Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов "Гавань" и "Быстринский"" до ЦТП МУП РГО "РежПром" № 524/1 от 16.04.21 г.;

• запрос № 55 от 24.05.21г в Администрацию Режевского городского округа о получении выписки из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения предварительной трассировки магистральных тепловых сетей, посадки тепловых пунктов и ЦТП;

• технические требования ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.);

• дополнительный запрос № 65 от 10.06.21г в Администрацию Режевского городского округа о получении дополнительных данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП;

• предоставление исходных данных ЕГРН по земельным участкам согласно предоставленной информации из Администрации Режевского городского округа (исх. № 69 от 18.06.2021 г.);

• документы, подтверждающие согласование места размещения нового ЦТП микрорайона «Гавань» (исх. № 70 от 21.06.2021 г.);

• замечания к ТЗ проектирование ЦТП-Гавань ООО «Полюс» для последующей корректировки и согласования (исх. №79 от 28.06.2021 г.);

• техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строи-тельство тепловой сети города Реж. Проектирование и строительство ЦТП в микрорайоне «Гавань» г. Реж (исх. №91 от 09.07.21 года;

• документ актуализации необходимого списка ИРД в соответствии с исх. № И-П1 О-218 от 23.07. 2021 г. ООО «Полюс»;

• схема размещения ЦТП исх. №09/08/21 от 09.08.21 года;

• документы, подтверждающие согласование ЗУ для размещения ЦТП в МУП «Водоканал» г. Реж для выдачи ГПЗУ;

• запрос исх.     №124  от        02.08.2021      года    в          Администрацию на формирование земельного участка под размещение     ЦТП    с последующим получением ГПЗУ;

• запрос исх. № 126 от 02.08.2021 года в ООО "Полюс" на получение объемов по энергоресурсам и согласовании схемы размещения земельного участка под ЦТП;

• письмо в ООО «Полюс» исх. 138 от 10.08.2021 года с откорректированными техническими требованиями от МУП РГО "РежПром" и скорректированным ТЗ по ЦТП микрорайона "Гавань";

• запрос исх. №143 от 16.08.2021 года в МУП "Водоканал" на получение ТУ по водопотреблению и водоотведению ЦТП;

• запрос исх. №144 от 16.08.2021 года в ООО "РЭС" на получение ТУ по электроснабжению ЦТП;

• письмо исх. № 152 от 23.08.2021 года технические условия от МУП "Реж-Водоканал" на водопотребление и водоотведение ЦТП «Гавань»;

• отказ от ГАЗЭКС исх. № Г/1846 от 25.08.2021 года в согласовании места размещения ЗУ под строительство ЦТП "Гавань;

• запрос в Администрацию ГО г. Реж от ЕТК г. Реж исх. №. 383 от 23.08.2021 г. о формировании ЗУ под ЦТП;

• запрос в Администрацию ГО г. Реж исх. № 159 от 27.08.2021 г. о формировании ЗУ под ЦТП с учетом корректировки земельного участка;

• письмо исх. №173 от 22.09.2021 года в ООО «Полюс» об обязательном выполнении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ЦТП на основании ответа ФАУ «Главгосэкспертиза» № 01-01-17/12737 -СБ от 13.08.2021 года;

• постановление Администрации ГО г. Реж №1477 от 06.09.2021 года об утверждении схемы расположения ЗУ на кадастровом плане территории под ЦТП по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> земельный участок №4/1;

• письмо исх. № 164 от 17.09.2021 года в Администрацию ГО г. Реж о необходимости формирования земельного участка под ЦТП и получения разрешения на выполнение инженерно-геологических изысканий под ЦТП;

• письмо исх. № 166 от 17.09.2021 года в Администрацию ГО г. Реж о согласовании выполнения инженерно-геологических изысканий под ЦТП Администрацией ГО г. Реж;

• замечания в ООО «Полюс» исх. №169 от 20.09.2021 года к выданным тепломеханическим решениям (ответ на И-П1О-236);

• согласование исх. № 5101 от 27.09.2021 года от Администрации ГО г. Реж "О согласовании бурения пробных скважин" для выполнения инженерно-геологических изысканий под ЦТП;

• документы, подтверждающие выполнение прочих работ в рамках исполнения функций Технического заказчика по Договору № 1/ТЗ от 01.03.2021 г. (Приложение 1);

• ответ на обращение № 5563 от 15.10.2021 года от Администрации о предоставлении ГПЗУ только после предоставления в отдел архитектуры и градостроительства результатов инженерных изысканий под ЦТП;

• согласование ФИО6 на постановлении о разрешенном использовании земельного участка под ЦТП для выполнения работ по инженерным изысканиям;

• согласование ФИО7 ГКУ СО "Режевское лесничество" на постановлении о разрешенном использовании земельного участка под ЦТП для выполнения работ по инженерным изысканиям;

• письмо исх. № 177 от 01.10.2021 года в Администрацию ГО г. Реж с просьбой ускорить процесс формирования земельного участка под ЦТП. (отсутствует межевой план);

• письмо исх.№ 189 от 15.1О.2021 года в Администрацию ГО г. Реж о рассмотрении возможности ускорения процесса получения ГПЗУ под ЦТП;

• письмо исх. № 184 от 15.10.2021 в ООО "Полюс" о необходимости предоставления отчетов инженерных изысканий в Администрацию ГО г. Реж для получения ГПЗУ под ЦТП (В соответствии с письмом №5563 от 15.10.2021 года от Администрации о предоставлении ГПЗУ только после предоставления в отдел архитектуры и градостроительства результатов инженерных изысканий под ЦТП);

• письмо исх. № 187 от 15.10.2021 в Администрацию ГО г. Реж и МУП "Реж- Водоканал" о корректировке ТУ на водоотведение ГТ ТЭЦ;

• письмо исх. № 190 от 15.10.2021 в ООО "Полюс" с приложениями: Постановление №1477 от 06.09.2021 года «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> земельный участок № 4/1»;

• Постановление № 1632 от 28.09.2021 года «О разрешении использования земельного участка с месторасположением: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> земельный участок №4/1, для размещения объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута»;

• письмо исх. № 193 от 20.10.2021 в ООО "Полюс" о направлении ТУ на присоединение к электрическим сетям ЦТП;

• уточненные ТУ на водоотведение от МУП "РежВодоканал" с учетом исключения пункта на прием сточных вод от ЦТП от 01.11.2021 г.;

• письмо исх. № 199 от 01.11.2021 года в ООО "Полюс" с корректированными ТУ на водоотведение ЦТП (исключен пункт с принятием ливневых стоков отдельно);

• письмо исх. № 201 от 02.11 .2021 года в ООО "Полюс" с корректированными ТЗ на проектирование ЦТП (опечатка в месяце даты заключения договора Генерального подряда);

• корректировка          ТУ       на        ЦТП    от        МУП   "Реж-Водоканал"      по водоотве-дению - корректировка от 02.11.21 г.;

• дефектная ведомость           на необходимые работы для восстановления работоспособности здания, проведена проверка и направлена в ООО "Полюс" для корректировки 03.11.2021 года    от        ООО            "Полюс";

• письмо исх. № 202 от 10.11.2021 года в ООО "Полюс" с просьбой разработать и направить на согласование корректированный график выполнения проектных работ по объектам концессии;

• документы, подтверждающие участие в оперативном совещании от 11.11.2021 года с обсуждением следующих вопросов: 1) выданы ООО "Полюс" замечания и предложения к эскизу фасада ЦТП; 2) ООО "Полюс" направить на согласование в ООО "ЦЭК" тепломеханические решения 3) ускорить предоставление со стороны Администрации ГПЗУ под ЦТП "Гавань";

• письмо исх. № 203 от 11.11.2021 года в ООО "Полюс" с информацией о необходимости про-хождения государственной экспертизы проектной документации по объектам концессии;

• проектные решения по фасаду здания ЦТП в Администрацию РГО;

• письмо исх. № 208 от 15.11.2021 года в ООО "Полюс" с замечаниями по направленному на согласование цветовых и технических решений по ЦТП "Гавань";

• заявка от ООО «Полюс» на запрос ТУ на Intemet для ЦТП;

• письмо исх. № 211 от 19.11.2021 года в ООО "Полюс" с замечаниями к результатам предоставленных обследований ТП4;

• Заключение экспертизы УрТПП в соответствии с исх. И-ПlО-375 от 23.11.2021 ответ на 426, 422 и 195;

• график выполнения проектных работ к Приложению № 2 ГП 24.11.21.       с целью сокращения            отставания     по        проектным    работам для направления его ГП;

• письмо исх. № 215 от 25.1 1.2021 года в ООО "Полюс"            с замечаниями к результатам повторно предоставленных обследований ТП Участие      в оперативном совещании  от 29.11.2021 года    с обсуждением следующих вопросов: 1) ООО «ЦЭК» ускорить предоставление со стороны Администрации ГПЗУ под ЦТП "Гавань";

• межевой план, выполненный кадастровым инженером ФИО8 под ЦТП с целью получения ГПЗУ;

• документы, подтверждающие участие 08.12.2021 года в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 08.12.2021 года;

• письмо исх. №220 от 14.12.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости корректировки технических отчетов по инженерным изысканиям ЦТП "Гавань" для возможного направления на государственную экспертизу выполненных изысканий;

• документы, подтверждающие участие 16.12.2021 года в оперативном совещании в Администрации г. Реж по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа". Вопросы уточнения границ ЗУ для выдачи ГПЗУ под ЦТП;

• документы, подтверждающие проведение рабочего совещания 17.12.2021 года в ООО "Полюс" с обсуждением и решением текущих вопросов по проектированию объектов теплоснабжения с оформлением протокола совещания;

• повторный запрос исх. № 223 от 17.12.2021 года на выдачу ТУ Intemet по узлам учета, ТП, ЦТП в АО «Транстелеком»;

• документ согласования размещения ЦТП с Водоканалом в соответствии с письмом №6845 от 15.12.2021 года;

• согласование размещения ЦТП с МУП РГО Режпром в соответствии с письмом №6845 от 15.12.2021 года;

• письмо исх. №227 от 22.12.2021 года в ООО "Полюс" Протокол оперативного совещания от 17.12.2021 года по вопросам корректировки ТУ на электроснабжение ЦТП, предоставления окончательных границ ЗУ под ЦТП с учетом откосов, предоставления технологических решений по ЦТП (разрезы, планы);

• согласование размещения ЦТП с Газэкс в соответствии с письмом №6845 от 15.12.2021 года;

• выписка по ЗУ на ЦТП;

• исх. № 229 от 27.12.2021 года в ООО «Полюс» о срыве сроков передачи на экспертизу ПД по ЦТП.

2. Обязать ООО «Центр энергетических компетенций» передать ООО «Единая теплоснабжающая компания г. Реж» документы, которые составлялись по результатам оказания услуг по Договору № 2 оказания юридических, финансовых и бухгалтерских услуг от 03.08.2020 г.:

• новое соглашение о займах Заказчика и документы при предоставлении заявки на предоставление займа;

• документы БДДС и БДР;

• ответы на требования № 9779, 9780 и 9781 от 14.08.2020 г. в МРИФНС №23 по Свердловской области;

• возражения на акт камеральной проверки № 3348 от 02.12.2020;

• ответы на запросы Администрации Режевского городского округа;

• документация в рамках Концессионного соглашения заказчика;

• документы, подтверждающие проработку договоров, соглашений, писем Заказчика.

Также истец с учетом уточнения иска просит взыскать с ответчика на случай неисполнения решения суда судебного штрафа / неустойки в размер 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда в законную силу до его фактического исполнения.

Истец в обоснование исковых требований указывает, что до 19.06.2022 функции единоличного исполнительного органа ООО «ЕТК г. Реж» осуществлял ФИО2 (далее – ФИО2). С 20.06.2022 по настоящее время единоличным исполнительным органом является общество с ограниченной ответственностью «Энергоальянс» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Энергоальянс»). В процессе смены единоличного исполнительного органа ООО «ЕТК г. Реж» ФИО2 в ООО «Энергоальянс» были переданы учредительные документы, первичные учетные документы, а также иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕТК г. Реж». По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕТК г. Реж» было установлено отсутствие документов, которые составлялись по результатам исполнения ООО «ЦЭК» Договора № 2 и Договора № 1/ТЗ.

Таки образом, истец полагает, что ООО «Центр энергетических компетенций» (ответчик) не были исполнены обязательства по передаче документов по Договору № 2 и Договору № 1/ТЗ, у истца отсутствуют документы, указанные в подписанных между сторонами актах и отчетах об оказанных услугах, в ходе судебного разбирательства истец неоднократно пояснял, что третьим лицом не были переданы данные документы, поэтому он первоначально посчитал нужным обратиться с иском в суд к контрагенту.

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, исходя из предмета и основания заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд отказывает в удовлетворении исковых требований на основании следующего.

Материалами дела подтверждается, что к договорам, заключенным между сторонами были подписаны акты выполненных работ, к которым приложены соответствующие отчеты, в которых указан перечень услуг и переданных документов ответчиком истцу.

В частности, по договору №1/ТЗ согласно акту № ТС/2 от 30 апреля 2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за март 2021г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету о  выполнении функций технического заказчика ответчиком осуществлено:

-Рассмотрение предварительной трассировки магистральных тепловых сетей.

-Организация и участие в совещаниях по проектированию тепловых сетей.

-Рассмотрение гидравлического расчета по тепловым сетям микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» выполненные ООО «Полюс» поверочным расчетом в программе «ЗУЛУ»

Согласно акту № ТС/6 от 30 апреля 2021 г. ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за апрель 2021г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету о  выполнении функций технического заказчика ответчиком осуществлено:

-Утверждение технического задания №3 от 26.04.21 г на выполнение инженерных изысканий для Объекта.

-Запрос №32 от 19.04.21 г в Администрацию Режевского городского округа о предоставлении правоустанавливающих документов на Объект (кадастровые документы, техпаспорт БТИ), на получение существующей проектной и исполнительной документации по Объекту

-МУП РГО "РежПром" № 524/1 от 16.04.21 г " Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов "Гавань" и "Быстринский""

Согласно акту №ТС/3 от 31.05.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за май 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету о  выполнении функций технического заказчика ответчиком осуществлено:

-Утвержден гидравлический расчет 0001-2021-00-ГР участков ГТ ТЭЦ-ЦТП микрорайона «Гавань» и ГТ ТЭЦ-ЦТП №2 микрорайона «Быстринский».(исх. 57 от 26.05.2021 года)

-Запрос № 55 от 24.05.21 г в Администрацию Режевского городского округа о получении выписки из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП.

-Выдача технических требований ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.)

Согласно акту №ТС/14 от 30.12.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за декабрь 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету о  выполнении функций технического заказчика ответчиком осуществлено:

-Участие в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 08.12.2021 года

-Направлено письмо исх. № 219 от 14.12.2021 года в ООО "Полюс" о проведении совещания 15.12.2021 года в 15.00 по проектированию линейных объектов Концессионного соглашения.

-Участие в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 16.12.2021 года в Администрации РГО. Вопросы согласования схемы ТС от ГТ ТЭЦ до ЦТП "Гавань" после проведения согласований пересечений с собственниками коммуникаций.

-Проведено рабочее совещание 17.12.2021 года в ООО "Полюс" с обсуждением и решением текущих вопросов по проектированию объектов теплоснабжения с оформлением протокола совещания

-Направлен письмо исх. №224 от 21.12.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости руководствоваться утвержденной схемой движения документов для согласования трассировки ТС. Изначально согласовывает Заказчик(Технический Заказчик) и после этого документы направляются на согласование в заинтересованные инстанции.

-Направлен на согласование исх. №227 от 22.12.2021 года в ООО "Полюс" Протокол оперативного совещания от 17.12.2021 года по вопросам окончания работ по изысканиям под линейные объекты в срок до 25.12.2021 года.

-Получено согласование пересечений ТС в направлении микрорайона "Гавань" с Газэкс.

-Направлено письмо исх. № 230 от 27.12.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости направления проектно-сметной документации по ТС на государственную экспертизу сметной стоимости и ПД.

-Направлено исх. №229 от 27.12.2021 года в ООО "Полюс" о срыве сроков передачи на экспертизу ПД по ТС.

-Получено согласование пересечений ТС в направлении микрорайона "Гавань" с МУП РГО РежПром.

-Участие в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 08.12.2021 года

-Направлено письмо исх. № 219 от 14.12.2021 года в ООО "Полюс" о проведении совещания 15.12.2021 года в 15.00 по проектированию линейных объектов Концессионного соглашения.

Согласно акту №ТС/4  от 12.07.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за июнь 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчиком осуществлено

-Дополнительный запрос № 65 от 10.06.21 г в Администрацию Режевского городского округа о получении дополнительных данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП.

-Предоставление исходных данных ЕГРН по земельным участкам согласно предоставленной информации из Администрации Режевского городского округа (исх. № 69 от 18.06.2021 г.)

-Выданы замечания по направленному на согласование ТЗ №3 на производство инженерных изысканий по объекту «Строительство тепловых сетей города Реж» (Исх. № 73 от 21.06.2021 г.)

-Согласован (предпочтительный) вариант трассировки тепловых сетей от ГТ ТЭЦ к ЦТП микрорайона «Гавань» (исх. № 71 от 21.06.2021 г.)

Согласно акту №ТС/22 от 31.07.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за июль 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчиком осуществлено

-Запрос № 98 от 13.07.21 г в Администрацию Режевского городского округа о получении дополнительных данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП.

-Корректировка границ инженерных изысканий в соответствии с запросом ООО «Полюс» № И-П10-192 от 08.07.2021 года (Исх. № 96 от 12.07.2021 г. ООО «ЦЭК»)

-Выданы замечания по направленному на согласование ТЗ №3 на производство инженерных изысканий по объекту «Строительство тепловых сетей города Реж» (Исх. № 96 от 12.07.2021 г.)

-Актуализация необходимого списка ИРД в соответствии с исх. № И-П10-218 от 23.07. 2021 г. ООО «Полюс».

Согласно акту №ТС/26 от 31.08.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за август 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до Ц в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчиком осуществлено

-Дополнительный запрос № 158 от 27.08.21г в Администрацию Режевского городского округа о получении необходимых данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения проектирования (выбора трассировки) магистральных тепловых сетей.

-Направлена в ООО «Полюс» карта зонирования Режевского городского округа исх. №130 для выполнения проектирования линейных объектов.

-Направлены в ООО «Полюс» исх.№ 142 от 12.08.2021 года координаты земельных участков в соответствии с картой зонирования .

-Направлены замечания в ООО «Полюс» исх. № 139 от 11.08.2021 года по предоставленным на согласование обследованиям ТП №1-4,6

-Направлены(повторно) замечания в ООО «Полюс» исх. № 147 от 18.08.2021 года по предоставленным на согласование обследованиям ТП №1-4,6

-Направлено в ООО «Полюс» заключение ООО «Геокрафт» в соответствии с договором №142-2021/В от 29.07.2021 года "Об отсутствии кадастровых ошибок" по спорным участкам исх. №145 от 16.08.2021 года.

Согласно акту №ТС/30 от 30.09.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за сентябрь 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчиком

-Направлены в ООО «Полюс» тепловые нагрузки объектов концессии исх. №159/1 от 31.08.2021 года согласно запроса И-П10-286 от 31.08.2021 года.

-Направлено письмо исх. №166 от 17.09.2021 года в Администрацию Режевского городского округа о согласовании выполнения пробных скважин для выполнения инженерно-геодезических изысканий под магистральные ТС.

-Направлено письмо исх. №168 от 20.09.2021 года в Администрацию Режевского городского округа о наложении сервитута на существующие земельные участки попадающие в полосу отвода под магистральные ТС (2 земельных участка).

-Направлено письмо исх. №173 от 22.09.2021 года в ООО «Полюс» об обязательном выполнении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий линейных объектов на основании ответа ФАУ «Главгосэкспертиза» № 01-01-17/12737-СБ от 13.08.2021 года.

-Выполнение прочих работ в рамках исполнения функций Технического заказчика по Договору № 1/ТЗ от 01.03.2021 г.(Приложение 1)

Согласно акту №ТС/35 от 31.10.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за сентябрь 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦП 1 в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил

-Проведено рабочее совещание 01.10.2021 года с ООО «Полюс» и оформлением протокола о текущем состоянии дел по проектированию объектов концессии. Выполнение изысканий. Трассировка ТС.

-Направлено письмо исх. № 184 от 15.10.2021 в ООО "Полюс" о необходимости предоставления отчетов инженерных изысканий в Администрацию ГО г. Реж для получения ГПЗУ под ТС.

-Направлено письмо-запрос исх. № 185 от 15.10.2021 года в Администрацию о рассмотрении возможности прокладки ТС без необходимости наложения сервитутов.

-Проведено рабочее совещание 18.10.2021 года с ООО «Полюс» и оформлением протокола о текущем состоянии дел по проектированию объектов концессии. Выполнение изысканий. Направление на согласование ППО по магистральным сетям от ГТ ТЭЦ до микрорайона «Быстринский».

-Проведено рабочее совещание 27.10.2021 года с ООО «Полюс» и оформлением протокола о текущем состоянии дел по проектированию объектов концессии. Выполнение изысканий. Трассировка ТС. Выполнение согласования с собственниками ЗУ(Гаражей) наложения сервитута охранной зоной тепловых сетей.

Согласно акту №ТС/38 от 30.12.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за ноябрь 2021 г. по объекту "Строительство тепловой сети от ГТ ТЭЦ до ЦП 1 в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчиком

- Получена выписка (по запросу)ЗУ попадающему в створ схемы ТС в направлении "Гавань" от Администрации РГО с кадастровым номером 66:22:1913010:137 от Администрация Режевского городского округа письмом от 01.11.2021 № 5892 от 01.11.2021

-Направлено письмо исх. № 202 от 10.11.2021 года в ООО "Полюс" с просьбой разработать и направить на согласование корректированный график выполнения проектных работ по объектам концессии.

-Направлено письмо исх. № 203 от 11.11.2021 года в ООО "Полюс" с информацией о необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации по объектам концессии.

-Направлено письмо исх. № 205 от 12.11.2021 года в ООО "Полюс" с просьбой предоставить заключение по способу прокладки квартальных тепловых сетей (реконструкция/новое строительство)

-Направлено письмо исх. № 209 от 18.11.2021 года в ООО "Полюс" о предоставлении информации с пояснениями по способу прокладки квартальных сетей по микрорайону "Быстринский"

-Участие в оперативном совещании от 19.11.2021 года с обсуждением следующих вопросов: 1) ООО «Полюс» предоставить заключение о целесообразности прокладки новых квартальных сетей по микрорайону "Быстринский" 2)Обследование существующих квартальных сетей целесообразно провести для определения объемов реконструкции только после принятия решения о целесообразности строительства.

-Получена в проработку ПД вместе с выполненным Заключением экспертизы УрТПП в соответствии с исх. И-П10-375 от 23.11.2021 ответ на 426, 422 и 195

-Оформлен график выполнения проектных работ к Приложению №2 ГП 24.11.21. с целью сокращения отставания по проектным работам для направления его ГП.

-Направлено письмо исх. № 216 от 25.11.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости предоставить ТЭО по прокладке магистральных/квартальных сетей по микрорайону "Быстринский".

Согласно акту №ТСкв/1 от 30.04.2021 ответчиком осуществлено выполнение Выполнение функций технического заказчика за март 2021 г. по объекту "Реконструкция существующих квартальных тепловых сетей и сетей ГВС микрорайонов «Быстринский» г. Реж ЛИБО создание новых квартальных тепловых сетей и сетей ГВС микрорайона «Быстринский» г. Реж., согласно отчету ответчик выполнил рассмотрение предварительной трассировки квартальных тепловых сетей и мест размещения ТП-Быстринский(1,2,3,4)

Согласно акту №ТСкв/2 от 30.04.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за апрель 2021 г. по объекту "Реконструкция существующих квартальных тепловых сетей и сетей ГВС микрорайонов «Быстринский» г. Реж ЛИБО создание новых квартальных тепловых сетей и сетей ГВС микрорайона «Быстринский» г. Реж.", согласно отчету, ответчик осуществил

- Запрос №32 от 19.04.21г. в Администрацию Режевского городского округа о предоставлении правоустанавливающих документов на Объект (кадастровые документы, техпаспорт БТИ) , на получение существующей проектной и исполнительной документации по Объекту.

- МУП РГО "РежПром" № 524/1 от 16.04.21 г " Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов "Гавань" и "Быстринский""

Согласно акту №ТСкв/3 от 31.05.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за май 2021 г. по объекту "Реконструкция существующих квартальных тепловых сетей и сетей ГВС микрорайонов «Быстринский» г. Реж ЛИБО создание новых квартальных тепловых сетей и сетей ГВС микрорайона «Быстринский» г. Реж.", согласно отчету ответчиком осуществлена выдача технических требований от ООО «ЦЭК» к ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.).

Согласно акту №ТЭЦ/1 от 30.04.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за март 2021г. по объекту" Строительство ГТ ТЭЦ", согласно отчету ответчиком подготовлены

-Справка для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту строительства от "Уральского управления по гидрометеорглогии и мониторингу окружающей среды"(№ОМ-11-260/317 от 19.03.2021)

-Договор №1 Д-21-03-22 от 26.03.2021 г. на проведение археологического обследования на предмет наличия объектов культурного наследия объектов культурного наследия с ООО "НПП Археобюро"

-Организация и участие в совещаниях по проектированию ГТ ТЭЦ.

-Направлен комплект документов исх.№239 от 20.04.21 года в ПАО «Газпром» по запросу 03/08/2-3422 от 09.04.21 года для получения ТУ на газ 1,2 МПа

-Подписан Акт № 195 о привязке точек пересечения на местности от 26.03.21 года с определением предварительной точки подключения газопровода и сформирована предварительная схема прокладки газопровода с давлением 1,2 МПа с БПГ от магистральных сетей.

Согласно акту №ТЭЦ/2 от 30.04.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за апрель 2021 г. по объекту " Строительство ГТ ТЭЦ", согласно отчету ответчиком осуществлено:

-"Согласие на технические требования и условия №1" от 23.04.21, от Администрации режевского городского округа, на автомобильную дорогу общего пользования местного назначения IV категории ул. Заводская, инд. номер 66-486 ОП МГ 66Н028.

-Согласование ООО "РегионТранснефть № РТН-185 от 28.04.21 о резервировании, хранении и поставки дизельного топлива для нужд ГТ ТЭЦ.

-Справка заключение 03г-21 о величине расчетной силы сейсмического воздействия на планируемый к строительству объект "Газотурбинная станция " по адресу 

<

...> кад. номер 66:22:1913008:775 от Института Геофизики им. Ю. М. Булашевича Уральского отделения Росийской академии наук (ИГФ УрО РАН) №16361-67 от 08.02.2021 г.

-Технические условия для подключения к городским водопроводным сетям (письмо № 231 от 14.04.2021 года) МУП "Реж-Водоканал" для проектируемого объекта с кадастровым номером 66:22:1913008:775 Режевского городского округа.

-МУП РГО "РежПром" № 524/1 от 16.04.21г " Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов "Гавань" и "Быстринский".

Согласно акту №ТЭЦ/3 от 31.05.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за май 2021г. по объекту " Строительство ГТ ТЭЦ", согласно отчету ответчик осуществил

-Выдача замечаний по OTP, дополнительная проработка поставки аналога газовой турбины российскими производителями, в том числе «РЭП Холдинг» «Невский завод» исх.54 от 24.05.2021 года.

-Выдача технических требований ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.)

Согласно акту №ТЭЦ/4 от 12.07.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за июнь 2021 г. по объекту " Строительство ГТ ТЭЦ", согласно отчету ответчиком

-Выданы замечанию по вендор-листу основного технологического оборудования (исх. № 77 от 23.06.2021 г.)

-Согласована предварительная схема сетей водоснабжения и водоотведения от ГТ ТЭЦ (исх. № 74 от 21.06.2021 г.)

-Согласована принципиальная тепловая схема РЕЖ-ОТР-ТМ-ГЧ, л.1. (исх. №76 от 22.06.2021 г.)

-Запрос данных в ООО «Полюс» для получения разрешения на пользование водным объектам (исх.75 от 22.06.2021 г.)

-Согласована схема изысканий для выполнения проекта по временному электроснабжению

Согласно акту №ТЭЦ/5 от 31.07.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за июль 2021 г. по объекту " Строительство ГТ ТЭЦ", согласно отчету, ответчиком

-Выданы замечания Исх. №110 от 20.07.21 года к направленным ООО «Полюс» на согласование OTP.

-Актуализация необходимого списка ИРД в соответствии с исх. № И-П10-218 от 23.07. 2021 г. ООО «Полюс».

-Направлен в ООО «Полюс» Акт приема-передачи строительной площадки под строительство ГТ ТЭЦ (исх.№345 от 20.07.2021 года) в соответствии с договором Генерального подряда №9 от 16.07.2021 года.

-Направлен в ООО «Полюс» Акт разбивки геодезической основы исх. №118 от 28.07.2021 года (дополнение к письму № 345 от 20.07.21 года о передаче строительной площадки для строительства ГТ ТЭЦ

-Запрос в ООО «Полюс» о предоставлении дополнительной информации по сервисному обслуживанию газотурбинной установки типа Титан 250(срок, стоимость) и стоимости этапов работ проектирование, СМР, ПНР ГТ ТЭЦ и др. информации (исх. № 117 от 27.07.2021 года.)

-Рабочая командировка на АО «ОДК Авиадвигатель» и действующие энергоустановки с целью рассмотрения применения отечественных аналогов ГТУ в проекте.

-Исх. 38-01-23/2642 от 03.08.2021 года от Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о размещении земельного участка под строительство ГТ ТЭЦ вне охранной и защитной зоны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и согласие с заключением ГИКЭ.

Согласно акту №ТЭЦ/6 от 31.08.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за август 2021 г. по объекту " Строительство ГТ ТЭЦ", согласно отчету ответчиком

-Направлен запрос в ООО «Полюс» исх. № 129 от 03.08.2021 года о расшифровке стоимости в укрупненном сметном расчете.

-Направлен запрос в ООО «Полюс» исх. № 133 от 06.08.2021 года о предоставлении дополнительной информации по ГТУ для объективности сравнения газотурбинных установок.

-Вынос границ осей земельного участка площадки строительства ГТ ТЭЦ ООО «Геокрафт» 18 августа 2021 года.

-Направление письма исх. Исх. № 377 от 17.08.2021 г. о передаче земельного участка площадки строительства ГТ ТЭЦ в ООО «Полюс» по Акту разбивки геодезической основы.

-Направлены в ООО «Полюс» исх. №154 от 24.08.2021 года, результаты археологических изысканий, выполненные на территории площадки строительства ГТ ТЭЦ.

-Получено заключение от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области исх. 38-01-23/2642 от 03.08.2021 года о размещении земельного участка вне охранной и защитной зоны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно акту №ЦТП/1 от 30.04.2021 ответчиком осуществлено выполнение функций технического заказчика за март 2021г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> согласно отчету ответчик осуществил определение места размещения нового ЦТП в микрорайоне «Гавань», согласовано с администрацией Режевского городского округа.

Согласно акту №ЦТП/2 от 30.04.2021 ответчиком осуществлено Выполнение функций технического заказчика за апрель 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил МУП РГО "РежПром" № 524/1 от 16.04.21 г " Технические требования на подключение ГТ ТЭЦ к тепловым сетям микрорайонов "Гавань" и "Быстринский"" до ЦТП.

Согласно акту №ЦТП/3 от 31.05.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за май 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил

- Запрос № 55 от 24.05.21 г в Администрацию Режевского городского округа округа о получении выписки из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения предварительной трассировки магистральных тепловых сетей, посадки тепловых пунктов и ЦТП.

-Выдача технических требований ООО «Полюс» минимальной нагрузки ГВС микрорайонов «Быстринский» и «Гавань» составляет 3,5 Гкал/час (исх. 50 от 20.05.2021 г.)

Согласно акту №ЦТП/4 от 12.07.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за июнь 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил:

-Дополнительный запрос № 65 от 10.06.21 г в Администрацию Режевского городского округа о получении дополнительных данных по выпискам из ЕГРН с основными характеристиками, координатами для выполнения трассировки магистральных тепловых сетей, посадки новых тепловых пунктов и ЦТП.

-Предоставление исходных данных ЕГРН по земельным участкам согласно предоставленной информации из Администрации Режевского городского округа (исх. № 69 от 18.06.2021 г.)

-Согласовано место размещение нового ЦТП микрорайона «Гавань» (исх. № 70 от 21.06.2021 г.)

-Направлены замечания к ТЗ проектирование ЦТП-Гавань ООО «Полюс» для последующей корректировки и согласования.(исх. №79 от 28.06.2021 г.)

Согласно акту №ЦТП/5 от 31.07.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за июль 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил:

-Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство тепловой сети города Реж. Проектирование и строительство ЦТП в микрорайоне «Гавань» г. Реж(исх. №91 от 09.07.21 года

-Актуализация необходимого списка ИРД в соответствии с исх. № И-П10-218 от 23.07. 2021 г. ООО «Полюс».

Согласно акту №ЦТП/6 от 31.08.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за август 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>, согласно отчету ответчиком осуществлены:

-Направлена в ГАЗЭКС на согласование схема размещения ЦТП исх. №09/08/21 от 09.08.21 года.

-Согласование ЗУ для размещения ЦТП в МУП «Водоканал» г. Реж для выдачи ГПЗУ

-Направлен запрос  исх.  №124  от  02.08.2021   года в  Администрацию  на формирование земельного участка под размещение ЦТП    с последующим получением ГПЗУ

-Направлен запрос исх. № 126 от 02.08.2021 года в ООО "Полюс" на получение объемов по энергоресурсам и согласовании схемы размещения земельного участка под ЦТП.

-Направлено письмо в ООО «Полюс» исх. 138 от 10.08.2021 года с откорректированными техническими требованиями от МУП РГО "РежПРом" и скорректированным ТЗ по ЦТП микрорайона "Гавань"

-Направлен запрос исх. №143 от 16.08.2021 года в МУП "Водоканал" на получение ТУ по водопотреблению и водоотведению ЦТП.

-Направлен запрос исх. №144 от 16.08.2021 года в ООО "РЭС" на получение ТУ по электроснабжению ЦТП.

-Направлены в ООО "Полюс" исх.№ 152 от 23.08.2021 года технические условия от МУП "Реж-Водоканал" на водопотребление и водоотведение ЦТП «Гавань»

-Получен отказ от ГАЗЭКС исх. № Г/1846 от 25.08.2021 года в согласовании места размещения ЗУ под строительство ЦТП "Гавань.

-Выполнен повторный запрос в Администрацию ГО г. Реж от ЕТК г. Реж исх. № ? 383 от 23.08.2021 г..о формировании ЗУ под ЦТП.

-Выполнен повторный запрос в Администрацию ГО г. Реж исх. № 159 от 27.08.2021 г. о формировании ЗУ под ЦТП с учетом корректировки земельного участка.

Согласно акту №ЦТП/7 от 30.09.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за сентябрь 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил:

-Направлено письмо исх. №173 от 22.09.2021 года в ООО «Полюс» об обязательном выполнении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ЦТП на основании ответа ФАУ «Главгосэкспертиза» № 01-01-17/12737-СБ от 13.08.2021 года.

-Получено постановление Администрации ГО г. Реж №1477 от 06.09.2021 года об утверждении схемы расположения ЗУ на кадастровом плане территории под ЦТП по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> земельный участок №4/1

-Направлено письмо исх. № 164 от 17.09.2021 года в Администрацию ГО г. Реж о необходимости формирования земельного участка под ЦТП и получения разрешения на выполнение инженерно-геологических изысканий под ЦТП.

-Направлено письмо исх. №166 от 17.09.2021 года в Администрацию ГО г. Реж о согласовании выполнения инженерно-геологических изысканий под ЦТП Администрацией ГО г. Реж.

-Направлены замечания в ООО «Полюс» исх. №169 от 20.09.2021 года с к выданным тепломеханическим решениям (ответ на И-П10-236).

-Получено согласование исх. №5101 от 27.09.2021 года от Администрации ГО г. Реж "О согласовании бурения пробных скважин" для выполнения инженерно-геологических изысканий под ЦТП.

-Выполнение прочих работ в рамках исполнения функций Технического заказчика по Договору № 1/ТЗ от 01.03.2021 г.(Приложение 1)

Согласно акту №ЦТП/8 от 31.10.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за октябрь 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил:

-Получен ответ на обращение №5563 от 15.10.2021 года от Администрации о предоставлении ГПЗУ только после предоставления в отдел архитектуры и градостроительства результатов инженерных изысканий под ЦТП.

-Выполнено согласование ФИО6 на постановлении о разрешенном использовании земельного участка под ЦТП для выполнения работ по инженерным изысканиям.

-Выполнено согласование ФИО7 ГКУ СО "Режевское лесничество" на постановлении о разрешенном использовании земельного участка под ЦТП для выполнения работ по инженерным изысканиям.

-Направлено письмо исх. №177 от 01.10.2021 года в Администрацию ГО г. Реж с просьбой ускорить процесс формирования земельного участка под ЦТП. (отсутствуем межевой план).

-Направлено письмо исх. № 189 от 15.10.2021 года в Администрацию ГО г. Реж о рассмотрении возможности ускорения процесса получения ГПЗУ под ЦТП.

-Направлено письмо исх. № 184 от 15.10.2021 в ООО "Полюс" о необходимости предоставления отчетов инженерных изысканий в Администрацию ГО г. Реж для получения ГПЗУ под ЦТП.( В соответствии с письмом №5563 от 15.10.2021 года от Администрации о предоставлении ГПЗУ только после предоставления в отдел архитектуры и градостроительства результатов инженерных изысканий под ЦТП).

-Направлено письмо исх. № 187 от 15.10.2021 в Администрацию ГО г. Реж и МУП "Реж-Водоканал" о корректировке ТУ на водоотведение ГТ ТЭЦ.

-Направлено письмо исх. № 190 от 15.10.2021 в ООО "Полюс" с приложениями: Постановление №1477 от 06.09.2021 года «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> земельный участок №4/1».

-Постановление №1632 от 28.09.2021 года «О разрешении использования земельного участка с месторасположением: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...> земельный участок №4/1, доля размещения объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута»

-Направлено письмо исх. № 193 от 20.10.2021 в ООО "Полюс" о направлении ТУ на присоединение к электрическим сетям ЦТП.

Согласно акту №ЦТП/9 от 30.12.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за ноябрь 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчик осуществил:

-Получены 01.11.2021г. уточненные ТУ на водоотведение от МУП "Реж-Водоканал" с учетом исключения пункта на прием сточных вод от ЦТП

-Направлено письмо исх. № 199 от 01.11.2021 года в ООО "Полюс" с корректированными ТУ на водоотведение ЦТП (исключен пункт с принятием ливневых стоков отдельно).

-Направлено письмо исх. № 201 от 02.11.2021 года в ООО "Полюс" с корректированными ТЗ на проектирование ЦТП (опечатка в месяце даты заключения договора Генерального подряда).

-Получена корректировка ТУ на ЦТП от МУП "Реж-Водоканал" по водоотведению - корректировка от 02.11.21

-Получена 03.11.2021 года от ООО "Полюс" дефектная ведомость на необходимые работы для восстановления работоспособности здания, проведена проверка и направлена в ООО "Полюс" для корректировки.

-Направлено письмо исх. № 202 от 10.11.2021 года в ООО "Полюс" с просьбой разработать и направить на согласование корректированный график выполнения проектных работ по объектам концессии.

-Участие в оперативном совещании от 11.11.2021 года с обсуждением следующих вопросов: 1) выданы ООО "Полюс" замечания и предложения к эскизу фасада ЦТП; 2) ООО "Полюс" направить на согласование в ООО "ЦЭК" тепломеханические решения 3) ускорить предоставление со стороны Администрации ГПЗУ под ЦТП "Гавань"

-Направлено письмо исх. № 203 от 11.11.2021 года в ООО "Полюс" с информацией о необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации по объектам концессии.

-Направлены на предварительное согласование проектные решения по фасаду здания ЦТП в Администрацию РГО, в отдел архитектуры

-Направлено письмо исх. № 208 от 15.11.2021 года в ООО "Полюс" с замечаниями по направленному на согласованию цветовых и технических решений по ЦТП "Гавань"

-Получена заявка от ООО «Полюс» на запрос ТУ на Internet для ЦТП.

-Направлено письмо исх. № 211 от 19.11.2021 года в ООО "Полюс" с замечаниями к результатам предоставленных обследований ТП4

-Получена в проработку ПД вместе с выполненным Заключением экспертизы УрТПП в соответствии с исх. И-П10-375 от 23.11.2021 ответ на 426, 422 и 195

-Оформлен график выполнения проектных работ к Приложению №2 ГП 24.11.21.  с  целью  сокращения  отставания  по  проектным  работам  для направления его ГП.

- Направлено письмо исх. № 215 от 25.11.2021 года в ООО "Полюс" с замечаниями к результатам повторно предоставленных обследований ТП

- Участие в оперативном совещании от 29.11.2021 года с обсуждением следующих вопросов: 1) ООО «ЦЭК» ускорить предоставление со стороны Администрации ГПЗУ под ЦТП "Гавань"

Согласно акту №ЦТП/10 от 30.12.2021 ответчик осуществил выполнение функций технического заказчика за декабрь 2021 г. по объекту "Строительство ЦТП в районе котельной №1, расположенной по адресу: Свердловская область, Режевской городской округ, 

<

...>", согласно отчету ответчиком осуществлено

-Выполнение межевого плана кадастровым инженером ФИО8 под ЦТП с целью получения ГПЗУ.

-Участие 08.12.2021 года в оперативном совещании по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа" от 08.12.2021 года

-Направлено письмо исх. №220 от 14.12.2021 года в ООО "Полюс" о необходимости корректировки технических отчетов по инженерным изысканиям ЦТП "Гавань" для возможного направления на государственную экспертизу выполненных изысканий.

-Участие 16.12.2021 года в оперативном совещании в Администрации г. Реж по вопросам "О реализации КС от 07.04.2020 года в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Режевского городского округа". Вопросы уточнения границ ЗУ для выдачи ГПЗУ под ЦТП.

-Проведено рабочее совещание 17.12.2021 года в ООО "Полюс" с обсуждением и решением текущих вопросов по проектированию объектов теплоснабжения с оформлением протокола совещания

-Направлен повторный запрос исх. № 223 от 17.12.2021 года на выдачу ТУ Internet по узлам учета, ТП, ЦТП в АО «Транстелеком».

-Получено согласование размещения ЦТП с Водоканалом в соответствии с письмом №6845 от 15.12.2021 года.

-Получено согласование размещения ЦТП с МУП РГО Режпром в соответствии с письмом №6845 от 15.12.2021 года.

-Направлен на согласование исх. №227 от 22.12.2021 года в ООО "Полюс" Протокол оперативного совещания от 17.12.2021 года по вопросам корректировки ТУ на электроснабжение ЦТП, предоставления окончательных границ ЗУ под ЦТП с учетом откосов, предоставления технологических решений по ЦТЩразрезы, планы).

-Получено согласование размещения ЦТП с Газэкс соответствии с письмом №6845 от 15.12.2021 года.

-Получена выписка по ЗУ на ЦТП. Направлена в Архитектуру для получения ГПЗУ.

-Направлено исх. №229 от 27.12.2021 года в ООО «Полюс» о срыве сроков передачи на экспертизу ПД по ЦТП.

Кроме того, по договору №2 от 05.08.2020 в материалы дела представлены акты выполненных работ и отчеты об оказанных услугах от 28.02.21, от 29.01.2021, от 30.04.2021, от 30.09.2020, от 30.10.2020, от 30.11.2020, от 31.03.2021, от 31.05.2021, от 31.08.2020, от 31.12.2020, также с указанием перечня документов и действий ответчика, выполненных ответчиком при исполнении договора.

Факт оказания услуг, указанных в актах, истцом не оспаривается, на что неоднократно указывалось им судебных заседаниях и в возражениях на отзыв, согласно которым, истец возражает относительно применения положений ст. 725 ГК РФ относительно довода ответчика о пропуске срока исковой давности, ссылаясь на то, что он не оспаривает факт оказания услуг согласно упомянутым актам.

Также факт надлежащего исполнения ответчиком обязанностей по договорам подтверждает третье лицо – ФИО2, являвшийся директором истца в период с  09.02.2021 по 10.06.2022  в отзыве на исковое заявление.

Кроме того, ответчиком в ходе судебного разбирательства в материалы дела были представлены копии истребуемых документов, имеющихся в распоряжении ответчика, при том, что такой обязанности у ответчика не имелось, ответчик настаивает на том, что все указанные в отчетах к актам по договорам были переданы заказчику (истцу).

Принимая во внимание отсутствие оспаривания истцом факта оказания услуг по договорам, в отсутствие доказательств обратного, суд, принимая во внимание, что акты оказанных услуг сторонами подписаны, в актах указано на передачу документации, следовательно, все документы были переданы ответчиком истцу в рамках исполнения обязательств по договорам №1/ТЗ от 01.03.2021, №2 от 05.08.2020.

При этом, то обстоятельство, что у организации истца сменился директор, не является основанием для возникновения на стороне ответчика обязанности по повторной передаче документации в рамках исполнения обязательств по договорам №1/ТЗ от 01.03.2021, №2 от 05.08.2020. Более того, из перечисленных в письме и иске запрошенных документов очевидно, что данные документы имеют реквизиты и адресованы в конкретные организации и муниципальные органы (с указанием их наименования). Действующий исполнительный орган ООО «ЕТК г. Реж» уполномочен удостовериться в наличии указанных документов у соответствующих адресатов/контрагентов.

Поскольку факт оказания ответчиком услуг по договорам истцом не оспаривается, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности со ссылкой на ст. 725 ГК РФ, судом отклоняются, поскольку качество оказанных услуг не является предметом спора.

Согласно ч. 1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При отказе в удовлетворении иска расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

 

Судья                                                                                   А.С. Дёмина