АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 14, город Владимир, 600025

тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

город Владимир                                                          

«16» апреля 2019 года                                                  Дело № А11- 174/2018

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2019 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 16 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой - Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: ул. Чайковского, д. 38Б, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ВладСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: ул. Северная, д. 63Б, оф. 7, 

<

...>) 

о взыскании 1 366 427 рублей 23 копеек,

при участии:

от истца – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет;

от ответчика – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет,

установил следующее.

Акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВладСтрой» (далее -  ответчик) о взыскании неустойки, начисленной по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.09.2015 № 16/683/ВЛ в сумме 1 366 427 рублей 23 копеек, за период с 23.09.2016 по 22.09.2017.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, явку представителя в судебные заседания не обеспечил, отзыв на иск не представил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Спор рассматривается в отсутствие представителей истца и ответчика на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец представил заявление о смене наименования с АО «Владимирская областная электросетевая компания» на АО «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области». 

Суд в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает заявленное истцом заявление о смене наименования.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 02.04.2019 по делу № А11-174/2019 объявлен перерыв до 09.04.2019 до 10 мин. 00 коп.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»  (сетевая организация) и ООО «ВладСтрой» (заказчик) заключен договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям от 22.09.2015 № 16/683/ВЛ (далее – договор), в согласно которому в соответствии с которым услуги по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения указанных группы жилых домов (на земельном участке  с кадастровым номером 33:22:014075:35 по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Преображенская), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик, согласованных в пункте 1 договора.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении (пункт 4 договора). 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора). 

В соответствии с разделом 8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

-после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; 

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией и подписать акт осмотра (обследования) объектов заявителя; 

-после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 11.12.2014 № 57/2 и составляет 3 295 414  руб. 72 коп., в том числе НДС 18% в сумме 502 690 руб. 38 коп.

Согласно пункта 18 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки

Истец во исполнение условий договора от 22.09.2015 № 16/683/ВЛ ООО «ВОЭК» оказало ответчику услуги по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения указанных группы жилых домов (на земельном участке с кадастровым номером 33:22:014075:35 по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Преображенская), что подтверждается заключенными 08.08.2016 с ООО строительной компанией «Д-Строй» договорами подряда от № 85/17/16ТП, № 84/17/16ТП и актами о приемке выполненных работ от 09.09.2016, подписанных сторонами об исполнении указанных договоров подряда.

Сетевая организация, направила в адрес заявителя уведомление от 28.09.2016 № 113-07-3693 о выполнении мероприятий по техническим условиям со стороны сетевой организации с предложением в установленный срок выполнить свои обязательства по договору, которое было получено ответчиком 09.11.2016 (почтовое уведомление приложено к исковому заявлению).

В связи с неисполнением ответчиком обязательств, предусмотренных в пункте 8 по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.09.2015 АО «ВОЭК» направило 11.07.2018 № 113-62-2685 в адрес ООО «ВладСтрой» претензию, в которой указал о необходимости исполнения обязательств по договору и уплате неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 18 договора. 

Претензия ответчиком оставлена без ответа и удовлетворения. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по спорному договору послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению. 

Арбитражный суд, всесторонне проанализировав и оценив в совокупности все представленные документы, считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

На основании статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт оказания услуг подтверждены материалами дела (договорами подряда от 08.08.2016 № 85/17/16ТП, № 84/17/16ТП, актами о приемке выполненных работ 09.09.2016, ответчиком не оспорены. 

Нормы, регламентирующие порядок заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила присоединения № 861). 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). 

По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил присоединения № 861). 

В силу пунктов 3, 6, 16, 18 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в отношении 8 любого обратившегося к ней лица в соответствии с заключенным договором. 

В соответствии с пунктом 90 Правил № 861 срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний. 

Вышеуказанные нормы действующего законодательства нашли отражение в договоре технологического присоединения от 22.09.2015 № 16/683/ВЛ, а именно в разделе 8 договора, где указано, что заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (пункт 8.1). 

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (пункт 8.3)

Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией и подписать акт осмотра (обследования) объектов заявителя (пункт 8.4). 

Как установлено судом, ответчиком не исполнены принятые по договору обязательства - не выполнены возложенные на него мероприятия в соответствии с техническими условиями. 

Сетевая организация, руководствуясь принципом добросовестности и осмотрительности со своей стороны, направила в адрес заявителя уведомление от 28.09.2016 № 113-07-3693 о выполнении мероприятий по техническим условиям со стороны сетевой организации с предложением в установленный срок выполнить свои обязательства по договору, которое было получено ответчиком 09.11.2016 (почтовое уведомление приложено к исковому заявлению).

Арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о нарушении ответчиком существенных условий договора технологического присоединения, а именно сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей ответчиком  по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.09.2015 № 16/683/ВЛ истец предъявил требование о взыскании неустойки, в сумме 1 366 427 рублей 23 копеек, начисленной за период с 23.09.2016 по 22.09.2017.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой  гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с  подпунктом в пункта 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 и пунктом 17 договора в случае нарушения одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению она обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Согласно пункта 18 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Материалы дела свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору. 

Ответчик доказательств обратного в материалы дела не представил.

Расчет неустойки судом проверен, соответствует действующему законодательству, согласуется с условиями договора, ответчиком не оспорен, не опровергнут, контррасчет не представлен. Доказательства оплаты неустойки в добровольном порядке ответчиком суду также не представлены. 

Оснований для снижения размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не находит, поскольку ответчик соответствующего ходатайства не заявил, доказательств явной несоразмерности суммы процентов последствиям нарушения обязательства не представил. 

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, 4 допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Таким образом, арбитражный суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат к взысканию в пользу истца 

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВладСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку, начисленную по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.09.2015 № 16/683/ВЛ в сумме 1 366 427 рублей 23 копеек, за период с 23.09.2016 по 22.09.2017, и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 26 664  рублей 00 копеек.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

    Судья                                                                      Ю.В. Бондарева-Битяй