224_3053556 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-2482/2019

30 июля 2020 года

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края  

в составе судьи Кудиновой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой  Е.А.,  

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Вектор-Строй» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об устранении недостатков, взыскании расходов по проведению технической  экспертизы в размере 115 000 руб.  

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Империя» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение трех месяцев со дня  вступления решения в законную силу устранить недостатки (дефекты) в  рамках гарантийных обязательств по договору подряда № 09/В-51-ОТ от  09.11.2015, а именно:  

- выполнить присоединение фитингов и запасно-регулирующей  арматуры с уплотнительной мастикой в соответствие с требованиями  СП73.13330.2012, с 1-го по 25-ый этажи включительно, в подвальных и  чердачных технических помещениях. Устранить течи;  

- выполнить установку воздухоотводчиков врезкой патрубков в верхние  образующие трубопроводов и воздухосборников;  

- выполнить крепление трубопроводов к опорам хомутами, установить  соответствующие скользящие опоры в подвальных и чердачных технических  помещениях;  

- заменить муфтовые фитинги на приварные отводы в узлах  присоединения стояков отопления к подающим и обратным трубопроводам;  

- выполнить работы по устранению контруклонов (отклонение от  горизонтали более определенных требованиям СП73.13330.2012)  трубопроводов подключения и радиаторов во всех квартирах с 1 по 25 этаж;  

- выполнить работы по ремонту сварных швов не соответствующих  СП73.13330.2012, ГОСТ16037-80, в местах общего пользования,  тех.помещениях, в подвале, на чердаке;  

- выполнить замену запорно-регулирующую арматуры со следами  коррозий;  

- выполнить работы по маркировке трубопроводов ввода в ИТП  (тех.этаж, подвал).  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью  «Вектор-Строй» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 115 000 руб.  расходов по проведению технической экспертизы, 32 563 руб. судебных  расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

 Судья О.В. Кудинова