АРБИТРАЖНЫЙ СУД  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                Дело № А32-18221/2017

 

Резолютивная часть решения объявлена 18.10.2017 г.

Решение изготовлено в полном объеме 23.10.2017 г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края

в составе судьи  Гречко О.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амбелиди В.А., рассмотрев дело по исковому заявлению

  ООО "Стройэнергосистемы" (Общество с ограниченной ответственностью "Стройэнергосистемы", Адрес (место нахождения) юр.лица 350055 край Краснодарский 

<

...>. А, ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к ООО "АСК-Монолит" (Общество с ограниченной ответственностью "АСК-Монолит", Адрес (место нахождения) юр.лица 350062 край Краснодарский 

<

...>, ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 7 074 561, 76 руб. и неустойки в размере 1 364 777, 22 руб. (общая сумма 8 439 338, 98 руб.)

и по встречному исковому заявлению

ООО "АСК-Монолит"

к ООО "Стройэнергосистемы"

о взыскании неустойки в размере 20 879 162, 37 руб.

            при участии:

            истец: директор ФИО1

            ответчик: директор ФИО2 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Стройэнергосистемы" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "АСК-Монолит" с требованиями о взыскании задолженности в размере 7 074 561, 76 руб. и неустойки в размере 1 364 777, 22 руб. (общая сумма 8 439 338, 98 руб.)

Исковые требования мотивированы  неисполнением обязательства ответчиком по своевременной оплате выполненных истцом работ.

Ответчик по первоначальному иску возражений по существу заявленных требований не представил.

 

ООО "АСК-Монолит" обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением к ООО "Стройэнергосистемы" с требованиями о взыскании неустойки в размере 20 879 162, 37 руб. за просрочку выполнения работ.

Ответчик по встречному иску заявленные требования не признает? считает, что нарушение сроков выполнения  работ обусловлено несвоевременной передачей строительной площадки, несвоевременным выполнением истцом по встречному иску тех работ, которые предшествовали работам, выполнявшимся ответчиком по встречному иску.

В соответствии с частью 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав непосредственно доказательства по делу, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд установил следующее.

          05.01.2015 года между ООО «АСК-Монолит» (далее Заказчик), и                                           ООО «Стройэнергосистемы», (далее Подрядчик), заключен Договор подряда № 1 по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы противопожарной защиты, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизация систем противопожарной защиты с проведением испытания, пусконаладочных работ и ввода системы         в         эксплуатацию,         согласование         (при         необходимости)         с

надзорными/контролирующими органами и/или заинтересованными организациями на объекте Заказчика: «Строительство 2-х секционного 13-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом районе Солнечный, в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить условленную настоящим договором цену.

             Общая стоимость работ, согласно п.п. 2.1 Договора № 1, составляет 1 497 940, 27 рублей.

              В соответствии с п.п. З.1.1., 3.1.2. Договора № 1 оплата выполненных работ за текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

              ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном

объеме,   объект   сдан   в   эксплуатацию,   что   подтверждается   справками   о   стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 31.08.2016. № 1, от 31.10.2016. № 2., подписанными заказчиком без замечаний, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.

             ООО «АСК-Монолит», в нарушение взятых на себя обязательств, произвело оплату выполненных работ 30.03.2017 года на сумму 500 000 рублей.

           Задолженность ООО «АСК-Монолит» за выполненные работы по Договору №1 от 05.01.2015 года составляет 997 940,27  рублей.

            Кроме того, на основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных, выполненных работ за каждый календарный день просрочки.

           За период с 16.11.2016 года по 15.05.017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 248 127,18 рублей согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

 

            05.01.2015 между ООО «АСК-Монолит» и ООО «Стройэнергосистемы» заключен Договор подряда №2 по монтажу системы вентиляции объекта, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по монтажу системы вентиляции, провести испытания, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию системы вентиляции, согласовать (при необходимости) с надзорными/контролирующими органами и/или заинтересованными организациями на объекте Заказчика: «Строительство 2-х секционного 13-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом районе Солнечный, в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

           Общая стоимость работ, согласно п.п. 2.1 Договора № 2  составляет 5 805 242,68 рубля.

           В соответствии с п.п. З.1.1., 3.1.2. Договора № 2 оплата выполненных работ за текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

          ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном

объеме,   объект   сдан   в   эксплуатацию,   что   подтверждается   справками   о   стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 30.09.2016. № 6, от 30.09.2016. № 1, от 31.10.2015. № 2, от 30.11.2015. № 3, от 31.12.2015. № 4, от 31.08.2016. № 5, подписанными сторонами, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.

         Задолженность ООО «АСК-Монолит» за выполненные работы согласно Договору   № 2 от 05.01.2015 года составляет 218 284,11 рубля, по представленным истцом и не оспоренным ответчиком сведениям. 

          Кроме того, на основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных выполненных работ за каждый календарный день просрочки.

           За период с 14.10.2016 года  по 15.05.2017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 40164,27  рубля согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

 

           05.01.2015 года между ООО «АСК-Монолит» и 000 «Стройэнергосистемы» заключен Договор подряда № 3 по внутреннему электроснабжению объекта, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс электромонтажных работ по внутреннему электроснабжению объекта, проведение пусконаладочных работ, проведение испытаний и ввод электроустановки в эксплуатацию, согласование (при необходимости) с надзорными/контролирующими органами и/или заинтересованными организациями на объекте Заказчика: «Строительство 2-х секционного 13-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом районе Солнечный, в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

            Общая стоимость работ, согласно п.п. 2.1 Договора № 3, составляет 12 045 000,08  рублей 08 коп.

           В соответствии с п.п. З.1.1., 3.1.2. Договора № 3 оплата выполненных работ за текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

           ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 30.06.2015. № 5, от 31.07.2015. № 6, от 30.09.2015. № 7, от 31.10.2015. № 8, от 31.12.2015. № 9, от 19.02.2015. № 1, от 25.03.2015. № 2, от 30.04.2015. № 3, от 31.05.2015. № 4, от 31.08.2016. № 15, от 30.09.2016. № 16, от 31.10.2016. № 17, от 31.01.2016. № 10, от 31.03.2016. № 11, от 30.04.2016. № 12, от 31.05.2016. № 13, от 31.07.2016. № 14, подписанными заказчиком без замечаний, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.

           Задолженность ООО «АСК-Монолит» за выполненные работы согласно Договору № 3 от 05.01.2015 года составляет 2 752 732,38 рубля.

           На основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных, выполненных работ за каждый календарный день просрочки.

          За период с 15.11.2016 года  по 15.05.2017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 520 644,55  рубля согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

 

           05.01.2015 года между ООО «АСК-Монолит» и ООО «Стройэнергосистемы» заключен Договор подряда № 4 по строительству внутренних сетей водопровода, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по строительству внутренних сетей водопровода, ввод сети водопровода в эксплуатацию, согласование (при необходимости) с надзорными/контролирующими органами и/или заинтересованными организациями на объекте  Заказчика:   «Строительство  2-х  секционного   13-ти  этажного  многоквартирногожилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом районе Солнечный, в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

         Общая стоимость работ, согласно п.п. 2.1 Договора № 4 составляет 2 396 590,02 рублей.

          В соответствии с п.п. З.1.1., 3.1.2. Договора № 4 оплата выполненных работ за текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

          ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 31.08.16. № 6,

от 30.09.16. № 7, от  31.05.15. № 3, от  30.06.15. № 4, от 31.01.16. № 5, от 26.01.15. № 1, от 25.03.15. № 2, подписанными заказчиком без замечаний, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.            

           Задолженность ООО «АСК-Монолит» за выполненные работы согласно Договору № 4 от 05.01.2015 года составляет 912 933,75 рубля.

           Кроме того, на основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных, выполненных работ за каждый календарный день просрочки.

           За период с 14.10.2016 года по 15.05.2017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 167979,81 рублей согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

            05.01.2015   года   между   ООО   «АСК-Монолит»   и                                                              ООО  «Стройэнергосистемы» заключен  Договор   подряда....№   5   по   строительству   внутренних   сетей   канализации,   в соответствии с которым-Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по строительству внутренних сетей канализации, с проведением пусконаладочных   работ,   испытаний,   ввод   сетей   в   эксплуатацию,   согласование   (при необходимости)   с   надзорными/контролирующими   органами   и/или   заинтересованными

организациями  на  объекте  Заказчика:   «Строительство  2-х  секционного   13-ти  этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом   районе   Солнечный,   в   соответствии   с   заданием   Заказчика,   проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором,  а Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

             Общая стоимость работ,  согласно  п.п.  2.1  Договора № 5  составляет 853 554,99 рубля.

            В соответствии с п.п.  З.1.1., 3.1.2. Договора № 5  оплата выполненных работ за

текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

           ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 30.09.2016. № 4,

от 26.01.2016. № 1, от 30.09.2015. № 2, от 30.11.2015. № 3, подписанными заказчиком без замечаний, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.

           Задолженность ООО «АСК-Монолит» за выполненные работы согласно Договору № 5 от 05.01.2015 года составляет 254 108,51 рубля.

           Кроме того, на основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных, выполненных работ за каждый календарный день просрочки,

          За период с 15.10.2016 года  по 15.05.2017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 46501,86 рублей согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

 

           05.01.2015 года между ООО «АСК-Монолит» и ООО «Стройэнергосистемы» заключен Договор подряда № 6 по монтажу отопления объекта, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по монтажу системы отопления, с проведением пусконаладочных работ, испытаний, ввода системы         в         эксплуатацию,         согласование         (при         необходимости)         с надзорными/контролирующими органами и/или заинтересованными организациями на объекте Заказчика: «Строительство 2-х секционного 13-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом районе Солнечный, в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

           Общая стоимость работ, согласно п.п. 2.1 Договора № 6, составляет 9 814 268,05  рублей.

            В соответствии с п.п. З.1.1., 3.1.2. Договора № 6 оплата выполненных работ за текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

           ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 31.10.2016. № 14,

от 31.05.2016. № 10, от 31.07.2016. № 11, от 31.08.2016. № 12, от 30.09.2016. № 13, от 31.01.2016. № 74, от 31.03.2016. № 8, от 30.04.2016. № 9, от 31.10.2015. № 4, от 30.11.2015. № 5, от 31.12.2015. № 6, от 26.01.2015. № 1, от 25.03.2015. № 2, от 30.06.2015. № 3, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.      

           Задолженность 000 «АСК-Монолит» за выполненные работы согласно Договору              № 6 от 05.01.2015 года составляет 418 669,04 рублей.

           Кроме того, на основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных, выполненных работ за каждый календарный день просрочки.

          За период с 16.11.2016 года по 15.05.2017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 63219,02 рублей согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

 

           05.01.2015 года между ООО «АСК-Монолит» и ООО «Стройэнергосистемы» заключен Договор подряда № 7 по монтажу внутренних сетей системы связи, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по монтажу внутренних сетей системы связи и сигнализации с проведением предварительных и комплексных испытаний, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, согласование (при необходимости) с надзорными/контролирующими органами и/или заинтересованными организациями на объекте Заказчика: «Строительство 2-х секционного 13-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Литер 3», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ по ул. им. Симиренко, 55 в жилом районе Солнечный, в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

            Общая стоимость работ, согласно п.п. 2.1 Договора № 7, составляет 2 038 169,99  рублей.

            В соответствии с п.п. 3.1.1., 3.1.2. Договора № 7 оплата выполненных работ за текущий период производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 банковских дней, после представления Подрядчиком Заказчику счета на оплату.

           ООО «Стройэнергосистемы» свои обязательства по договору выполнило в полном

объеме,   объект   сдан   в   эксплуатацию,   что   подтверждается   справками   о   стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ от 31.05.2016. № 5, от 31.08.2016. № 7, от 30.09.2016. № 8, от 31.10.2015. № 1, от 31.12.2015. № 2, от 31.03.2016. № 3, от 30.04.2016. № 4, двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.

            Задолженность ООО «АСК-Монолит» за выполненные работы согласно Договору № 7 от 05.01.2015 года составляет 1519893,70  рубля.

            Кроме того, на основании п. 9.3 в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных, выполненных работ за каждый календарный день просрочки.

            За период с 15.10.2016 года по 15.05.2017 года пеня за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 278140,55 рублей согласно представленному истцом, проверенному судом, и не оспоренному ответчиком расчету.

          Задолженность ответчика составляет по всем указанным договорам 7074561 руб. 76 коп. – долга, 1364777 руб. 22 коп. – пеня за просрочку оплаты, что подтверждается также двусторонне подписанным актом сверки за декабрь 2016 года.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Требования истца по первоначальному иску подлежат удовлетворению в полном объеме  7074561 руб. 76 коп. – долга, 1364777 руб. 22 коп. – пени за просрочку оплаты в силу ст. ст. 309, 310, 711, 330 ГК РФ.

 

            Требования истца по встречному иску взыскании неустойки за просрочку выполнения работ за периоды,  указанные в расчетах истца, суд считает подлежащими отклонению по следующим основаниям.

В силу пунктов 9.1. рассматриваемых договоров  за нарушение  сроков выполнения работ подрядчик уплачивает подрядчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от стоимости  невыполненных  работ.

В пункте 3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что подрядчик несет ответственность за нарушение как конечного, а также иных, установленных договором подряда сроков.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является неустойка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с пунктом 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежаще исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (статья 406 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Как следует из содержания договоров (пункты 6.13.)  подрядчик обязан предоставить субподрядчику до начала производства работ строительную площадку.

Истцом по встречному иску не оспорены представленные ответчиком сведения о том, что подрядчику с нарушением установленных сроков передавалась  строительная площадка по каждому из договоров.

Неисполнение заказчиком обязательств по передаче указанной строительной площадки препятствовало подрядчику выполнять предусмотренные договором работы в срок, установленный договорами.

Так, из представленных Актов о приемке выполненных работ (том 6), общего журнала работ видно, что истцом по встречному иску работы по обустройству полов, дверей, кровли, входных групп были сданы 31.08.2016. – 19.09.2016.

В то же время, несмотря на то, что договорами между истцом и ответчиком не предусмотрена  поэтапная сдача работ, а установлен один срок окончания работ – 05.10.2015., из существа обязательства и видов работ следует, что выполнение работ подрядчиком было обусловлено выполнением работ заказчиком по подготовке строительной площадки для подрядчика (по мере стройготовности объекта).

То обстоятельство, что подрядчик приступал к выполнению работ по каждому из договоров в 2015 году, не означает, что ему была передана строительная площадка в объеме, необходимом для выполнения всего объема работ.

Зависимость работ, выполняемых подрядчиком, от общестроительных работ, выполняемых заказчиком, подтверждается пояснениями подрядчика, которые не оспорены заказчиком, п. 4.3. СП 73.13330.2016 СНиП 3.05.01-85, Правилами устройства электроустановок.

Из указанных документов, а также из Графика производства работ по спорному объекту, выполняемых истцом по встречному иску для своего заказчика, видно, что выполнение работ, являющихся предметом рассматриваемых договоров № 1-7 (по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы противопожарной защиты, по монтажу системы вентиляции, электромонтажных работ по внутреннему электроснабжению объекта, проведение пусконаладочных работ, проведение испытаний и ввод электроустановки в эксплуатацию, по строительству внутренних сетей водопровода, по строительству внутренних сетей канализации, с проведением пусконаладочных   работ,   испытаний,   вводу   сетей   в   эксплуатацию, по монтажу внутренних сетей системы связи и сигнализации, по монтажу системы отопления, с проведением пусконаладочных работ, испытаний, ввода системы         в         эксплуатацию), осуществляется параллельно общестроительным работам, а выполняемые подрядчиком (ответчик по встречному иску) работы заканчиваются в период от 7 месяцев до 4,5 месяцев после окончания общестроительных работ. Например, наружные стены и перегородки должны быть выполнены за 7, 5 месяцев до окончания работ подрядчиком. Указанные работы завершились в октябре 2016 года, тогда как подрядчик завершил работы в октябре 2016 года. Ответчиком по встречному иску представлен фактический график выполнения работ, из которого видно, что подрядчик начинал работы по мере готовности соответствующего участка работ, и заканчивал работ – в пределах срока выполнения работ,  установленного договорами подряда (289 дней), т.е. работы подрядчиком выполнялись параллельно с работами, выполняемыми истцом по встречному иску.

Истцом по встречному иску не представлено доказательств тому, что  ответчиком по встречному иску нарушался срок выполнения работ с учетом условия о передаче стройплощадки, расчет истца по неустойке составлен неверно, без учета исполнения своих обязательств по передаче строительной площадки, без учета стоимости выполненных работ по каждому из договоров. Неустойка начислена по апрель2017 года, тогда как все работы подрядчиком закончены в октябре 2016 года, приняты заказчиком без замечаний, претензий о том, что работы по договору не закончены, заказчиком не предъявлялось. Несовпадение сумм договора со стоимостью фактически выполненных работ объясняется ответчиком тем, что он по ряду договоров приступил к их выполнению не с самого начала, в связи с чем стоимость работ оказалась меньше, чем предусмотрено договором. ООО «Финансово-строительная группа «Юг», являющаяся заказчиком по отношению к ООО «АСК-Монолит» в письме от 02.06.2017. № 40 соообщае6т, что претензий по объему и качеству работ, выполненных ООО «Стройэнергосистемв» не имеет. Таким образом, истцом по встречному иску не доказано, что работы подрядчиком выполнены не в полном объеме. 

 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

 

На основании изложенного и, руководствуясь статьями  110, 167-171 АПК  РФ,

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «АСК-Монолит» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Стройэнергосистемы» 7074561 руб. 76 коп.  – долга,  1364777 руб. 22 коп.  – пеню.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСК-Монолит» в доход федерального бюджета госпошлину по первоначальному и встречному искам в общей  сумме  192592 руб. 50 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                О.А. Гречко